Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-54705/2018

14 августа 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  10 августа 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  14 августа 2018 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "СК "Северо-Запад" (адрес:  Россия 236010, 

<

...> лит. А, оф. 717; ИНН: 

<

***>; ОГРН:  

<

***>; Дата регистрации: 06.06.2007);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Альфамедиа" (адрес:  Россия 117246, 

<

...>; ИНН: 

<

***>; ОГРН:  

<

***>; Дата регистрации: 06.12.2012);

о взыскании 28 000 руб. неустойки по договору от 16.04.2016 № АМ/209/16,

при участии:

- от истца: ФИО2 по доверенности от 09.01.2018;

- от ответчика: не явился, извещен;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СК "Северо-Запад" (далее - ООО "СК "Северо-Запад") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Альфамедиа" (далее – ООО "Альфамедиа") о взыскании 28 000 руб. неустойки по договору от 16.04.2016 № АМ/209/16.

ООО "Альфамедиа", извещенное о времени и месте рассмотрения дела, представителя в судебное заседание не направило.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал в полном объёме.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд признал иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «СК «Северо-Запад» (Заказчик) и ООО «АльфаМедиа» (Исполнитель) 16.05.2016 заключен договор на выполнение проектных работ № АМ/209/16, согласно которого Исполнитель обязался разработать техническую документацию для устройства фасадов для объекта: «Многофункциональное здание общественного назначения», расположенного по адресу: г. Мурманск, Октябрьский административный округ по ул. Гвардейской в западной части кадастрового плана.

Согласно п. 2.1 договора и Протокола соглашения цена договора составила 280 000, в т.ч. НДС.

В соответствии п. 2.2 оплата работ производится в следующем порядке: Заказчик не позднее 5 банковских дней с момента подписания сторонами договора перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 70% от стоимости работ, что составляет 196 000 руб. 00 коп., в том числе НДС. Заказчик не позднее 5 банковский дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ оплачивает 30% от стоимости работ, что составляет 84 000, в том числе НДС.

Авансовый платеж произведен Заказчиком 13.05.2016.

Согласно п. 4.1 договора и Приложению №3 к договору срок выполнения работ составляет 10 рабочих дней с даты оплаты авансового платежа.

В соответствии с 6.3 договора в случае нарушения Исполнителем сроков разработки Технической документации, предусмотренных разделом 4 договора, Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан выплатить пени в размере 0,1% от стоимости выполненного в срок этапа Технической документации по договору за каждый рабочий день просрочки исполнения обязательств, но не более 10% от стоимости невыполненных работ по текущему этапу.

Истцом представлен двусторонний акт № 2017026/2 от 27.07.2017 о приёмки выполненных работ.

Поскольку материалами дела подтвержден факт нарушения ответчиком сроков выполнения работ, за период с 30.05.2016 по 27.07.2017 (в количестве рабочих дней) подлежит начислению неустойка, размер которой с учётом установленного договором ограничения составит 28 000 руб.

Исковые требования соответствуют положениям ст. ст. 309, 310, 330 Гражданского кодекса РФ, условиям договора.

ООО "Альфамедиа" выполнение работ в порядке статьи 716 ГК РФ не приостанавливало, своевременно не известило ООО "СК "Северо-Запад" о необходимости предоставления заявленных документов.

С учётом изложенного возражения, заявленные в отзыве на исковое заявление, не опровергают обоснованность иска. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Альфамедиа» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СК «Северо-Запад» 28 000 руб. 00 коп. неустойки, 2 000 руб. 00 коп. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.

     Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                            Коросташов А.А.