Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-165649/2018

06 июня 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  30 мая 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  06 июня 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ПОЖМОНТАЖ" (адрес:  Россия 614033, ПЕРМЬ, . ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВА ДОМ/19, ОФИС 203, ОГРН:  1145958085877);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "А ПЛЮС ИНЖИНИРИНГ" (адрес:  Россия 196626, п ШУШАРЫ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ш МОСКОВСКОЕ 179/2 ЛИТ. А/1-Н НОМ. ЧАСТИ 224, ОГРН:  1127847421525);

о взыскании 1135405.68

при участии

- от истца: ФИО2, по доверенности от 01.05.19,

- от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом,

установил:

ООО "ПОЖМОНТАЖ" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "А ПЛЮС ИНЖИНИРИНГ" о взыскании 1 135 405 руб. 68 коп, составляющих: 984 903 руб. 93 коп. задолженности и 98 490 руб.40 коп. неустойки и 52 011 руб. 00 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Определением от 07.03.19 года суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства на основании статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассматривается без его участия на основании ст.156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между ООО «ПожМонтаж»  (далее - Подрядчик) и ООО «А Плюс Инжиниринг»  (далее - Заказчик) был заключен договор субподряда №СМР/510/2017 от 17.03.2017 года (далее - Договор).

Цена Договора, с учетом заключенного дополнительного соглашения №1 от 02.04.2017 года, составляет 3 959 253 руб. 35 коп.

Датой фактического окончания работ согласно условиям договора считается день подписания Сторонами закрывающего акта КС-2, который был подписан Сторонами 06.10.2017 года, что подтверждает выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору. Претензий со стороны Заказчика в адрес Подрядчика не поступало.

Срок исполнения заказчиком обязательства по оплате работ, выполненных подрядчиком, составляет 15 рабочих дней с момента подписания закрывающего акта КС-2, а именно 30 октября 2017 года.

Заказчиком произведены авансовые платежи и частичная оплата по Договору в общей сумме 2 974 349 руб. 42 коп.

Задолженность Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком работ составляет 984 903 руб. 93 коп.

В соответствии с п.11.1 договора, ответчику начислены пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки оплаты, но не более 10 % от такой суммы. С учетом ограничения пени составляют 98 490 руб.40 коп.

Суд считает, что проценты за пользование чужими денежными средствами взысканию не подлежат. Согласно п.4 ст. 395 ГК РФ в случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или договором.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению частично с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика пропорционально удовлетворенным исковым требованиям.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "А ПЛЮС ИНЖИНИРИНГ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ПОЖМОНТАЖ" 1 078 394 руб. 33 коп., из них: 984 903 руб. 93 коп. основного долга и 98 490 руб. 40 коп. неустойки, а также 23 784 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.