АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

Резолютивная часть

Дело № А07-28911/20

г. Уфа

10 октября 2024 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э. Р.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кабировой  Н.В., рассмотрев дело по иску  

Администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района  Давлекановский район Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройгазцентр» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>)  

Третье лицо: Третье лицо: временный управляющий общества с ограниченной  ответственностью «Стройгазцентр» арбитражный управляющий ФИО1  (ИНН 

<

***>)  

о взыскании пени и штрафа в размере 4 483 293 руб. 35 коп.; об обязании устранить  в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу недостатки  работ (с учетом уточнения от 16.08.2024г.)  

Руководствуясь ст.ст. 49,110,167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Уточненные требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройгазцентр» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу Администрации городского поселения город  Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) пени в размере 1 365 454 руб. 73 коп., штраф в  размере 575 000 руб.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройгазцентр» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить выявленные недостатки работ: 

По муниципальному контракту № 010130003101900024_115527 от 14.06.2019г. -  Благоустройство дворовой территории МКД № 24, 26 по ул. Мира, ГП г.Давлеканово МР  Давлекановский р-н РБ:  

Ул. Мира24: 

- Неровность установки бордюра - нарушение п.3.9. Таблица 1 «Типовая  технологическая карта (ТТК) установка бортовых камней». Путем переустановки  бордюров.  

- Просадка покрытия возле колодца 2*2,5м - нарушение п.6.1 СП 82.133302016.  Путем замены асфальтобетонного покрытия с горизонтальным выравниванием, площадью  2*2,5м.  

Ул. Мира 26: 

- Просадка покрытия 4* 16 м- нарушение п.6.1 СП 82.133302016. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с горизонтальным выравниванием площадью 4* 16 м.  

- Шелушение покрытия площадки у входа в подъезд 4*5м. Связано с  недоуплотнением, либо применением некачественной асфальтобетонной смеси. Путем  замены асфальтобетонного покрытия площадью 4*5 м.  

По муниципальному контракту № 010130003101900025_115527 от 02.07.2019г. -  Благоустройство дворовых территорий МКД № 6, 8, 10,12 по ул. Беляева и № 7, 11, 13 по  ул. Давлекановская, ГП г. Давлеканово МР Давлекановский р-н РБ:  

ФИО2 6: 

- Сетка трещин 1,6*5,5м. Связано со слабым основанием. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с усилением основания, площадью 1,6*5,5 м.  

- Сетка трещин 3,8*7,4м. Связано со слабым основанием. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с усилением основания, площадью 3,8*7,4м.  

- Сетка трещин S=41 м2 (трапеция на въезде). Связано с некачественным  сопряжением сдоев покрытия. Путем замены асфальтобетонного покрытия площадью  41м2.  

ФИО2 8: 

- Сетка трещин 13*3,7м Связано со слабым основанием. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с усилением основания, площадью 13*3,7м.  

ФИО2 10: 

- Сетка трещин 8*1,5м. Связано со слабым основанием, либо применением  некачественной асфальтобетонной смеси. Путем замены асфальтобетонного покрытия с  усилением основания, площадью 8*1,5м.  

- Сетка трещин 3,7*2,7м. Связано со слабым основанием. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с усилением основания, площадью 3,7*2,7м.  

Ул. Давлекановская 7: 

- Сетка трещин 1,5*8м. Связано со слабым основанием. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с усилением основания, площадью 1,5*8м.  

- Сетка трещин 1,5*1,7м. Связано со слабым основанием. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с усилением основания, площадью 1,5*1,7м.  

Ул. Давлекановская 11: 

- Сетка трещин 2*2м. Связано со слабым основанием. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с усилением основания, площадью 2*2м.  

- Сетка трещин 1*9м. Связано со слабым основанием. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с усилением основания, площадью 1 *9м.  

- Сетка трещин 1,5*2,6м. Связано со слабым основанием. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с усилением основания, площадью 1,5*2,6м.  

- Сетка трещин 2,5*5м. Связано со слабым основанием. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с усилением основания, площадью 2,5*5м.  

Ул. Давлекановская 13: 

- Сетка трещин 2*11м. Связано со слабым основанием. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с усилением основания, площадью 2*11 м.  

- Сетка трещин 2,9*3,5м. Связано со слабым основанием. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с усилением основания, площадью 2,9*3,5 м.  

- Сетка трещин 1,8*40м. Связано с некачественным сопряжением слоев  покрытия. Путем замены асфальтобетонного покрытия площадью 1,8*40м.  

По муниципальному контракту 010130003101700020_115527 от 21.082017г. -  Благоустройство дворовой территории МКД № 2, 4 по ул. Мира, № 59, 61 по ул. Ленина,  

 № 17, 19, 19/2 по ул. Мира, № 3, 5, 7 по ул. Высоковольтная, № 10, 127 по ул. Карла  Маркса, № 58, 60, 61 по ул. Элеваторская, № 8А, 10А по ул. Мира, № 13,15, 17 по ул.  Высоковольтная, № 31 по пер. Каранский, № 2 по ул. Байкальская, ГП г.Давлеканово МР  Давлекановский р-н РБ:  

Ул. Мира 2,4: 

- Продавливание покрытия 3*9м., нарушение п.6.1 СП 82.133302016. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с горизонтальным выравниванием площадью 3*9м.  

Ул. Ленина 61: 

- Заваливание бордюрного камня - 20 м., - нарушение п. 3.9. Таблица 1 «Типовая  технологическая карта (ТТК) установка бортовых камней». Путем переустановки  бордюрного камня общей длиной 20м.  

- Заваливание тротуарного бордюрного камня - 21 м., - нарушение п.3.9. Таблица 1  «Типовая технологическая карта (ТТК) установка бортовых камней». Путем  переустановки тротуарного бордюрного камня общей длиной 21 м.  

- Продавливание покрытия 4*6 м., - нарушение п.6.1 СП 82.133302016. Путем  замены асфальтобетонного покрытия с горизонтальным выравниванием площадью 4*6м.  

-  Продавливание покрытия 19*11 м., - нарушение п.6.1 СП 82.13330.2016. Путем  замены асфальтобетонного покрытия с горизонтальным выравниванием площадью  19* 11 м.  

- Между домами ул. Ленина 59 и 61 заваливание бордюрного камня- 37 м., -  нарушение п.3.9. Таблица 1 «Типовая технологическая карта (ТТК) установка бортовых  камней». Путем переустановки бордюрного камня общей длиной 37м.  

Ул. Мира17: 

-  Продавливание покрытия 1,5*21 м., - нарушение п.6.1 СП 82.13330.2016. Путем  замены асфальтобетонного покрытия с горизонтальным выравниванием площадью  1,5*21 м.  

Ул. Мира 19: 

- Продавливание покрытия 9*7 м., - нарушение п.6.1 СП 82.133302016. Путем  замены асфальтобетонного покрытия с горизонтальным выравниванием площадью 9*7м.  

- Сетка трещин 1,5*1 м. Связано со слабым основанием. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с усилением основания, площадью 1,5*1м.  

Ул. Мира 19/2: 

- Сетка трещин 2*1,5 м. Связано со слабым основанием, либо применением  некачественной асфальтобетонной смеси. Путем замены асфальтобетонного покрытия с  усилением основания, площадью 2*1,5 м.  

- Сетка трещин 4,5*2,6м. Связано со слабым основанием. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с усилением основания, площадью 4,5 *2,6м.  

- Заваливание бордюрного камня - 10 м., - нарушение п. 3.9. Таблица 1 «Типовая  технологическая карта (ТТК) установка бортовых камней». Путем переустановки  бордюрного камня общей длиной 10м.  

Ул. Высоковольтная3,5,7: 

- Сетка трещин на тротуаре - 5 м2. Связано со слабым основанием, либо  применением некачественной асфальтобетонной смеси. Путем замены асфальтобетонного  покрытия с усилением основания, площадью 5 м2.  

Ул. Карла Маркса 10: 

- Заваливание бордюрного камня -1м.,- нарушение п.3.9. Таблица 1 «Типовая  технологическая карта (ТТК) установка бортовых камней». Путем переустановки  бордюрного камня общей длиной 1 м.  

- Сетка трещин - 60 м2. Связано со слабым основанием. Путем замены  асфальтобетонного покрытия с усилением основания, площадью 60 м2.  

Ул. Мира 8А: 

- Заваливание бордюрного камня - 3 м., - нарушение п.3.9. Таблица 1  «Типовая технологическая карта (ТТК) установка бортовых камней». Путем  переустановки бордюрного камня общей длиной 3м.  

- Заваливание бордюрного камня - 4 м., - нарушение п.3.9. Таблица 1  «Типовая технологическая карта (ТТК) установка бортовых камней». Путем  переустановки бордюрного камня общей длиной 4м.  

Ул. Высоковольтная 15: 

- Сетка трещин 1*7 м., Связано со слабым основанием, либо применением  некачественной асфальтобетонной смеси. Путем замены асфальтобетонного покрытия с  усилением основания, площадью 1 *7м.  

Ул. Высоковольтная 17: 

- Сетка трещин 2,8*0,8м. Связано с некачественным сопряжением слоев  покрытия. Путем замены асфальтобетонного покрытия площадью 2,8*0,8м.  

- Заваливание бордюрного камня - 1 м.,- нарушение п3.9. Таблица 1 «Типовая  технологическая карта (ТТК) установка бортовых камней». Путем переустановки  бордюрного камня общей длиной 1 м.  

Переулок Каранский 31: 

- Сетка трещин 1*3,5 м., Связано недостаточностью ширины земляного  полотна и отсутствием укрепления откосов насыпи. Путем замены асфальтобетонного  покрытия площадью 0,9*5,5м.  

В удовлетворении остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройгазцентр» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере  51 416 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройгазцентр» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Независимый центр дорожной экспертизы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  расходы по экспертизе в сумме 466 080 руб.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Исполнительный лист на взыскание госпошлины в доход федерального бюджета  выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской  Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья Э.Р. Шамсутдинов