Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-148408/2018

26 апреля 2021 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи Бутовой Р.А. ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛИ" (адрес:  Россия 197198, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА. СЪЕЗЖИНСКАЯ ДОМ/19, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 3-Н ОФИС 7Д, ОГРН:  1157847388005);

ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНДОМ" (адрес:  Россия 195297, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт СВЕТЛАНОВСКИЙ 74/1, ОГРН:  1037808052215);

третье лицо: М ИФНС России №25 по СПб (адрес:  Россия 197136, Санкт-Петербург, П.С.ул.Ленина, д.11/64, ОГРН:  )

о взыскании  13 987 831 руб. 63 коп. задолженности 

и принятому к совместному рассмотрению с первоначальным встречному иску

общества с ограниченной ответственностью  «Виндом» к

обществу с ограниченной ответственностью  «Строители»

о взыскании 

при участии

- от истца: не явился, извещен

- от ответчика: ФИО2, по доверенности от 01.09.2018, 

                           ФИО3, по доверенности от 01.09.2018

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Строители» (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Вииндом» (далее – Компания) о взыскании 13 987 831 руб. 63 коп., из которых: 55 354,80 руб. неустойки по договору от 03.08.2017 № 608, 150 000 руб. неустойки по договору от 23.03.2017 № 2303/17, 1 465 000 руб. неустойки по договору от 06.02.2017 № 602/17, 77 335,47 руб. компенсации по договору от 06.02.2017 № 602/170, 1 107 715,76 руб. неустойки по договору от 01.02.2016 № 7/607-15, 4 184 754,48 руб. компенсации по договору от 01.02.2016 № 7/607-15, 528 102,66 руб. неустойки по договору от 11.08.2016 № AL83806БН, 6 419 568 руб. по договору  от 31.01.2016 № 8/607-15.

Определением от 30.11.2018 исковое заявление принято к производству.

Определением от 30.11.2018 исковое заявление принято к производству.Занесенным в протокол судебного заседания определением от 24.05.2018, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции. 

Протокольным определением от 16.05.2019 принят к производству встречный иск о взыскании 2 118 609,46 руб. 

В ходе судебного заседания судом установлено, что согласно резолютивной части решения от 23.10.2019 общество с ограниченной ответственностью «Строители» признано несостоятельным (банкротом), введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО4

Протокольным определением от 19.12.2019 судебное заседание отложено.

Определением суда от 23.03.2020 судебное заседание отложено по техническим причинам.

Определением суда от 30.04.2020 судебное заседание отложено в связи с указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы с 04.04.2020 по 30.04.2020 (включительно), в связи с чем дату судебного заседания следует изменить.

Определением суда от 30.07.2020 судебное заседание отложено для извещения конкурсного управляющего о судебном разбирательстве.

Протокольными определениями от 03.09.2020, от 28.09.2020, от 05.11.2020, от 12.11.2020 судебные заседания откладывались для предоставления дополнительных доказательств. 

В судебное заседание 04.12.2020 представитель истца не явился, заявил ходатайство о фальсификации, представители ответчика явились в судебное заседание.

Арбитражный суд, заслушав мнение представителя истца, изучив и оценив представленные в дело доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, установил следующее.

1. Общество (подрядчик) и Компания (заказчик) заключили договор от 03.08.2017 № 608/17, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя выполнение комплекса работ по производству и монтажу заполнений проемов светопрозрачными изделиями из алюминиевых профилей на объекте «Жилой комплекс» «Светлый мир «Я-Романтик», корпуса 6 по адресу: Санкт-Петербург, Невская губа, участок 28 (западнее Васильевского острова, квартал 25) далее «Объект».

В силу пункта 2.1 договора оплата объемов выполненных работ производится заказчиком на основании представленных и принятых заказчиком форм КС-2, КС-3 ав следующем порядке:

Ежемесячно не позднее 20 числа отчетного месяца подрядчик обязан предоставить заказчику по 4 экземпляра актов выполненных работ по форме КС-2  и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на выполненные работы, счет на выполненные работы и счет-фактуру: также акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования выполненных работ, иные акты, подтверждающие фактическое выполнение, исполнение работ, исполнительные схемы, сертификаты, паспорта на оборудование, отчеты об использовании давальческого сырья и иную исполнительную документацию по предъявляемой к приемке работ, выполненных за отчетный период.

В пункте 2.4.2 настоящего договора выполненная и принятая работа должна быть оплачена заказчиком на основании подписанных заказчиком документов (актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания заказчиком при условии предоставления полного комплекта документов, указанного в п. 2.4.1 настоящего договора.

Однако, уведомление о готовности и сдачи работ заказчиком не получено. Документация для приемки и оплаты работ, акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ по форме КС-3, исполнительная документация заказчику не направлялись.

Согласно пункту 3.2 договора установлено дата окончания работ, дата подписания заказчиком акта окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору не позднее 20.08.2017. 

В соответствии с пунктом 5.1 договора подрядчик обязуется выполнить все работы по договору в соответствии со сметой (Приложение № 1). Документом, определяющим сроки производства работ (Приложение № 21) Техническим заданием заказчика (Приложение № 3) , остальными Приложениями и СНиП, и сдать их заказчику в срок, указанный в документе, определяющем сроки производства работ (Приложение № 2). Выполненные работы должны быть переданы заказчику в состоянии 100% готовности обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта или производство дальнейших работ, предусмотренных технологическим циклом.

Согласно пункту 5.8 настоящего договора подрядчик обязуется письменно извещать заказчика за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о своей готовности сдать работы.

Заказчик 09.08.2017 перечислил аванс по договору № 608 с целью обеспечения возможности начать работы.

Подрядчик в нарушение указанного договора работы не сдал, акт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ не подписан.

Пунктом 10.3 договора установлено в случае задержки сроков выполнения работ подрядчиком относительно документа, определяющего сроки производства работ (Приложение № 2), а также в случае задержки сроков исправления некачественно выполненных работ, заказчик имеет право предъявить, а подрядчик обязан будет оплатить заказчику штрафную неустойку в размере 0,1%  от стоимости работ за каждый день просрочки, но суммарно не более 5 (пяти) % от стоимости настоящего договора.

Таким образом, задолженность подрядчика перед заказчиком составляет в размере 55 354,80 руб. за период с 21.08.2017 по 08.06.2018.

2. Между Обществом (заказчик) и Компанией (подрядчик) заключен договор от 23.03.2017 № 2303/17, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя выполнение комплекса работ по производству  и монтажу заполнений проемов светопрозрачными изделиями из ПВХ и алюминиевых профилей на объекте «Жилой комплекс «Светлый мир «Я-Романтик»Дошкольное образовательное учреждение на 140 мест, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, участок 28 (западнее Васильевского острова, квартал 28), кадастровый номер 78:43:0000000:10, далее Объект.

Согласно пункту 3.2 договора установлено дата окончания работ, дата подписания заказчиком акта окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору не позднее 01.05.2017.

В соответствии с пунктом 5.1 договора подрядчик обязуется выполнить все работы по договору в соответствии со сметой (Приложение № 1). Документом, определяющим сроки производства работ (Приложение № 21) Техническим заданием заказчика (Приложение № 3), остальными Приложениями и СНиП, и сдать их заказчику в срок, указанный в документе, определяющем сроки производства работ (Приложение № 2). Выполненные работы должны быть переданы заказчику в состоянии 100% готовности обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта или производство дальнейших работ, предусмотренных технологическим циклом.

Заказчик 07.04.2017 перечислил аванс по договору № 2303/17 с целью обеспечения возможности начать работы.

Подрядчик в нарушение указанного договора работы не сдал, акт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ не подписан.

Пунктом 10.3 договора установлено в случае задержки сроков выполнения работ подрядчиком относительно документа, определяющего сроки производства работ (Приложение № 2), а также в случае задержки сроков исправления некачественно выполненных работ, заказчик имеет право предъявить, а подрядчик обязан будет оплатить заказчику штрафную неустойку в размере 0,1%  от стоимости работ за каждый день просрочки, но суммарно не более 5 (пяти) % от стоимости настоящего договора.

Таким образом, задолженность подрядчика перед заказчиком составляет в размере 150 000 руб. за период с 02.05.2017 по 08.06.2018.

3. Между Обществом (заказчик) и Компанией (подрядчик) заключен договор от 06.02.2017 № 602/17, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя выполнение комплекса работ по производству  и монтажу заполнений проемов светопрозрачными изделиями из ПВХ и алюминиевых профилей на объекте «Жилой комплекс «Светлый мир «Я-Романтик», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 25), кадастровый номер 78:43:0000000:10, далее Объект.

Согласно пункту 3.2 договора установлено дата окончания работ, дата подписания заказчиком акта окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору не позднее 14.04.2017.

В соответствии с пунктом 5.1 договора подрядчик обязуется выполнить все работы по договору в соответствии со сметой (Приложение № 1). Документом, определяющим сроки производства работ (Приложение № 21) Техническим заданием заказчика (Приложение № 3) , остальными Приложениями и СНиП, и сдать их заказчику в срок, указанный в документе, определяющем сроки производства работ (Приложение № 2). Выполненные работы должны быть переданы заказчику в состоянии 100% готовности обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта или производство дальнейших работ, предусмотренных технологическим циклом.

Согласно пункту 5.2.1 договора подрядчик обязуется обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническим заданием заказчика.

Качество выполнения всех работ  в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, предусмотренными законодательством РФ (пункт 5.2.2 договора). 

 Заказчик 15.02.2017 перечислил аванс по договору № 602/17 с целью обеспечения возможности начать работы.

Подрядчик в нарушение указанного договора работы не сдал, акт окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ не подписан.

Пунктом 10.3 договора установлено в случае задержки сроков выполнения работ подрядчиком относительно документа, определяющего сроки производства работ (Приложение № 2), а также в случае задержки сроков исправления некачественно выполненных работ, заказчик имеет право предъявить, а подрядчик обязан будет оплатить заказчику штрафную неустойку в размере 0,1%  от стоимости работ за каждый день просрочки, но суммарно не более 5 (пяти) % от стоимости настоящего договора.

Таким образом, задолженность подрядчика перед заказчиком составляет в размере 1 542 335,47 руб., из них: 77 335,47 руб. неустойка за нарушение сроков выполнения работ за период с 15.04.2017 по 08.06.2018.

4. Между Обществом (заказчик) и Компанией (подрядчик) заключен договор от 06.02.2017 № 7/607-15, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя выполнение комплекса работ по производству  и монтажу заполнений проемов светопрозрачными изделиями из ПВХ и алюминиевых профилей на объекте «Жилой комплекс «Светлый мир «Я-Романтик», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, участок 25 (западнее Васильевского острова, квартал 25), кадастровый номер 78:43:0000000:10, далее Объект.

В соответствии с пунктом 5.1 договора подрядчик обязуется выполнить все работы по договору в соответствии со сметой (Приложение № 1). Документом, определяющим сроки производства работ (Приложение № 21) Техническим заданием заказчика (Приложение № 3) , остальными Приложениями и СНиП, и сдать их заказчику в срок, указанный в документе, определяющем сроки производства работ (Приложение № 2). Выполненные работы должны быть переданы заказчику в состоянии 100% готовности обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта или производство дальнейших работ, предусмотренных технологическим циклом.

Согласно пункту 3.2 договора установлено дата окончания работ, дата подписания заказчиком акта окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору не позднее 31.05.2017.

Согласно пункту 5.2.1 договора подрядчик обязуется обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническим заданием заказчика.

Качество выполнения всех работ  в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, предусмотренными законодательством РФ (пункт 5.2.2 договора). 

Согласно пункту 10.12 договора в случае когда работа выполнена подрядчиком с отступлением от договора, технической документации и/или от СНиП, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для предусмотренного в договоре использования, заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика:

Безвозмездного устранения недостатков в дополнительной оговоренный срок, но не более 5 (пяти) календарных дней с даты уведомления заказчиком  (пункт 10.12.1 договора).

Однако, подрядчиком замечания не устранены.

Пунктом 10.6 договора установлено в случае нарушения подрядчиком  п.п. 5.2, 5.4, 5.17, 5.19 договора заказчик имеет право предъявить, а подрядчик обязан оплатить штраф в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый зафиксированный случай нарушения.

Заказчик 20.02.2017 перечислил аванс по договору № 602/17 с целью обеспечения возможности начать работы.

Подрядчиком по состоянию на 29.10.2018 не оплачена компенсация в размере 4 184 754,48 руб.

 Согласно пункту 2.8 договора подрядчик выполняет административно-хозяйственные услуги, связанные с устройством электроснабжения бытового городка в участков работы, содержанием строительной площадки, вывозом строительного мусора и определенных для этого мест, содержанием временных дорог, охраной бытового городка, а также связанные с обеспечением договорной, в том числе и технической документацией и координацией работ, с учетом стоимости материалов и оборудования за свой счет.

  Таким образом, задолженность подрядчика перед заказчиком составляет в размере 4 947 847 руб., из них: 1 107 715,76 руб. неустойка за нарушение сроков выполнения работ по состоянию на  29.10.2018, а также 4 184 754,48 руб. компенсации.

5. Между Обществом (заказчик) и Компанией (подрядчик) заключен договор от 11.08.2016 № AL83806БН, по условиям которого заказчик поручает, а исполнитель осуществляет изготовление, доставку и монтаж алюминиеваых конструкций, согласно утвержденной сметы (Спецификации на изделия и работы Приложение № 1), которая является неотъемлемой частью договора, в соответствии с ГОСТ 21519-84 на объекте:  «Жилой комплекс «Светлый мир «Я-Романтик», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Василеостровский район, Невская Губа.

Согласно пункту 3.1 договора начало производства работ не позднее 3-х рабочих дней с момента заключения договора, утверждения и подписания проекта КМ, а также наличия строительной готовности.

Пунктом 3.2 настоящего договора установлено, что сроки готовности изделий и окончания производства работ указываются в Графике выполнения работ (Приложение № 2) к договору.

В соответствии с приложением № AL83806БН срок производства монтажных работ по договору в течение 14 рабочих дней с момента передачи фронта работ и наличия строительной готовности. Последний день для выполнения работ – 05.09.2016.

Исполнитель нарушил сроки выполнения работ по указанному договору.

В соответствии с пунктом 7.2 настоящего договора, в случае нарушения сроков изготовления изделий и (или) сроков выполнения работ исполнитель по требованию заказчика обязан уплатить последнему неустойку в размере 0,1% от размера авансового платежа, подлежащего оплате согласно пунктам 2.3-2.4 договора и графику выполнения работ, за каждый день просрочки.

В связи с нарушением исполнителем сроков выполнения работ по настоящему договору, работы в настоящее время не сданы. Акт окончательной сдачи/приемки  всего комплекса работ не подписан.

Таким образом,  задолженность исполнителя перед заказчиком составляет в размере 528 102,66 руб. за период с 06.09.2016 по 08.08.2018.

6. Между Обществом (заказчик) и Компанией (подрядчик) заключен договор от 06.02.2017 № 8/607-15, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя выполнение комплекса работ по производству  и монтажу заполнений проемов светопрозрачными изделиями из ПВХ профилей на объекте «Жилой комплекс «Светлый мир «Я-Романтик», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Невская губа, участок 28 (западнее Васильевского острова, квартал 25), кадастровый номер 78:43:0000000:10, далее Объект.

Согласно пункту 3.2 договора установлено дата окончания работ, дата подписания заказчиком акта окончательной сдачи/приемки всего комплекса работ по договору не позднее 31.03.2016.

В соответствии с пунктом 5.1 договора подрядчик обязуется выполнить все работы по договору в соответствии со сметой (Приложение № 1). Документом, определяющим сроки производства работ (Приложение № 2) Техническим заданием заказчика (Приложение № 3), остальными Приложениями и СНиП, и сдать их заказчику в срок, указанный в документе, определяющем сроки производства работ (Приложение № 2). Выполненные работы должны быть переданы заказчику в состоянии 100% готовности обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта или производство дальнейших работ, предусмотренных технологическим циклом.

Согласно пункту 5.2.1 договора подрядчик обязуется обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническим заданием заказчика.

Качество выполнения всех работ  в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, предусмотренными законодательством РФ (пункт 5.2.2 договора). 

Согласно пункту 10.12 настоящего договора, в случае, когда работа выполнена подрядчиком с отступлением  от договора, технической документации и/или от СНиП, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для предусмотренного в договоре использования, заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика:

Безвозмездного устранения недостатков в дополнительно оговоренный срок, но не более 5 (пяти) календарных дней с даты уведомления заказчиком (пункт 10.12.1 договора).

Однако,  в нарушении пунктов 5.11 и 10.12.1 указанного договора замечания не устранены.

Подрядчик  допустил нарушение сроков работ, первые КС-2, КС-3 составлены только лишь 25.04.2016.

Пунктом 10.3 договора установлено в случае задержки сроков выполнения работ подрядчиком относительно документа, определяющего сроки производства работ (Приложение № 2), а также в случае задержки сроков исправления некачественно выполненных работ, заказчик имеет право предъявить, а подрядчик обязан будет оплатить заказчику штрафную неустойку в размере 0,1%  от стоимости работ за каждый день просрочки, но суммарно не более 5 (пяти) % от стоимости настоящего договора.

В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, работы в настоящее время не сданы. Акт окончательной сдачи/приемки  всего комплекса работ не подписан.

Таким образом, задолженность подрядчика перед заказчиком составляет в размере 6  419 568,46 руб. за период с 01.04.2016 по 01.04.2018.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно статье 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно статьям 702, 708, 720, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) и оплатить обусловленную цену.

Согласно материалам дела объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справками по форме КС-3, подписанными ответчиком без возражений. Замечания по объему, качеству и срокам выполнения работ ответчик суду не представил.

Сдача результатов работ истцом и приемка их ответчиком, оформленная актом, подписанным обеими сторонами, в соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для возникновения у ответчика обязательства по оплате выполненных работ. 

Подписанный сторонами акт выполненных работ является основанием для окончательной оплаты работ.

Оценив представленные истцом пояснения и доказательства, учитывая, что работы сданы ответчику по актам приемки работ, к которым у ответчика при их подписании не было замечаний, суд приходит к выводу, что ответчик в нарушение статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых на себя обязательств необоснованно уклоняется от оплаты выполненных истцом работ.

Поэтому суд удовлетворяет требования истца в данной части в полном объеме.

В соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязанности заказчика по оплате работ является сдача подрядчиком результата работ надлежащего качества и их приемка заказчиком.

Оценив представленные истцом пояснения и доказательства, учитывая, что работы сданы ответчику по актам приемки работ, к которым у ответчика при их подписании не было замечаний, суд приходит к выводу, что ответчик в нарушение статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых на себя обязательств необоснованно уклоняется от оплаты выполненных истцом работ.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения потерь кредитора, вызванных нарушением должником своих обязательств.

Как подтверждается материалами дела, ответчик нарушил обязательство по своевременной оплате работ.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по государственной пошлине относятся на ответчика и взыскиваются в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Первоначальный иск удовлетворить частично

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Виндом» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строители» 3 500 000 руб. неустойки.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Встречное исковое заявление оставить без рассмотрения.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Бутова Р.А.