1789/2017-225023(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-13472/2017

г. Казань

30 октября 2017 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Мусина Ю.С., при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании  дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Энергоспецналадка" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Комис"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 6 667 163,93руб. долга, 206 832,72руб.  неустойки за нарушение сроков оплаты второй части аванса, 126 510,47руб. неустойки за  нарушение сроков оплаты выполненных работ, 798 497,87руб. стоимости дополнительных  работ, 187 826,67руб. долга за поставленный товар,  

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Комис» к Обществу с  ограниченной ответственностью «Энергоспецналадка» о взыскании 6 288 170 рублей 78  копеек неустойки на основании п. 12.1.3 договора строительного подряда № ЭСН/Дтн/16/Р/08- 04 от 15.08.2016г.  

с привлечением в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не  заявляющего самостоятельных требований - АО "ТРАНСНЕФТЬ - ПРИКАМЬЕ",  

с участием представителей: от истца – ФИО2, доверенность от 09.01.2017г., от ответчика – ФИО3, доверенность от 24.04.2017г. № 40/04-17, от третьего лица – ФИО4, представитель по доверенности от 16.12.2016г., 

руководствуясь ст 110, 167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Комис" (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Энергоспецналадка"  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6 667 163 руб. 93 коп. основного долга, 204 711 руб.  

20 коп. неустойки за нарушение сроков оплаты второй части аванса, 126 510 руб.  47 коп. неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных работ и 55 145 руб. судебных  расходов по уплате государственной пошлины  

В удовлетворении первоначального иска в оставшейся части отказать. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Энергоспецналадка" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью  "Комис" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 554 651 руб. 44 коп. неустойки, 54 141 руб.  расходов по оплате госпошлины.  

Произвести зачет встречных требований и в результате зачета взыскать с Общества с  ограниченной ответственностью "Комис" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью Энергоспецналадка" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 6 444 738 руб. 16 коп. основного долга.  

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок.  

Судья Ю.С. Мусин