221/2019-46665(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 20 февраля 2019 года 

по делу А33-36221/2018 Красноярск 

20 февраля 2019 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить. 

Внести изменения в государственный контракт № 0319100001017000053 от 07.09.2017 на  выполнение работ по объекту: «Модернизация береговых производственных объектов и  сооружений (Модернизация Ладейских ремонтно-механических мастерских в г. Красноярск)  в части изменения сроков выполнения работ, указанных в Графике производства работ  (Приложение № 1) по объектам: Строительство дамбы обвалования с устройством проезжей  части, Строительство причала КОФ № 2, изложив График производства работ в следующей  редакции: пункт 3 «Строительство дамбы обвалования с устройством проезжей части»,  начало выполнения работ: с даты подписания контракта, окончание выполнения работ: до 30  июля 2019 г.; пункт 4 «Строительство причала КОФ № 2», начало выполнения работ: с даты  подписания контракта, окончание выполнения работ: до 30 июля 2019 г.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья А.Н. Мальцева