﻿

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-33059/2018

06 октября 2019 года

г. Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть постановления объявлена     26 сентября 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме  06 октября 2019 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Пряхиной Ю.В.

судей  Масенковой И.В., Семиглазова В.А.

при ведении протокола судебного заседания:  19.09.2019 до перерыва – секретарем Т. П. Утяшевой, 26.09.2019 – после перерыва – секретарем И. И. Царевым,

при участии:  

от истца (заявителя): до перерыва О. В. Борисов, доверенность от 10.04.2019, после перерыва: О. В. Борисов, доверенность от 10.04.2019, О. А. Моисеева, доверенность от 01.01.2019;

от ответчика (должника): А. А. Мусиенко, доверенность от 01.01.2019 (до и после перерыва);

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-21416/2019) ООО «РОСМА» на решение  Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.05.2019 по делу № А56-33059/2018 (судья У. В. Стрельчук), принятое

по иску (заявлению)  Общества с ограниченной ответственностью "РОСМА"

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Теплофорум"

о взыскании

и по встречному иску о взыскании

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «РОСМА» (далее – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Теплофорум» (далее – ответчик, Компания) 420860,52 руб. неосновательного обогащения, а также 20000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя.

Компания обратилась в арбитражный суд со встречным исковым заявлением о взыскании с Общества 155000 руб. задолженности по договору подряда ДП-061 от 07.07.2017, пеней за просрочку выполнения обязательств по договору № 61-ДП в сумме 17360 руб. за период с 21.12.2017 по 11.04.2018, а также 60000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя.

В суде первой инстанции Общество заявило ходатайство о фальсификации доказательств по делу: договора подряда от 07.07.2017 № ДП-061 и письма ООО «РОСМА» от 10.01.2018 № 1 и исключении их из числа доказательств.

Ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы подписи генерального директора ООО «РОСМА» и печати, было отозвано истцом в судебном заседании 23.05.2019.

В удовлетворении заявления о фальсификации судом первой инстанции было отказано.

Законность и обоснованность решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО «РОСМА» платежным поручением от 07.07.2017 перечислило ООО «Теплофорум» 195000 руб. в оплату по счету № 320 от 07.07.2017 по договору №ДП-061 от 07.07.2017, за выполнение монтажных работ по ГСН и инженерному сопровождению.

 В деле имеется счет на оплату № 320 от 10.07.2017 на сумму 195000 руб. на аванс 50% по договору № ДП-061 от 07.07.2017.

Платежным поручением от 24.08.2017 № 00335 ООО «РОСМА» перечислило ООО «Теплофорум» 225860,52 руб. в оплату по счету № 408 от 23.08.2017 по договору подряда № ДП-67 от 23.08.2017, за лаборатории.

В счете на оплату от 23.08.2017 № 408 указано: услуги по газовой лаборатории, просвет стыков по разделу ГСВ, сумма 225860 руб.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является передача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работ в установленном законом и договором порядке (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

В силу пункта 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

При наличии спора о заключенности договора суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 ГК РФ, на что указывалось в информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 N 165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными".

Согласно пункту 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса.

Договор №ДП-67 в виде единого документа между сторонами заключен не был, что сторонами не оспаривается.

Истец также утверждает, что и договор №ДП-061 сторонами не заключался.

Между тем, такой договор от 07.07.2017 №ДП-061 был представлен ответчиком в материалы дела, договор подписан путем обмена электронными документами, стоимость работ по договору составила 390000 руб.

Суд первой инстанции, в рамках рассмотрения заявления истца о фальсификации, подробным образом проанализировал обстоятельства заключения данного договора сторонами, и пришел к правильному выводу о том, что договор был заключен, ни он, ни письмо от 10.01.2018 сфальсифицированными не являются.

В обоснование ходатайства о фальсификации Общество ссылалось на то, что на присланном посредством электронной почты договоре от 07.07.2017 № ДП-061 имеется подпись, не принадлежащая генеральному директору ООО "РОСМА" Румянцеву Д.В., а также, что электронный адрес 0915151@gmail.com , на который был прислан договор, Обществу не принадлежит.

Компания представила в материалы дела Протокол осмотра письменных доказательств, проведенный и.о. нотариуса Горошиной О.В. от 12.09.2018 № 78АБ 5669109, из которого усматривается, что спорный договор был направлен Обществом с электронной почты 0915151@gmail.com на электронный адрес Компании E-mail: ftenergo@yandex.ru. Во вложениях имеется, в том числе подписанный со стороны Общества данных договор подряда ДП 061 от 07.07.2017.

В подтверждение принадлежности спорного электронного адреса Обществу, Компания представила договор подряда Общества с иным лицом, с официального сайта о проводимых тендерах в рамках государственного контракта № 2470000125417000896, в реквизитах которого также указан электронный почтовый ящик ООО "РОСМА" 0915151@gmail.com.

Данный адрес электронной почты истца был актуален на момент 2017 года, его изменение в 2019 году не влечет недействительность такого адреса на момент 2017 года.

При этом, истец в платежном поручении, относящемся к договору №ДП-061, ссылался на реквизиты данного договора, что свидетельствует, как минимум, об осведомленности истца о наличии такого договора. В материалах дела отсутствуют письма истца ответчику, направленные непосредственно после совершения платежа, с требованием вернуть денежные средства, перечисленные в отсутствие на то оснований, в связи с неверным указанием основания платежа.

Следовательно, договор №ДП-061 признается апелляционным заключенным.

Оснований для признания сфальсифицированным письма от 10.01.2018 №1, в котором истец признает факт заключения договора, однако ссылается на просрочку выполнения по нему работ, в связи с чем расторгает договор и просит вернуть аванс, у апелляционного суда также не имеется, исходя из переписки сторон, подтверждения наличия спорного договора между сторонами, реквизитов платежа.

Материалами дела подтверждается выполнение ответчиком работ по инженерному сопровождению лабораторий (в дело представлены протоколы контроля, акты контроля установок). При этом, предметом правоотношений сторон в рамках счета № 408, акцептованного истцом путем его оплаты, были взаимосвязанные работы по услугам газовой лаборатории, просвет стыков по разделу ГСВ. Данные работы были фактически выполнены ответчиком, что подтверждается протоколом проверки сварных соединений, протоколом механических испытаний контрольных сварных соединений. Фактически данные работы были выполнены на объекте иного лица ЗАО «Эврика» - контрагента истца (на что истец указал в спорном письме на л.д. 117, том 1).

Ответчик письмом от 11.01.2018 (направлено истцу по электронной почте) направил истцу акт от 15.12.2017 № 639 на сумму 225860,52 руб. на оплату услуг по договору №ДП-67.

Поскольку договор представляет собой счет и его акцепт платежом, исполнен, отсутствие в данном договоре срока выполнения работ, как существенного условия договора подряда, не влечет его незаключенность. Данные работы являются фактически выполненными на сумму, согласованную в счете.

Письмом от 11.01.2018 ответчик направил истцу копии документов исполнения лабораторий.

Поскольку по объекту был получен акт законченного строительства 25.12.2017, как следует из письма от 10.01.2018 и не опровергнуто истцом (истец вправе был представить общедоступные сведения об отсутствии по данному объекту разрешения на ввод объекта в эксплуатацию), и в материалы дела представлен пакет первичных документов по лабораториям, доказательства направления таких документов истцу, апелляционный суд полагает, что работы по договору №ДП-061, а также по счету с указанием на договор №ДП-67 ответчиком фактически были выполнены.

Стороны не ходатайствовали о проведении по делу экспертизы на предмет объема и стоимости фактически выполненных ответчиком работ, а их выполнение и потребительская ценность для ответчика документально подтверждены, в связи с чем основания для взыскания с ответчика в пользу истца неосвоенных авансов (которые в действительности были ответчиком освоены по целевому назначению) не имеется.

Следовательно, в удовлетворении первоначального иска отказано правомерно, а встречный иск подлежит удовлетворению на сумму неоплаченных работ. Поскольку ответчик просил взыскать с истца в рамках договора №ДП-061 сумму 155000 руб. в оплату работ, работы на данную сумму оплачены истцом не были, с истца в пользу ответчика надлежит взыскать 155000 руб. долга.

Исходя из пункта 3.2 договора №ДП-061, просрочка оплаты наступила с 30.12.2017 и на дату 11.04.2018 неустойка по пункту 6.1 договора составляет сумму 15965 руб., которая подлежит взысканию с истца в пользу ответчика. Оснований для взыскания пеней в большем размере не имеется.

Ответчик также просил взыскать с истца судебные расходы на оплату юридических услуг в размере 60000 руб.

В соответствии со статьями 106, 110 АПК РФ, исходя из принципов разумности и соразмерности, документальной подверженности указанных судебных издержек, проделанной представителем ответчика юридической работы, апелляционный суд полагает возможным взыскать с истца в пользу ответчика 17000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя.

При таких обстоятельствах, решение суда вынесено с соблюдением норм материального и процессуального права, выводы суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела, за исключением периода просрочки исполнения обязанности по оплате работ, в связи с чем решение суда надлежит изменить в соответствующей части, а апелляционную жалобу – по существу оставить без удовлетворения.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.05.2019 по делу № А56-33059/2018 изменить, изложив резолютивную часть решения суда в следующей редакции:

В удовлетворении первоначального иска отказать.

По встречному иску:

Взыскать с ООО «Росма» в пользу ООО «Теплофорум» 155000 руб. долга, 15965 руб. пеней, 17000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 6121 руб. расходов по оплате госпошлины.

В остальной части в удовлетворении требований отказать.

        Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий  двух месяцев со дня его принятия. 

Председательствующий

Ю.В. Пряхина

 

Судьи

 

И.В. Масенкова

 

В.А. Семиглазов