Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-100616/2018

08 мая 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  26 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  08 мая 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "Векос-Строй" (адрес:  Россия 191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 3, литер А, пом. 23Н; ОГРН:  

<

***>),

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "Строители" (адрес:  Россия 197198, 

<

...>, литер. А, помещение 3-Н, офис 7Д, ОГРН:  

<

***>), 

третьи лица: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ВентПром",  Общество с ограниченной ответственностью "Ленстройресурс", Общества с ограниченной ответственностью "Мирос", 

о взыскании,

при участии: 

- от истца: ФИО2 (генеральный директор), ФИО3 (доверенность от 18.02.2019),

- от ответчика: ФИО4 (доверенность от 22.02.2019), 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Векос-Строй" (далее - ООО "Векос-Строй") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Строители" (далее - ООО "Строители") о взыскании 19 865 424 руб. 96 коп. задолженности, в том числе 115 448 руб. 00 коп. по договору от 01.12.2015 № 0112-Л, 2 102 721 руб. 54 коп. по договору от 01.12.2015 № 10113-Л, 6 256 851 руб. 39 коп. по договору от 03.08.2016 № 1692-П, 11 113 243 руб. 33 коп. по договору от 23.03.2016 № 1700, 277 160 руб. 70 коп. по договору от 03.10.2016 № 1793/Оп.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ВентПром",  Общество с ограниченной ответственностью "Ленстройресурс", Общества с ограниченной ответственностью "Мирос".

Третьи лица, извещенные о времени и месте судебного разбирательства, представителей в судебное заседание не направили.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителей сторон, арбитражный суд признал иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 01.12.2015 между ООО "Строители" (заказчик) и ООО "Векос-Строй" (подрядчик) заключен договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ № 0112-Л, в соответствии с которым  ООО "Векос-Строй" обязалось выполнить комплекс работ по монтажу автоматики вытяжных вентиляторов из с/у, ванных комнат и кухонь жилой части здания на кровле на объекте Жилой комплекс «Светлый мир «Я-Романтик» 1-й строительный этап, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невская губа, участок 28 (Западнее Васильевского острова, квартал 25) кадастровый номер 78:43:0000000:10, корпуса №№ 1,2,3,5.

Срок выполнения работ с 01.12.2015 по 01.09.2016 (п. 2.1 договора).

Пунктом 3.1 договора предусмотрена стоимость работ в размере 2 308 960 руб. 02 коп.

Разделом 9 договора установлен порядок оплаты работ и взаиморасчетов.

Также 01.12.2015 между сторонами заключен договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных работ) № 10113-Л, в рамках которого ООО "Векос-Строй" обязалось выполнить комплекс работ монтажу общеобменной вентиляции дымоудаления жилой части здания на указанной объекте.   

Срок выполнения работ с 01.12.2015 по 01.09.2016 (п. 2.1 договора). 

Пунктом 3.1 договора предусмотрена стоимость работ в размере 14 968 955 руб. 86 коп.

Разделом 9 договора установлен порядок оплаты работ и взаиморасчетов.

23.03.2016 между сторонами заключен договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ № 1700, согласно которому ООО "Векос-Строй" обязалось выполнить комплекс работ по монтажу общеобменной вентиляции, вентиляции дымоудаления и автоматики общеобменной вентиляции паркинга на объекте Жилой комплекс «Светлый мир «Я-Романтик» 1-й строительный этап, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невская губа, участок 28 (Западнее Васильевского острова, квартал 25) кадастровый номер 78:43:0000000:10, корпуса №№ 1,2,3.

Срок выполнения работ с 30.03.2016 по 30.05.2016 (п. 2.1 договора).

Пунктом 3.1 договора предусмотрена стоимость работ в размере 19 000 000 руб. 00 коп. 

Разделом 9 договора установлен порядок оплаты работ и взаиморасчетов.

03.08.2016 между сторонами заключен договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ № 1692/П, в соответствии с которым ООО "Векос-Строй" обязалось выполнить комплекс работ по монтажу «Порошкового пожаротушения», «АППЗ», «ПС», «СОУЭ» и «Газового анализа» паркингов на объекте Жилой комплекс «Светлый мир «Я-Романтик» 1-й строительный этап, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Невская губа, участок 28 (Западнее Васильевского острова, квартал 25) кадастровый номер 78:43:0000000:10, корпуса №№ 1,2,3.

Срок выполнения работ с 03.08.2016 по 10.09.2016 (п. 2.1 договора).

Пунктом 3.1 договора предусмотрена стоимость работ в размере 10 354 297 руб. 40 коп. 

Разделом 9 договора установлен порядок оплаты работ и взаиморасчетов.

03.10.2016 между сторонами заключен договор подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ № 1793/Оп, согласно которому ООО "Векос-Строй" обязалось выполнить комплекс работ по устройству металлических опор под вентиляционной оборудование на кровле на объекте Жилой комплекс «Светлый мир «Я-Романтик» 2-й строительный этап – 6 корпус, расположенный по по адресу: г. Санкт-Петербург, Невская губа, участок 28 (Западнее Васильевского острова, квартал 25) кадастровый номер 78:43:0000000:10, корпус № 6.

Срок выполнения работ с 01.06.2017 по 30.06.2017 (п. 2.1 договора). 

Пунктом 3.1 договора предусмотрена стоимость работ в размере 320 000 руб. 00 коп.  

Разделом 9 договора установлен порядок оплаты работ и взаиморасчетов.

Ссылаясь на наличие на стороне ООО "Строители" задолженности по оплате принятых работ по названным договорам,  ООО "Векос-Строй" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы, или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (абзац 2 пункта 4 статьи 753 ГК РФ).

В силу пункта 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Из материалов дела следует, что ООО "Векос-Строй", в том числе письмом от 06.06.2018 № 78 направило в адрес ООО "Строители" акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В ходе судебного разбирательства и до обращения ООО "Векос-Строй" в арбитражный суд с настоящим иском ООО "Строители" не заявляло мотивированных возражений относительно объема, качества и стоимости выполненных работ.  

С учётом изложенного суд признал обоснованными доводы истца о выполнении работ в рамках спорных договоров на заявленную в иске сумму с учётом ранее внесенных заказчиком платежей, признав  последние акт о приёмке выполненных работ по каждому договору итоговым актом по смыслу пунктов 9.6 договоров. 

 Вместе с тем при исследовании возражений ответчика судом установлено, что в рамках договора подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ  от 03.08.2016 № 1692/П ООО "Строители" в счет оплаты работы осуществило платеж за ООО "Векос-Строй"  на общую сумму 5 476 936 руб. 52 коп., в том числе  за оборудование системы АУПТ подземного паркинга (2 789 840 руб. 09 коп.) и за материалы системы АУПТ паркинга (2 687 096 руб. 43 коп.); договора подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ от 23.03.2016 № 1700 осуществлен ООО "Строители" платеж в счет оплаты работы за ООО "Векос-Строй"   на общую сумму 9 672 242 руб. 33 коп., в том числе  за воздуховод из оцинкованной стали, отвод из оцинкованной стали (1 656 020 руб. 00 коп.), оплата за траверса, герметик силик., алюм. Лента, хомут (2 152 862 руб. 69 коп.), оплата за материалы (хомут, анкер) (1 032 323 руб. 58 коп.), оплата за материалы (воздуховод) (1 737 959 руб. 86 коп.), оплата за материалы (клапан, автомат. в комплекте) (3 093 076 руб. 20 коп.);   договора подряда на выполнение комплекса строительных (монтажных) работ  от  03.10.2016 № 1793/Оп осуществлен ООО "Строители" платеж в счет оплаты работы за ООО "Векос-Строй"   на сумму 176 611 руб. 10 коп.

При таких обстоятельствах и с учётом положений ст. 313 Гражданского кодекса РФ общий размер задолженности по спорным договорам составляет 4 539 635 руб. 01 коп.

В остальной части в иске следует отказать . 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строители" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Векос-Строй" 4 539 635 руб. 01 коп. долга.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Векос-Строй" в доход федерального бюджета 94 373 руб. государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строители" в доход федерального бюджета 27 954 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.