Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-116791/2017

19 декабря 2018 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  13 декабря 2018 года.

Полный текст решения изготовлен  19 декабря 2018 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "АКСИОМА СПБ" (адрес:  Россия 192012, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ 120/ЛИТЕР Б/538, ОГРН:  1137847323570);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Комфорт - Авто" (адрес:  Россия 196608, Санкт-Петербург , г.Пушкин, ул.Широкая, д.20, пом.7-Н; Россия 197341, г Санкт-Петербург, г Санкт-Петербург, пр-кт Королева 7, ОГРН:  1027807577500; 1027807577500);

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Альтернатива" (адрес:  Россия 191186, Санкт-Петербург, М. Конюшенная 14, лит А, п. 18Н, ОГРН:  )

о взыскании 750000.00

при участии

- истец: ФИО2 по доверенности от 11.04.17,

- ответчик: Курило А.П. по доверенности от 21.08.18,

установил:

ООО "АКСИОМА СПБ" после уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ просит взыскать с ООО "Комфорт - Авто" 1 500 000 руб. 00 коп. задолженности по договору №36-П от 27.04.16.

Ответчик иск отклонил.

Третье лицо отзыв не предоставило.

Определением от 23.03.18 суд перешел из упрощенного в общий порядок искового производства.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор №36-П от 27.04.16 на разработку проектной документации на строительство многоэтажного гаража по адресу: Санкт-Петербург, Туристская ул., участок 9 (Юго-Западное пересечение с улицей Оптиков).

Цена работ составляет 2 500 000 руб. 00 коп. 

Истец – исполнитель выполнил работы в полном объеме, что подтверждается подписанным сторонами актом о приемке выполненных работ формы КС-2 №1 от 14.06.16 на сумму 2 250 000 руб. 00 коп. 

Истцом представлено положительное заключение экспертизы проектной документации №77-2-1-3-0497-16 от 22.12.16.

С учетом произведенных оплат и зачете суммы в размере 500 000 руб. 00 коп., задолженность ответчика по оплате работ в настоящее время составляет 1 500 000 руб. 00 коп. 

Доводы ответчика, изложенные в отзыве, не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения дела.

Ходатайство ответчика о назначении экспертизы отклонено как необоснованное.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

В связи с увеличением суммы иска с ответчика подлежит взысканию в доход федерального бюджета 10 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Комфорт - Авто" в пользу общества с ограниченной ответственностью "АКСИОМА СПБ"1 500 000 руб. 00 коп. задолженности и 18 000 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Комфорт - Авто" в доход федерального бюджета 10 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.