9/2022-95828(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-7516/2022

г. Астрахань

29 ноября 2022 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе: судьи: Богатыренко С.В.  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 173, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Внести в п.3.1 Государственного контракта № 03252000067210000330001 от  15.09.2021г.изменения и изложить его в следующей редакции:  

«3.1. Сроки выполнения работ: С даты заключения контракта: 

-передача заказчику результатов проектных и изыскательских работ, включая  экспертизу проектной документации: с даты заключения контракта до 26.09.2022 г.;  

-строительно-монтажные работы: с даты заключения контракта до 01.07.2023 г.; 

-приобретение и монтаж оборудования, включая ввод объекта в эксплуатацию: до  01.09.2023 г.»  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Информация о движении дела может быть получена на официальном интернет – сайте  Арбитражного суда Астраханской области: http://astrahan.arbitr.ru»  

Судья С.В. Богатыренко  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 09.09.2021 4:21:11

29 ноября 2022 года Кому выдана Богатыренко Светлана Викторовна