АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-6045/2021

г. Белгород

11 октября 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 04 октября 2021 года. Полный текст решения изготовлен 11 октября 2021 года.

Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Танделовой З. М.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио и видеозаписи помощником судьи Ю.А. Черняевой,

рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "АГРОСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 3123358225, ОГРН 1153123000315)

к ООО "ИРГА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 7 328 646,78 руб.

от истца –   ФИО1, директор,  паспорт, 

от ответчика – ФИО2., доверенность от 06.10.2020 

УСТАНОВИЛ:

ООО "АГРОСПЕЦСТРОЙ" (истец, генподрядчик) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с исковым заявлением, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ, к ООО "ИРГА" (ответчик, заказчик) с требованием о взыскании задолженности по договору подряда № 1 от 05.06.2017 в сумме 6 955 411 руб. 28 коп., пени за период с 20.05.2021 по 20.07.2021 в сумме 431 235 руб. 50 коп., начисление пени продолжать до даты фактического исполнения обязательства.  

В судебном заседании представитель  истца уточненные исковые требования поддержал в полном объёме.

Ответчик в   судебном заседании и в судебном заседании исковые требования признал полностью.

Исследовав материалы дела, суд считает, что иск  подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что между заказчиком ООО «ИРГА» и генеральным подрядчиком ООО «АГРОСПЕЦСТРОЙ» заключен договор подряда на строительство объекта № 1 от 05.06.2017 года, предметом которого являлась реконструкция магазина - встроено-пристроенного помещения по адресу 

<

...>. 21.

В пункте 3.1. договора № 1 от 05.06.2017 г. стороны согласовали стоимость работ в размере 79 125 700 руб., в том числе 2 100 000 руб. по первому этапу, связанному с демонтажом помещения, и 77 125 700 руб. по второму этапу, связанному с возведением нового помещения под ключ.

Срок выполнения работ согласован в п. 4.1. договора № 1 от 05.06.2017 г., согласно которому работы должны быть выполнены в срок до 28 февраля 2018 г.

К договору № 1 от 05.06.2017 г. заключены ряд дополнительных соглашений, конкретизирующих порядок и сроки его исполнения.

Дополнительным соглашением № 1 от 30.06.2017 г. стороны определили порядок сдачи работ и гарантийного удержания выполненных работ.

Дополнительным соглашением № 2 от 09.08.2017 г. стороны приостановили действие договора в связи с отменой разрешения па строительство.

Дополнительным соглашением № 3 от 16.10.2017 г. стороны возобновили действия договора. Срок окончания работ согласован прежним - 28.02.2018 г.

Дополнительным соглашением № 4 от 31.01.2018 г. стороны подтвердили окончание работ по договору и установили порядок окончательного расчета по договору. В частности, окончательный расчет должен быть произведен в течение 10 банковских дней, с даты подписания акта формы № КС-11.

Дополнительным соглашением № 5 от 27.04.2021 г. в связи с истечением срока гарантийного удержания стороны определили, что окончательная стоимость работ по договору№ 1 от 05.06.2017 г. составила 48 211 369 руб. 28 коп. Стоимость гарантийного удержания составила 6 955 411 руб. 28 коп., которое подлежит выплате в течение 10 банковских дней. Стороны определили, что все необходимые документы для окончательного расчета по договору подписаны.

Истцом работы выполнены, что подтверждается представленными в материалы дела актами по форме КС-2, КС-3 на общую сумму 41 255 958 руб. и гарантийного удержания на общую сумму 10 351 192 руб., а всего 56 607 150 руб. Указанные акты подписаны сторонами без замечаний и скреплены печатями обществ. 

Оплата выполненных истцом работ ответчиком произведена не в полном объеме.

Сторонами подписан акт сверки, согласно которому сумма задолженности ООО «ИРГА» перед ООО «АГРОСПЕЦСТРОЙ» составляет  6 955 411 руб. 28 коп.

ООО «АГРОСПЕЦСТРОЙ» направило в адрес ООО «ИРГА» досудебную претензию от 28.04.2021 г., которая получена последним 06.05.2021 г.

В соответствии с пунктом 8.3. договора подряда № 1 от 05.06.2017 г. установлено, что за нарушением сроков оплаты принятых работ, предусмотренных настоящим договором, заказчик уплачивает генподрядчику пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки платежа.

Истцом начислены пени за период с 20.05.2021 по 20.07.2021 в размере 431 235,50 руб.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения с настоящим иском в суд.

В соответствии с ч.3 ст. 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых  другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В соответствии со ст. 49 АПК РФ  ответчик вправе  при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск  полностью или частично. Арбитражный суд не принимает признание ответчиком  иска, если это  противоречит закону  или нарушает права других лиц.

 В рассматриваемом деле суд не видит препятствий для принятия признания иска ответчиком, поскольку оно не противоречит требованиям закона, не нарушает прав и охраняемых законом интересов  других лиц.

При таких обстоятельствах иск подлежит удовлетворению в полном объёме.  

В соответствии с ч.1 ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны.  

С учетом изложенного, государственная пошлина, уплаченная истцом при предъявлении иска, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Иск ООО "АГРОСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> удовлетворить полностью.

          Взыскать с ООО "ИРГА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "АГРОСПЕЦСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по договору подряда № 1 от 05.06.2017 в сумме  6 955 411 руб. 28 коп., пени за период с 20.05.2021 по 20.07.2021 в сумме 431 235 руб. 50 коп., начисление пени продолжать с 21.07.2021  до даты фактического исполнения обязательства.

Взыскать с ООО "ИРГА" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 59 643 руб.   государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья

Танделова З. М.