АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А57-11956/2023

15 апреля 2024 года

город Саратов

 

Резолютивная часть решения оглашена 04 апреля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 15 апреля 2024 года.

 Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Безрукова П.М., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Корой И.В., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Саратов, администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Саратов

к обществу с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Саратов 

третьи лица: ООО «СтройКонтрольИнжиниринг», г. Саратов, ООО «НГ Групп» г.Саратов, МБУ «Службу благоустройства Волжского района», г. Саратов,

об обязании, 

при участии до перерыва: 

от истца – комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» - ФИО1, представитель по доверенности от 27.12.2023,

от истца - администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности от 29.12.2022,

от третьих лиц - представители не явились, извещен надлежащим образом,

после перерыва: 

от истца – комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» - ФИО3, представитель по доверенности от 27.12.2023,

от истца - администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» - ФИО4, представитель по доверенности от 14.11.2023,

от ответчика – ФИО5, представитель по доверенности от 28.12.2022,

от третьих лиц - представители не явились, извещен надлежащим образом,

после перерыва:

от истца – комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» - представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от истца - администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» - ФИО4, представитель по доверенности от 14.11.2023,

от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности от 29.12.2022,

от третьих лиц - представители не явились, извещен надлежащим образом, 

 

У С Т А Н О В И Л:

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» обратился в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» об обязании в течение 7 (семи) рабочих дней с момента вступления решения в законную силу, привести в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации асфальтобетонное покрытие и песчано-щебеночное основание, общей площадью 50 (пятьдесят) квадратных метров на участке дороги по адресу: 

<

...>, в случае неисполнения решения суда, взыскать неустойку в размере 10 000 руб. за каждый день неисполнения, начисляемую с момента истечения сроков на добровольное исполнение решения суда, после вступления решения суда в законную силу, и до момента фактического исполнения решения суда.

            Определением от 25.07.2023 суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «СтройКонтрольИнжиниринг», администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов».

Определением от 27.09.2023 суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «НГ Групп», МБУ «Службу благоустройства Волжского района».

Определением от 30.10.2023 суд привлек администрацию Волжского района муниципального образования «Город Саратов» в качестве соистца.

Определением суда от 11.12.2023 по делу была назначена строительно-техническая экспертиза и приостановлено производство по делу.

Определением суда от  04.03.2024  производство по делу возобновлено.

Дело рассматривается в порядке статей 153-166 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Отводов суду не заявлено.

Представитель администрации Волжского района в судебном заседании заявил ходатайство об уточнении исковых требований, в соответствии с которым просит в течение 30 календарных дней с момента вступления решения в законную силу, обязать ООО «КВС» выполнить работы по благоустройству территории после проведения земляных работ в 

<

...>, общей площадью 50 кв.м согласно приложению № 2 Ведомость объемов работ на устранение просадки дорожного асфальтобетонного покрытия на участке выполнения вскрышных работ заключения судебной экспертизы Союза «Межрегиональное объединение судебных экспертов» № 0016 от 28 февраля 2024 года; в случае неисполнения решения суда, взыскать с ООО «КВС» в пользу администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда, с момента истечения сроков на добровольное исполнение решения суда, после вступления решения в законную силу, и до момента фактического исполнения судебного акта.

В соответствии с частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Соответствующие уточнения заявленных требований приняты арбитражным судом, поскольку они не противоречат закону и не нарушают права других лиц. 

Представители истца в судебном заседании поддержали исковые требования в полном объеме по основаниям, указанным в исковом заявлении, с учетом уточнений.

В судебном заседании представитель ответчика представил отзыв на иск, в котором изложил позицию по делу, просил снизить размер судебной неустойки.

Третьи лица  в судебное заседание не явились. В материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения третьих лиц о времени и месте судебного заседания.

В соответствии с п. 5 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.

В судебном заседании 27.03.2024 в порядке ст.163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 11 час. 20 мин. 03.04.2024, вынесено протокольное определение. После перерыва судебное заседание продолжено.  

В судебном заседании 03.04.2024 в порядке ст.163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв до 14 час. 20 мин. 04.04.2024, вынесено протокольное определение. После перерыва судебное заседание продолжено.  

В соответствии со статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований и возражений.

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

           Исследовав материалы дела, проверив доводы, изложенные в исковом заявлении, отзывах на иск, выслушав лиц, участвующих в деле, суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» (Заказчик) и ООО «НГ Групп» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт №0160300002721000067 от 21.12.2021, по условиям которого Подрядчик должен выполнить работы по ремонту автомобильных дорог, указанных в Смете (Приложение №1 к контракту), согласно перечню объектов (Приложение №2 к контракту) и графику выполнения работ (Приложение №3 к контракту).

Согласно приложению № 2 к указанному контракту одним из объектов ремонта дорожного полотна (вместе с бордюрными камнями) являлась ул.Первомайская (от ул. Чернышевского Н.Г. до ул. Радищева А.Н.).

Работы, предусмотренные контрактом, были выполнены Подрядчиком и сданы Заказчику.

Согласно распоряжению комитета по управлением имуществом города Саратова№181-р от 18.02.2022 ул.Первомайская закреплена за администрацией Волжского района муниципального образования «Город Саратов».

Администрацией Волжского района муниципального образования «Город Саратов» были выданы ООО «КВС» следующие разрешения на проведение земляных работ: разрешение №340 Д от 19.08.2022 по адресу: 

<

...> д.№74а (дорога), срок выполнения работ с 17.08.2022 по 21.08.2022; разрешение №340 Д-1 от 19.08.2022 по адресу: 

<

...> д.№74а (дорога), срок выполнения работ с 22.08.2022 по 24.08.2022.

Согласно пункту 7.1. разрешений установлено, что ООО «КВС» обязано восстановить дорожное покрытие, элементы обустройства дорог и горизонтальную разметку в срок, на который выдано разрешение.

В соответствии с пунктом 9 указанных разрешений ООО «КВС» несет ответственность за восстановленный участок дороги в течение трех лет. 

Согласно предписанию № 35 об устранении нарушений правил производства дорожно-строительных работ от 25 августа 2022 года, было установлено, что щебеночное основание не соответствует требованиям СП 78.13330.2012 и СП 34.13330.2021 по уплотнению. 

ООО «КВС» не представило обратную засыпку котлована песком на проверку уплотнения. Срок устранения нарушений указан до 01 сентября 2022 года.

В предписании № 40 от 30 августа 2022 года об устранении нарушений правил производства дорожно-строительных работ указано, что асфальтобетонное покрытие на соответствует требованиям ГОСТ Р 58406.2-2020 по содержанию воздушных пустот. Необходимо переустроить асфальтобетонное покрытие. Срок устранения нарушений указан до 13 сентября 2022 года.

Протоколом №30/08/2022-1 от 30 августа 2022 года установлено, что содержание воздушных пустот асфальтобетонного покрытия, уложенного по адресу: 

<

...>, в выравнивающем слое асфальтобетонной смеси А16Нн, после вскрышных работ ООО «КВС» составляет 9,8 %, в то время как согласно требованиями ГОСТ Р 58406.2-2020 содержание воздушных пустот должно составлять от 1,0 % до 7,0 %.

В протоколе № 05/09/2022-1 от 05 сентября 2022 года испытания асфальтобетонной смеси указано, что содержание воздушных пустот должно составлять от 2,0% до 6,0% и от 1,0% до 6,0% при единичных испытаниях, в то время как в месте отбора по адресу: 

<

...>, установлено содержание пустот равное 6,8%. Также установлено несоответствие толщины асфальтобетонной смеси — 4,4 см., в то время как проектируемая толщина указанного материала должна составлять 5,0 см. 

Таким образом щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16 не соответствует требованиям ГОСТ Р 58406.1-2020 по содержанию воздушных пустот.

Кроме того, в ходе осмотра и инструментального обследования основания (слоев щебня и песка обратной засыпки) измерителем модуля упругости грунтов и оснований дорог ПДУ-МГ4 «Удар», было установлено, что модуль упругости основания на указанном выше участке дороги составляет 44 Мпа, что свидетельствует о недостаточном уплотнении данного участка асфальтобетонного покрытия.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» направил ответчику претензию от 15.09.2022 №02-22/887 с требованием привести в соответствие с требованиями Законодательства РФ асфальтобетонное покрытие, а также песчано-щебеночное основание на участке дороги по адресу: 

<

...>.

Поскольку претензия не исполнена, указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящими исковыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В рассматриваемом случае возложение на причинителя вреда обязанности привести в соответствие с требованиями Законодательства РФ асфальтобетонное покрытие, а также песчано-щебеночное основание на участке дороги по адресу: 

<

...>, является мерой гражданско-правовой ответственности, поэтому с учетом пункта 2 статьи 1064 ГК РФ бремя доказывания отсутствия вины лежит на ответчике. 

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик указал, что в настоящее время в месте проведения работ по адресу: 

<

...>, отсутствуют просадки (провалы) асфальтобетонного покрытия.

Согласно части 1 статьи 82 АПК РФ арбитражный суд назначает экспертизу для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

Для установления существенных обстоятельств по делу определением суда от 11.12.2023 по настоящему делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза, производство которой поручено Союзу «Межрегиональное объединение судебных экспертов» эксперту ФИО6.

 На разрешение экспертизы поставлены следующие вопросы: 

1. Соответствует ли дорожное асфальтобетонное покрытие и песчано-щебеночное основание, общей площадью 50 (пятьдесят) квадратных метров на участке дороги по адресу: 

<

...>, требованиям ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия», ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия» и иным действующим ГОСТам и СНиПам?

2. Какие виды работ необходимо выполнить для устранения выявленных недостатков, определить их объем и стоимость? 

По результатам проведения экспертного исследования в материалы дело представлено заключение №0016 от 28.02.2024. Экспертом сделаны следующие выводы:

По первому вопросу. 

С применением передвижной дорожной лаборатории установлено, что асфальтобетонное покрытие на участке вскрышных работ не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля по показателям ровности и отдельных повреждений требованиям». В результате исследования показателя содержания воздушных пустот было установлено значительное несоответствие щебёночно-мастичного асфальтобетона верхнего слоя покрытия нормативным требованиям ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования.

В результате выемки (извлечения) слоев дорожной одежды и грунта обратной засыпки с замером пенетрометром и в результате применения георадарного метода исследований было установлено, что слои песка и щебня под асфальтобетонным покрытием находятся в насыпном состоянии и не уплотнялись до нормативных значений, степень уплотнения слоя щебня и песка обратной засыпки значительно не соответствуют нормативным требованиям СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги».

В результате замеров передвижной дорожной лабораторией, инструментальных и лабораторных исследований было установлено, что дорожное асфальтобетонное покрытие и песчано-щебеночное основание, общей площадью 50 (пятьдесят) квадратных метров на участке дороги по адресу: 

<

...>, не соответствует     требованиям ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия», ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия», СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85 и ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Meтоды контроля.

По второму вопросу.

Для устранения просадки асфальтобетона на участке вскрышных работ, необходимо демонтировать все результаты работ и выполнить их снова с соблюдением нормативных требований к качеству работ по обратной засыпке котлованов и к качеству работ по устройству оснований и покрытий дорожных одежд.

В приложении 2 составлена ведомость объёмов работ на устранение просадки дорожного асфальтобетонного покрытия на участке выполнения вскрышных работ. Стоимость устранения просадки асфальтобетонного покрытия на участке вскрышных работ составляет, в текущих ценах на момент выполнения экспертного исследования 393 596,64 (Триста девяносто три тысячи пятьсот девяносто шесть рублей 64 копейки), в том числе НДС 20% - 65 599,44 (Шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто девять рублей 44 копейки).

Суд, исследовав указанное заключение эксперта в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, установил, что оно соответствует требованиям законодательства Российской Федерации об экспертной деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 06.01.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Город Саратов» решением Саратовской городской Думы от 25.12.2018 № 45-326 утверждены «Правила благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» (далее по тексту – Правила № 45-236). 

Разделом 4.10. Правил № 45-236 установлены основные требования к проведению земляных работ. 

Согласно пунктам 4.10.6, 4.10.7 Правил № 45-236 проведение земляных работ на территории муниципального образования допускается только при наличии разрешения, которое действует в пределах, указанных в нем места и срока. Порядок выдачи разрешения на проведение земляных работ, подготовки, проведения и завершения земляных работ на территории муниципального образования утверждается постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов». 

Разрешением на проведение земляных работ в силу пункта 4.10.8 Правил № 45-236 является документ, выдаваемый уполномоченным органом местного самоуправления в целях координации проведения земляных работ и контроля за восстановлением благоустройства, предоставляющий заказчику право на проведение земляных работ. 

Согласно пунктам 4.10.19, 4.10.21 Правил № 45-236 все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных организаций при проведении земляных работ, ликвидируются в полном объеме организациями, получившими разрешение на проведение работ, в сроки, согласованные с уполномоченным структурным подразделением администрации муниципального образования «Город Саратов». Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся над подземными коммуникациями после проведения земляных работ, устраняются организациями, получившими разрешение на проведение земляных работ, в сроки и порядке, установленные администрацией муниципального образования «Город Саратов». 

Под восстановлением благоустройства места проведения земляных работ в силу пункта 4.10.5. Правил № 45-236 следует понимать приведение нарушенного в результате земляных работ благоустройства на месте их проведения, в том числе дорожных покрытий, тротуаров, газонов и иной территории, занятой зелеными насаждениями, иных объектов и элементов благоустройства, в состояние, соответствующее требованиям нормативных правовых актов, национальных стандартов и сводов правил. 

Постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 08.06.2010 №1477 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство вскрышных работ на территории муниципального образования «Город Саратов» утвержден административный регламент, в соответствии с которым определены стандарт предоставления данной муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения. 

В соответствии с административным регламентом муниципальная услуга «выдача разрешений на производство вскрышных работ на территории муниципального образования «Город Саратов» предоставляется департаментом Гагаринского административного района муниципального образования «Город Саратов» или администрацией соответствующего района муниципального образования «Город Саратов» 

Согласно ч. 1 ст. 33 Устава муниципального образования «Город Саратов», утвержденного решением Саратовской городской Думы от 18.12.2005 № 67-649, администрация муниципального образования «Город Саратов» является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления города, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города федеральными законами и законами Саратовской области. 

Администрация осуществляет свою деятельность на основании Положения о территориальных структурных подразделениях администрации муниципального образования «Город Саратов», утвержденного решением Саратовской городской Думы от 01.03.2022 № 12-143.

Согласно п. 1.1 Положения об администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов», (далее по тексту - администрация района), утвержденным решением Саратовской городской Думы от 01.03.2022 № 12-143, администрация района является территориальным структурным подразделением администрации муниципального образования «Город Саратов», осуществляющим от имени администрации муниципального образования «Город Саратов» исполнительно-распорядительные функции по вопросам местного значения на территории Октябрьского района в части и объеме, установленных настоящим Положением, а также иными муниципальными правовыми актами. 

Пунктом 3.1.8. настоящего Положения определены полномочия Администрации района в сфере организации благоустройства и озеленения: обеспечивает содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий; обеспечивает проведение мероприятий по озеленению района и воспроизводству зеленых насаждений; обеспечивает установку указателей с обозначением наименований улиц, переулков, проездов и домовых номерных знаков; выдает разрешения на производство земляных работ на тротуарах, внутриквартальных проездах, газонах и других объектах благоустройства, осуществляет контроль за сроками и качеством восстановительных работ, а также принимает выполненные восстановительные работы; выдает разрешения на производство земляных работ на автомобильных дорогах, осуществляет контроль за сроками и качеством восстановительных работ, а также принимает выполненные восстановительные работы; рассматривает в установленном порядке дендропланы; осуществляет иные полномочия в сфере благоустройства территории района в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов».

Согласно п. 1.12. Постановления администрации муниципального образования «Город Саратов» от 06.07.2012 № 1462 «О порядке проведения работ на подземных коммуникациях и обустройства строительных площадок» (далее - Порядок проведения работ) восстановление (ремонт) территории, в отношении которой проведены земляные работы, должно производиться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. По окончании выполнения работ по восстановлению территории заказчик незамедлительно уведомляет об этом организацию, ответственную за содержание соответствующей территории, соответственно администрацию района, департамент Гагаринского района. 

Приемка работ по восстановлению территории, в отношении которой проведены земляные работы, осуществляется при участии представителя заказчика, получившей разрешение на производство земляных работ, представителей организации, ответственной за содержание соответствующей территории, и администрации соответствующего района не позднее трех рабочих дней со дня окончания выполнения работ по восстановлению территории. 

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с частью 1 статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Каких-либо иных достоверных и допустимых доказательств, подтверждающих иную причину повреждения имущества истца, ответчиком не добыто и суду не представлено. 

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению. 

На основании части 1 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

При рассмотрении требования о понуждении к исполнению обязанности в натуре суд обязан дать оценку наличия спорной обязанности у ответчика, права истца требовать понуждения к ее исполнению, а также субъективной и объективной возможности исполнения.

Принимая во внимание условия, характер работ, место выполнения работ по устранению недостатков, арбитражный суд счел, что выполнение работ, необходимых для устранения рассматриваемых недостатков, в соответствии с обязательными строительными нормами и правилами будет объективно возможно в месячный  срок.

Также истцом заявлено о взыскании неустойки в случае неисполнения решения суда в размере 1 000 руб., за каждый день просрочки устранения недостатков. 

Представитель ответчика просит снизить размер неустойки. 

Указанные требования истца, по мнению суда, подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

 В силу ч. 4 ст. 174 АПК РФ, арбитражный суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом арбитражным судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

В пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

 Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

 Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (ч. 4 ст. 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункты 31, 32 названного постановления). 

Денежные средства, присуждаемые на случай неисполнения судебного акта, определяются судом в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо в денежной сумме, начисляемой периодически. 

Определяя размер судебной неустойки, суд руководствуется принципами справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

В данном случае суд полагает  обоснованным установление денежной суммы (неустойки) в размере 1 000 руб. за каждый календарный день просрочки неисполнения решения, начиная со следующего дня с момента вступления решения в законную силу.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражным судом суд решает вопрос о распределении судебных расходов.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

К судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся, в том числе, денежные суммы, подлежащие выплате экспертам (статья 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

По окончании проведения судебной экспертизы Союз «Межрегиональное объединение судебных экспертов» выставил счет на оплату №2802/1 от 28.02.2024 на сумму 70 000 руб.

Учитывая то обстоятельство, что исковые требования удовлетворены, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика  ООО «КВС» в пользу экспертного учреждения, проводившего экспертизу - Союза «Межрегиональное объединение судебных экспертов»   расходы за производство судебной экспертизы 70 000 руб.

Истец освобожден от уплаты государственной пошлины на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации.

При подаче иска по требованию неимущественного характера подлежало оплате 6 000 руб. государственной пошлины.

Государственная пошлина в размере 6 000 руб. подлежит взысканию с ООО «КВС» в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения - Саратов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Саратов в течение тридцати календарных дней с момента вступления в законную силу решения суда выполнить работы по устранению недостатков дорожного покрытия по адресу: 

<

...>, а именно: 

 

№ п/п

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.

Индексы

Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

на единицу

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу

коэффициенты

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Раздел 1. Ремонт а/б покрытия S=50 м2

Демонтаж старого покрытия

1

ФЕРр68-12-16

Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 130 мм

1000 м2

0,05

1

0,05

 

291,18

 

Объем=50 / 1000

 

1

ОТ

 

65,13

 

3,26

 

2

ЭМ

 

5 191,60

 

259,58

 

3

в т.ч. ОТм

 

298,10

 

14,91

 

Н

01.7.13.01

Лом асфальтобетона

т

257,4

 

12,87

 

ЗТ

чел.-ч

8,35

 

0,4175

 

ЗТм

чел.-ч

21,58

 

1,079

 

Итого по расценке

 

5 256,73

 

262,84

 

ФОТ

 

18,17

 

Пр/812-102.0-1

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

%

102

 

102

 

18,53

 

Пр/774-102.0

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

%

54

 

54

 

9,81

 

Всего по позиции

 

291,18

 

2

ФССЦпг-01-01-01-041

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза

12,87

1

12,87

42,98

 

553,15

11,25

6 222,94

 

Всего по позиции

 

553,15

 

6 222,94

3

ФССЦпг-03-21-01-010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

1 т груза

12,87

1

12,87

11,42

 

146,98

11,6

1 704,97

 

Всего по позиции

 

146,98

 

1 704,97

4

ФЕРр68-12-2

Разборка покрытий и оснований: щебеночных

100 м3

0,25

1

0,25

 

145,48

 

Объем=(50*0,5) / 100

 

1

ОТ

 

92,08

 

23,02

 

2

ЭМ

 

287,60

 

71,90

 

3

в т.ч. ОТм

 

37,57

 

9,39

 

ЗТ

чел.-ч

11,7

 

2,925

 

ЗТм

чел.-ч

2,96

 

0,74

 

Итого по расценке

 

379,68

 

94,92

 

ФОТ

 

32,41

 

Пр/812-102.0-1

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

%

102

 

102

 

33,06

 

Пр/774-102.0

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

%

54

 

54

 

17,50

 

Всего по позиции

 

145,48

 

5

ФССЦпг-01-01-01-041

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза

35

1

35

42,98

 

1 504,30

11,25

16 923,38

 

Объем=25*1400/1000

 

Всего по позиции

 

1 504,30

 

16 923,38

6

ФССЦпг-03-21-01-010

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км

1 т груза

35

1

35

11,42

 

399,70

11,6

4 636,52

 

Всего по позиции

 

399,70

 

4 636,52

7

ФЕР01-01-011-01

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 8 (6,3-10) м3, группа грунтов 1

1000 м3

0,2

1

0,2

 

408,93

 

Объем=(50*4) / 1000

 

1

ОТ

 

19,74

 

3,95

 

2

ЭМ

 

1 885,74

 

377,15

 

3

в т.ч. ОТм

 

92,64

 

18,53

 

4

М

 

2,17

 

0,43

 

ЗТ

чел.-ч

2,1

 

0,42

 

ЗТм

чел.-ч

6,57

 

1,314

 

Итого по расценке

 

1 907,65

 

381,53

 

ФОТ

 

22,48

 

Пр/812-001.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

%

92

0,9

82,8

 

18,61

 

Пр/774-001.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

%

46

0,85

39,1

 

8,79

 

Всего по позиции

 

408,93

 

Устройство нового поктрытия

8

ФЕР01-02-033-01

Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком

10 м3

20

1

20

 

7 118,21

 

Объем=(50*4) / 10

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

1

ОТ

 

96,56

1,15

2 220,88

 

2

ЭМ

 

82,19

1,25

2 054,75

 

3

в т.ч. ОТм

 

10,08

1,25

252,00

 

Н

02.3.01.02

Песок для строительных работ природный

м3

10

 

200

 

ЗТ

чел.-ч

13,43

1,15

308,89

 

ЗТм

чел.-ч

0,93

1,25

23,25

 

Итого по расценке

 

178,75

 

4 275,63

 

ФОТ

 

2 472,88

 

Пр/812-001.4-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

%

89

0,9

80,1

 

1 980,78

 

Пр/774-001.4, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

%

41

0,85

34,85

 

861,80

 

Всего по позиции

 

7 118,21

 

9

ФССЦ-02.3.01.02-1008

Песок природный II класс, мелкий, круглые сита (плюс 15% дополнительный песок на засыпку)

м3

33

1

33

59,99

 

1 979,67

 

Объем=(200*1,1)*0,15

 

Всего по позиции

 

1 979,67

 

10

ФЕР27-04-007-03

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных

1000 м2

0,05

1

0,05

 

1 281,46

 

Объем=50 / 1000

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

1

ОТ

 

233,66

1,15

13,44

 

2

ЭМ

 

4 162,99

1,25

260,19

 

3

в т.ч. ОТм

 

263,42

1,25

16,46

 

4

М

 

18 684,20

 

934,21

 

ЗТ

чел.-ч

28,6

1,15

1,6445

 

ЗТм

чел.-ч

23,14

1,25

1,44625

 

Итого по расценке

 

23 080,85

 

1 207,84

 

ФОТ

 

29,90

 

Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Автомобильные дороги

%

147

0,9

132,3

 

39,56

 

Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Автомобильные дороги

%

134

0,85

113,9

 

34,06

 

Всего по позиции

 

1 281,46

 

11

ФЕР27-04-007-04

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03

1000 м2

0,05

1

0,05

 

957,08

 

Объем=50 / 1000

 

до толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

2

ЭМ

 

468,89

12,5(10*1,25)

293,06

 

3

в т.ч. ОТм

 

27,84

12,5(10*1,25)

17,40

 

4

М

 

1 242,36

10

621,18

 

ЗТм

чел.-ч

2,51

12,5(10*1,25)

1,56875

 

Итого по расценке

 

1 711,25

 

914,24

 

ФОТ

 

17,40

 

Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Автомобильные дороги

%

147

0,9

132,3

 

23,02

 

Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Автомобильные дороги

%

134

0,85

113,9

 

19,82

 

Всего по позиции

 

957,08

 

12

ФЕР27-04-007-02

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных

1000 м2

0,05

1

0,05

 

1 551,84

 

Объем=50 / 1000

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

1

ОТ

 

269,61

1,15

15,50

 

2

ЭМ

 

6 597,56

1,25

412,35

 

3

в т.ч. ОТм

 

399,38

1,25

24,96

 

4

М

 

20 487,60

 

1 024,38

 

ЗТ

чел.-ч

33

1,15

1,8975

 

ЗТм

чел.-ч

35,13

1,25

2,195625

 

Итого по расценке

 

27 354,77

 

1 452,23

 

ФОТ

 

40,46

 

Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Автомобильные дороги

%

147

0,9

132,3

 

53,53

 

Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Автомобильные дороги

%

134

0,85

113,9

 

46,08

 

Всего по позиции

 

1 551,84

 

13

ФССЦ-02.2.05.04-1817

Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2

м3

-9,45

1

-9,45

103,00

 

-973,35

 

Всего по позиции

 

-973,35

 

14

ФССЦ-02.2.05.04-1777

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

м3

9,45

1

9,45

108,40

 

1 024,38

 

Всего по позиции

 

1 024,38

 

15

ФЕР27-04-007-04

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03

1000 м2

0,05

1

0,05

 

957,08

 

Объем=50 / 1000

 

до толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

2

ЭМ

 

468,89

12,5(10*1,25)

293,06

 

3

в т.ч. ОТм

 

27,84

12,5(10*1,25)

17,40

 

4

М

 

1 242,36

10

621,18

 

ЗТм

чел.-ч

2,51

12,5(10*1,25)

1,56875

 

Итого по расценке

 

1 711,25

 

914,24

 

ФОТ

 

17,40

 

Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Автомобильные дороги

%

147

0,9

132,3

 

23,02

 

Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Автомобильные дороги

%

134

0,85

113,9

 

19,82

 

Всего по позиции

 

957,08

 

16

ФССЦ-02.2.05.04-1817

Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2

м3

-6,3

1

-6,3

103,00

 

-648,90

 

Всего по позиции

 

-648,90

 

17

ФССЦ-02.2.05.04-1777

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

м3

6,3

1

6,3

108,40

 

682,92

 

Всего по позиции

 

682,92

 

18

ФССЦпг-03-21-01-030

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км

1 т груза

-19,3725

1

-19,3725

19,29

 

-373,70

11,6

-4 334,92

 

Объем=-15,75*1,23

 

Всего по позиции

 

-373,70

 

-4 334,92

19

ФССЦпг-03-21-01-179

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 179 км

1 т груза

19,3725

1

19,3725

77,94

 

1 509,89

11,6

17 514,72

 

Объем=15,75*1,23

 

Всего по позиции

 

1 509,89

 

17 514,72

20

ФЕР27-06-026-01

Розлив вяжущих материалов

т

0,035

1

0,035

 

2,47

 

Объем=50/1000*0,7

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

2

ЭМ

 

39,10

1,25

1,71

 

3

в т.ч. ОТм

 

7,15

1,25

0,31

 

Н

01.2.01.01

Битум

т

1,03

 

0,03605

 

ЗТм

чел.-ч

0,66

1,25

0,028875

 

Итого по расценке

 

39,10

 

1,71

 

ФОТ

 

0,31

 

Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Автомобильные дороги

%

147

0,9

132,3

 

0,41

 

Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Автомобильные дороги

%

134

0,85

113,9

 

0,35

 

Всего по позиции

 

2,47

 

21

ФССЦ-01.2.01.01-1024

Битум нефтяной дорожный БНД 70/100

т

0,03605

1

0,03605

1 615,23

 

58,23

 

Всего по позиции

 

58,23

 

22

ФЕРр68-10-1

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщина слоя 7 см)

100 т

0,08575

1

0,08575

 

497,17

 

Объем=(50*0,07*2,45) / 100

 

1

ОТ

 

186,42

 

15,99

 

2

ЭМ

 

4 909,20

 

420,96

 

3

в т.ч. ОТм

 

255,27

 

21,89

 

4

М

 

13,03

 

1,12

 

Н

04.2.01.02

Смеси асфальтобетонные горячие пористые

т

101

 

8,66075

 

ЗТ

чел.-ч

19,1

 

1,637825

 

ЗТм

чел.-ч

19,34

 

1,658405

 

Итого по расценке

 

5 108,65

 

438,07

 

ФОТ

 

37,88

 

Пр/812-102.0-1

НР Благоустройство (ремонтно-строительные)

%

102

 

102

 

38,64

 

Пр/774-102.0

СП Благоустройство (ремонтно-строительные)

%

54

 

54

 

20,46

 

Всего по позиции

 

497,17

 

23

ФССЦ-04.2.01.01-0041

Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I

т

8,66075

1

8,66075

478,23

 

4 141,83

 

Всего по позиции

 

4 141,83

 

24

ФЕР27-06-026-01

Розлив вяжущих материалов

т

0,015

1

0,015

 

1,05

 

Объем=50/1000*0,3

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

2

ЭМ

 

39,10

1,25

0,73

 

3

в т.ч. ОТм

 

7,15

1,25

0,13

 

Н

01.2.01.01

Битум

т

1,03

 

0,01545

 

ЗТм

чел.-ч

0,66

1,25

0,012375

 

Итого по расценке

 

39,10

 

0,73

 

ФОТ

 

0,13

 

Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Автомобильные дороги

%

147

0,9

132,3

 

0,17

 

Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Автомобильные дороги

%

134

0,85

113,9

 

0,15

 

Всего по позиции

 

1,05

 

25

ФССЦ-01.2.01.01-1024

Битум нефтяной дорожный БНД 70/100

т

0,01545

1

0,01545

1 615,23

 

24,96

 

Всего по позиции

 

24,96

 

26

ФЕР27-06-029-01

Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см

1000 м2

0,05

1

0,05

 

583,53

 

Объем=50 / 1000

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

1

ОТ

 

182,32

1,15

10,48

 

2

ЭМ

 

7 479,03

1,25

467,44

 

3

в т.ч. ОТм

 

234,46

1,25

14,65

 

4

М

 

874,78

 

43,74

 

П,Н

04.2.01.01

Смесь асфальтобетонная

т

0

 

0

ЗТ

чел.-ч

20,86

1,15

1,19945

 

ЗТм

чел.-ч

18,85

1,25

1,178125

 

Итого по расценке

 

8 536,13

 

521,66

 

ФОТ

 

25,13

 

Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Автомобильные дороги

%

147

0,9

132,3

 

33,25

 

Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Автомобильные дороги

%

134

0,85

113,9

 

28,62

 

Всего по позиции

 

583,53

 

27

ФЕР27-06-030-01

При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 (толщина слоя 5 см)

1000 м2

0,05

1

0,05

 

35,29

 

Объем=50 / 1000

 

до толщины 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

 

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б

При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

 

1

ОТ

 

3,29

2,3(2*1,15)

0,38

 

2

ЭМ

 

254,89

2,5(2*1,25)

31,86

 

3

в т.ч. ОТм

 

5,95

2,5(2*1,25)

0,74

 

4

М

 

2,94

2

0,29

 

П,Н

04.2.01.01

Смесь асфальтобетонная

т

0

2

0

 

ЗТ

чел.-ч

0,35

2,3(2*1,15)

0,04025

 

ЗТм

чел.-ч

0,47

2,5(2*1,25)

0,05875

 

Итого по расценке

 

261,12

 

32,53

 

ФОТ

 

1,12

 

Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25

НР Автомобильные дороги

%

147

0,9

132,3

 

1,48

 

Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

СП Автомобильные дороги

%

134

0,85

113,9

 

1,28

 

Всего по позиции

 

35,29

 

28

ФССЦ-04.2.03.01-0013

Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные SMA-16

т

6,04

1

6,04

867,90

 

5 242,12

 

Объем=0,05*(96,6+12,1*2)

 

Всего по позиции

 

5 242,12

 

Итоги по смете:

 

Итого прямые затраты (справочно)

25 770,35

 

в том числе:

 

Оплата труда рабочих

2 306,90

 

Эксплуатация машин

4 944,74

 

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

408,77

 

Материалы

14 778,39

 

Перевозка

3 740,32

 

Строительные работы

29 102,95

 

327 997,20

 

4 кв 2023 , Письмо Минстроя России  28.12.2023г. №82450-ИФ/09

          Строительные работы

25 362,63

11,25

285 329,59

 

в том числе:

 

оплата труда

2 306,90

 

эксплуатация машин и механизмов

4 944,74

 

в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

408,77

 

материалы

14 778,39

 

накладные расходы

2 264,06

 

сметная прибыль

1 068,54

 

Перевозка

3 740,32

 

42 667,61

 

Итого ФОТ (справочно)

2 715,67

 

Итого накладные расходы (справочно)

2 264,06

 

Итого сметная прибыль (справочно)

1 068,54

 

НДС 20%

5 820,59

 

65 599,44

 

ВСЕГО по смете

34 923,54

 

393 596,64

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В случае неисполнения настоящего решения в установленный судом срок взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Концессия водоснабжения – Саратов», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г.Саратов в пользу администрации Волжского района муниципального образования «Город Саратов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Саратов судебную неустойку в размере 1 000 руб. за каждый день не исполнения решения суда. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Концессия водоснабжения – Саратов», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Саратов в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Концессия водоснабжения – Саратов», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г.Саратов в пользу Союза «Межрегиональное объединение судебных экспертов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г.Саратов судебные расходы за проведение экспертизы в размере 70 000 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.

Направить копии судебного акта лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Судья арбитражного суда

Саратовской области                                                                                            П.М. Безруков