АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА 

ул. Селезнёвская, д. 9, г. Москва, ГСП-4, 127994, официальный сайт: http://www.fasmo.arbitr.ru e-mail: info@fasmo.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А40-135581/2015

30 июля 2018 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 30 июля 2018 года 

Полный текст постановления изготовлен 30 июля 2018 года  

Арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи Стрельникова А.И. судей Хвостовой Н.О., Дзюбы Д.И. при участии в заседании: от истца – ФИО1 по доверенности № Д-14.3/169 от 28.12.2017; 

от ответчика – ФИО2 по доверенности № КТС-26/2018-ВУ,  ФИО3 по доверенности от 30.07.2018;  

от третьего лица – ФИО4 по доверенности № 072д от 05.02.2018,  ФИО5 по доверенности № 071д от 05.02.2018,  

рассмотрев 23-30 июля 2018 года в судебном заседании кассационные жалобы 

Федерального агентства воздушного транспорта и ФГУП «Администрация  гражданских аэропортов (аэродромов)»  

на решение от 20 ноября 2017 года Арбитражного суда города Москвы, принятое судьей Акименко О.А., на постановление от 20 февраля 2018 года 

Девятого арбитражного апелляционного суда,  

принятое судьями Стешаном Б.В., Лялиной Т.А., Ким Е.А., 

по иску Федерального агентства воздушного транспорта (ОГРН 1047796301002,  ИНН 

<

***>)  

к АО Корпорация «Трансстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),  третье лицо: ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»,  

о признании государственного контракта расторгнутым, и по иску АО Корпорация «Трансстрой» 

к ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>),  

о признании незаконным одностороннего расторжения государственного  контракта,  

УСТАНОВИЛ:

Федеральное агентство воздушного транспорта (далее Росавиация, истец,  государственный заказчик) обратилось с исковым заявлением к открытому  акционерному обществу Корпорация «Трансстрой» (далее ОАО Корпорация  «Трансстрой», ответчик, подрядчик) о признании расторгнутым  государственного контракта от 08.05.2014 № 0373100090913000044.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 06 октября 2015 года  были объединены в одно производство дело № А40-123567/2015 по иску ОАО  Корпорация «Трансстрой» к Федеральному агентству воздушного транспорта о  признании незаконным одностороннего расторжения указанного  государственного контракта для его совместного рассмотрения с делом № А40- 135581/2015 с присвоением объединенному делу номера А40-135581/2015.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 12 ноября 2015 года к  участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные  требования относительно предмета спора, было привлечено Федеральное  государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских  

аэропортов (аэродромов)» (далее ФГУП «Администрация гражданских  аэропортов (аэродромов)», третье лицо, заказчик).  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08 декабря 2015 года было  отказано в удовлетворении иска Федерального агентства воздушного  транспорта, иск ОАО Корпорация «Трансстрой» был удовлетворен - суд признал  незаконным одностороннее расторжение Федеральным агентством воздушного  транспорта государственного контракта от 08.05.2014 № 0373100090913000044  на основании уведомления № 06/46 от 24.06.2015.  

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 20  февраля 2016 года данное решение суда было оставлено без изменения.  

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 19 июля 2016  года, вышеназванные решение и постановление были отменены, а дело было  направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

При новом рассмотрении решением Арбитражного суда города Москвы 20  ноября 2017 года, оставленным без изменения постановлением Девятого  арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2018 года, в удовлетворении  исковых требований Федерального агентства воздушного транспорта было  отказано, а исковые требования АО Корпорация «Трансстрой» были  удовлетворены в полном объеме (т. 14, л.д. 54-62).  

Не согласившись с решением и постановлением, Федеральное агентство  воздушного транспорта и ФГУП «Администрация гражданских аэропортов  (аэродромов)» обратились с кассационными жалобами, в которых просили  отменить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной  инстанции, как принятые с нарушением норм процессуального и материального  права и направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда.  

В заседании суда кассационной инстанции объявлялся перерыв до 30 июля  2018 года, после чего рассмотрение кассационной жалобы было продолжено, но  с учетом изменения состава суда заново, о чем было заявлено сторонам по делу  судебной коллегией.  

В заседании суда кассационной инстанции до начала рассмотрения  кассационных жалоб ответчик заявил ходатайство об утверждении мирового  соглашения, которое было поддержано истцом и третьим лицом.  

В соответствии с ч. 4 ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, стороны могут закончить дело мировым соглашением.  Согласно ч. 1 ст. 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, мировое соглашение может быть заключено на любой стадии  арбитражного процесса. При этом арбитражный суд утверждает мировое  соглашение, если оно не противоречит закону и не нарушает права и законные  интересы других лиц.  

Условиями представленного на утверждение суда мирового соглашения от  30 июля 2018 года являются: Федеральное агентство воздушного транспорта в  лице руководителя ФИО6, действующего на  основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 №  1950-р, в дальнейшем также именуемое «Истец», и Акционерное общество  Корпорация «Трансстрой» в лице внешнего управляющего ФИО7, действующего на основании Определения Арбитражного суда  г.Москвы от 04.07.2017 по делу № А40-49691/2015 и Устава, именуемое в  дальнейшем также «Ответчик», при участии третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, с учетом положений  п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ № 50 от 18.07.2014, Федерального  государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских  аэропортов (аэродромов)», в лице генерального директора ФИО8, действующего на основании Приказа Федерального агентства  воздушного транспорта № 40/Т, именуемое в дальнейшем также «Третье лицо», в  целях урегулирования спора по делу № А40-135581/2015 по иску Федерального  агентства воздушного транспорта к АО Корпорация «Трансстрой» о признании  государственного контракта № 0373100090913000044 от 08.05.2014,  заключенного между Сторонами, расторгнутым с 06.07.2015 г. и объединенному  делу № А40-123567/15 по иску АО Корпорация «Трансстрой» к Федеральному  агентству воздушного транспорта о признании незаконным одностороннего  

расторжения государственного контракта № 0373100090913000044 от 08.05.2014  г. на основании уведомления ФГУП «Администрация гражданских аэропортов  (аэродромов)» № 06146 от 24.06.2015 г., в предложенной редакции, по которому:  

1. Стороны договорились о расторжении государственного контракта   № 0373100090913000044 от 08.05.2014 (далее - Контракт) по соглашению сторон  с 10.09.2015, в связи с чем обязательства Ответчика по выполнению всех  невыполненных работ по Контракту прекратились. Обязательства Ответчика по  возврату неотработанного аванса возникают с даты утверждения мирового  соглашения и подлежат исполнению в порядке, предусмотренном п.4  настоящего соглашения, с учетом условий п.2 настоящего соглашения.  

2. Все обязательства Сторон, возникшие из Контракта, в том числе в связи  с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств Сторон по  Контракту, прекращаются в порядке, установленном настоящим мировым  соглашением.  

3. Стороны согласились, что на дату утверждения настоящего Мирового  соглашения Истцом приняты работы по Контракту на общую сумму  425.234.852,64 руб. (Четыреста двадцать пять миллионов двести тридцать  четыре тысячи восемьсот пятьдесят два рубля 64 копейки), в том числе НДС  64.866.333, 45 руб. Если иной объем выполненных работ будет установлен  судом, стороны производят расчеты на основании соответствующего судебного  акта.  

На дату утверждения арбитражным судом Мирового соглашения сумма  неотработанного по Контракту аванса (непогашенный аванс) составляет  1.021.399.544, 21 руб. (Один миллиард двадцать один миллион триста девяносто  девять тысяч пятьсот сорок четыре рубля, 21 копейка), в том числе НДС  155.806.710,13 руб. Обязательства Ответчика по возврату неизрасходованного по  Контракту аванса возникают с даты утверждения арбитражным судом  настоящего мирового соглашения и исполняются в порядке, предусмотренном п.  4 Мирового соглашения.  

4. Ответчик обязуется возвратить непогашенный аванс на расчетный счет  Федерального государственного унитарного предприятия «Администрация  

гражданских аэропортов (аэродромов)» р/сч 40502810338040000117 в ПАО  Сбербанк г. Москва к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 в порядке,  предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»   № 127-ФЗ от 26.10.2002г. Стороны согласовали, что обязанность Ответчика по  возврату денежных средств согласно п.З настоящего мирового соглашения  может быть исполнена третьим лицом, в т.ч. ООО «Трансстрой-Инвест», с  применением аккредитивной формы расчетов. ООО «Трансстрой-Инвест»  открывает покрытый безотзывный аккредитив на сумму 1.021.399.544, 21 руб.  (Один миллиард двадцать один миллион триста девяносто девять тысяч пятьсот  сорок четыре рубля, 21 копейка) в банке ВТБ (ПАО) в срок не позднее 01  октября 2018 года. Такое исполнение должно быть принято Истцом/Третьим  лицом в качестве надлежащего исполнения Ответчика по настоящему  соглашению. Для возврата денежных средств используется аккредитивная форма  расчетов. Платеж по аккредитиву осуществляется банком ВТБ (ПАО) при  представлении ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»  следующих документов:  

- заверенная единоличным исполнительным органом Третьего лица копия  утвержденного арбитражным судом Мирового соглашения по делу № А40- 135581 /2015;  

- заверенная единоличным исполнительным органом Третьего лица копия  Определения арбитражного суда об утверждении Мирового соглашения по делу   № А40-135581/2015;  

- заверенная единоличным исполнительным органом Третьего лица копия  письма ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»,  подписанного единоличным исполнительным органом Третьего лица,  скрепленного оттиском печати Третьего лица, с отметкой банка о его получении  и составленного по форме банка ВТБ (ПАО), являющейся приложением к  аккредитиву, об отказе ФГУП «Администрация гражданских аэропортов  (аэродромов)» от прав по банковской гарантии № 78-1003/16/100-14-ГА от  19.03.2014 и отзыве ранее предъявленных им требований платежа № 05513 от  03.06.2015 на сумму 1.166.480.379,19 руб. и № 07086 от 17.07.2015 на сумму  

1.021.399.544,21 руб.; с подтверждением, что указанные требования не подлежат  исполнению с даты их получения банком; подтверждающем, что ФГУП  «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» не имеет к банку  претензий в связи с неудовлетворением указанных требований о платеже.  

При получении ФГУП «Администрация гражданских аэропортов  (аэродромов)» платежа, предусмотренного настоящим пунктом мирового  соглашения, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»  обязуется перечислить полученные денежные средства в полном объеме на счет  Федерального агентства воздушного транспорта в установленном законом  порядке.  

5. За нарушение сроков возврата неотработанного аванса более чем на 20  календарных дней, предусмотренных п. 3 настоящего соглашения, Ответчик  уплачивает Истцу пени в размере 0,1% от суммы неосуществленного в срок  платежа за каждый день неисполнения обязательства.  

6. Гарантийные обязательства Ответчика, предусмотренные ст. 25  Контракта в отношении выполненных Ответчиком и принятых Истцом работ по  Контракту, за исключением условий о банковской гарантии, действуют в течение  36 календарных месяцев с момента утверждения мирового соглашения.  

Ответчик участвует в проверках Ростехнадзора по выполненным и  принятым Истцом работам, устраняет все выявленные в ходе этих проверок  замечания до получения ЗОС.  

7. Истец, Ответчик и Третье лицо не имеют претензий друг к другу в связи с  неполным исполнением обязательств/встречных обязательств, которые должны  были быть исполнены на момент заключения настоящего мирового соглашения,  с учетом пункта 2 настоящего мирового соглашения. Гарантийные обязательства  подлежат исполнению в соответствии с настоящим Соглашением.  

8. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения Арбитражным  судом Московского округа настоящего Мирового соглашения и открытия  аккредитивного счета, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов  (аэродромов)» и Федеральное агентство воздушного транспорта обязуются  возвратить в банк ВТБ (ПАО) банковскую гарантию № 78-1003/16/100-14-ГА,  

выданную ОАО «Банк Москвы» 19.03.2014г., и одновременно письменно  отказаться от своих прав по банковской гарантии № 78-1003/16/100-14-ГА от  19.03.2014г и освобождают банк ВТБ (ПАО) от его обязательств по данной  банковской гарантии, а также от всех других имущественных требований к банку  (в т.ч. о взыскании убытков, неустоек, процентов за пользование денежными  средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ), которые возникли или могут  возникнуть в будущем в связи с банковской гарантией № 78-1003/16/100-14-ГА  от 19.03.2014 г.  

Указанные отказ от прав по гарантии и освобождение банка от обязательств  не зависят от возврата оригинала банковской гарантии.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения арбитражным судом  настоящего Мирового соглашения и открытия аккредитивного счета, ФГУП  «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» письменно  отказывается от ранее предъявленных требований платежа № 05513 от  03.06.2015 на сумму 1.166.480.379,19 руб. и № 07086 от 17.07.2015 на сумму  1.021.399.544,21 руб. по банковской гарантии № 78-1003/16/100-14-ГА от  19.03.2014г., и отзывает их, а также подтверждает, что указанные требования не  подлежат исполнению с даты их получения банком; что ФГУП «Администрация  гражданских аэропортов (аэродромов)» не имеет к банку претензий в связи с  неудовлетворением указанных требований о платеже.  

Письма Третьего лица в банк ВТБ (ПАО) оформляются по форме банка,  подписываются его единоличным исполнительным органом, скрепляются  оттиском печати, и должны иметь отметку банка ВТБ (ПАО) о их получении.  

9. ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»  обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты осуществления  Ответчиком или третьим лицом за Ответчика платежа на сумму неотработанного  аванса в размере, указанном в п.З Мирового соглашения, подать в Арбитражный  суд г. Москвы в дело № А40-162332/2015-69-1301 заявление о полном отказе от  исковых требований к банку ВТБ (ПАО) (к АКБ «Банк Москвы» (ОАО),  выступающего ответчиком по делу № А40-162332/2015, до осуществления  замены Арбитражным судом г. Москвы его правопреемником - Банк ВТБ  

(публичное акционерное общество)) о взыскании денежных средств по  банковской гарантии № 78-1003/16/100-14-ГА от 19.03.2014 в размере  1.021.399.544,21 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами  в размере 3.005.433,18 руб., суммы госпошлины уплаченной при подаче иска.  

Истец, Ответчик и Третье лицо обязуются поддержать данный отказ от иска  в суде, в судебном заседании по делу № А40-162332/2015.  

10. Расходы по уплате государственных пошлин и иные судебные расходы  (неуказанные в настоящем Соглашении), связанные с судебными спорами по  государственному контракту № 0373100090913000044 от 08.05.2014, возлагаются  на сторону, которая понесла данные расходы. Расходы на оплату услуг  представителей Сторон несет сторона, пригласившая соответствующего  представителя.  

11. Стороны подтверждают проведение всех корпоративных процедур,  получение всех согласований и одобрений, необходимых для подписания и  реализации настоящего мирового соглашения.  

12. Ответчик в качестве обеспечения исполнения настоящего соглашения в  течение 10 дней с его утверждения Арбитражным судом представляет Истцу  независимую гарантию.  

Независимая гарантия должна быть безотзывной и отвечать требованиям  законодательства Российской Федерации.  

13. Настоящее мировое соглашение составлено в четырех экземплярах,  имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон  соглашения и один для материалов дела № А40-135581/2015.  

14. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с даты утверждения его  Арбитражным судом.  

Обсудив представленное мировое соглашение, суд кассационной инстанции  считает, что представленное мировое соглашение не противоречит требованиям  закона и не нарушает прав и законных интересов других лиц, в связи с чем суд  кассационной инстанции находит возможным утвердить предложенную  сторонами редакцию мирового соглашения.  

Учитывая изложенное, решение Арбитражного суда города Москвы 20  ноября 2017 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда  от 20 февраля 2018 года подлежат отмене, а производство по делу -  прекращению.  

Руководствуясь ч. 2 ст. 150, ст. ст. 138-142, 289 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

П О С Т А Н О В И Л:

Утвердить мировое соглашение, заключенное 30 июля 2018 года между  Федеральным агентством воздушного транспорта в лице руководителя ФИО6, действующего на основании распоряжения  Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1950-р, в дальнейшем  также именуемое «Истец», и Акционерного общества Корпорация «Трансстрой»  в лице внешнего управляющего ФИО7, действующего на  основании Определения Арбитражного суда г.Москвы от 04.07.2017 по делу   № А40-49691/2015 и Устава, именуемое в дальнейшем также «Ответчик», при  участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, с учетом положений п. 12 Постановления  Пленума ВАС РФ № 50 от 18.07.2014, Федерального государственного  унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов  (аэродромов)», в лице генерального директора ФИО8,  действующего на основании Приказа Федерального агентства воздушного  транспорта № 40/Т, именуемое в дальнейшем также «Третье лицо», в целях  урегулирования спора по делу № А40-135581/2015 по иску Федерального  агентства воздушного транспорта к АО Корпорация «Трансстрой» о признании  государственного контракта № 0373100090913000044 от 08.05.2014,  заключенного между Сторонами, расторгнутым с 06.07.2015 г. и объединенному  делу № А40-123567/15 по иску АО Корпорация «Трансстрой» к Федеральному  агентству воздушного транспорта о признании незаконным одностороннего  расторжения государственного контракта № 0373100090913000044 от 08.05.2014  

г. на основании уведомления ФГУП «Администрация гражданских аэропортов  (аэродромов)» № 06146 от 24.06.2015 г., в предложенной редакции по которому:  

1. Стороны договорились о расторжении государственного контракта   № 0373100090913000044 от 08.05.2014 (далее - Контракт) по соглашению сторон  с 10.09.2015, в связи с чем обязательства Ответчика по выполнению всех  невыполненных работ по Контракту прекратились. Обязательства Ответчика по  возврату неотработанного аванса возникают с даты утверждения мирового  соглашения и подлежат исполнению в порядке, предусмотренном п.4  настоящего соглашения, с учетом условий п.2 настоящего соглашения.  

2. Все обязательства Сторон, возникшие из Контракта, в том числе в связи  с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств Сторон по  Контракту, прекращаются в порядке, установленном настоящим мировым  соглашением.  

3. Стороны согласились, что на дату утверждения настоящего Мирового  соглашения Истцом приняты работы по Контракту на общую сумму  425.234.852,64 руб. (Четыреста двадцать пять миллионов двести тридцать  четыре тысячи восемьсот пятьдесят два рубля 64 копейки), в том числе НДС  64.866.333, 45 руб. Если иной объем выполненных работ будет установлен  судом, стороны производят расчеты на основании соответствующего судебного  акта.  

На дату утверждения арбитражным судом Мирового соглашения сумма  неотработанного по Контракту аванса (непогашенный аванс) составляет  1.021.399.544, 21 руб. (Один миллиард двадцать один миллион триста девяносто  девять тысяч пятьсот сорок четыре рубля, 21 копейка), в том числе НДС  155.806.710,13 руб. Обязательства Ответчика по возврату неизрасходованного по  Контракту аванса возникают с даты утверждения арбитражным судом  настоящего мирового соглашения и исполняются в порядке, предусмотренном п.  4 Мирового соглашения.  

4. Ответчик обязуется возвратить непогашенный аванс на расчетный счет  Федерального государственного унитарного предприятия «Администрация  гражданских аэропортов (аэродромов)» р/сч 

<

***> в ПАО  

Сбербанк г. Москва к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 в порядке,  предусмотренном Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»   № 127-ФЗ от 26.10.2002г. Стороны согласовали, что обязанность Ответчика по  возврату денежных средств согласно п.З настоящего мирового соглашения  может быть исполнена третьим лицом, в т.ч. ООО «Трансстрой-Инвест», с  применением аккредитивной формы расчетов. ООО «Трансстрой-Инвест»  открывает покрытый безотзывный аккредитив на сумму 1.021.399.544, 21 руб.  (Один миллиард двадцать один миллион триста девяносто девять тысяч пятьсот  сорок четыре рубля, 21 копейка) в банке ВТБ (ПАО) в срок не позднее 01  октября 2018 года. Такое исполнение должно быть принято Истцом/Третьим  лицом в качестве надлежащего исполнения Ответчика по настоящему  соглашению. Для возврата денежных средств используется аккредитивная форма  расчетов. Платеж по аккредитиву осуществляется банком ВТБ (ПАО) при  представлении ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»  следующих документов:  

- заверенная единоличным исполнительным органом Третьего лица копия  утвержденного арбитражным судом Мирового соглашения по делу № А40- 135581 /2015;  

- заверенная единоличным исполнительным органом Третьего лица копия  Определения арбитражного суда об утверждении Мирового соглашения по делу   № А40-135581/2015;  

- заверенная единоличным исполнительным органом Третьего лица копия  письма ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»,  подписанного единоличным исполнительным органом Третьего лица,  скрепленного оттиском печати Третьего лица, с отметкой банка о его получении  и составленного по форме банка ВТБ (ПАО), являющейся приложением к  аккредитиву, об отказе ФГУП «Администрация гражданских аэропортов  (аэродромов)» от прав по банковской гарантии № 78-1003/16/100-14-ГА от  19.03.2014 и отзыве ранее предъявленных им требований платежа № 05513 от  03.06.2015 на сумму 1.166.480.379,19 руб. и № 07086 от 17.07.2015 на сумму  1.021.399.544,21 руб.; с подтверждением, что указанные требования не подлежат  

исполнению с даты их получения банком; подтверждающем, что ФГУП  «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» не имеет к банку  претензий в связи с неудовлетворением указанных требований о платеже.  

При получении ФГУП «Администрация гражданских аэропортов  (аэродромов)» платежа, предусмотренного настоящим пунктом мирового  соглашения, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»  обязуется перечислить полученные денежные средства в полном объеме на счет  Федерального агентства воздушного транспорта в установленном законом  порядке.  

5. За нарушение сроков возврата неотработанного аванса более чем на 20  календарных дней, предусмотренных п. 3 настоящего соглашения, Ответчик  уплачивает Истцу пени в размере 0,1% от суммы неосуществленного в срок  платежа за каждый день неисполнения обязательства.  

6. Гарантийные обязательства Ответчика, предусмотренные ст. 25  Контракта в отношении выполненных Ответчиком и принятых Истцом работ по  Контракту, за исключением условий о банковской гарантии, действуют в течение  36 календарных месяцев с момента утверждения мирового соглашения.  

Ответчик участвует в проверках Ростехнадзора по выполненным и  принятым Истцом работам, устраняет все выявленные в ходе этих проверок  замечания до получения ЗОС.  

7. Истец, Ответчик и Третье лицо не имеют претензий друг к другу в связи с  неполным исполнением обязательств/встречных обязательств, которые должны  были быть исполнены на момент заключения настоящего мирового соглашения,  с учетом пункта 2 настоящего мирового соглашения. Гарантийные обязательства  подлежат исполнению в соответствии с настоящим Соглашением.  

8. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения Арбитражным  судом Московского округа настоящего Мирового соглашения и открытия  аккредитивного счета, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов  (аэродромов)» и Федеральное агентство воздушного транспорта обязуются  возвратить в банк ВТБ (ПАО) банковскую гарантию № 78-1003/16/100-14-ГА,  выданную ОАО «Банк Москвы» 19.03.2014г., и одновременно письменно  

отказаться от своих прав по банковской гарантии № 78-1003/16/100-14-ГА от  19.03.2014г и освобождают банк ВТБ (ПАО) от его обязательств по данной  банковской гарантии, а также от всех других имущественных требований к банку  (в т.ч. о взыскании убытков, неустоек, процентов за пользование денежными  средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ), которые возникли или могут  возникнуть в будущем в связи с банковской гарантией № 78-1003/16/100-14-ГА  от 19.03.2014 г.  

Указанные отказ от прав по гарантии и освобождение банка от обязательств  не зависят от возврата оригинала банковской гарантии.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения арбитражным судом  настоящего Мирового соглашения и открытия аккредитивного счета, ФГУП  «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» письменно  отказывается от ранее предъявленных требований платежа № 05513 от  03.06.2015 на сумму 1.166.480.379,19 руб. и № 07086 от 17.07.2015 на сумму  1.021.399.544,21 руб. по банковской гарантии № 78-1003/16/100-14-ГА от  19.03.2014г., и отзывает их, а также подтверждает, что указанные требования не  подлежат исполнению с даты их получения банком; что ФГУП «Администрация  гражданских аэропортов (аэродромов)» не имеет к банку претензий в связи с  неудовлетворением указанных требований о платеже.  

Письма Третьего лица в банк ВТБ (ПАО) оформляются по форме банка,  подписываются его единоличным исполнительным органом, скрепляются  оттиском печати, и должны иметь отметку банка ВТБ (ПАО) о их получении.  

9. ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»  обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты осуществления  Ответчиком или третьим лицом за Ответчика платежа на сумму неотработанного  аванса в размере, указанном в п.З Мирового соглашения, подать в Арбитражный  суд г. Москвы в дело № А40-162332/2015-69-1301 заявление о полном отказе от  исковых требований к банку ВТБ (ПАО) (к АКБ «Банк Москвы» (ОАО),  выступающего ответчиком по делу № А40-162332/2015, до осуществления  замены Арбитражным судом г. Москвы его правопреемником - Банк ВТБ  (публичное акционерное общество)) о взыскании денежных средств по  

банковской гарантии № 78-1003/16/100-14-ГА от 19.03.2014 в размере  1.021.399.544,21 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами  в размере 3.005.433,18 руб., суммы госпошлины уплаченной при подаче иска.  

Истец, Ответчик и Третье лицо обязуются поддержать данный отказ от иска  в суде, в судебном заседании по делу № А40-162332/2015.  

10. Расходы по уплате государственных пошлин и иные судебные расходы  (неуказанные в настоящем Соглашении), связанные с судебными спорами по  государственному контракту № 0373100090913000044 от 08.05.2014, возлагаются  на сторону, которая понесла данные расходы. Расходы на оплату услуг  представителей Сторон несет сторона, пригласившая соответствующего  представителя.  

11. Стороны подтверждают проведение всех корпоративных процедур,  получение всех согласований и одобрений, необходимых для подписания и  реализации настоящего мирового соглашения.  

12. Ответчик в качестве обеспечения исполнения настоящего соглашения в  течение 10 дней с его утверждения Арбитражным судом представляет Истцу  независимую гарантию.  

Независимая гарантия должна быть безотзывной и отвечать требованиям  законодательства Российской Федерации.  

13. Настоящее мировое соглашение составлено в четырех экземплярах,  имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон  соглашения и один для материалов дела № А40-135581/2015.  

14. Настоящее мировое соглашение вступает в силу с даты утверждения его  Арбитражным судом.  

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20 ноября 2017 года и  постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2018  года по делу № А40-135581/2015 - отменить.  

Производство по указанному делу - прекратить. 

Председательствующий-судья А.И.Стрельников 

Судьи: Н.О.Хвостова 

 Д.И. Дзюба