АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, 

<

...> http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-2165/2025

г. Чебоксары

10 октября 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 29 сентября 2025 года.

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе 

судьи Краснова А.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бирюковой Е.М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

казенного учреждения Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, площадь Красная, д.3, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>

к обществу с ограниченной ответственностью «Дортех», 428024, 

<

...> зд. 6, пом. 218, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>

о взыскании 100 000 руб.,

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: Управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике, Министерства финансов Чувашской Республики,

при участии:

от истца – ФИО1 по доверенности от 09.01.2025 (сроком до 31.12.2025; до перерыва в судебном заседании),

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 17.07.2025 (сроком на 1 год; до перерыва в судебном заседании),

установил:

казенное учреждение Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее – истец, КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Дортех» (далее – ответчик, ООО «Дортех») о взыскании 100 000 руб.

            Исковые требования мотивированы тем, что 17.10.2022 между КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии и ООО «Дортех» заключен государственный контракт № 177/22 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Красночетайском, Моргаушском, Порецком, Ядринском районам и Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики в 2023-2024 гг.

            30.01.2024 в отношении КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии должностынм лицом Госавтоинспекции ОМВД России «Моргаушский» составлены протоколы за допущение рыхлого снега  на проезжей части в нарушение пункта 8.2 ГОСТ Р 50597-2017.

21.02.2024 в отношении КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа 100 000 руб. КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии платежным поручением № 118724 от 06.05.2024 административный штраф уплатило. 

Истец полагает, что сумма уплаченного штрафа подлежит взысканию с ООО «Дортех» в порядке регресса. Истцом в адрес ответчика 09.01.2025 направлена претензия. По состоянию на 18.03.2025 требование в добровольном порядке не исполнено.

Определением суда от 28.03.2025 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Определением от 21.05.2025 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

23.05.2025 от истца поступили возражения на отзыв ответчика.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, указав, что ответчиком нарушены требования по толщине снега на проезжей части, в связи с чем истец был привлечен к административной ответственности.

Представитель ответчика просил отказать в удовлетворении исковых требований по основаниям, изложенным в дополнительных пояснениях от 29.09.2025. Пояснил, что замеры производили после выхода уборочных машин.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв в течение одного дня до 15 час. 30 мин. 29.09.2025.

Третьи лица о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом извещенные, явку своих полномочных представителей не обеспечили, каких-либо ходатайств не представили.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие представителей третьих лиц по имеющимся в деле документам.

Изучив материалы дела, выслушав пояснения представителей истца и ответчика, суд установил следующее.

Из материалов дела следует, что 17.10.2022 между казенным учреждением Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (заказчик) и ООО «Дортех» (подрядчик) заключен государственный контракт № 177/22 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Красночетайском, Моргаушском, Порецком, Ядринском районах и Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики в 2023-2024 гг.

Требования к выполняемому комплексу работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения определяются Описанием  объекта  закупки (Приложение № 2), Ведомостью объемов и стоимости работ (Приложение №3) и перечнем работ, установленным в Государственных стандартах, Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автодорог общего пользования, Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и Руководстве по оценке уровня содержания автомобильных дорог общего пользования Чувашской Республики (пункт 1.1 контракта).

Стоимость работ и услуг определена сторонами в разделе 3 контракта и составляет сумму  1 036 421 688 руб. (л.д.17, оборот).

Согласно пункту 3.4 контракта основанием для оплаты работ является, оформленные в установленном порядке акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), составленные в соответствии с Описанием  объекта  закупки. Оплата выполненных работ производится в течение 10 календарных дней с момента подписания заказчиком структурированного документа о приемке в единой информационной системе, актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и представлении счетов (счетов-фактур).

В пункте 9.1 контракта установлены сроки работ по содержанию автомобильных дорог: 1 этап – 01.01.2023 по 31.12.2023; 2 этап – 01.01.2024 по 31.12.2024. Ежегодное зимнее содержание - с 01.01. по 05.04, с 28.10. по 31.12, ежегодное весеннее-летнее-осеннее содержание - с 06.04. по 27.10. Устранение после зимних локальных разрушений покрытия проезжей части и обочин должны быть завершены до 15.05.

В соответствии пунктом 5.1.2 контракта подрядчик обязан поддерживать требуемый в соответствии с условиями настоящего Контракта уровень содержания Объекта для обеспечения круглогодичного проезда автомобильных транспортных средств по автодорогам, создания условий для бесперебойного и безопасного дорожного движения, а также обеспечивать сохранность имущества, входящего в состав автодорог, за исключением участков или отдельных элементов автодорог, на которых выполняются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию (устройство защитных слоев, слоев износа, поверхностной обработки) переданных третьим лицам по соответствующим Актам приёма-передачи с разграничением полномочий сторон в отношении таких участков или отдельных элементов. Информировать Заказчика об изменениях в состоянии обслуживаемого Объекта в соответствии с установленным Федеральным дорожным агентством порядком представления информации о состоянии автомобильных дорог, дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях на объектах дорожного хозяйства Российской Федерации.

Согласно п. 5.1.16 контракта подрядчик обязан осуществлять ежедневный (без исключения выходных и праздничных дней) осмотр состояния автодорог с ведением Журнала ежедневных осмотров. Подрядчик обязан ежедневно, а при неблагоприятных, особо неблагоприятных погодных условий (перечень неблагоприятных погодных условий и особо неблагоприятных погодных условий- согласно ГОСТ Р 59434-2021) и в период весеннего паводка -круглосуточно, производить патрулирование и постоянное наблюдение за состоянием дорог с целью принятия оперативных мер по предупреждению возможных причин ограничения и прекращения движения, дорожно-транспортных происшествий, устранения мелких повреждений элементов автодорог и ликвидации возникших препятствий для движения.

В соответствии с абз. 3 подпункта 6 пункта 5 технического задания (Приложение № 2) к контракту состав работ по зимнему содержанию автомобильных дорог входит: механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин (л.д. 23).

В соответствии с пунктом 7.1.12 контракта в случае возникновения факта ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий контракта или нарушения срока выполнения работ (просрочки обязательств по настоящему контракту) Заказчик направляет Подрядчику претензионное письмо с указанием суммы неустойки (штрафа, пени), убытков и сроком перечисления данных сумм на расчетный счет Заказчика в добровольном порядке. При не перечислении сумм в добровольном порядке удержания, предусмотренные в данном разделе, производятся Заказчиком в одностороннем порядке путем вычета из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, т.е. оплата Контракта при этом осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), убытков, которая перечисляется Заказчиком в установленном порядке в доход соответствующего бюджета бюджетной системы.

В случае, если Заказчик будет подвергнут; административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания, а также судебные издержки (пункт 7.1.19 контракта).

Работы по государственному контракту выполнены подрядчиком и сданы Учреждению без возражений,  что подтверждается  актами выполненных работ по форме КС-2  и справками по форме КС-3,  спор в этой части отсутствует.  

Платежным поручением № 391101 от 26.12.2023 произведена оплата выполненных работ за период с 26 ноября по декабрь 2023 года.

Истец указывает, что 30.01.2024 в отношении КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии должностным лицом Госавтоинспекции ОМВД России «Моргаушский» составлены протоколы 21 АА № 007744 и 21 АЛ № 007745, где допущены нарушения, а именно - 16.12.2023 года в 03 ч. 00 мин. на участке с км 18 + 399 м по км 22 + 446 м автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения «Аликово-Ишаки» в Моргаушском муниципальном округа Чувашской Республики в нарушение пункта 8.2 ГОСТ Р 50597-2017 на покрытии проезжей части допущено формирование полос рыхлого (не обработанного ПГМ) снега шириной до 1.2 м. толщиной (высотой) 10 см и 16.12.2023 года в 03 ч. 00 мин. на участке с км 0 + 000 м по км 17 + 500 м автомобильной дороги общего пользования «Авданкасы - Моргауши - Козьмодсмьянск» в Моргаушском муниципальном округе в нарушение пункта 8.2 ГОСТ Р 50597-2017 на покрытии проезжей части допущено формирование полос рыхлого (не обработанного ПГМ) снега шириной до 1,2 м, толщиной (высотой) 9 см.

Постановлением от 21.02.2024 мирового судьи судебного участка № 7 Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики   по делу об административном правонарушении № 5-90/2024/7  КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии привлечено к адинистративной ответственности по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 100 000 рублей

Уплатив платежным поручением №118724 от 06.05.2025  штраф в размере 100 000 руб., КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии обратилось с требованиями к  ООО «Дортех»  с требованием о взыскании  убытков, ссылаясь на ненадлежащее исполнение обязательств ООО «Дортех» в рамках контракта  от 17.10.2022  № 177/22.   

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 названного кодекса.

Статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб).

В пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» даны следующие разъяснения. По делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику. Государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно пункту 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования.

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (статья 722 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

Согласно статье 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. В пункте 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» разъяснено, что условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду. Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (абзац первый статьи 431 ГК РФ). Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора (системное толкование). Толкование условий договора осуществляется с учетом цели договора и существа законодательного регулирования соответствующего вида обязательств. 

Согласно статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Судом в постановлении от 21.02.2024 установлено несоблюдение  требований по обеспечению безопасности дорожного движения  при содержании автодороги на участке автомобильной дороги Аликово-Ишаки Моргаушского муниципального округа км 18+339 - км 22+445 и участка автомобильной дороги Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск км 0+000 - км 17+500, а именно 16.12.2023 в 03 час. 00 мин и в 03 час. 11 мин. во время снегопада (допущено на покрытии проезжей части рыхлого снега (не обработанного ПСС) толщиной (высотой) 10 и 9 см соответственно, в нарушение Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (TP ТС 014/2011), подпункты б, в пункта 13.1, пункт 13.9 статьи 3; ГОСТ 33181-2014 пункты 5.1. 7.1; ГОСТ 33220-2015 пункт 10.1; ГОСТ Р 50597-2017 пункт 8.2.

Согласно пункту 5.1.16 контракта Подрядчик (ответчик) обязан осуществлять ежедневный (без исключения выходных и праздничных дней) осмотр состояния автодорог с ведением Журнала ежедневных осмотров. Подрядчик обязан ежедневно, а при неблагоприятных, особо неблагоприятных погодных условий (перечень неблагоприятных погодных условий и особо неблагоприятных погодных условий - согласно ГОСТ Р 59434-2021) и в период весеннего паводка - круглосуточно, производить патрулирование и постоянное наблюдение за состоянием дорог с целью принятия оперативных мер но предупреждению возможных причин ограничения и прекращения движения, дорожно-транспортных происшествий, устранения мелких повреждений элементов автодорог и ликвидации возникших препятствий для движения.

В соответствии с пунктом 3.4 ГОСТ Р 59434-2021 под особо неблагоприятными погодными условиями понимается состояние погоды, при котором под действием метеорологических факторов состояние поверхности автомобильной дороги, условия взаимодействия участников дорожного движения с автомобильной дорогой и ее восприятие водителями изменяется настолько, что движение становиться затрудненным, несет прямую угрозу безопасности участников дорожного движения и без специальных мер по защите дорог от воздействия метеорологических факторов может быть прервано.

К особо неблагоприятным погодным условиям относят: осадки в виде дождя и/или снегопада интенсивностью более 0.1 мм/мин. ветер со скоростью более 20 м/с, метель со скоростью ветра более 9 м/с, туман с метеорологической дальностью видимости менее 200 м, температура воздуха в тени летом - более 40°С, зимой - менее минус 40°С (примечание к п. 3.4 ГОСТ Р 59434-2021).

Как следует из распечатки информации ЦДС КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог Чувашской Республики в период с 18 час. 00 мин. 15.12.2023 по 08 час. 00 мин. 16.12.2023 прошли осадки в виде снега при скорости ветра от 7 до 12 м/с. (л.д.94-95) Также согласно распечатке прогноза возможных чрезвычайных ситуаций на территории Чувашской Республики на 15 и 16 декабря 2023 года прогнозировались осадки в виде сильного снега при ветре в от 5 до 10 м/с (по прогнозу от 15.12) или при скорости ветра от 7 до 12 м/с (по прогнозу от 16.12) (л.д.96-101).

Согласно абз. 3 раздела 4 описания объекта закупки на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования региональною и межмуниципального значения в Алатырском. Аликовском. Вурнарском. Ибресинском, Канашском, Красночетайском. Моргаушском, Порецком, Ядринском районах и Шумерлинском муниципальном округе Чувашской Республики в 2023-2024 гг., являющегося приложением №2 к Государственному контракту № 177/22 от 17.10.2022 выполнение работ по содержанию автомобильных дорог должны проводиться в соответствии с приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. №402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»: ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» и нормативно-техническими документами.

Приложением № 1 к Контракту «Требования к показателям, характеризующим содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике» установлены показатели и допустимый уровень к содержанию автодорог для достижения показателей, в том числе:

Зимний период: Проезжая часть.

П. 2.1 Рыхлый (талый) снег на проезжей части, толщиной не более, см. - допустимо Рыхлый снег - 2 см, талый - 4 см для автодорог категории ТБ, ТВ; для категории ТА - 1 (2) см. - допустимый уровень.

П. 2.2. Срок ликвидации зимней скользкости с момента образования и уборка снега с момента окончания снегопада:  группа ТА - 4 часа,  группа ТБ - 5 часов.

В соответствии с пунктом 8.2 ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» во время снегопада и (или) метели и до окончания снегоочистки, на проезжей части дорог категорий IA-II1 допускается наличие рыхлого (талого) снега толщиной не, более 1 (2) см, на дорогах категории IV - не более 2 (4) см, на всех группах улиц - 5 см.

Автомобильная дорога «Авданкасы - Моргауши - Козьмодемьянск (до границы Республики Марий Эл)» с км 0+000 по км 16+300 относится к IV категории, а с км 16+300 по км 37+609 - к III категории. Автомобильная дорога «Аликово-Ишаки» с км 6+040 по км 31+470 относится к III категории.

Согласно протоколу документального обследования  от 16.12.2023 обследование проведено в период с 03 час. 11 мин. 16.12.2023 по 03.час. 25 мин. на автодороге «Авданкасы - Моргауши – Козьмодемьянск» на км 0+000- км 17+500 (слева, справа) во время снегопада (метели) на покрытии проезжей части дороги имеются полосы рыхлого снега шириной до 1,2 м, толщиной 9 см (л.д.126-127).

Согласно протоколу документального обследования  от 16.12.2023 обследование проведено в период с 03 час. 00 мин. 16.12.2023 по 03.час. 09 мин. на автодороге «Аликово-Ишаки» на км 18+399- км 22+446 (слева, справа) во время снегопада (метели) на покрытии проезжей части дороги имеются полосы рыхлого снега шириной до 1,2 м, толщиной 10 см (л.д.128-129).

Из представленных ответчиком журналов  производства работ следует, что на спорных участках автомобильных дорог произведены работы, в том числе 16.12.2023 на участке автодороги «Аликово - Ишаки» с км 18+381 - км 23+180 произведена россыпь ПСС в количестве 20 тн, произведена очистка проезжей части от снега, очистка обочин от снега, работы проведены с 06 час. 00 мин. по 12 час. 30 мин.; на участке автодороги «Авданкасы - Моргауши - Козьмодеянск» с км 0+000 -км 37+609 произведена россыпь ПСС в количестве 100 тн, произведена очистка проезжей части от снега, очистка обочин от снега, работы проведены с 03 час. 20 мин. по 14 час. 30 мин. (л.д.56-63).

При этом из указанных журналов производства работ не следует, что работы по расчистке дорог проводились также 15.12.2023 при наличии соответствующих погодных условиях с 18 час. 00 мин. 15.12.2023 по 08 час. 00 мин. 16.12.2023 в виде снега.

Таким образом,  факт ненадлежащего содержания дорог в виде превышения толщины рыхлого (талого) снега на проезжей части подтверждается постановлением по делу об административном правонарушении от 21.02.2024 по делу №5-90/2024/7 (л.д.48), протоколами инструментального обследования,  актами о проведении постоянного рейда, фототаблицей (л.д.126-133, 135-136).

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу об обоснованности исковых требований о взыскании с ООО «Дортех» убытков в размере 100 000 руб.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ООО «Дортех» и подлежит взысканию в федеральный бюджет.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дортех» в пользу казенного учреждения Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики 100 000 (Сто тысяч) рублей убытков.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дортех» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Чувашской Республики-Чувашии в течение месяца с момента его принятия.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья

А.М. Краснов