АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А83-13969/2021

24 марта 2022 года

город  Симферополь

 

Резолютивная часть решения оглашена 17 марта 2022

Решение в полном объеме изготовлено 24 марта 2022

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Можаровой М.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению 

Акционерного общества «Транспортные технологии» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к Федеральному государственному унитарному предприятию «Крымская железная дорога» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

при участии в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: АО "АБ "РОССИЯ"

 о взыскании денежных средств,

с участием представителей:

от истца – ФИО2, представитель по доверенности № 2 от 10.01.2022 г.;

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности № 207 от 11.02.2021 г. сроком до 31.12.2021 г.;

от третьего лица – не явились

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Транспортные технологии» (далее по тексту – АО «Транспортные технологии», Общество, истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Федеральному государственному унитарному предприятию «Крымская железная дорога» (далее по тексту – ФГУП «КЖД», Предприятие, ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в размере 179 540,16 руб. проценты за пользование денежными средствами в размере 2 175,39 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины.

Определением от 01.07.2021 г. суд принял исковое заявление в порядке упрощенного производства.

21.07.2021 в суд от ответчика поступил отзыв на исковое заявление и ходатайство о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

22.07.2021 от истца поступило заявление об уточнении исковых требований, согласно которого, истец просит взыскать с ответчика убытки (командировочные расходы) в сумме 179 540,16 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 4 017,52 руб., которое судом принято в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)

Определением от 13.08.2021 г. суд перешел к рассмотрению заявления по общим правилам искового производства, предварительное судебное заседание назначено на 05.10.2021 г.

Определением от 05.10.2021 г. суд в порядке, предусмотренном статьей 137 АПК РФ, перешел к судебному разбирательству, привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора – Акционерное общество «АБ «РОССИЯ» (далее по тексту – АО «АБ «Россия», Банк) и отложил судебное заседание по делу на 23.11.2021 г. в связи с необходимостью предоставления сторонами дополнительных доказательств.

Далее судебные заседания неоднократно откладывались. 

В судебное заседание 17.03.2022 представитель третьего лица в судебное заседание не явился.

В соответствии с ч. 1 ст. 123 АПК РФ, лица, участвующие в деле и иные участники судебного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия, арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном АПК РФ, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся процессе.

В пункте 15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» разъяснено, что извещение является надлежащим, если в материалах дела имеются документы, подтверждающие направление арбитражным судом лицу, участвующему в деле, копии первого судебного акта по делу в порядке, установленном статьей 122 АПК РФ, и ее получение адресатом (уведомление о вручении, расписка, иные документы согласно части 5 статьи 122 АПК РФ), либо иные доказательства получения лицами, участвующими в деле, информации о начавшемся процессе (часть 1 статьи 123 АПК РФ), либо документы, подтверждающие соблюдение одного или нескольких условий части 4 статьи 123 АПК РФ.

Кроме того, в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 121 АПК РФ суд разместил информацию о совершении всех процессуальных действий по делу на сайте Арбитражного суда Республики Крым в информационно - телекоммуникационной сети Интернет www.crimea.arbitr.ru.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что третье лицо надлежащим образом уведомлено о времени и месте судебного заседания. 

Руководствуясь положениями статьи 156 АПК РФ, суд определил рассмотреть дело в отсутствие представителя третьего лица.

Представитель истца в судебном заседании на удовлетворении исковых требований настаивала в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражала в полном объеме по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Выслушав представителей сторон, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению, исходя из следующего. 

Так, судом установлено, что 22.09.2020 между Акционерным обществом «Транспортные технологии» (Исполнитель) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Крымская железная дорога» (Заказчик) заключен договор на проведение капитального ремонта тягового подвижного состава в объеме СР от 22.09.2020 № 517-ДТ/20 (идентификационный номер закупки 201910215778391020100100260013317000), в редакции дополнительного соглашения № 1  от 18.11.2020, дополнительного соглашения № 2 от 14.12.2020, дополнительного соглашения № 3 (далее – Договор).

В соответствии с п. 1.1. Договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению капитального ремонта тягового подвижного состава в объеме СР тепловозам серии 2ТЭ116 заводской № 1604,1591,1171 (инвентарные № 16828782, 16828790, 16828766, 16828774, 16828436, 16828444) (далее – Объекты).

Согласно п. 1.2. Договора объем услуг, предусмотренный в п. 1.1. Договора и стоимость определяется Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

В соответствии с п. 1.3. Договора требования к проведению капитального ремонта тягового подвижного состава в объеме СР указаны в Техническом задании (Приложение № 2 к Договору), являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Согласно п. 2.2. Договора Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению среднего ремонта тепловозов 2ТЭ116 (6 секций) в срок не более 55 календарных дней, с момента подписания формы Акта сдачи-приемки ТПС в ремонт (Приложение № 5 к Договору). Согласно п. 6 Технического задания (Приложение № 2 к Договору) период проведения работ с момента заключения Договора и до 31.12.2020. 

В соответствии с п. 2.3. Договора в случае, если объем выполненных работ согласно Технического задания (приложение № 2 к Договору) не соответствует заявленному, Исполнитель вправе оставить объект ремонта до согласования объема, стоимости и сроков выполнения работ. 

В соответствии с п. 3.1. Договора (в редакции дополнительного соглашения № 2 от 14.12.2020) цена Договора включает в себя все расходы, производимые Исполнителем в процессе выполнения работ, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, иные платежи, выплаченные или подлежащие выплате, и составляет 189 832 763,98 руб., в том числе НДС 20% - 31 638 794,00 руб.

В качестве обеспечения исполнения Договора Обществом была предоставлена банковская гарантия АО «Акционерный Банк «Россия» от 21.09.2020 № ЭБГ-00488-2020 (далее – Гарантия).

Заказчиком 31.12.2020 принято решение об одностороннем отказе от исполнения Договора за № ГА-67.

Решение от 31.12.2020 № ГА-67 об одностороннем отказе от исполнения Контракта 13.01.2021 направлено Предприятием на адрес электронной почты Истца, указанный в Договоре: info@trth.ru и размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в разделе «Дополнительная информация». 13.01.2021 направлено почтой заказным письмом с уведомлением на адрес, указанный в Договоре:105066, 

<

...>, этаж 1 помещение IV ком 1-17 (почтовый идентификатор АО «Почта Крыма» РПО № 29505154036646)

25.01.2021 истец получил уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора № ГА-67 от 31.12.2020. 

29.01.2021 АО «Акционерный Банк «Россия» (далее – Банк, Гарант) уведомил Истца о получении со стороны Ответчика требования о выплате суммы из банковской гарантии в размере 179 540,16 руб. К уведомлению от 29.01.2021 № 00-1188-исх было приложено требование от 28.01.2021 № ГА-21 (№ 2 от 28.01.2021) Ответчика об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии от 21.09.2020 № ЭБГ-00488-2020.

Согласно требованию от 28.01.2021 № ГА-21 (№ 2 от 28.01.2021) (далее - Требование № 2 от 28.01.2021) ФГУП «КЖД», являясь Бенефициаром по Гарантии, предъявила Гаранту требование об осуществлении уплаты денежной суммы по Гарантии за командировочные расходы (убытки), в размере 179 540,16 руб. 

В качестве обоснования предъявления требований по выплате по банковской гарантии, ФГУП «КЖД» указало на нарушение Обществом срока выполнения работ по Контракту, что в свою очередь явилось основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта со стороны Заказчика (ответчика).

К требованию № 2 от 28.01.2021 Предприятием приложен расчет убытков (возникшие в период с ноября 2020 года по 25.12.2021), понесенных ОП «Дирекцией по эксплуатации и ремонту подвижного состава» ФГУП «КЖД», в результате ненадлежащего исполнения договорных обязательств контрагентом АО «Транспортные технологии» по Договору № 517-ДТ/20 от 22.09.2020 и авансовые отчеты.

В соответствии с заключенным между Гарантом и АО «Транспортные технологии» соглашением о предоставлении банковской гарантии № ЭБГ-00488-2020 от 21.09.2020, Истец осуществил возмещение денежных средств, уплаченных Банком по Гарантии от 21.09.2020 № ЭБГ-00488-2020 в пользу банка, что подтверждается платежным поручением № 32 от 02.02.2021.

Истец просит взыскать с ответчика денежную сумму в размере 179 540,16 руб. в качестве убытков, указывая на то, что Предприятием указанная сумма была удержана по банковской гарантии незаконно.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал, указывая, что отказался от исполнения Договора в соответствии с положениями статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), соответственно Предприятие имеет право на возмещение убытков.

Согласно положениям статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

Согласно положениям статьи 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Заключенный между сторонами договор является по своей правовой природе договором подряда, отношения по которому регулируются положениями главы 37 ГК РФ с особенностями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон № 44-ФЗ). 

Как указано в статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии со статьей 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В соответствии с положениями статьи 708 ГК РФ, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков (ч. 3 ст. 708 ГК РФ).

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Как указано в части 2 статьи 405 ГК РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано Законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ). 

В силу части 3 статьи 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

Пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ установлено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть  осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). 

Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (пункт 2 статьи 450.1 ГК РФ). 

Частью 14 статьи 34 Закона № 44-ФЗ установлено, что в контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 настоящего Федерального закона. 

В силу частей 8 и 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством; заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце 2 пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах», и пункту 4 статьи 421 ГК РФ, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано обязательными для сторон правилами, установленными законом или иными правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения (статья 422 ГК РФ). В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

Как установлено в статье 715 ГК РФ, заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (статья 717 ГК РФ).

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает разные последствия отказа заказчика от исполнения договора подряда.

Принимая решение о взыскании денежных средств по гарантии, а именно расходов на командировочные расходы, Предприятие ссылается на то, что указанные расходы явились убытками ФГУП «КЖД».

Согласно пункту 1 статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

В силу пункта 2 статьи 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства (пункт 1 статьи 393 ГК РФ).

Как разъяснено в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации).

 Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 7), в состав убытков согласно статьям 15, 393 ГК РФ входят реальный ущерб и упущенная выгода. 

Под реальным ущербом понимаются расходы, которые кредитор произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение его имущества. Упущенной выгодой являются неполученные кредитором доходы, которые он получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. Основанием для удовлетворения требования о взыскании убытков является совокупность условий: факт их причинения, документально подтвержденный размер убытков и наличие причинно-следственной связи между понесенными убытками и нарушением.

Как разъяснено в пункте 12 Постановления Пленума ВС РФ № 7, по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). 

Как следует из пункта 5 Постановления Пленума № 7, по смыслу статей 15 и 393 ГК РФ кредитор представляет доказательства, подтверждающие наличие у него убытков, а также обосновывающие с разумной степенью достоверности их размер и причинную связь между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником и названными убытками; должник вправе предъявить возражения относительно размера причиненных кредитору убытков и представить доказательства, что кредитор мог уменьшить такие убытки, но не принял для этого разумных мер (статья 404 ГК РФ). Отсутствие вины в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). 

При этом, суд отмечает, что право на возмещение убытков возникает у заказчика только при условии, что отказ от исполнения договора подряда вызван нарушением  Подрядчиком условий договора (ст. 715, 723 ГК РФ).

При этом, истец ссылается на недействительность (незаконность) одностороннего отказа ФГУП «КЖД» от исполнения Договора.

Таким образом, для принятия решения о легитимности удержания соответствующих средств в качестве убытков следует дать оценку одностороннему отказу от Договора Заказчика.

В статье 65 АПК РФ указано, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 АПК РФ).

В соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Как уже указывалось судом, согласно п. 6 Технического задания (Приложение № 2 к Договору) период проведения работ с момента заключения Договора и до 31.12.2020. 

В соответствии с п. 2.1. Договора работы (услуги) по Договору были начаты Исполнителем после получения тепловозов от Заказчика (акты сдачи-приемки ТПС в ремонт за № 1 от 30.09.2020, № 2 от 13.10.2020 и № 3 от 13.10.2020).

В ходе выполнения работ и разборки секций тепловозов серии 2ТЭ116 Исполнителем были выявлены части с ненормальным износом, требующие (для последующей эксплуатации тепловозов) обязательного проведения ремонта с заменых отдельных деталей, которые не были предусмотрены условиями Договора и Техническим заданием (приложение № 2 к Договору) и которые выходили за рамки работ (услуг) предусмотренные вышеуказанными нормативными документами. 

Как указано в пункте п.5.2. Договора, если в процессе разборки ремонтируемых объектов выявляются дополнительно части с ненормальным износом (коленчатый вал дизеля, блок дизеля, рама тележки тепловоза, ось колесной пары, центр колесный, зубчатое колесо колесной пары), составляется Акт о недостающих узлах и скрытых дефектах формы (Приложение № 6 к Договору. При этом сроки выполнения работ и стоимость работ определяются дополнительным соглашением Сторон. Срок ремонта, установленный п.2.2. Договора, приостанавливается на время согласования дополнительного соглашения с момента направления уведомления в адрес Заказчика до момента   подписания дополнительного соглашения обеими Сторонами, либо получения Исполнителем отказа Заказчика в проведении дополнительных работ».

Как указывает истец, руководствуясь п. 2.3 и п. 5.2. Договора Исполнитель письмом за №216/08-01 от 14.10.2020 уведомил Заказчика о выявлении частей с ненормальным износом и направил приглашение на проведение совместного осмотра тепловозов, составления дефектной ведомости и оформления Акта о недостающих узлах и скрытых дефектах по форме Приложение № 6 к Договору. Так же в данном письме Исполнитель уведомил Заказчика о приостановке выполнения работ по Договору.

Заказчик письмом № 3198/ДТ от 21.10.2020 подтвердил о направлении своих представителей на приемку проведение совместного осмотра тепловозов, составления дефектной ведомости и оформления Акта о недостающих узлах и скрытых дефектах по форме Приложение № 6 к Договору. 

По результатам приемки был составлен двухсторонний Акт №1 от 23.10.2020 о недостающих узлах и скрытых дефектах. Письмом № 229/08-01 от 26.10.2020 Исполнитель уведомили Заказчика о составлении вышеуказанного акта и письмом №239/08-01 от 28.10.2020 направил Заказчику информацию (в целях принятия решения о проведении дополнительных работ (услуг) о готовности выполнить дополнительные работы (услуги), не предусмотренные условиями Договора, а также их стоимость.

В дополнение к ранее направленному письму исх. № 216/08-01 от 14.10.2020 письмом от 26.10.2020 № 237/08-01 Исполнитель уведомил Заказчика о том, что специалистами ремонтного предприятия, после дополнительного освидетельствования (дизель № 949 тип 1А-9ДГ) выявлены части с ненормальным износом требующие обязательного проведения ремонта с заменой отдельных деталей, для последующей нормальной эксплуатации тепловозов. Данный вид работ также не был предусмотрен условиями Технического задания (Приложения № 2 к Договору) и Договором. Данным письмом, на основании п. 5.2. Договора Исполнитель направил приглашение Заказчику на проведение совместного осмотра, составления дефектной ведомости и оформления Акта о недостающих узлах и скрытых дефектах по форме Приложение № 6 к Договору. 

В связи с отсутствием ответа от Заказчика на письмо Исполнителя от 26.10.2020 № 237/08-01 и не направлении своих специалистов на проведение совместного осмотра, составления дефектной ведомости и оформления Акта о недостающих узлах и скрытых дефектах по форме Приложение № 6 к Договору, письмом от 09.11.2020 № 252/08-01 Исполнитель уведомил Заказчика о том, что специалистами  ремонтного предприятия проведена разборка дизеля, с соответствующей фотофиксацией, и выявлены недостающие узлы и скрытые дефекты (Приложение № 1 к настоящему письму) и повторно попросил принять решение в отношении ремонта и направить своих представителей для оформления  Акта о недостающих узлах и скрытых дефектах по форме Приложение № 6 к Договору, а также повторно сообщил Заказчику о том, что Исполнитель своими письмами за № 216/08-01 от 14.10.2020 и за № 246/08-01 от 05.11.2020, уведомлял Заказчика о приостановке работ по Договору до принятия Заказчиком решения по Договору. 

В ответ на письмо от 28.10.2020 № 239/08-01 Заказчик письмом №3411/ДТ от 02.11.2020 предложил Исполнителю использовать снятые с других тепловозов запчасти Заказчика (доставка запчастей планировалась на 08.11.2020 с прибытием на завод в г. Коломна – 10.11.2020). 

Исполнитель письмом № 246/08 от 05.11.2020 согласился с данными предложением и уведомил Заказчика, что приемка передаваемых запасных частей с последующей их установкой и сохранением гарантийных обязательств в рамках исполнения Договора, допускается только после подписания Акта дефектовки, проведения очистки, разборки, визуального осмотра, дефектоскопии данных запчастей, а также уведомил Заказчика о том, что в случае непригодности передаваемых запчастей, будет продолжаться вынужденный простой работ (услуг) по Договору. 

Кроме того, Исполнитель уведомил Заказчика о том, что ФГУП «КЖД» не ответило на письмо за № 237/08-01 от 26.10.2020 и не направило своих представителей для составления Акта о недостающих узлах и скрытых дефектах (по форме Приложение № 6 к Договору), а также повторно уведомил Заказчика о том, что работы приостановлены до принятия Решения Заказчиком и оформления дополнительного соглашения. 

Письмом от 06.11.2020 № 3444/ДТ Заказчик уведомил Исполнителя о номенклатуре узлов, направленных для ремонта дизеля локомотива серии 2ТЭ116 № 1171.

В ответ на письмо Исполнителя № 246/08 от 05.11.2020 Заказчик письмом от 09.11.2020 № 3671/ДТ уведомил Исполнителя о том, что запасные узлы, указанные в письме от 06.11.2020 № 3444/ДТ, передислоцированы в адрес Исполнителя и попросил произвести по данным узлам визуальный осмотр и применение современных средств дефектоскопии. Результаты (протоколы) по дефектоскопии узлов, направить сопроводительным письмом на адрес электронной почты указанный в письме.

По результатам совместной со специалистом Заказчика дефектовки поступивших запчастей, составлен Акт №1/2 от 12.11.2020 согласно, которого основная часть поступивших от Заказчика запчастей признана непригодной для установки на тепловоз. 

Данный Акт был направлен Заказчику письмом № 256/08-01 от 12.11.2020, в котором повторно сообщили информацию (в целях принятия решения о проведении дополнительных работ (услуг)) о готовности выполнить дополнительные работы (услуги), не предусмотренные условиями Договора. 

Своим письмом от 28.10.2020 № 239/08-01 Исполнитель в очередной раз сообщил Заказчику, что работы по Договору приостановлены до принятия решения Заказчиком и оформления дополнительного соглашения.

В связи с тем, что при проведении разборки секций тепловоза серии 2ТЭ116 № 1604 специалистами ремонтного предприятия выявлены части с ненормальным износом (установленные дизеля № 907 тип 1А-9ДГ) требующие обязательного проведения ремонта с заменой отдельных деталей, для последующей нормальной эксплуатации тепловозов. Данный вид работ также не был предусмотрен условиями Технического задания (Приложения № 2 к Договору) и Договором. Исполнитель письмом от 12.11.2020 № 255/08-01 пригласил Заказчика на приемку дизелей тепловоза серии 2ТЭ116 № 1604 и уведомил Заказчика о приостановке работ по Договору.

24.11.2020 года по результатам приемки были составлены двухсторонние акты № 2 от 24.11.2020 и № 3 от 24.11.2020 о недостающих узлах и скрытых дефектах на тепловозах серии 2ТЭ116 № 1171 и № 1604.

Письмами от 27.11.2020  за № 273/08-01 и за № 274/08-01 Исполнитель уведомили Заказчика о составлении  вышеуказанных  актов  и направил Заказчику информацию (в целях принятия решения о проведении дополнительных работ (услуг) о готовности выполнить дополнительные работы (услуги)), не предусмотренные условиями Договора, их стоимость, а также уведомил о приостановке выполнения работ по Договору, на основании п. 2.3 и п. 5.2. Договора до принятия Заказчиком решения и заключения между сторонами дополнительного соглашения.

Заказчик в ответ на полученное письмо от 26.10.2020 № 229/08-01 письмом от 20.11.2020 № 790-НТЗ/20 сообщил, что коленчатые валы существенно дешевле у ООО «ЛОКО СЕРВИС» и предложил приобрести необходимые коленчатые валы с установкой на дизеля тепловозов серии 2ТЭ116 № 1171 (секции А и Б) у ООО «ЛОКО СЕРВИС».

Исполнитель направил запрос в указанную Заказчиком организацию (письмо от 20.11.2020 № 265/08-01), однако ответа со стороны ООО «ЛОКО СЕРВИС» не последовало.

Исполнитель письмом от 27.11.2020 № 276/08-01 уведомил Заказчика о том, что «ЛОКО СЕРВИС» не ответил на запрос в свою очередь Исполнителем получено коммерческое предложение от ООО ПКФ «Ремдизельсервис» (письмо от 24.11.2020 исх.№ 496), которое сопоставимо со стоимостью, предложенной Исполнителем.  

Письмом от 27.11.2020 № 275/08-01 в целях ускорения сроков проведения ремонта тепловоза серии 2ТЭ116 № 1171 Исполнитель просил согласовать переустановку коленчатого вала № 8-553 и главного генератора, демонтированных с дизеля № 1551 тепловоза 2ТЭ116 № 1604 секция Б на дизель № 1137 тепловоза 2ТЭ-116№ 1171 секция А.

Ввиду необходимости выполнения дополнительных работ Исполнитель повторно обращался (письмом № 286/08-01 от 09.12.2020) к Заказчику с просьбой о согласовании использования старогодних (бывших в эксплуатации) коленчатых валов при ремонте дизелей и получил 14.12.2020 положительный ответ письмом № ГА-44 (через 5 дней).

Письмом от 09.12.2020 № 287/02-12 Исполнитель на основании п. 6.3. Договора просил согласовать замену сборочных единиц, агрегатов, электрических машин и другого оборудования, в связи с их не ремонтопригодности. 

С 27.11.2020 проходило согласование редакции дополнительного соглашения к Договору на дополнительные работы. Письмом № 4088/ДТ от 08.12.2020 Заказчик обвинил Исполнителя о том, что Исполнитель не подписывает проект дополнительного соглашения, направленного 04.12.2020. 

Письмом №285/08-01 от 09.12.2020 Исполнитель сообщил Заказчику, что в направленном 04.12.2020 Заказчиком проекте дополнительного соглашения отсутствовали два вида дополнительных работ и это соглашение не соответствует заявленным объемам. Этим же письмом Исполнитель подготовил полную редакцию дополнительного соглашения и направил его Заказчику и только 14 декабря (через 5 дней) Заказчик подписал со своей стороны дополнительное соглашение №2 о включении дополнительных работ в объем выполняемых работ по Договору без увеличения сроков выполнения работ.

Кроме того, ответчик ссылается на просрочку выполнения ремонта тепловоза с заводским № 1591(третий тепловоз): 

Письмом за № 260/08-01 от 16.11.2020 Исполнитель первый раз пригласили Заказчика на приемку 25-26 ноября 2020. Однако, в последствии из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 был вынужден перенести дату приемки на 7-10 декабря 2020 года, о чем известил Заказчика письмом № 271/08-01 от 24.11.2020. Из-за повторного распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Исполнитель был вынужден повторно перенести дату, о чем уведомил Заказчика письмом за № 282/08-01 от 07.12.2020.  Данные обстоятельства ответчиком не оспорены.

25.12.2020 (письмом №308/08-01) Исполнитель пригласил Заказчика на приемку 29-30.12.2020 Представитель Заказчика не прибыл. 

30.12.2020 (письмом №312/08-01) Исполнитель повторно пригласил Заказчика на 12-13 января 2021. Представитель Заказчика не прибыл.  

Учитывая завершение срока действия Договора, письмом № 309/08-01 от 26.12.2020 Исполнитель сообщил Заказчику о том, что необходимо продлить действие Договора до 30.03.2020 в связи с затягиванием со Стороны Заказчика согласования выполнения дополнительных работ (услуг). Заказчик оставил данное письмо без ответа.

Ввиду отсутствия ответа Заказчика на ранее направленные письма № 260/08-01 от 16.11.2020, № 308/08-01 от 25.12.2020, № 312/08-01 от 30.12.2020 о вызове представителей ФГУП «КЖД» для совместного осмотра дизелей тепловоза № 1591, составления дефектной ведомости и оформления Акта о недостающих узлах и скрытых дефектах по форме Приложения № 6 к Договору, 13.01.2021 года на ремонтном предприятии в г. Коломна произведена односторонняя приемка, осмотр с фото и видеофиксацией и составлены Акты № 4 и № 5. Согласно данных актов, требуется проведение дополнительных работ, не предусмотренных Договором.

Письмом от 14.01.2021 № 05/08-01 исполнитель информировал Заказчика о составлении вышеуказанных актов и уведомил о приостановке работ по Договору. 

Письмом №10/08-01 от 20.01.2021 Исполнитель информировал Заказчика о ходе выполнения ремонтных работ на трех тепловозах по состоянию на 20.01.2021. Никакой информации от Заказчика не поступало.

31.12.2020 Заказчиком принято оспоримое решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Исполнитель, руководствуясь условиями Договора (п. 2.3, п.5.2), приостановил выполнение работ и направил Заказчику соответствующие уведомления:

- уведомление от 14.10.2020г. № 216/08-01;

- уведомление от 05.11.2020г. № 246/08-01;

- уведомление от 28.10.2020г. № 239/08-01;

- уведомление от 09.11.2020г. № 252/08-01;

- уведомление от 12.11.2020г. № 255/08-01;

- уведомление от 12.11.2020г. № 256/08-01;

- уведомление от 16.11.2020г. № 260/08-01.

Процесс согласования по объему работ, срокам выполнения работ и утверждению стоимости запчастей с ненормальным износом в период с 14.10.2020г. по 14.12.2020 г. составил 60 календарных дней, а по тепловозу серии 2ТЭ116 заводской номер 1591 Заказчиком не согласовано проведение необходимых дополнительных работ, без которых не представляется возможным выполнение работ (услуг) по Договору в полном объеме и надлежащего качества. 

Таким образом, суд соглашается с позицией истца о правомерности приостановления работ на период согласования большой части работ по проведению капитального ремонта тягового подвижного состава в объеме СР тепловозам серии 2ТЭ116 заводской номер № 1604, 1591,1171.

Учитывая тот факт, что в период с 14.10.2020 г. по 14.12.2020 г. проходило неоднократное согласование с Заказчиком объема выполняемых работ, сроков выполнения работ и утверждения конечной стоимости запчастей, которые необходимо было заменить ввиду критического износа – обязательства по оказанию услуг со стороны Исполнителя не представлялось возможным в полном объеме.

Следовательно, суд также соглашается с позицией истца о том, что Заказчик не оказывал содействия для решения вопросов, связанных с оказанием услуг в установленный срок. 

В соответствии с положениями статьи 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 

Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне (часть 2 статьи 328 ГК РФ). 

В силу положений части 3 статьи 405 ГК РФ, должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно статье 406 ГК РФ, кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства. 

Пунктом 10 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, разъяснено, что при несовершении заказчиком действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или существа обязательства, до совершения которых исполнитель государственного (муниципального) контракта не мог исполнить своего обязательства, исполнитель не считается просрочившим, а сроки исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту продлеваются на соответствующий период просрочки заказчика, поскольку подрядчик не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора в соответствии с п. 3 ст. 405, п. 1 ст. 406 ГК РФ, п. 9 ст. 34 Федерального закона 3 44-ФЗ. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что истец дл получения согласования с ответчиком выполнение дополнительных работ, не мог исполнить свои обязательства по Договору. Соответственно, приостановление работ по Договору было осуществлено Исполнителем на законном основании.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» при осуществлении стороной права на одностороннее изменение условий обязательства или односторонний отказ от его исполнения она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и законные интересы другой стороны (пункт 3 статьи 307, пункт 4 статьи 450.1 ГК РФ). Нарушение этой обязанности может повлечь отказ в судебной защите названного права полностью или частично, в том числе признание ничтожным одностороннего изменения условий обязательства или одностороннего отказа от его исполнения (пункт 2 статьи 10, пункт 2 статьи 168 ГК РФ).

В соответствии с положениями пунктов 3, 4 статьи 1 ГК РФ, при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно положениям частей 1, 2 статьи 10 ГК РФ, не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

В силу разъяснений, содержащихся в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

С учетом императивного положения закона о недопустимости злоупотребления правом возможность квалификации судом действий лица как злоупотребление правом не зависит от того, ссылалась ли другая сторона спора на злоупотребление правом противной стороной. Суд вправе по своей инициативе отказать в защите права злоупотребляющему лицу, что прямо следует и из содержания пункта 2 статьи 10 ГК РФ (пункт 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации в Определении Конституционного Суда РФ от 18.01.2011 № 8-О-П, установленный в статье 10 ГК РФ запрет злоупотребления правом в любых формах прямо направлен на реализацию принципа, закрепленного в статье 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации о том, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Кроме того, факт добросовестного исполнения Истцом обязательств по Договору отсутствие вины в просрочке выполнения работ документально установлен Решением № 082/06/104-337/2021-РНП от 01.03.2021 комиссии УФАС по Республике Крым и городу Севастополю. Рассмотрев материалы дела, комиссия УФАС по Республике Крым и городу Севастополю признала доводы и доказательства Исполнителя обоснованными и пришла к выводу о добросовестности и надлежащем исполнении Истцом своих обязательств по Договору и отметила недобросовестное поведение Заказчика.

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что отказ Предприятия от исполнения Договора по статье 715 ГК РФ является недействительным.

Как указано в части 1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ, Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.

 Согласно части 3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

Требования к банковским гарантиям и банкам, выдающим данные банковские гарантии, установлены статьей 45 Закона № 44-ФЗ.

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору истцом предоставлена банковская гарантия, о чем судом уже указывалось выше.

Как указано в статье 368 ГК РФ, по независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом.

Независимые гарантии могут выдаваться банками или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими организациями (пункт 3 статьи 368 ГК РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 370 ГК РФ предусмотренное независимой гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, от отношений между принципалом и гарантом, а также от каких-либо других обязательств, даже если в независимой гарантии содержатся ссылки на них. 

Гарант не вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, вытекающие из основного обязательства, в обеспечение исполнения которого независимая гарантия выдана, а также из какого-либо иного обязательства, в том числе из соглашения о выдаче независимой гарантии, и в своих возражениях против требования бенефициара об исполнении независимой гарантии не вправе ссылаться на обстоятельства, не указанные в гарантии (пункт 2 статьи 370 ГК РФ). 

В соответствии с положениями статьи 374 ГК РФ, требование бенефициара об уплате денежной суммы по независимой гарантии должно быть представлено в письменной форме гаранту с приложением указанных в гарантии документов. В требовании или в приложении к нему бенефициар должен указать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по независимой гарантии.

В соответствии с положениями статьи 375 ГК РФ по получении требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить об этом принципала и передать ему копию требования со всеми относящимися к нему документами. Гарант должен рассмотреть требование бенефициара и приложенные к нему документы в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения требования со всеми приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим, произвести платеж. Условиями независимой гарантии может быть предусмотрен иной срок рассмотрения требования, не превышающий тридцати дней. 

Гарант проверяет соответствие требования бенефициара условиям независимой гарантии, а также оценивает по внешним признакам приложенные к нему документы (пункт 3 статьи 375 ГК РФ). 

Банковская гарантия является одним из способов обеспечения обязательств. При этом, имущественный интерес бенефициара состоит в возможности получить исполнение максимально быстро, не опасаясь возражений должника, в тех случаях, когда кредитор полагает, что срок исполнения обязательства либо иные обстоятельства, на случай наступления которых кредитор себя обеспечивал, наступили (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.10.2012 № 6040/12).

Вместе с тем, как следует из положений статьи 375.1 ГК РФ, бенефициар обязан возместить гаранту или принципалу убытки, которые причинены вследствие того, что представленные им документы являлись недостоверными либо предъявленное требование являлось необоснованным. 

Получение заказчиком денежных сумм по банковской гарантии в объеме, предусмотренном такой гарантией, не лишает исполнителя права на возмещение убытков в виде разницы между выплаченной суммой и размером имущественных требований, имевшихся у заказчика в соответствии с обеспечиваемым гарантией обязательством.

Данные выводы также нашли свое отражение в пункте 30 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, пункте 16 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о независимой гарантии, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 05.06.2019.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что на основании вышеизложенного командировочные расходы (убытки) в размере 179 540, 16 руб. возникли в рамках исполнения Ответчиком своих обязательств по Договору (в частности п. 6.7. Договора) и во исполнение требований статьи 718 ГК РФ, соответственно с ответчика в пользу истца подлежит взысканию указанная денежная сумма.

Одновременно, истцом заявлены требования о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 4 017,52 руб.

Относительно вопроса о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, суд полагает следующее.

Так, истец, обращаясь с исковыми требованиями, обосновывает их положениями главы 60 ГК РФ, как неосновательное обогащение. Вместе с тем, вышеприведенные нормы гражданского законодательства и судебной практики, указывают на то, что соответствующие нормы гражданского законодательства и судебная практика определяют соответствующие суммы, выплаченные незаконно по банковской гарантии, как убытки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Вместе с тем, как следует из разъяснений, содержащихся в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.05.2007 № 420/07 по делу N А40-41625/06-105-284, начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму убытков не допускается, поскольку и проценты, и убытки являются видами ответственности за нарушение обязательства. По отношению к убыткам проценты, как и неустойка, носят зачетный характер.

Аналогичные выводы содержатся и в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.03.2003 № 10360/02 по делу № А54-2691/99-С9, от 22.10.2002 № 6381/02 по делу № А54-2901/98-С2-С7

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что исковые требования истца в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами удовлетворению не подлежат.

Разрешая вопрос о распределении судебных расходов, суд исходит из следующего.

В соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Так, истцом при рассмотрении дела изменены исковые требования в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в части увеличения таких требований.

Как следует из пункта 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств.

Так, с учетом частичного удовлетворения исковых требований, принимая во внимание принятие судом увеличения исковых требований, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы в виде оплаченной государственной пошлины в сумме 6 308,58 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Акционерного общества «Транспортные технологии» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) убытки в сумме 179 540,16 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 308,58 руб.

В остальной части иска – отказать.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 56,00 руб.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, 

<

...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, 

<

...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления суда апелляционной инстанции. 

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Судья                                                                        М.Е. Можарова