ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г.Москва                                                                                               А40-204271/23-113-1638

21 июня 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 20 июня 2024 г.

Полный текст решения изготовлен 21 июня 2024 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

председательствующего судьи А.Г.Алексеева

при ведении протокола судебного заседания секретарём Торосян М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску ООО «Специализированный застройщик «Спартак» к ООО «Крашмен»,

о взыскании 111 439 232,45 рублей,

при участии:

от истца – ФИО1 по доверенности от 23 октября 2023 г.;

от ответчика – не явился, извещён;

У С Т А Н О В И Л :

Иск заявлен о солидарном взыскании с соответчиков ООО «Крашмен» и ООО «АФТ» в пользу истца неосновательного обогащения в размере 63 836 433,42 рублей по договору от 14 сентября 2020 г. № 12/СЗС/2020 (далее – Договор), заключённому между истцом (заказчик) и ответчиком ООО «Крашмен» (подрядчик), а также договорной неустойки в размере 11 639 273,82 рубля, штрафа в размере 12 228 525,21 рублей, неосновательного обогащения в размере 21 000 000 рублей; кроме того, взыскать с ООО «Крашмен» премию в размере 1 000 000 рублей и неустойки в размере 1 535 000 рублей и истребовании у ООО «Крашмен» имущества на общую сумму 48 630 954 рублей согласно представленному перечню.

Между тем, 15 мая 2024 г. по делу А40-43470/23-123-111 ООО «АФТ» (поручитель) признан банкротом.

Определением от 4 июня 2024 г. исковое заявление по делу А40-204271/23-113-1638 оставлено без рассмотрения в части требований к ООО «АФТ».

Таким образом по настоящему делу рассматривается иск ООО «Специализированный застройщик «Спартак» к ООО «Крашмен» о взыскании с ответчика в пользу истца с учётом принятого судом уточнения в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Арбитражный процессуальный кодекс), неосновательного обогащения в размере 63 735 816,8 рублей по Договору, неосновательного обогащения в размере 21 000 000 рублей, а также договорной неустойки в размере 11 839 273,82 рублей, кроме того возврата премии в размере 1 000 000 рублей и неустойки в размере 1 535 000 рублей, а также истребовании имущества на общую сумму 48 630 954 рублей согласно представленному перечню.

Истец в судебном заседании настаивал на удовлетворении иска.

Ответчик, извещённый о месте и времени судебного заседания надлежащим образом согласно статье 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – Арбитражный процессуальный кодекс), в судебное заседание не прибыл.

Дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле, в порядке статей 122, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса по имеющимся в деле доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришёл следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, Договор заключён на выполнение работ по устройству фасада на объекте строительства «Спортивно-оздоровительного комплекса с гостиницей, автостоянками и инженерными коммуникациями, расположенного по адресу: Москва, Новоясеневский проспект, владение 3».

Общая цена Договора на момент подписания составила 231 565 239,39 рублей, из которых 149 828 812,14 рублей – стоимость СМР (приложение №2 к Договору - Сметный расчёт: строительно-монтажные работы) и 81 736 427,25 рублей – стоимость материалов (приложение №3 к Договору - Сметный расчёт: поставка материалов). При этом часть материалов поставляет заказчик в соответствии с приложением № 6 к Договору - п. 6.1.3 Договора. Финансирование работ заказчиком осуществляется в соответствии с графиком финансирования (приложение № 4 к Договору).

Сроки поставки материалов определяются графиком поставки материалов на объект, согласно которому поставки происходят поэтапно, последняя поставка должна быть произведена 31 мая 2021 г.

В соответствие с п. 5.1.13. Договора стороны согласовали и подписали график выполнения СМР, согласно которому работы выполняются поэтапно, дата завершения последнего этапа – 16 августа 2021 г.

Между истцом (заказчик), ООО «АФТ» (поручитель) и ответчиком (подрядчик) был заключён договор поручительства от 14 сентября 2020 г. № 13/СЗС/2020 (далее –Договор поручительства), согласно условиям которого поручитель обязался отвечать перед заказчиком за исполнение подрядчиком всех обязательств по Договору, включая возврат всех совершенных заказчиком авансовых и иных платежей в случае его расторжения, исполнение гарантийных обязательств, а также компенсации затрат, убытков, уплату штрафов и неустоек в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по Договору. Ответственность поручителя ограничена суммой Договора подряда и составляет 233 065 239,39 рублей.

Ответчиком 15 сентября 2020 г. по акту приёма-передачи принята строительная площадка.

В целях осуществления строительства 20 сентября 2020 г. приказом № 2 было назначено ответственное за организацию строительства и сдачу-приёмку работ лицо – ФИО2

Также сторонами во исполнение Договора заключены ряд дополнительных соглашений к нему:

дополнительное соглашение №1 от 23.09.2020. Предмет: внесение изменений в п.3.3 Договора - возможность расчетов по аккредитиву.

дополнительное соглашение №2 от 24.09.2020. Предмет: внесение дополнений в п. 5.1 Договора - особенности приема, хранения, контроля и учета материалов, предоставленных Заказчиком.

дополнительное соглашение №3 от 16.11.2020. Предмет: поставка дополнительных материалов Подрядчиком на сумму 6 490 865 рублей.

дополнительное соглашение №4 от 20.11.2020. Предмет: выполнение дополнительных работ на сумму 900 000 рублей.

дополнительное соглашение №5 от 18.01.2021. Предмет: поставка дополнительных материалов Подрядчиком на сумму 1 429 421,60 рублей.

дополнительное соглашение №6 от 21.01.2021. Предмет: поставка дополнительных материалов Подрядчиком на сумму 5 085 178,90 рублей.

дополнительное соглашение №7 от 25.03.2021. Предмет: выполнение дополнительных работ на сумму 397 000 рублей.

дополнительное соглашение №8 от 22.06.2021. Предмет: возможность передачи СМР другому подрядчику, с соразмерным уменьшением их стоимости.

Кроме того, заказчик дал согласие на выполнение подрядчиком работ за пределами ранее установленных сроков строительства, при условии завершения подрядчиком закрытия теплового контура до 1.09.2021, выполнения полного объема работ, предусмотренных Договором и дополнительными соглашениями к нему до 1.10.2021, за исключением замечаний, не влияющих на приемку объекта Мосгосстройнадзором. Устранение таких замечаний допускается до 1.11.2021, а именно: замена дефектных стеклопакетов, замена дефектных фиброцементных панелей, окончательная регулировка створок. При соблюдении сроков заказчик выплачивает подрядчику премию в размере до 15 000 000 рублей, причём, заказчик имеет право выплатить ее досрочно, а при нарушении подрядчик обязан вернуть ее и выплатить неустойку в случае просрочки возврата (п.п 4-7).

Подрядчиком 28 октября 2021 г. были выполнены работы по устройству вентилируемого фасада и установке светопрозрачных конструкций на высоте и сданы Застройщику/Техническому заказчику по 23-м из 35-ти актам выполненных работ. Данный факт свидетельствует о ненадлежащей работе руководства подрядчика за соблюдением требований безопасности, невыполнении договорных обязательств (п. 5.1.7, 5.1.11, 8.4 Договора) в части обеспечения безопасного производства работ.

В процессе продолжения строительства навесного вентилируемого фасада подрядной организацией ООО «БиСиДи Уникальные фасады» (ОРГН 5177746360776) после прекращения работ на объекте строительства подрядчиком 11.02.2022 г. часть ранее принятых работ была забракована по причине выявления дефектов и переделана данной организацией. Из представленных документов усматривается, что подрядчик, согласно акту о прекращении работ от 11.02.2022 г. с 11.02.2022 г., прекратил работы на объекте строительства, соответственно фактически положения Договора об устранении выявленного брака (п. 8.7, 9.3.) в последующем им не исполнялись. В этом случае, в соответствии с п. 8.7 Договора застройщик выполнил устранение брака силами нового подрядчика - компании ООО «БиСиДи Уникальные фасады».

Застройщиком 8 апреля 2021 г. параллельно договору с подрядчиком заключил договор № 7/СЗС/21 на устройство фасада (полный комплекс работ).

Письмом ООО «БиСиДи Уникальные фасады» от 14.02.2022 г. в адрес застройщика, с указанной в нём схемой (рис. 1 Узел сборки) и фотографией недостатка (раздел №11, поз. № 11.90), указано, что в соответствии с проектом стадии РД № 12/СЗС/2020-АФТ-КМ (НВС)-Укрепление кляммера клёпкой не позволяет производить регулировку облицовки в плоскости фасада, а работа выполненная (читай предыдущим Подрядчиком на секции 1 м.о. 15-8/В с отм. 10.525 до отм 432.250) имеет брак: «Кривизна монтажа направляющих видна невооружённым глазом см. фото 7».

Согласно п. 13.2.2 Договора при отказе или несвоевременном устранении дефектов подрядчиком заказчик вправе устранить дефекты своими силами и взыскать с подрядчика ущерб в размере 100% стоимости работ по устранению дефектов.

ООО «Крашмэн», при этом, повторно был уведомлен истцом о необходимости передачи части не выполненных работ по монтажу системы навесного фасада, в осях 15-39, В-Д еще письмом от 26.05.2021г. Исх. 50-21/Н.

Согласно договору с новым подрядчиком, работы по договору выполняются ООО «БиСиДи Уникальные фасады» из давальческих материалов.

График, согласованный сторонами в приложении №1 предусматривает передачу заказчиком материалов:

- для устройства светопрозрачных конструкций (с 08.04.2021 по 30.04.2021г.)

- для устройства навесного фасада из панелей Konoshima (с 01.05.2021 по 16.05.2021г.)

- для устройства фасада из клинкерной плитки (с 23.04.2021 по 30.04.2021г.),

Новый подрядчик взял на себя обязательство приступить к монтажу кронштейнов в зоне СПК с 15.04.2021г., если это будет согласовано с ООО «Крашмэн».

При этом, согласно Договору сроки поставки материалов определяются графиком поставки материалов на объект, согласно которому поставки происходят поэтапно, последняя поставка должна быть произведена 31.05.2021 г.

ООО «БиСиДи Уникальные фасады» в адрес ООО «Крашмэн» были выставлены заявки на получение ТМЦ ещё 20.04.2021, а затем 20.05.2021. Ответа от ответчика не последовало.

Согласно данным бухгалтерского учета, по состоянию на 01.08.2023, на складе ООО «Крашмэн» числится давальческих материалов, переданных в ООО «Крашмэн» на сумму в 48 630 954 рубля. При этом, части материалов нет ни на фасаде, ни на складе, в натуре.

Дополнительное соглашение № 9 от 28.06.2021. Предмет: поставка дополнительных материалов подрядчиком на сумму 6 962 771,2 рублей.

Дополнительное соглашение № 10 от 27.08.2021. Предмет: изменение стоимости строительно-монтажных работ (124 612 431,2 рублей) и поставок материалов (87 250 558,99 рублей) с корректировкой стоимости уже выполненных и принятых работ согласно новым единичным расценкам. При этом список работ и поставок материалов остались неизменными.

Дополнительное соглашение № 11 от 19.11.2021. Предмет: выполнение дополнительных работ на сумму 784 269 рублей.

Дополнительное соглашение № 12 от 16.12.2021. Предмет: поставка дополнительных материалов на сумму 2 602 891,2 рублей.

Подрядчик неоднократно допускал просрочки в выполнении работ, о чем заказчик его уведомлял (письма истца №122-20/Н от 29.12.2020 г.; письмо с исх.№05-21/Н от 25.01.2021 г.; письмо с исх.№14-21/Н от 02.02.2021 г., письмо с исх.№29-21/Н от 15.03.2021 г., письмо с исх.№128 от 31.05.2021 г., письмо с исх.№138-21/Н от 28.09.2021 г., письмо с исх.№155-21/Н от 17.11.2021 г. и др.).

Предписанием Мосгосстройнадзора от 8 ноября 2021 г № 7119/21 (дело 35506) выявлены и предписаны к устранению следующие нарушения:

1.           Проектной документацией раздела 10.1 предусмотрено применение сертифицированной навесной фасадной системы с воздушным, зазором с облицовкой клинкерным кирпичом и утеплением минераловатными плитами Роквул Венти Баттс Д толщиной 200 мм, плотностью в 90 кг на метр кубический, однако фактически на объекте применены НФС с воздушным зазором ООО 'Торговый дом ДИАТ' типа СД Т-КХ-СП-ХХ (тех. сеид N 4507-15 (продление за N 6113-20) с облицовкой клинкерной плиткой Stroher с последующей затиркой швов. Класс пожарной опасности - КО, применение которой возможно на зданиях, функционального назначения Ф. 1.2, Ф 3.6 - утепление выполняется по двухслойной системе общей толщиной в 150м.мс внутренний слой Венти Баттс Н толщиной 100 мм, наружный слой Венти Баттс толщиной 50мм, что не соответствует проектной документации;

2.           Стройматериалы, изделия, конструкции и оборудование не отвечают требованиям соответствующих стандартов, и/или технических условий и рабочих чертежей, и/или проектной документации.

3.           Срок исполнения предписания, выданного в порядке ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации - до 13.12.2021г.

При этом, в письме, выполненном на бланке ООО «Крашмэн» от 25.11.2021г. № бн, главный инженер проекта ООО «АФТ» (поручитель), ФИО3, за его подписью и печатью ООО «АФТ», указал, что проектная документация получила положительное заключение экспертизы (раздел 3 шифр 20/15-АР; 20/15-ЭЭ).

Указанное выше письмо от 25.11.2021 было направлено истцу по итогам проверки Мосгостройнадзором хода строительных работ.

Претензией истца исх. 128 от 31.05.2021г. ответчику фиксировались просрочки выполнения работ:

- по этапу 2 светопрозрачные конструкции П. 9 - СОК, Стилобатная часть (1430кв.м.) П. 19, 25, 31 - Закрытие теплового контура Секций N1, 2, 3

П. 20, 26, 32 - Герметизация, установка прижимных планок, декоративных элементов в Секциях N1, 2, 3

Срок окончание по этапу N2 - 83 дня (с 10.03.2021 по 31.05.2021).

- по этапу 3 НВФ П. 36, 37, 38 - Установка утеплителя, наплавляющих профилей и клинкерной плитки в стилобатной части

Срок окончания работ по п. 36 - 30.12.2020г.;

Просрочка выполнения составила 152 дня (с 31.12.2020 по 31.05.2021) Срок окончания по п. 42 - 15.01.2021г.;

Просрочка выполнения поставила 136 дней (с 16.01.2021 по 31.05.2021); Срок окончания работ по п. 47 - 01.02.2021г.;

Просрочка выполнения работ составила 119 дней (с 02.02.2021 по 31.05.2021); Срок окончания работ по п. 52 - 29.01.2021г.

выполнения работ составила 122 дня (с 30.01.2021 по 31.05.2021);

- по этапу 4 п. 57

Срок окончания работ - 19.04.2021

Просрочка выполнения работ составила 42 дня (с 20.04.2021 по 31.05.2021г.).

Кроме того, отчётом от 2.07.2021 N УТР 28/21 инспекционного осмотра Алютех по запросу технадзора ЖК Лес в дату обследования, 22.06.2021 выявлены ряд существенных нарушений при монтаже профильных систем, однако организациями установщиками поименованы ООО «Энтузиаст» и ООО «АФТ» (поручитель).

Инспектор Мосгосстройнадзора по состоянию на 8 ноября 2021 г. констатировал, что устройство навесного вентилируемого фасада на объекте строительства велось по проекту ДИАТ462КМ1 (разработчик ООО «ДИАТ-ПРОЕКТ»).

По состоянию на 8 ноября 2021 г. подрядчиком были выполнены и сданы застройщику/техническому заказчику работы по устройству вентилируемого фасада и установке светопрозрачных конструкций по 24-м из 35-ти актов выполненных работ.

Между тем, истец письмами в проектную организацию ООО «ДИАТ-ПРОЕКТ» до заключения Договора и в ходе его действия многократно (17.07.2020 №62-20/Н, 02.09.2020 №69-20/H, 30.10.2020 №99-20/Н, 02.07.2021 №85-21/Н) обращался с просьбами устранить выявленные в проекте замечания, дополнить необходимыми разрешительными документами.

При этом, имеется договор № Б07-ЗСК-201207 от 07 декабря 2020 г. между истцом и ООО «Завод строительных конструкций Энтузиаст» (ИНН 

<

***>), предложенным ответчиками, на разработку в срок 2,5 месяца (с момента получения аванса) комплекта документации на изготовление конструкций облицовки фасадов объекта строительства.

Из данных платёжного поручения № 203 от 07.04.2020 г. следует, что истец оплатил аванс в сумме 500 000 руб., а платёжными поручениями № 377 от 17.06.2021 г., № 695 от 27.09.2021, оставшуюся сумму в 500.000 руб. по договору (всего - 1.000.000,00 руб.).

Письмом от 01.07.2021 № 83-21/Н в адрес компании-разработчика проектной документации на изготовление конструкций облицовки фасадов - ООО «Завод строительных конструкций Энтузиаст», истец обращался с вопросом статуса полученной истцом части проектной документации, выпущенной иной компанией - ООО «АФТ». Ответа на указанный запрос не последовало.

Исх. № 82-21/Н от 1.07.2021 истец, также, направил в адрес ООО «Крашмэн» претензионное уведомление, касательно сомнительности выставленного ответчиком УПД № 26 от 02.06.2021г., на фоне отсутствия смонтированных материалов и ТМЦ на объекте и фактическом запросе бездоговорного дополнительного авансирования. При этом, предлагалось создать комиссию для проведения инвентаризации по материалам.

Согласно п. 5.1.1 Договора, действуя по поручению заказчика, ООО «Крашмэн», как агент, должно было приобретать материалы по перечню (приложение № 3 Договора), за вознаграждение, не входящего в цену договора в размере 1 500 000 рублей, уплачиваемых на основании счета с актом оказанных услуг.

Неотработанными авансами являются денежные средства в 1 500 000,00 рублей, уплаченные в составе платежных поручений, указанных ниже, в связи с ненадлежащим образом оказанными услугами по закупке материалов (п. 5.1.1 Договора) общей суммой в 21 000 000 рублей, а именно:

в размере 1.500 000 рублей, уплаченные платежным поручением № 316 от 23.09.2020г. по выставленному ООО «Крашмэн» счету № КН/01 от 15.09.2020г.

в размере 1 500 000 рублей, уплаченные платежным поручением № 430 от 27.10.2020г. по выставленному ООО «Крашмэн» счету № КН/03 от 26.10.2020г;

в размере 1 500 000 рублей, уплаченные платежным поручением № 551 от 16.12.2020г. по выставленному ООО «Крашмэн» счету №КН201130/1 от 30.11.2020г.

в размере 1 500 000 рублей, уплаченные платежным поручением № 168 от 25.03.2021г. по выставленному ООО «Крашмэн» счету № КМ21032202 от 22.03.2021 г;

в размере 1 500 000 рублей, уплаченные платежными поручениями №№ 363, 364, 365 от 09.06.2021г. по выставленным ООО «Крашмэн» счетам №№ 5, 6, 7 от 7.06.2021г. и 8.06.2021г.;

в размере 1 500 000 рублей, уплаченные платежным поручением № 420 от 1.07.2021г. по выставленному ООО «Крашмэн» счету № 12 от 29.06.2021г.;

в размере 1 500 000 рублей, уплаченные платежным поручением № 474 от 23.07.2021г. по выставленному ООО «Крашмэн» счету № 14 от 19.07.2021г.;

в размере 1 500 000 рублей, уплаченные платежным поручением № 546 от 11.08.2021г. по выставленному ООО «Крашмэн» счету № 17 от 09.08.2021г.;

в размере 1 500 000 рублей, уплаченные платежным поручением № 570 от 23.08.2021г. по выставленному ООО «Крашмэн» счету № 18 от 18.08.2021г.;

в размере 1 500 000 рублей, уплаченные платежным поручением № 653 от 13.09.2021г. по выставленному ООО «Крашмэн» счету № 23;

в размере 1 500 000 рублей, уплаченные платежным поручением № 687 от 27.09.2021г. по выставленному ООО «Крашмэн» счету № 24, с учетом корректировки стоимости материалов (Дополнительное соглашение № 10);

в размере 1 500 000 рублей, уплаченные платежным поручением № 778 от 11.10.2021г. по выставленному ООО «Крашмэн» счету № 31 от 08.10.2021г.;

в размере 1 000 000 рублей рублей, уплаченные платежным поручением № 985 от 1.12.2021г. по выставленному ООО «Крашмэн» счету № 38 от 26.11.2021г.;

в размере 500 000 рублей, уплаченные платежным поручением № 987 от 1.12.2021г. по выставленному ООО «Крашмэн» счету № 40 от 26.11.2021г. (доплата к пп 985 от 01.12.2021г.);

в размере 1 500 000 рублей, уплаченные платежным поручением № 1100 от 27.12.2021г. по выставленному ООО «Крашмэн» счету № 43 от 16.12.2021г.;

Как указывает истец, подрядчик без надлежащего уведомления заказчика, прекратил работы на объекте, о чем был составлен акт о прекращении работ от 11.02.2022, подписанный представителями заказчика, технического заказчика и подрядчика.

К работам подрядчик так и не вернулся, их результат не сдал, в результате заказчик в порядке статьи 715 Гражданского кодекса направил ответчику уведомление от 6 мая 2022 г. № 135-НН об отказе от Договора.

Информационным письмом от 1.10.2020г. ООО «Крашмэн» проинформировало истца, что им определена методика установки платформенных подъемников (люлек), в адрес Заказчика направлялся ППР, а информационным письмом от 8.12.2020 подрядчик уведомляет, что:

- ведет геодезическую съемку всего здания для предоставления геодезической разбивочной основы и выявления отклонений по монолиту и кладке;

- выдал монтажные съемы на основе геодезической съемке по лицевым фасадам секции 2и3;

выполняет геодезическую съёмку и проектирование в стадии КМ (конструкции металлической) по торцевым и тепловым фасадам секций 2 и 3;

выполняет раскладку фиброцементной панели системы «Коношима»;

дорабатывает узел крепления фиброцементной панели для выполнения монтажа МОКАПа с последующим предоставлением на согласование.

Кроме того, в отношении проектной документации по объекту, в распоряжении ответчиков имеется положительное заключение экспертизы № 77-2-1-2-0001-17 от 27.03.2017г. ООО «Экспертно-инжиниринговый центр», а также, дополнительно, заключение экспертизы № 77-2-1 -2-034842-2021 от 25.06.2021 г. ООО «Центр Экспертиз».

Учитывая выполнение подрядчиком части работ и приемку их заказчиком возврату подлежит аванс в размере 63 735 816,8 рубля. Указанная сумма также подтверждается подписанным сторонами актом сверки по состоянию на 10 марта 2022 г.

Согласно доводам истца, указанные денежные средства возвращены не были.

Перечисленная в качестве аванса сумма в спорном размере, по мнению истца, является неосновательным обогащением по смыслу статьи 1102 Гражданского кодекса, так как ответчик без законных (договорных оснований) удерживает сумму аванса.

Статьёй 1102 Гражданского кодекса установлено, что лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счёт другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретённое или сбережённое имущество (неосновательное обогащение).

Исходя из содержания указанной нормы получение ответчиком денежных средств от истца при отсутствии у истца обязанности их выплачивать в силу соответствующего договора или требования нормативного акта, без предоставления ответчиком со своей стороны каких-либо товаров (работ, услуг) в счёт принятых сумм следует квалифицировать как неосновательное обогащение.

Таким образом, иск о взыскании суммы неосновательного обогащения подлежит удовлетворению, если будут доказаны: факт получения (сбережения) имущества ответчиком, отсутствие для этого должного основания, а также то, что неосновательное обогащение произошло за счёт истца.

При этом правила, предусмотренные главой 60 Гражданского кодекса, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Согласно пункту 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» возможно истребование в качестве неосновательного обогащения, полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала. Основания для удержания перечисленных истцом денежных средств в спорном размере отсутствуют.

Лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения (пункт 1 статьи 1107 Гражданского кодекса).

Таким образом, из смысла указанной правовой нормы следует, что для взыскания неосновательного обогащения необходимо доказать факт получения ответчиком имущества либо денежных средств без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований и его размер.

Согласно положениям статьи 1107 Гражданского кодекса на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путём сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (статья 431 Гражданского кодекса).

Согласно положениям пункта 2 статьи 450 Гражданского кодекса, по требованию одной из сторон договор может быть изменён или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечёт для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Согласно правовой позиции, сформированной в пункте 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 2014 г. № 35, если к моменту расторжения договора, исполняемого по частям, поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе по ведению чужого дела (по договору комиссии, доверительного управления и т.п.), не были оплачены, то взыскание задолженности осуществляется согласно условиям расторгнутого договора и положениям закона, регулирующим соответствующие обязательства. При этом сторона сохраняет право на взыскание долга на условиях, установленных договором или законом, регулирующим соответствующие договорные обязательства, а также права, возникшие из обеспечительных сделок, равно как и право требовать возмещения убытков и взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства (пункты 3 и 4 статьи 425 Гражданского кодекса).

Согласно правовой позиции, сформированной в пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 2014 г. № 35, разрешая споры, связанные с расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по смыслу пункта 2 статьи 453 Гражданского кодекса при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.).

При рассмотрении требований истца о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ суд пришёл к следующим выводам.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определённая законом или договором денежная сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу статьи 708 Гражданского кодекса подрядчик несёт ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ.

За нарушения сроков окончания этапов работ и общего срока строительства, согласно п. 13.2.1. Договора подряда, с Подрядчика взимается штраф в размере 0,1% от цены Договора подряда за каждый день просрочки, но не более 5% от договорной цены.

Согласно расчёту истца, просрочка выполнения всех работ по Договору на дату уведомления о расторжении составляет 263 дня (с 17.08.2021 по 06.05.2022).

Помимо вышеуказанного, дополнительным соглашением № 8 от 22.06.2021г. в п. 1 предусмотрено право заказчика уменьшить стоимость выполнения строительно-монтажных работ по Договору, в случае передачи части работ другому подрядчику, поскольку указанное дополнительное соглашение фиксировало имеющуюся значительную просрочку в сдаче подрядчиком работ и закрепляло согласие истца на выполнение и сдачу подрядчиком работ за пределами сроков, предусмотренных п. 4.1 Договора, однако в абз. 2 п. 2 дополнительного соглашения № 8 имеется оговорка о том, что, если и на этот раз работы не будут выполнены в срок, просрочка исполнения исчисляется в соответствии с условиями п. 4.1 Договора.

Пунктом 5 дополнительного соглашения № 8 была предусмотрена мотивационное вознаграждение (премия) подрядчика в случае соблюдения сроков работ.

Пунктом 7 вышеуказанного дополнительного соглашения предусмотрено право заказчика досрочно выплатить часть премии. Заказчик перевел подрядчику 1 000 000 рублей (платежное поручение № 486 от 29.07.2021г.).

Согласно п. 9.2 Договора сдача и приёмка работ, выполненных подрядчиком, производится поэтапно. Подрядчик ежемесячно до 1-го числа, следующего за отчётным, оформляет в установленном порядке со своей стороны и направляет заказчику КС-2, счёт-фактуру, КС-3 в 2-х экземплярах с подтверждением выполненных работ ответственным представителем Заказчика на объекте, в которых указывает виды, объём и стоимость работ, выполненных за отчетный месяц с предоставлением полного комплекта исполнительной документации в 4-х экземплярах отчет о давальческом материале».

При этом, в пунктах 5, 6 дополнительного соглашения № 8 указано, что в случае срыва вновь согласованных сроков, указанная премия должна быть возвращена заказчику в срок до 4.10.2021, а за каждый день просрочки возврата указанной премии, подлежит уплате неустойка в размере 0,5% от размера премии за каждый день нарушения срока. Таким образом размер неустойки на 3.08.2021 составит 1 000 000 х 307 (количество дней с 5.10.2021 по 08.08.2022) х 0,5% = 1 535 000 рублей.

По состоянию на 21.10.2022 года истцом составлен выбраковочный акт на все установленные ООО «Крашмэн» стеклопакеты, поставленные ООО «СТИК» (ИНН 

<

***>), ввиду наличия брака - плесневение (бронзовение), запотевание. Подрядчик ознакомлен с указанным актом.

Также 25.04.2023 года, в ходе осмотра и экспериментального исследования части стеклопакетов на предмет соответствия нормативам (в том числе, ГОСТ 32557-2013 «Стекло и изделия из него. Методы контроля геометрических параметров и показателей внешнего вида»; ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия» и другие) из выбраковочного акта, в присутствии представителя независимой экспертной организации АО «Институт Стекла», был составлен протокол № 2 «Совещания строительства Спортивно-оздоровительного комплекса с гостиницей, автостоянкой и инженерными коммуникациями по адресу: 

<

...>»

Заключением экспертизы стеклопакетов № 09-2023 от 6.06.2023 года, изданным АО «Институт стекла» (подписано ЭЦП 08.06.2023г.), фиксирующем ход экспертных испытаний, в разделе «Заключение», констатированы следующие выводы:

1)          При экспертизе установлено, что как при производстве, так и при монтаже стеклопакетов были нарушены требования ГОСТ 24886. Отмечены нарушения целостности герметизирующих слоев. Монтаж на тонкие деформирующиеся подкладки и без подкладок приводит к перекосу стеклопакетов в ходе эксплуатации, смещению стекол и дополнительной нагрузке на герметики. Использованная для обеспечения «терморазрыва» лента препятствует отводу влаги. Герметизирующие слои стеклопакетов не были защищены от воздействия ультрафиолетового излучения.

2)          Разрушение вторичного герметизирующего слоя могло произойти в результате длительного воздействия солнечного света, влаги в сочетании с высокими температурами, до которых может разогреваться алюминиевая система, окрашенная в тёмный цвет.

3)          Поскольку нет данных об испытаниях на долговечность образцов стеклопакетов производства ООО «СТИК» с рассматриваемой формулой и герметиками, то нельзя исключать нарушения технологии производства вторичного герметика, ставшей одной из причин быстрого разрушения герметика.

4)          Не соответствующие требованиям нормативных документов стеклопакеты подлежат замене. При монтаже необходимо руководствоваться нормативной документацией на фасадную систему и использовать рекомендованные комплектующие.

Абзацем 1 пункта 4 статьи 453 Гражданского кодекса предусмотрено, что стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

В соответствии с положениями статьи 728 Гражданского кодекса в случаях, когда заказчик на основании пункта 2 статьи 715 Гражданского кодекса расторгает договор подряда, подрядчик обязан возвратить предоставленные заказчиком материалы, оборудование, переданную для переработки (обработки) вещь и иное имущество либо передать их указанному заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (часть 1).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса).

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Из материалов дела не усматривается несогласия ответчика с заявленными требованиями в части существа правоотношений. Доводов в обоснование своей правовой позиции о непризнании исковых требований ответчиком не представлено.

Согласно части 3 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

В соответствии со статьями 8 и 9 Арбитражного процессуального кодекса судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В разъяснение указанной нормы права Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 6 марта 2012 г. № 12505/11 указал, что нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несёт риск наступления последствий такого своего поведения.

Таким образом, ответчик, которому суд разъяснил риск наступления неблагоприятных последствий в случае непредставления отзыва и доказательств в подтверждение своих возражений по каждому доводу заявителя, не оспорил и опроверг факты, указанные истцом в обоснование своих требований.

В соответствии со статьёй 110 Арбитражного процессуального кодекса судебные расходы относятся на сторон пропорционально удовлетворённых требований.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 11, 12, 307, 309, 310, 330, 331, 333 Гражданского кодекса, статьями 4, 9, 65, 110, 123, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса, суд

Р Е Ш И Л :

1.       Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Крашмен» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Спартак» (ОГРН 

<

***>):

сумму неосновательного обогащения в размере 85 735 816 (восемьдесят пять миллионов семьсот тридцать пять тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 88 копеек;

неустойку в размере 13 374 273 (тринадцать миллионов триста семьдесят четыре тысячи двести семьдесят три) рубля 82 копейки;

расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

2.       Истребовать из чужого незаконного владения общества с ограниченной ответственностью «Крашмен» (ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Спартак» (ОГРН 

<

***>) имущество согласно перечня:

ДМ КРАШМЭН переданные материалы

НАИМ.

КОЛ-ВО

руб.

А-18.1 Алюминиевый профиль, м.п.

пог. м

6,000

2 546

Аквилон для откосов и отливов, оц. Ст RAL 7024 t=0.55, L=3000 мм, шт

шт

362,000

264 254

Алюминиевая композитная панель Alcotek RAL-7024 сорт 0 толщина 4 мм 1220*4000, м2

м2

136,640

235 893

Болт с полной резьбой DIN933 нерж. М8х90

шт

4 546,000

100 391

Болт с частичной резьбой A2 M10X90 M10x90DIN931

100 шт

24,670

67 428

Бур по бетону SDS PLUS с двойной резьбой 9х210 мм

шт

40,000

12 250

Винт самонарезающий 3,9x13-А21SO14585, шт

шт

5 000,000

6 099

Винт самонарезающий 3,9x13DIN7981

100 шт

244,440

23 060

Винт самонарезающий 3,9x16-А21SO14585, шт

шт

5 000,000

6 528

Винт самонарезающий 3,9x16DIN7981

100 шт

52,940

6 022

Винт самонарезающий 3,9x16DIN7982

100 шт

93,810

9 906

Винт самонарезающий 3,9x19DIN7981

100 шт

5,240

609

Винт самонарезающий 3,9x25DIN7982

100 шт

14,000

2 037

Винт самонарезающий 3,9x32DIN7982

100 шт

31,140

5 399

Винт самонарезающий 3,9x45DIN7982

100 шт

39,550

9 139

Винт самонарезающий 3,9x50-А21SO14586, шт

шт

1 100,000

6 332

Винт самонарезающий 3,9x50DIN7982

100 шт

299,200

127 581

Винт самонарезающий 3,9x9,5DIN7981

100 шт

86,800

12 145

Винт самонарезающий 3,9х16ТХ

100 шт

504,920

109 206

Винт самонарезающий 4,2х9,5DIN7981, 100 шт

100 шт

1,000

160

Винт самонарезающий 4,8x16DIN7981

100 шт

17,000

3 107

Винт самонарезающий 4,8x19DIN7981, 100шт

100 шт

1,000

293

Винт самонарезающий 4,8x60DIN7982

100 шт

44,540

16 579

Винт самонарезающий 4,8x70DIN7982

100 шт

55,860

26 326

Винт самонарезающий 5,5x38DIN7981

100 шт

60,960

25 398

Винт самонарезающий 5,5x55DIN7981

100 шт

356,930

247 999

Винт самонарезающий 5,5x60DIN7981

100 шт

136,300

141 682

Винт самонарезающий 5,5x65DIN7981

100 шт

108,870

96 254

Вставка В1 нерж. 1,0 мм L=150, шт

шт

1 761,000

69 736

Вставка В2 нерж. 1,2 мм L=240, шт

шт

1 538,000

186 060

Втулка уплотнительная FRK151

шт

16 076,000

56 656

Гайка DIN 934 М8 шестигранная нерж. сталь А2

шт

4 042,000

12 968

Гайка M10DIN934

100 шт

19,600

10 996

Гайка M10DIN985

100 шт

8,000

4 222

Гладкий лист RAL 7024 0.5х1250х50000

м2

125,000

39 334

Гладкий лист RAL 7024 0.7х1250х30000 пленка

м2

187,500

84 155

Гладкий лист оцинк. 0.5х1250х50000

м2

656,570

147 728

Доводчик DORMA TSProfil (цв.RAL9005), шт

шт

1,000

2 538

Дюбель-гвоздь с потайным бортом 6х60, шт

шт

12 034,000

15 043

Забивной анкер HKD М10*40

шт

150,000

3 271

Забивной анкер HKD М16*65

шт

25,000

1 596

Забивной анкер HKD М8*40

шт

250,000

4 283

Заглушка порога AYPC.W72.0903, шт

шт

2,000

24

Заглушка профиля примыкания AYPC.С48.0909, шт

шт

2,000

5

Заглушка ригеля AYPC.F50.0921-01

шт

6 169,000

55 884

Заглушка стойки AYPC.F50.0926

шт

238,000

1 888

Закладная угловая AYPC.W62.0952 (цв.00)

шт

3 580,000

30 590

Закладная угловая AYPC.W62.0952-03 (цв.00)

шт

3 540,000

67 209

Закладная угловая AYPC.W62.0954 (цв.00), шт

шт

6,000

92

Закладная угловая AYPC.W62.0954-04 (цв.00)

шт

620,000

9 271

Закладная угловая AYPC.W62.0954-05 (цв.00)

шт

590,000

22 665

Закладная угловая AYPC.W62.0955-02 (цв.00), шт

шт

6,000

241

Закладная угловая AYPC.W62.0957 (цв.00)

шт

8 886,000

29 704

Закладная угловая AYPC.W62.0969-01 (цв.00)

шт

4 199,000

70 094

Закладная угловая AYPC.W62.0969-02 (цв.00)

шт

4 136,000

97 266

Замок роликовый 3031.00, шт

шт

1,000

394

Капельник водоотвода AYPC.F50.0928

шт

1 963,000

78 206

Клеевой анкер HIT-1

шт

12,000

9 499

Клей ПВХ Bailey 946ml

шт

2,000

1 308

Кляммер стартовый "Коношимы" 40х22х10 L=50 мм

шт

16 744,000

494 506

Комплект заглушки водоотвода с клапаном AYPC.C48.0919M-01, шт

шт

61,000

645

Комплект запорных элементов 1 поворотный 728756

шт

202,000

25 885

Комплект запорных элементов п/о 728804

шт

839,000

307 427

Комплект защелки балконной 728924

шт

136,000

27 609

Комплект ручек стальных 1400 мм 114.SS.1200.45, шт

шт

1,000

5 503

Комплект щеткодержателей AYPC.W72.0902, шт

шт

1,000

29

Крепежные элементы, м2

м2

1 659,190

962 330

Кронштейн AYPC.F50.2901-02 (цв. 00)

шт

12,000

2 907

Кронштейн AYPC.F50.2902-01 (цв. 00)

шт

9,000

1 101

Кронштейн К1 нерж. 1.0 мм L=180, шт

шт

6 284,000

550 547

Кронштейн К2 AISI 304 1.2 мм L=240, шт

шт

1 524,000

347 561

Кронштейн КГю

т

0,040

5 340

Кронштейны для крепления витражей, шт

шт

120,000

157 782

Лента бутиловая LB45х1,2,м

м

3 351,740

41 051

Лента бутиловая LB60х1,2, м

м

1 935,000

22 981

Лента межфланцевая уплотнительная 5х15, пог.м

пог. м

800,000

3 500

Лента Термотэйл (10 м.п. в рулоне), пог.м

пог. м

1 000,000

47 821

Манжета FRK98-280, шт

шт

2,000

199

МВБОР 5Ф 20000*1200*5 (24 кв.м)

м2

816,000

108 450

Металлоизделие КН-Л по чертежу Заказчика

шт

294,000

122 366

Металлоизделие КН-П по чертежу Заказчика

шт

309,000

128 608

Металлоизделие КН-Ц по чертежу Заказчика

шт

53,000

22 059

Металлоизделие КН110Л по чертежу Заказчика

шт

10,000

4 162

Металлоизделие КН110П по чертежу Заказчика

шт

11,000

4 578

Металлоизделие КН110Ц по чертежу Заказчика

шт

21,000

8 740

Металлоизделие КУ по чертежу Заказчика

шт

172,000

71 588

Металлоизделие МКЭ по чертежу Заказчика

шт

132,000

54 940

Металлоизделие МКЭП по чертежу Заказчика

шт

18,000

7 492

Металлоизделия МКЭП по чертежу Заказчика

шт

25,000

14 740

Набор для микропроветривателя 728958

шт

160,000

30 206

Накладка на цилиндр 1031.02, шт

шт

1,000

107

Направляющая Н5 оц. 1,0 мм  с двустор.покр. (рекуп.) L=3140 мм, шт

шт

237,000

89 213

Направляющая Н5 оц. 1,0 мм  с двустор.покр. (рекуп.) L=3590 мм, шт

шт

699,000

330 662

Направляющая Н5 оц. 1,0 мм с двустор. покр. (рекуп.) L=4000 мм, шт

шт

22,000

20 967

Направляющая Н6-1 оц. 1,2 мм с двустор. покр. (рекуп.) L=3000 мм, шт

шт

1 154,000

1 251 983

Нижняя петля на раме левая 624974

шт

312,000

120 790

Ножницы на раме 500 624957

шт

405,000

219 755

Ножницы на раме левые 735 624959

шт

31,000

18 942

Ножницы на раме правые 500 624956

шт

307,000

162 319

Ножницы на раме правые 735 624958

шт

189,000

87 665

Ножницы на створке 500 740836

шт

527,000

205 417

Ножницы на створке 735 740838

шт

313,000

148 133

Ограничитель открывания 740814

шт

187,000

29 776

Опора AYPC.F50.2903-02 (цв. 00)

шт

417,000

30 624

Опора AYPC.F50.2903-05 (цв. 00)

шт

3,000

282

Опора AYPC.F50.2904-07 (цв.00)

шт

176,000

43 616

Паронит ПОН-Б 0,5 мм ПРС

кг

70,900

8 916

Паронит ПОН-Б 1мм ПРС

кг

401,090

34 424

Паронит ПОН-Б 2мм ПРС

кг

240,840

16 099

Переключатель MV комплект 728842

шт

839,000

155 975

Перфолента 0,5х12 (22,5м)

боб

5,410

1 298

Перфолента LP 25х0,5 М8 (25м/боб)

боб

208,420

114 631

Перфолента LP12х0,5 М6 (25м/мбоб), боб

боб

1,200

288

Петля верхняя на раме левая 627260

шт

142,000

78 091

Петля верхняя на раме правая 627259

шт

65,000

37 193

Петля верхняя на створке 740811

шт

207,000

74 582

Петля нижняя на раме правая 624973

шт

515,000

196 125

Петля нижняя на створке левая 739700

шт

636,000

102 057

Петля нижняя на створке правая 739699

шт

508,000

79 308

Петля роликовая R72OUT (цв.А05-Е6), шт

шт

3,000

6 020

Планка горозонтальная "Коношимы" тип RAL 7030 мат  (3000мм)

шт

1 336,000

417 979

Планка опорная 770712

шт

998,000

95 759

Планка ответная 3016.10, шт

шт

1,000

71

Планка ответная 728918

шт

2 378,000

37 171

Плитка фасадная цвет 3302.3119 Riemchen X 240*17*71 с пропилом 16шт/уп Stroher

шт

24 349,500

1 170 798

Поджим ПЖ1 нерж. 0,5 мм, шт

шт

5 732,000

126 399

Поджим ПЖ2 нерж. 0,5 мм, шт

шт

7 472,000

132 379

Подкладка опорная AYPC.F50.0941-02 (цв.00)

шт

148,000

1 708

Подкладка опорная AYPC.F50.0952-01 (цв.00)

шт

868,000

13 058

Подкладка опорная AYPC.W62.0917

шт

2 230,000

34 225

Подкладка рихтовочная 100*26*3, шт

шт

1 013,000

2 062

Подкладка рихтовочная 100*32*3

шт

1 564,000

2 212

Подкладка рихтовочная 100*38*3

шт

5 419,000

8 833

Подкладка рихтовочная 100*44*1

шт

720,000

1 476

Подкладка рихтовочная 100*44*3

шт

3 132,000

7 893

Подкладка рихтовочная 100*50*1

шт

2 258,000

5 804

Подкладка рихтовочная 100*50*3

шт

4 488,000

11 387

Подкладка рихтовочная 100*56*1, шт

шт

4,000

19

Подкладка рихтовочная 100*56*3, шт

шт

4,000

19

Подкладка уплотнительная FRK42

шт

8 326,000

69 626

Подпорка 212008

шт

187,000

2 341

Полоса 6х150 Ст3 6м

пог. м

60,000

18 036

Прижим дополнительный на раме 728885

шт

291,000

27 373

Прижим дополнительный на створке 728884

шт

303,000

10 658

Прокладка ПР1 паронит 2,0 мм, шт

шт

6 735,000

43 919

Прокладка ПР2 паронит 2,0 мм, шт

шт

1 578,000

11 861

Профиль Z-образный оц. 45х22х15х0,8 мм с двустор. покр. (RAL7030мат) L=3000, шт

шт

75,000

24 589

Профиль Z-образный оц. 45х22х15х0,8 мм с двустор. покр. (RAL7038) L=3000, шт

шт

98,000

32 130

Профиль Z-образный оц. 45х22х15х0,8 мм с двустор. покр., шт

шт

30,000

6 911

Профиль алюминиевый экструдированный AYPC.120.0101

м

402,000

59 665

Профиль алюминиевый экструдированный AYPC.120.0101 (цв.RAL7024)

м

660,000

69 181

Профиль алюминиевый экструдированный AYPC.W72.0801 (цв.А00-Е6), м

м

6,500

4 865

Профиль вспомогательный AYPC.F50.0701 (цв. RAL7024/30)

м

2 533,820

79 056

Профиль дистанционный AYPC.F50.0901-01

м

10 606,610

264 049

Профиль дистанционный AYPC.F50.0902-01

м

6 419,800

189 394

Профиль крышки декоративной AYPC.F50.0503 (цв. RAL7024/30)

м

5 771,860

436 316

Профиль крышки декоративной AYPC.F50.0504 (цв. RAL7024/30)

м

3 151,461

216 606

Профиль опорный под стеклопакет AYPC.F50.0806 (цв. 00

м

5,820

633

Профиль отлива AYPC.C48.0611 (цв.00), м

м

6,500

390

Профиль отлива AYPC.C48.0611 (цв.RAL7024/30)

м

299,000

18 560

Профиль П1.12 оц. 0,5 мм с двустор.покр. (рекуп.) L=3000 мм, шт

шт

4 984,000

493 624

Профиль П2 оц. 0,5 мм с двустор.покр. (рекуп.) L=1800 мм, шт

шт

864,000

70 304

Профиль полки AYPC.W62.0820 (цв.RAL7024/30), м

м

100,100

12 409

Профиль прижимной планки AYPC.F50.0601F (цв. 00)

м

10 246,848

826 523

Профиль примыкания двери AYPC.С48.0618 (цв.00),м

м

6,500

361

Профиль рамы AYPC.W72.0130(цв. RAL7024/30)

м

5 816,260

3 849 504

Профиль ригеля AYPC.F50.0207 (цв. RAL7024/30(D0))

м

374,000

162 692

Профиль ригеля AYPC.F50.0207 (цв. RAL7024/30)

м

2 678,480

1 206 305

Профиль створки AYPC.W72.0204N (цв.00), м

м

13,000

10 819

Профиль створки AYPC.W72.0205N (цв.00), м

м

6,500

5 674

Профиль створки AYPC.W72.0218 (цв. А05-Е6), м

м

8,900

6 421

Профиль створки AYPC.W72.0221 (цв. RAL7024/30)

м

4 548,600

3 006 282

Профиль створки AYPC.W72.0223 (цв. RAL7024/30)

м

949,000

863 048

Профиль стойки AYPC.F50.0104 (цв. RAL7024/30(D0))

м

224,000

102 299

Профиль стойки AYPC.F50.0104 (цв. RAL7024/30)

м

5 561,090

2 718 646

Профиль стойки AYPC.F50.0107 (цв. RAL7024)

м

26,840

18 780

Профиль стойки AYPC.F50.0110 (цв. RAL7024/30(D0))

м

578,480

796 887

Профиль стойки AYPC.F50.0110 (цв. RAL7024/30), м

м

20,400

39 753

Профиль сухарный AYPC.F50.0405 (цв. 00)

м

2,980

462

Профиль сухарный AYPC.F50.0413 (цв.00), м

м

6,800

2 622

Профиль тяги AYPC.W62.0607 (цв. А00-Е6)

м

2 976,260

165 174

Профиль усиливающий AYPC.F50.0304 (цв. 00)

м

391,000

149 817

Профиль усиливающий AYPC.F50.0305 (цв. 00)

м

71,850

35 272

Профиль штапика AYPC.С48.0603 (цв.00), м

м

6,500

530

Профиль штапика AYPC.С48.0605 (цв. RAL7024/30), м

м

45,500

5 632

Профиль штапика AYPC.С48.0606 (цв. RAL7024/30)

м

4 865,250

470 389

Расходные материалы (метизы, буры, сверла, герметик для фасадно-стоечной системы, дюбель гвоздь, про

м2

1 956,275

347 629

Ручка 1096.00 (цв.RAL7024/30), шт

шт

146,000

11 296

Ручка Roto Line 377400 (цв.RAL7024/30)

шт

992,000

575 258

Саморез  4,2х41 HFF (фиксирующий)

шт

521,000

1 085

Саморез 4,2х41 HF (ветровой)

шт

754,000

3 022

Саморез DIN 7504N 3.9х13 с полкруглой головкой и сверлом нержавеющая сталь А2

шт

7 000,000

13 417

Саморез с пш. сверло 4,2*16

шт

12 500,000

5 000

СВФС Талреп (крюк-кольцо) DIN 1480 М10 (10шт)

шт

10,000

10 833

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,426, шир.0,396

м2

0,337

944

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,501, шир.0,396

м2

2,380

6 661

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,529, шир.0,381

м2

1,007

2 211

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,529, шир.0,382

м2

0,202

443

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,529, шир.0,455

м2

0,241

528

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,529, шир.0,495

м2

1,572

3 443

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,721, шир.0,501

м2

0,361

1 011

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,726, шир.0,501

м2

0,364

1 018

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,777, шир.0,529

м2

1,233

2 703

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,779, шир.0,529

м2

1,648

3 613

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,802, шир.0,529

м2

3,392

7 439

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,841, шир.0,501

м2

0,843

2 358

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,845, шир.0,529

м2

0,447

980

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,848, шир.0,529

м2

0,448

983

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,85, шир.0,725

м2

4,928

10 805

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,85, шир.0,841

м2

2,145

4 700

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,912, шир.0,529

м2

2,892

6 344

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,954, шир.0,85

м2

4,866

10 663

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,954, шир.0,949

м2

1,810

3 968

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,955, шир.0,85

м2

5,684

12 454

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,955, шир.0,949

м2

0,906

1 986

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,985, шир.0,62

м2

0,611

1 338

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.1,021, шир.0,529

м2

4,320

9 470

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.1,022, шир.0,529

м2

2,162

4 740

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.1,023, шир.0,53

м2

3,794

8 318

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.1,166, шир.0,529

м2

9,867

21 630

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.1,175, шир.0,72

м2

19,458

54 440

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.1,175, шир.0,902

м2

3,177

6 969

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.1,625, шир.0,72

м2

1,170

3 273

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT 22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.1,926, шир.0,396

м2

1,525

4 268

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT длин.1,71, шир.0,628

м2

1,073

2 327

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT длин.1,895, шир.0,81

м2

1,534

3 326

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.0,721, шир.0,426

м2

0,307

853

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.0,871, шир.0,426

м2

0,742

2 061

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,283, шир.0,769

м2

0,987

2 767

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,287, шир.0,769

м2

1,978

5 564

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,287, шир.0,771

м2

1,984

5 561

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,287, шир.0,772

м2

0,993

2 782

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,292, шир.0,777

м2

2,008

5 621

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,385, шир.0,771

м2

1,068

2 995

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,386, шир.0,656

м2

0,909

2 751

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,387, шир.0,541

м2

1,501

3 871

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,387, шир.0,654

м2

5,442

15 268

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,387, шир.0,767

м2

1,064

2 984

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,387, шир.0,77

м2

13,884

39 204

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,387, шир.0,772

м2

4,283

11 996

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,389, шир.0,544

м2

3,022

7 795

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,39, шир.0,659

м2

0,916

2 564

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,391, шир.0,541

м2

1,505

3 882

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,392, шир.0,662

м2

1,842

5 161

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,392, шир.0,772

м2

3,224

9 024

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,392, шир.0,777

м2

6,489

18 174

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,402, шир.0,777

м2

1,089

3 051

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,586, шир.0,659

м2

1,045

2 931

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,587, шир.0,662

м2

1,050

2 944

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,587, шир.0,725

м2

12,654

35 747

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,587, шир.0,727

м2

2,308

6 469

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,59, шир.0,727

м2

1,156

3 257

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,591, шир.0,727

м2

1,157

3 241

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,592, шир.0,662

м2

1,054

2 951

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,592, шир.0,729

м2

2,321

6 497

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,592, шир.0,732

м2

5,827

16 318

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,704, шир.0,726

м2

3,711

10 424

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,706, шир.0,587

м2

2,002

5 617

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,706, шир.0,591

м2

2,016

5 878

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,706, шир.0,613

м2

1,046

2 697

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,706, шир.0,614

м2

2,095

5 873

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,706, шир.0,726

м2

1,238

3 473

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,588

м2

1,004

2 815

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,589

м2

4,020

11 272

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,592

м2

1,010

2 830

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,614

м2

2,096

5 888

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,616

м2

12,617

34 455

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,617

м2

1,053

2 951

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,618

м2

1,055

3 192

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,659

м2

3,375

9 711

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,66

м2

2,254

6 329

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,687

м2

1,173

3 284

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,724

м2

1,236

3 461

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,725

м2

1,237

3 468

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,727

м2

2,482

6 972

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,737

м2

1,258

3 526

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,709, шир.0,725

м2

2,478

7 221

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,71, шир.0,613

м2

1,048

2 704

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,71, шир.0,619

м2

1,059

2 730

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,712, шир.0,597

м2

5,110

14 311

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,712, шир.0,617

м2

2,113

5 913

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,712, шир.0,622

м2

5,323

14 907

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,712, шир.0,662

м2

1,133

3 174

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,712, шир.0,667

м2

1,142

3 196

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,712, шир.0,732

м2

5,012

14 036

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,717, шир.0,73

м2

1,253

3 508

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,774, шир.0,494

м2

4,380

9 969

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,774, шир.0,495

м2

3,512

7 991

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,774, шир.0,779

м2

1,382

3 144

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,774, шир.1,021

м2

7,245

16 482

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,774, шир.1,166

м2

62,049

141 172

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,775, шир.1,023

м2

9,080

21 760

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,83, шир.0,742

м2

1,358

3 502

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,38

м2

0,719

1 637

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,381

м2

2,166

4 925

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,382

м2

0,723

1 646

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,455

м2

0,862

1 961

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,495

м2

5,622

12 797

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,779

м2

4,425

10 070

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,81

м2

1,534

3 490

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,811

м2

1,536

3 494

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,812

м2

9,228

20 993

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.1,021

м2

15,470

35 195

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.1,022

м2

7,743

17 615

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.1,166

м2

39,749

90 432

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,895, шир.0,58

м2

5,495

12 502

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,895, шир.0,581

м2

3,303

7 514

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,895, шир.0,62

м2

8,225

18 710

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,895, шир.1,023

м2

23,256

55 872

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,895, шир.1,166

м2

2,209

5 027

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,926, шир.0,396

м2

7,627

21 180

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,926, шир.0,721

м2

33,328

92 550

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.2,014, шир.0,62

м2

1,249

2 841

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.2,219, шир.0,639

м2

17,015

47 251

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.2,376 шир.0,721

м2

3,426

9 514

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,58, шир.0,53

м2

2,456

5 390

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.-22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.0,8, шир.0,53

м2

3,392

7 434

Стеклопакет 6 SG Neutral 70 HT зак.22Ar-4M1стемалит RAL7016 длин.1,205, шир.0,62

м2

5,229

11 462

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,375 шир.0,325

м2

0,487

1 150

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,376 шир.0,33

м2

0,372

878

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,496 шир.0,251

м2

0,373

881

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,512 шир.0,379

м2

0,194

375

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,531,шир.0,496

м2

0,790

1 864

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,596 шир.0,25

м2

0,298

576

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,596 шир.0,529

м2

1,260

2 438

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,597 шир.0,25

м2

0,298

577

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,597 шир.0,529

м2

0,632

1 221

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,626 шир.0,25

м2

0,312

605

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,626 шир.0,529

м2

1,324

2 561

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,627 шир.0,25

м2

0,314

606

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,628 шир.0,529

м2

0,664

1 285

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,642 шир.0,25

м2

0,640

1 241

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,642 шир.0,529

м2

2,034

3 940

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,721 шир.0,251

м2

0,905

2 135

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,721 шир.0,531

м2

2,296

5 419

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,726 шир.0,251

м2

0,910

2 150

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,726 шир.0,531

м2

2,312

5 457

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,826, шир.0,251

м2

1,659

3 913

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,847 шир.0,25

м2

1,060

2 047

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,85 шир.0,25

м2

0,424

822

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.0,876 шир.0,251

м2

0,219

517

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,175 шир.0,85

м2

1,997

3 862

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,175 шир.0,915

м2

1,075

2 079

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,175 шир.0,995

м2

1,169

2 260

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,381

м2

0,918

1 775

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,43

м2

0,518

1 002

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,431

м2

1,038

2 008

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,492

м2

1,779

3 439

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,496

м2

5,379

12 690

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,517

м2

1,869

3 613

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,537

м2

1,941

3 753

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,576

м2

1,388

2 684

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,72

м2

2,603

5 863

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,722

м2

2,610

5 046

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,725

м2

2,622

5 067

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,775

м2

0,934

1 982

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,776

м2

9,351

21 336

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,777

м2

32,760

63 356

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,836

м2

3,021

5 843

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,876

м2

2,110

4 082

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,877

м2

1,057

2 043

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,886

м2

3,204

6 192

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,945

м2

1,139

2 202

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.0,946

м2

5,695

11 019

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.1,067

м2

2,572

4 972

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.1,068

м2

1,287

2 488

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,205 шир.1,181

м2

4,269

8 254

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium T зак.-22Ar-4М1стем.RAL7016 длин.1,225 шир.1,175

м2

1,439

2 783

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,706, шир.0,406

м2

2,078

5 407

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,706, шир.0,412

м2

3,514

9 144

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,706, шир.0,456

м2

3,889

10 121

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,706, шир.0,539

м2

7,356

19 141

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,706, шир.0,587

м2

1,001

2 606

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,454

м2

2,325

5 398

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,585

м2

46,934

108 965

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,69

м2

7,067

16 407

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,707, шир.0,692

м2

2,362

5 485

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,712, шир.0,412

м2

0,705

1 823

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,712, шир.0,457

м2

0,782

2 022

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,712, шир.0,537

м2

8,274

19 210

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,712, шир.0,592

м2

10,134

23 530

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,712, шир.0,597

м2

5,110

13 208

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,712, шир.0,692

м2

1,185

3 062

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,38

м2

0,719

1 439

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,381

м2

1,444

2 886

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,43

м2

0,814

1 629

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,431

м2

1,632

3 265

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,517

м2

2,937

5 875

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,537

м2

3,051

6 102

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,576

м2

2,182

4 364

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,577

м2

1,093

2 186

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,596

м2

2,258

4 515

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,597

м2

1,131

2 261

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,626

м2

4,744

9 488

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,627

м2

2,374

4 750

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,642

м2

3,648

7 296

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,777

м2

4,416

8 830

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,836

м2

4,749

9 500

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,886

м2

5,034

10 068

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,945

м2

1,789

3 580

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.0,946

м2

3,584

7 167

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.1,067

м2

4,042

8 084

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.1,068

м2

2,023

4 046

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,894, шир.1,181

м2

6,711

13 421

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,895, шир.0,492

м2

2,796

5 594

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,895, шир.0,722

м2

4,104

8 209

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,895, шир.0,777

м2

13,248

26 504

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,895, шир.0,946

м2

5,379

10 756

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,896, шир.0,496

м2

12,225

28 383

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.1,896, шир.0,726

м2

8,258

19 175

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.2,212, шир.0,611

м2

32,436

75 307

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.2,219, шир.0,594

м2

11,862

27 541

Стеклопакет 6ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-4Clima Guard N длин.2,219, шир.0,619

м2

4,121

10 650

Стеклопакет 8 SG Neutral 70 HT длин.0,84, шир.0,45

м2

0,378

1 143

Стеклопакет 8 SG Neutral 70 HT длин.0,959, шир.0,75

м2

0,719

2 176

Стеклопакет 8 SG Neutral 70 HT длин.2,425, шир.1,209

м2

2,931

8 869

Стеклопакет 8 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-6Extra Clear зак.-14Ar длин.2,375,шир.0,902

м2

6,426

19 441

Стеклопакет 8 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-6Extra Clear зак.-14Ar-6Extra Clear за длин.0,726,шир.0,426

м2

0,309

1 098

Стеклопакет 8 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-6Extra Clear зак.-14Ar-6Extra Clear за длин.0,841,шир.0,426

м2

0,716

2 545

Стеклопакет 8 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-6Extra Clear зак.-14Ar-6Extra Clear за длин.1,742,шир.0,542

м2

0,944

3 354

Стеклопакет 8 SG Neutral 70 HT зак.-14Ar-6Extra Clear зак.-14Ar-6Extra Clear за длин.1,742,шир.0,657

м2

2,289

8 130

Стеклопакет 8ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear зак.-14A6Extra Clear зак.длин.1,915,шир.0,85

м2

3,255

9 088

Стеклопакет 8ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear зак.-14A6Extra Clear зак.длин.1,915,шир0,915

м2

1,752

4 892

Стеклопакет 8ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear зак.-14A6Extra Clear зак.длин.1,915,шир1,225

м2

2,346

6 549

Стеклопакет 8ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear зак.-14A6Extra Clear зак.длин.2,1, шир.0,85

м2

3,570

9 966

Стеклопакет 8ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear зак.-14A6Extra Clear зак.длин.2,1, шир.0,915

м2

1,921

5 364

Стеклопакет 8ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear зак.-14A6Extra Clear зак.длин.2,1, шир.1,225

м2

2,572

7 182

Стеклопакет 8ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear зак.-14A6Extra Clear зак.длин.2,1, шир.1,415

м2

2,971

8 295

Стеклопакет 8ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear зак.-14A6Extra Clear зак.длин.2,1,шир.0,995

м2

2,089

5 833

Стеклопакет 8ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-6Extra Clear зак.длин.2,1, шир.1,385

м2

29,085

81 196

Стеклопакет 8ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-6Extra Clear зак.длин.2,135, шир.1,385

м2

0,129

360

Стеклопакет 8ClimaGuard Premium Tзак.-14Ar-4Extra Clear-14Ar-6Extra Clear зак.длин.2,135, шир.1,415

м2

3,021

8 434

Стеклопакеты (согласно спецификации)

м2

2 364,762

7 572 966

Стойка СТ1 оц.1,2 мм с двустор.покр. (рекуп.) L=3140 мм, шт

шт

125,000

62 313

Стойка СТ1 оц.1,2 мм с двустор.покр. (рекуп.) L=3590 мм, шт

шт

77,000

43 886

Т-приемник 334754

шт

1 000,000

30 258

Твердосплавный бур ТЕ-СХ 10/22 МР32

шт

32,000

20 769

Твердосплавный бур ТЕ-СХ 10/22 МР8

шт

24,000

15 433

Твердосплавный бур ТЕ-СХ 10/27 МР8

шт

24,000

19 248

Уголок AYPC.W62.0912, шт

шт

2 880,000

26 791

Уголок AYPC.W62.0968 (цв. 00)

шт

932,000

7 618

Уголок г/к 25*25*4 ГОСТ 8509-93

пог. м

60,000

4 760

Уголок г/к 50*50*4 Ст3 ГОСТ 8509-93

пог. м

60,000

7 760

Уголок опорный 19х45 нерж. 1,2мм L=75, шт

шт

50,000

1 250

Уголок резиновый FRK170, шт

шт

4,000

159

Уголок резиновый FRK182, шт

шт

244,000

14 989

Уголок резиновый FRK64

шт

4 924,000

332 208

Уголок УГФ-1

шт

600,000

2 455

Уголок УГФ-2 (105х27) СТ

шт

400,000

3 430

УМП-10-01А-монтажный узел неподвижный

компл

1 721,000

644 853

Уплотнитель резиновый FRK07, м

м

20,000

222

Уплотнитель резиновый FRK13

м

40,000

395

Уплотнитель резиновый FRK131

м

6 376,710

273 107

Уплотнитель резиновый FRK14

м

5 830,230

52 491

Уплотнитель резиновый FRK15

м

2 664,130

35 548

Уплотнитель резиновый FRK16, м

м

3 675,000

80 924

Уплотнитель резиновый FRK17

м

7 044,220

133 598

Уплотнитель резиновый FRK174, м

м

71,804

5 944

Уплотнитель резиновый FRK18

м

3 642,950

77 527

Уплотнитель резиновый FRK19

м

3 902,260

98 815

Уплотнитель резиновый FRK24

м

35 843,260

449 601

Уплотнитель резиновый FRK29-01

м

6 037,000

54 838

Уплотнитель резиновый FRK36

м

610,000

6 854

Уплотнитель резиновый FRK38

м

6 219,000

60 151

Уплотнитель резиновый FRK63

м

6 201,000

372 509

Уплотнитель резиновый FRK65, м

м

10,000

246

Уплотнитель резиновый FRK67

м

3 367,000

46 774

Уплотнитель резиновый FRK98

м

6 455,000

43 227

Уплотнитель фальца AYPC.F50.0909

м

20,000

911

Уплотнитель фальца AYPC.F50.0910

м

100,000

4 102

Уплотнитель фальца AYPC.F50.0911

м

1 195,650

59 549

Уплотнитель фальца AYPC.F50.0912

м

1 954,160

101 040

Уплотнитель фальца AYPC.W72.0911

м

2 910,000

102 985

Уплотнитель фетровый РВ048.0750-FP, м

м

10,000

178

Фиброцементная панель ORA 112 384D (3030*455*18мм)

м2

31,540

54 079

Фиброцементная панель ORA 112 485D (3030*455*18мм)

м2

2 557,498

4 808 110

Фиксар АНК 10х105/25 М клиновой анкер с покрытием MAGNI, шт

шт

2 014,000

63 702

Фиксар АНК 12х105/25 М клиновой анкер с покрытием MAGNI, шт

шт

2 000,000

111 000

Фиксар ДФ-Б 10х115 ТД дюбель фасадный (200шт.), упак

упак

5,255

16 553

Шайба A2 10DIN9021

100 шт

27,820

22 931

Шайба AYPC.F50.2905 (цв. 00)

шт

1 897,000

17 462

Шайба DIN 127 гровер D 8 нерж. сталь А2

шт

2 000,000

2 167

Шайба M10DIN125

100 шт

18,000

3 740

Шайба М10 А2 DIN 125, шт

шт

2 070,000

12 627

Шайба с EPDM 6,7x16EPDM*

100 шт

235,000

48 692

Шайба Ш1 нерж.3,0 мм, шт

шт

10 222,000

115 852

Шайба Ш2 нерж.1,2 мм, шт

шт

1 685,000

35 427

Шовный раствор д/исп-я в навесных вентилир.фасадах FM-R.E, антрацитово-серый, мешок 25 кг, кг

кг

108,300

4 522

Штифт 5х10DIN6325D, 100шт

100 шт

116,000

26 896

Элемент запорный вставной 334671

шт

2 418,000

49 759

Элемент сухарный AYPC.F50.0942-03 (цв. 00), шт

шт

100,000

2 969

Элемент сухарный AYPC.F50.0943-04 (цв. 00)

шт

101,000

5 818

Элемент сухарный AYPC.F50.0945-04 (цв. 00)

шт

603,000

20 406

Элемент сухарный AYPC.F50.0966-04 (цв. 00)

шт

8 428,000

409 287

ИТОГО

48 630 954

3.       Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                                   А.Г.Алексеев