Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-135695/17-130-1218

г. Москва

07 ноября 2017 г.

Резолютивная часть решения объявлена 31 октября 2017 года

Полный текст решения изготовлен 07 ноября 2017 года

Арбитражный суд в составе судьи Кукиной С.М., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению (заявлению) ООО "Научно-производственное предприятие "Архитектура, инжиниринг, Монтаж" (адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая, д.7, стр.2, ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 07.10.2003) к АО "Теплоэнергетическая компания Мосэнерго" (адрес: 101000, Москва, переулок Огородная Слобода, д.5А,  ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 30.11.2007) о взыскании денежных средств в размере 33 824 483,12 руб., денежных средств в размере 3 367 514,34 руб.

при участии представителей: от истца - ФИО2, ФИО3. № 2017/01 от 20.01.2017, паспорт ; от ответчика  - ФИО4, ФИО3. № Д-333 от 14.12.2016, паспорт

УСТАНОВИЛ:

В судебном заседании был объявлен перерыв с 24.10.2017 до 31.10.2017.

ООО "Научно-производственное предприятие "Архитектура, инжиниринг, Монтаж"  обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к АО "Теплоэнергетическая компания Мосэнерго" (адрес: 101000, Москва, переулок Огородная Слобода, д.5А,  ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 30.11.2007) о взыскании 

задолженность по оплате выполненных работ по Договор) № 05/Н/15-57495 от 29 сентября 2015 года в размере 30 754 139 (тридцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи сто тридцать девять) рублей 22 копейки;

• задолженность по оплате выполненных работ по Договору № 01/Т20/13-2367 от 20 февраля 2013 года в размере 2 734 248 (два миллиона семьсот тридцать четыре тысячи двести сорок восемь) рублей 61 копейка;

• задолженность по оплате выполненных работ по Договору № 01/Т12/14-56441 от 5 июня 2014 года в размере 2 437 879 (два миллиона четыреста тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят девять рублей) 55 копеек;

• задолженность по оплате выполненных работ по Договору № 09/Т12/14-56400 от 23 апреля 2014 года в размере 6 494 (шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 94 копейки;

• задолженность по оплате выполненных работ по Договору № 926 от 13 ноября 2012 года в размере 6 177 (шесть тысяч сто семьдесят семь) рублей 44 копейки;

• задолженность по оплате выполненных работ по Договору № 908/3 от 1 октября 2012 года в размере 44 483 (сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 43 копейки;

• неустойку Договору №05/Н/15-57495 от 29 сентября 2015 года за просрочку оплаты работ за период с 21 мая 2016 года по 24 октября 2017 года в размере 2 174 964 (два миллионов сто семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 35 копеек;

• неустойку по Договору № 05/Н/15-57495 от 29 сентября 2015 года за просрочку оплаты гарантийной суммы за период с 30 сентября 2016 года по 24 октября 2017 года в размере 900 449 (девятьсот тысяч четыреста сорок девять) рублей 57 копеек;

• неустойку по Договору № 01/Т16ГП/16-137 от 1 сентября 2016 года за просрочку оплаты работ за период с 26 апреля 2017 года по 30 июля 2017 года в размере 8 849 (восемь тысяч восемьсот сорок девять) рублей 65 копеек;

• неустойку по Договору № 01/Т20/13-2367 от 20 февраля 2013 года за период с 25 ноября 2016 года по 24 октября 2017 года в размере 273 424 (двести семьдесят три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 86 копеек;

• неустойку по Договору № 01/Т12/14-56441 от 5 июня 2014 года за период с 17 февраля 2017 года по 24 октября 2017 года в размере 243 787 (двести сорок три тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 95 копеек;

• неустойку по Договору № 09/Т12/14-56400 от 23 апреля 2014 года за период с 5 мая 2017 года по 24 октября 2017 года в размере 649 (шестьсот сорок девять) рублей 40 копеек;

• неустойку по Договору № 926 от 13 ноября 2012 года за период с 5 мая 2017 года по 24 октября 2017 года в размере 617 (шестьсот семнадцать) рублей 74 копейки;

• неустойку по Договору № 908/3 от 1 октября 2012 года за период с 5 мая 2017 года по 24 октября 2017 года в размере 4 448 (четыре тысячи четыреста сорок восемь) рублей 34 копейки.

Обращение с иском последовало в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства по оплате поставленной электроэнергии. Требования уточнялись в порядке ст. 49 АПК РФ, приняты судом в указанной редакции.

Истец в судебное заседание явился, поддержал заявленные требования.

Ответчик в судебное заседание явился, требования в части суммы основного долга признал, вместе с тем, возражал против начисления неустойки.

Исследовав материалы дела в объеме представленных доказательств, судом усматриваются основания для удовлетворения иска по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, АО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (далее по тексту - «Ответчик», «Генподрядчик», «АО «ТЭК Мосэнерго») и ООО «Научно-производственное предприятие «Архитектура, Инжиниринг. Монтаж» (далее по тексту - «Истец». «Субподрядчик». ООО «НПП «АИМ») заключили ряд договоров на выполнение работ и поставку оборудования.

ООО «НПП «АИМ» выполнило обязательства по указанным договорам в полном объеме, однако со стороны «АО «ТЭК Мосэнерго» были допущены нарушения в виде задолженности по оплате.

29 сентября 2015 года между АО «ТЭК Мосэнерго» и ООО «НПП «АИМ» заключен договор субподряда с поставкой оборудования № 05/Н/15-57495 (далее по тексту - «Договор-1»), по условиям которого Субподрядчик обязался в срок до 30 апреля 2016 года (пункт 4.1 Договора-1) выполнить комплекс работ по созданию системы инженерно-технических средств охраны (ИТСО) (пункт 2.1 Договора-1) на объекте «Производственно-технологический комплекс Нижнетуринской ГРЭС. Этап строительства № 1 (ПК1). Этап строительства № 2 (ПК № 2)».

В соответствии с пунктом 3.1 Договора-1 общая цена Договора составляет 90 044 957 (девяносто миллионов сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь рублей) 10 копеек (согласно Дополнительному соглашению к Договору № 3 от 13 мая 2016 года) и складывается из общей стоимости оборудования (39 875 323, 61 руб.). поставляемого по Договору. общей стоимости строительно-монтажных (43 707 951.13 руб.) и пусконаладочных работ (6 461 682.36 руб.). Стоимость оборудования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ детализируется в Приложении №1 к Договору-1 -Ведомости договорной цены.

Согласно пункту 5.2.3 Договора-1 Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

Согласно пункту 10.11 Договора-1 объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ, произведенный Субподрядчиком, считается выполненным и его результат принятым с момента подписания Генподрядчиком без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

В соответствии с пунктом 8.4 Договора-1 оплата за выполненные работы производится на основании Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ в течение 25 рабочих дней с даты предоставления Субподрядчиком оригиналов указанных документов, а также Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Счета на оплату и Счета-фактуры, принятых Генподрядчиком без замечаний.

Пункты 8.5-8.8 раздела 8 Договора-1 содержат условия относительно Гарантийных сумм. В соответствии с разделом 1 Договора-1 «Термины, используемые в Договоре» Гарантийная сумма - предусмотренный Договором способ обеспечения обязательств Субподрядчика в виде части общей цены Договора. В соответствии с пунктом 8.5 Договора-1 при оплате выполненных работ Генподрядчик удерживает в счет гарантийной суммы денежные средства из сумм соответствующих платежей в размере 10 % от суммы платежей за выполненные работы (гарантийная сумма). В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 15.10.2015 года, начиная с 29 сентября 2015 года, гарантийная сумма составила 15 % от суммы платежей за выполненные работы.

Согласно пункту 8.6 Договора-1 гарантийная сумма представляет собой согласованный сторонами способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по Договору, не является удерживаемой Генподрядчиком суммой и Субподрядчик получает право на выплату гарантийной суммы в полном объеме после истечения Гарантийного срока и при условии отсутствия претензий со стороны Генподрядчика.

В соответствии с пунктом 8.7 Договора-1 50 % сформированной гарантийной суммы будут оплачены Субподрядчику после подписания Акта окончательной приемки выполненных работ в течение 30-ти рабочих дней с даты получения Генподрядчиком оригиналов Счета Субподрядчика и Акта окончательной приемки выполненных работ. Оставшиеся 50 % сформированной гарантийной суммы будут оплачены Субподрядчику в течение 30-ти дней после истечения гарантийного срока и предоставления Субподрядчиком счета на оплату.

Пункт 11.4 Договора-1 устанавливает гарантийный срок, который составляет для оборудования 24 месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на результат выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ начинается с даты подписания сторонами Акта окончательной приемки выполненных работ и истекает также спустя 24 месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию.

Согласно пункту 13.7 Договора-1 в случае просрочки Генподрядчиком оплаты принятого результата работ сроком более чем на 3 месяца Субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Во исполнение обязанностей, возложенных Договором-1 на Субподрядчика, ООО «НПП «АИМ» выполнило предусмотренные Договором-1 Работы.

Согласно Актам приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. подписанными Истцом и Ответчиком. Истцом по Договору-1 были выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на общую сумму 50 169 633 (пятьдесят миллионов сто шестьдесят девять тысяч шестьсот тридцать три) рубля 49 копеек. Согласно Товарным накладным Истец также поставил в адрес Должника оборудование на сумму 39 875 323 (тридцать девять миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч триста двадцать три) рубля 60 копеек.. Всего Истцом по Договору-1 было выполнено работ и поставлено оборудования на общую сумму 90 044 957 (девяносто миллионов сорок четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь) рублей 10 копеек..

В соответствии с Актом окончательной приемки выполненных работ от 16 августа 2016 года Субподрядчик выполнил работы в соответствии с Договором-1 и перечнем работ, указанным в Приложении №1 к Договору, а также в полном соответствии с технической документацией, а Генподрядчик принял результаты выполненных работ.

Во исполнение условий Договора-1 и для получения оплаты за выполненные работы 11 апреля 2016 года Истец направил в адрес Ответчика пакет документов, предусмотренный пунктом 8.4 Договора-1. за исходящим номером 01/16-78, который был получен Ответчиком 12 апреля 2016 года, что подтверждается сопроводительным письмом. Таким образом, в течение 25рабочих дней с даты получения Ответчиком указанного пакета документов. Ответчик был обязан в полном объеме оплатить работы.

Однако несмотря на то. что Субподрядчик согласно условиям Договора-1 выполнил свои обязательства по поставке оборудования и реализации строительно-монтажных и пусконаладочных работ в полном объеме, задолженность Генподрядчика по оплате выполненных работ по Договору-1 на текущий момент составляет 21 749 643 (двадцать один миллион семьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок три) рубля 51 копейка, что подтверждается подписанным Истцом и Ответчиком Актом сверки взаимных расчетов за период с января 2014 года по апрель 2017 года.

Помимо задолженности по оплате работ. Генподрядчик имеет обязательство перед Истцом по возврату гарантийной суммы в общем размере 13 506 743 (тринадцать миллионов пятьсот шесть тысяч семьсот сорок три) рубля 57 копеек, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов по гарантийным суммам за период с января 2014 года по апрель 2017 года.

В соответствии с условиями Договора-1, указанными выше, срок возврата 50% гарантийной суммы наступил спустя 30 рабочих дней после подписания Истцом и Ответчиком Акта окончательной приемки выполненных работ и получения указанного Акта и Счета на оплату Генподрядчиком. Во исполнение условий Договора-1 и для получения оплаты части гарантийной суммы 17 августа 2016 года Истец направил в адрес Ответчика пакет документов, предусмотренный пунктом 8.7 Договора-1, за исходящим номером 01/16-192, который был получен Ответчиком 18 августа 2016 года, что подтверждается сопроводительным письмом.

Таким образом, в течение 30 рабочих дней с даты получения Ответчиком указанного пакета документов. Ответчик был обязан частично оплатить гарантийную сумму в размере 6 753 371 (шесть миллионов семьсот пятьдесят три тысячи триста семьдесят один) рубль 78 копеек.

Вместе с тем, 1 августа 2017 года Истец и Ответчик подписали Дополнительное соглашение к Договору субподряда № 05/Н/15-57495 от 29.09.2015 г. № 4 (далее по тексту - «Дополнительное соглашение № 4», Приложение № 2 к настоящему Заявлению), которым закрепили следующий порядок оплаты гарантийной суммы: 10 % общей цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, являющиеся Гарантийной суммой, будут оплачены Субподрядчику после подписания Акта окончательной приемки выполненных работ в течение 30-ти рабочих дней с даты получения Генподрядчиком оригиналов Счета Субподрядчика и Акта окончательной приемки выполненных работ. Оставшиеся 5 % сформированной гарантийной суммы будут оплачены Субподрядчику в течение 30ти дней после истечения гарантийного срока и предоставления Субподрядчиком счета на оплату.

Как указывалось выше, гарантийная сумма по Договору-1 в общем размере составляет 13 506 743 (тринадцать миллионов пятьсот шесть тысяч семьсот сорок три) рубля 57 копеек.

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 4, изложенными выше, срок возврата 10 % стоимости выполненных работ и поставленного оборудования (2/3 от гарантийной суммы), наступил спустя 30 рабочих дней после подписания Истцом и Ответчиком Акта окончательной приемки выполненных работ и получения указанного Акта и Счета на оплату Генподрядчиком. Во исполнение условий Договора-1 и для получения оплаты части гарантийной суммы 17 августа 2016 года Истец направил в адрес Ответчика пакет документов, предусмотренный пунктом 8.7 Договора-1, за исходящим номером 01/16-192. который был получен Ответчиком 18 августа 2016 года, что подтверждается сопроводительным письмом (Приложение № 42 к исковому заявлению). Таким образом, в течение 30 рабочих дней с даты получения Ответчиком указанного пакета документов. Ответчик был обязан частично оплатить гарантийную сумму в размере:

13 506 743, 57 рублей * 2/3 = 9 004 495 (девять миллионов четыре тысячи четыреста девяноста пять) рублей 71 копейка.

Таким образом, совокупная задолженность по оплате выполненных работ и гарантийной суммы по Договору № 05/Н/15-57495 от 29 сентября 2015 года составляет 21 749 643 (двадцать один миллион семьсот сорок девять тысяч шестьсот сорок три) рубля 51 копейка и 9 004 495 (девять миллионов четыре тысячи четыреста девяноста пять) рублей 71 копейка соответственно, всего 30 754 139 (тридцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи сто тридцать девять) рублей 22 копейки. До настоящего момента указанная задолженность Ответчиком не погашена.

1 сентября 2016 года между АО «ТЭК Мосэнерго» и ООО «НПП «АИМ» заключен договор субподряда № 01/Т16ГП/16-137 (далее по тексту - «Договор-2»), по условиям которого Субподрядчик обязался в срок до 31 декабря 2016 года (пункт 2.3 Договора-2) выполнить работы по реализации изменений в системах автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре главного корпуса на энергоблоке ст. № 8 ПГУ-420Т ТЭЦ-16 - филиал ПАО «Мосэнерго».

В соответствии с пунктом 3.1 Договора-2 общая стоимость работ по Договору составляет 460 919 (четыреста шестьдесят тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 30 копеек.

Согласно пункту 5.2.1 Договора-2 Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

Согласно пункту 8.7 Договора-2 объем работ, произведенный Субподрядчиком, считается выполненным и его результат принятым с момента подписания Генподрядчиком без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

В соответствии с пунктом 4.6 Договора-2 оплата за выполненные работы производится на основании Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ в течение 25 рабочих дней с даты предоставления Субподрядчиком оригиналов указанных документов, а также Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Счета на оплату. Счета-фактуры, Исполнительной документации и копии акта выполнения гарантийного ремонта, принятых Генподрядчиком без замечаний.

Согласно пункту 10.4 Договора-2 в случае просрочки Генподрядчиком оплаты принятого результата работ сроком более чем на 3 месяца Субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0.1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Во исполнение обязанностей, возложенных Договором-2 на Субподрядчика. ООО «НИИ «АИМ» приступило к выполнению предусмотренных Договором-2 Работ.

Актом о приемке выполненных работ №1 по форме КС-2и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 по форме КС-3 от 9 марта 2017 года за период с 12 октября 2016 года по 9 марта 2017 года, подписанными Истцом и Ответчиком, подтверждается выполнение работ на сумму 460 919 (четыреста шестьдесят тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 30 копеек.

Во исполнение условий Договора-2 и для получения оплаты за выполненные работы 14 марта 2017 года Истец направил в адрес Ответчика пакет документов, предусмотренный пунктом 8.4 Договора-2, за исходящим номером 01/17-47. который был получен Ответчиком 21 марта 2017 года, что подтверждается сопроводительным письмомТаким образом, в течение 25 рабочих дней с даты получения Ответчиком указанного пакета документов. Ответчик был обязан в полном объеме оплатить работы.

В нарушение условий Договора-2 Ответчиком на момент обращения истца в суд в полном объеме не оплачены выполненные работы по договору. Задолженность Ответчика по Договору-2 на момент обращения истца в суд составляла 92 183 (девяносто две тысячи сто восемьдесят три) рубля 86 копеек, что подтверждается подписанным Истцом и Ответчиком Актом сверки взаимных расчетов за период с января 2014 года по апрель 2017 года.

31.07.2017 ответчик оплатил задолженность по Договору-2 в размере 92 183 (девяносто две тысячи сто восемьдесят три) рубля 86 копеек.

20 февраля 2013 года между АО «ТЭК Мосэнерго» и ООО «НПП «АИМ» заключен договор субподряда с поставкой оборудования № 01/Т20/13-2367), по условиям которого Субподрядчик обязался в срок до 31 октября 2015 года (пункт 4.1 Договора-3 в редакции Дополнительного соглашения № 5 к Договору-3) поставить оборудование и выполнить работы на объекте - Энергоблок ПГУ-420 МВт ТЭЦ-20.

В соответствии с пунктом 3.1 Договора-3 (в редакции Дополнительного соглашения № 8 от 15 октября 2016 года) общая стоимость работ по Договору составляет 54 680 484 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 11 копеек и складывается из стоимости предоставления исходных данных для проектирования рабочей документации (472 000 руб.), стоимости оборудования (11 931 169, 72 руб.), стоимости строительно-монтажных работ (25 926 319, 63 руб.). стоимости пуско-наладочных работ (16 205 496. 19 руб.) и стоимости строительно-монтажных работ по временной телефонной связи (145 498, 57 руб.).

Согласно пункту 5.2.3 Договора-3 Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

Согласно пункту 11.11 Договора-3 объем строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, произведенный Субподрядчиком, считается выполненным и его результат принятым с момента подписания Генподрядчиком без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Пункты 8.6-8.9 Договора-3 содержит условия относительно Гарантийных сумм. В соответствии с разделом 1 Договора-3 «Термины, используемые в Договоре» Гарантийная сумма -предусмотренный Договором способ обеспечения обязательств Субподрядчика в виде части общей цены Договора. В соответствии с пунктом 8.6 Договора-3 при оплате выполненных работ Генподрядчик удерживает в счет гарантийной суммы денежные средства из сумм соответствующих платежей в размере 10 % от суммы платежей за выполненные работы (гарантийная сумма).

Согласно пункту 8.7 Договора-3 гарантийная сумма представляет собой согласованный сторонами способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по Договору, не является удерживаемой Генподрядчиком суммой и Субподрядчик получает право на выплату гарантийной суммы в полном объеме после истечения Гарантийного срока и при условии отсутствия претензий со стороны Генподрядчика.

В соответствии с пунктом 8.8 Договора-3 50 % сформированной гарантийной суммы будут оплачены Субподрядчику после подписания Акта окончательной приемки выполненных работ в течение 30-ти рабочих дней с даты получения Генподрядчиком оригиналов Счета Субподрядчика и Акта окончательной приемки выполненных работ. Оставшиеся 50 % сформированной гарантийной суммы будут оплачены Субподрядчику в течение 30-ти дней после истечения гарантийного срока и предоставления Субподрядчиком счета на оплату.

Пункт 12.4 Договора-3 устанавливает гарантийный срок, который составляет для оборудования 24 месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на результат выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ начинается с даты подписания сторонами Акта окончательной приемки выполненных работ и истекает также спустя 24 месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию.

Согласно пункту 14.9 Договора-3 в случае просрочки Генподрядчиком оплаты принятого результата работ сроком более чем на 3 месяца Субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0.2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Во исполнение обязанностей, возложенных Договором-3 на Субподрядчика. ООО «НПП «АИМ» выполнило предусмотренные Договором-3 Работы.

Согласно Актам приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. подписанными Истцом и Ответчиком. Истцом по Договору-3 были выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на общую сумму 42 277 314 (сорок два миллиона двести семьдесят семь тысяч триста четырнадцать) рублей3 7 копеек.

Согласно Товарным накладным Истец также поставил в адрес Должника оборудование на сумму 11 935 657 (одиннадцать миллионов девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 80 копеек.

Также согласно Акту приема-передачи стоимость предоставления исходных данных для проектирования рабочей документации составила 472 ООО (четыреста семьдесят две тысячи) рублей.

Всего Истцом по Договору-3 было выполнено работ и поставлено оборудования на общую сумму 54 684 972 (пятьдесят четыре миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 17 копеек.

В соответствии с Актом окончательной приемки выполненных работ от 29 августа 2016 года Субподрядчик выполнил работы в соответствии с Договором-3 и перечнем работ, указанным в Приложении №1 к Договору, а также в полном соответствии с технической документацией, а Генподрядчик принял результаты выполненных работ.

На настоящий момент Генподрядчик имеет обязательство перед Истцом по возврату гарантийной суммы в общем размере 5 468 497 (пять миллионов четыреста шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто семь) рублей 22 копейки, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов по гарантийным суммам за период с января 2014 года по апрель 2017 года.

Во исполнение условий Договора-3 и для получения оплаты части гарантийной суммы 19 октября 2016 года Истец направил в адрес Ответчика пакет документов, предусмотренный пунктом 8.8 Договора-3. за исходящим номером 01/16-240. который был получен Ответчиком 19 октября 2016 года, что подтверждается сопроводительным письмом (Приложение №76 к настоящему исковому заявлению). Таким образом, в течение 25 рабочих дней с даты получения Ответчиком указанного пакета документов в соответствии с условиями Договора-3 Ответчик был обязан оплатить 50 % от Гарантийной суммы в размере 2 734 248 (два миллиона семьсот тридцать четыре тысячи двести сорок восемь) рублей 61 копейка. Однако до настоящего момента Ответчик указанную сумму не оплатил.

5 июня 2014 года между АО «ТЭК Мосэнерго» и ООО «НПП «АИМ» заключен договор субподряда с поставкой оборудования № 01/Т12/14-56441 (далее по тексту -«Договор-4») (Приложение № 77 к настоящему исковому заявлению), по условиям которого Субподрядчик обязался в срок до 30 ноября 2014 года (пункт 4.1 Договора-4 в редакции Дополнительного соглашения № 2 к Договору-4) выполнить комплекс работ по созданию на объекте - Энергоблок ПГУ-220Т - системы инженерно-технических средств охраны (ИТСО).

В соответствии с пунктом 3.1 Договора-4 (в редакции Дополнительного соглашения № 2 от 21 октября 2014 года; общая стоимость работ по Договору-4 составляет 48 757 590 (сорок восемь миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 97 копеек и складывается из стоимости оборудования (13 418 925, 64 руб.), стоимости строительно-монтажных работ (24 371 928, 21 руб.) и стоимости пуско-наладочных работ (10 966 737, 12 руб.).

Согласно пункту 5.2.3 Договора-4 Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

Согласно пункту 10.11 Договора-4 объем строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, произведенный Субподрядчиком, считается выполненным и его результат принятым с момента подписания Генподрядчиком без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Пункты 8.5-8.8 Договора-4 содержит условия относительно Гарантийных сумм. В соответствии с разделом 1 Договора-4 «Термины, используемые в Договоре» Гарантийная сумма - предусмотренный Договором способ обеспечения обязательств Субподрядчика в виде части общей цены Договора. В соответствии с пунктом 8.5 Договора-4 при оплате выполненных работ Генподрядчик удерживает в счет гарантийной суммы денежные средства из сумм соответствующих платежей в размере 10 % от суммы платежей за выполненные работы (гарантийная сумма).

Согласно пункту 8.6 Договора-4 гарантийная сумма представляет собой согласованный сторонами способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по Договору, не является удерживаемой Генподрядчиком суммой и Субподрядчик получает право на выплату гарантийной суммы в полном объеме после истечения Гарантийного срока и при условии отсутствия претензий со стороны Генподрядчика.

В соответствии с пунктом 8.7 Договора-4 50 % сформированной гарантийной суммы будут оплачены Субподрядчику после подписания Акта окончательной приемки выполненных работ в течение 30-ти рабочих дней с даты получения Генподрядчиком оригиналов Счета Субподрядчика и Акта окончательной приемки выполненных работ. Оставшиеся 50 % сформированной гарантийной суммы будут оплачены Субподрядчику в течение 30-ти дней после истечения гарантийного срока и предоставления Субподрядчиком счета на оплату.

Пункт 11.4 Договора-4 устанавливает гарантийный срок, который составляет для оборудования 24 месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на результат выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ начинается с даты подписания сторонами Акта окончательной приемки выполненных работ и истекает также спустя 24 месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию.

Согласно пункту 13.9 Договора-4 в случае просрочки Генподрядчиком оплаты принятого результата работ сроком более чем на 3 месяца Субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0.2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Во исполнение обязанностей, возложенных Договором-4 на Субподрядчика. ООО «НПП «АИМ» выполнило предусмотренные Договором-4 Работы.

Согласно Актам приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. подписанными Истцом и Ответчиком, Истцом по Договору-4 были выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на общую сумму 35 338 665 (тридцать пять миллионов триста тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 33 копейки.

Согласно Товарным накладным Истец также поставил в адрес Должника оборудование на сумму 13 418 925 (тринадцать миллионов четыреста восемнадцать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей 64 копейки. Всего Истцом по Договору-4 было выполнено работ и поставлено оборудования на общую сумму 48 757 590 (сорок восемь миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 97 копеек.

В соответствии с Актом окончательной приемки выполненных работ от 19 декабря 2014 года  Субподрядчик выполнил работы в соответствии с Договором-4 и перечнем работ, указанным в Приложении №3 к Договору, а также в полном соответствии с технической документацией, а Генподрядчик принял результаты выполненных работ.

Гарантийная сумма по Договору-4 составила 4 875 759 (четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 10 копеек. 50 % которой была оплачена Генподрядчиком.

20 декабря 2016 года в соответствии с условиями Договора-4 истек гарантийный срок по Договору-4, в связи с чем наступил срок оплаты оставшихся 50 % от Гарантийной суммы в размере 2 437 879 (два миллиона четыреста тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят девять рублей) 55 копеек.

Во исполнение условий Договора-4 и для получения оплаты оставшейся части гарантийной суммы 12 января 2017 года Истец направил в адрес Ответчика пакет документов, предусмотренный пунктом 8.7 Договора-4, за исходящим номером 01/17-05, который был получен Ответчиком 16 января 2017 года, что подтверждается сопроводительным письмом. Таким образом, в течение 30-ти дней с даты получения Ответчиком указанного пакета документов в соответствии с условиями Договора-4 Ответчик был обязан оплатить оставшиеся 50 % от Гарантийной суммы в размере 2 437 879 (два миллиона четыреста тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят девять рублей) 55 копеек.

Однако до настоящего момента Ответчик указанную сумму не оплатил, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов по гарантийным суммам за период с января 2014 года по апрель 2017 года.

23 апреля 2014 года между АО «ТЭК Мосэнерго» и ООО «НПП «АИМ» заключен договор субподряда № 09/Т12/14-56400 (далее по тексту - «Договор-5»), по условиям которого Субподрядчик обязался в срок до 27 апреля 2014 года (пункт 4.1 Договора-5) выполнить демонтажные и монтажные работы на объекте - ПГУ-220Т.

В соответствии с пунктом 3.1 Договора-5 общая стоимость работ по Договору составляет 129 898 (сто двадцать девять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 75 копеек.

Согласно пункту 5.2.3 Договора-5 Генподрядчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями Договора.

Согласно пункту 9.10 Договора-5 объем строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, произведенный Субподрядчиком, считается выполненным и его результат принятым с момента подписания Генподрядчиком без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Пункты 8.3-8.6 Договора-5 содержит условия относительно Гарантийных сумм. В соответствии с разделом 1 Договора-5 «Термины, используемые в Договоре» Гарантийная сумма - предусмотренный Договором способ обеспечения обязательств Субподрядчика в виде части общей цены Договора. В соответствии с пунктом 8.3 Договора-5 при оплате выполненных работ Генподрядчик удерживает в счет гарантийной суммы денежные средства из сумм соответствующих платежей в размере 5 % от суммы платежей за выполненные работы (гарантийная сумма).

Согласно пункту 8.4 Договора-5 гарантийная сумма представляет собой согласованный сторонами способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств Субподрядчика по Договору, не является удерживаемой Генподрядчиком суммой и Субподрядчик получает право на выплату гарантийной суммы в полном объеме после истечения Гарантийного срока и при условии отсутствия претензий со стороны Генподрядчика.

В соответствии с пунктом 8.5 Договора-5 сформированная гарантийная сумма будет оплачена Субподрядчику после подписания Акта окончательной приемки выполненных работ в течение 30-ти рабочих дней с даты получения Генподрядчиком оригиналов Счета Субподрядчика и Акта окончательной приемки выполненных работ.

Пункт 10.2 Договора-5 устанавливает гарантийный срок на результат выполненных работ, который составляет 24 месяца с даты подписания сторонами Акта окончательной приемки выполненных работ.

Согласно пункту 11.6 Договора-5 в случае просрочки Генподрядчиком оплаты принятого результата работ сроком более чем на 3 месяца Субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Во исполнение обязанностей, возложенных Договором-5 на Субподрядчика, ООО «НПП «АИМ» выполнило предусмотренные Договором-5 Работы.

Актом о приемке выполненных работ №1 по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 по форме КС-3 за период с 1 апреля 2014 года по 27 апреля 2014 года от 27 апреля 2014 года, подписанными Ответчиком, подтверждается выполнение работ на сумму 129 898 (сто двадцать девять тысяч восемьсот девяносто восемь) рублей 75 копеек.

В соответствии с Актом окончательной приемки выполненных работ от 27 апреля 2014 года Субподрядчик выполнил работы в соответствии с Договором-5 и перечнем работ, указанным в Приложении №1 к Договору, а также в полном соответствии с технической документацией, а Генподрядчик принял результаты выполненных работ.

По факту подписания Субподрядчиком и Генподрядчиком Акта окончательной приемки выполненных работ, а также в связи с окончанием гарантийного срока в соответствии с условиями Договора-5 наступил срок возврата гарантийной суммы в размере 6 494 (шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 94 копейки.

Во исполнение условий Договора-5 и для получения оплаты гарантийной суммы 21 марта 2017 года Истец направил в адрес Ответчика пакет документов, предусмотренный пунктом 8.5 Договора-5. за исходящим номером 01/17-59. который был получен Ответчиком 22 марта 2017 года, что подтверждается сопроводительным письмом. Таким образом, в течение 30-ти дней с даты получения Ответчиком указанного пакета документов в соответствии с условиями Договора-5 Ответчик был обязан оплатить гарантийную сумму в размере 6 494 (шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 94 копейки.

Однако вплоть до настоящего момента Ответчик указанную сумму не оплатил, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов по гарантийным суммам за период с января 2014 года по апрель 2017 года.

13 ноября 2012 года между АО «ТЭК Мосэнерго» и ООО «НПП «АИМ» заключен договор субподряда № 926 (далее по тексту - «Договор-6»), по условиям которого Субподрядчик обязался выполнить комплекс работ по прокладке волоконнооптического кабеля между КПП1 и КПП2 Адлерской ТЭС.

В соответствии с пунктом 3.1 Договора-6 общая стоимость работ по Договору составляет 186 961 (сто восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 55 копеек.

Согласно пункту 6.1.2 Договора-6 Генподрядчик обязан произвести оплату выполненного Субподрядчиком этапа работ в порядке, предусмотренном Договором.

Согласно пункту 7.12 Договора-6 этап работ, произведенный Субподрядчиком, считается выполненным и принятым с момента подписания Генподрядчиком без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Пункты 4.3-4.5 Договора-6 содержит условия относительно Гарантийных сумм. В соответствии с разделом 1 Договора-6 «Термины, используемые в Договоре» Гарантийная сумма - предусмотренный Договором способ обеспечения обязательств Субподрядчика в виде части общей цены Договора. В соответствии с пунктом 4.3 Договора-6 Генподрядчик из сумм соответствующих платежей за выполненный этап работ удерживает в счет гарантийной суммы 5 % от суммы платежа (гарантийная сумма).

В соответствии с пунктом 4.4 Договора-6 Генподрядчик выплачивает субподрядчику все суммы, удержанные в счет гарантийной суммы, после истечения гарантийного срока в течение 30-ти дней с даты предоставления счета при условии отсутствия претензий и требований со стороны Генподрядчика.

Согласно пункту 8.2 Договора-6 гарантийный срок на результат выполненных работ начинается с даты подписания по последнему этапу работ Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и истекает по истечении 24 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, но не позднее 1 сентября 2014 года.

Согласно пункту 9.2 Договора-6 за просрочку оплаты выполненного этапа работ Генподрядчиком сроком более чем на 3 месяца Субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0.15 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Во исполнение обязанностей, возложенных Договором-6 на Субподрядчика. ООО «НПП «АИМ» выполнило предусмотренные Договором-6 Работы.

Актом о приемке выполненных работ б/н по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат б/н по форме КС-3 за период с 1 ноября 2012 года по 30 ноября 2012 года от 30 ноября 2012 года, подписанными Ответчиком, подтверждается выполнение работ на сумму 123 548 (сто двадцать три тысячи пятьсот сорок восемь) рублей 73 копейки.

По факту истечения гарантийного срока 1 сентября 2014 года в соответствии с условиями Договора-6 наступил срок возврата гарантийной суммы в размере 6 177 (шесть тысяч сто семьдесят семь) рублей 44 копейки. Во исполнение условий Договора-6 и для получения оплаты гарантийной суммы 21 марта 2017 года Истец направил в адрес Ответчика пакет документов, предусмотренный пунктом 4.4 Договора-6, за исходящим номером 01/17-59, который был получен Ответчиком 22 марта 2017 года, что подтверждается сопроводительным письмом.

Таким образом, в течение 30-ти дней с даты получения Ответчиком указанного пакета документов в соответствии с условиями Договора-6 Ответчик был обязан оплатить гарантийную сумму в размере 6 177 (шесть тысяч сто семьдесят семь) рублей 44 копейки. Однако до настоящего момента Ответчик указанную сумму не оплатил.

1 октября 2012 года между АО «ТЭК Мосэнерго» и ООО «НПП «АИМ» заключен договор субподряда № 908/3 (далее по тексту - «Договор-7»), по условиям Субподрядчик обязался в срок до 31 октября 2012 года (пункт 2.1 Договора-7) выполнить комплекс работ по демонтажу технических средств охраны временного ограждения Адлерской ТЭС.

В соответствии с пунктом 3.1 Договора-7 общая стоимость работ по Договору составляет 889 668 (восемьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 76 копеек.

Согласно пункту 6.1.2 Договора-7 Генподрядчик обязан произвести оплату выполненного Субподрядчиком этапа работ в порядке, предусмотренном Договором.

Согласно пункту 7.12 Договора-7 этап работ, произведенный Субподрядчиком, считается выполненным и принятым с момента подписания Генподрядчиком без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Пункты 4.3-4.5 Договора-7 содержат условия относительно Гарантийных сумм. В соответствии с разделом 1 Договора-7 «Термины, используемые в Договоре» Гарантийная сумма - предусмотренный Договором способ обеспечения обязательств Субподрядчика в виде части общей цены Договора. В соответствии с пунктом 4.3 Договора-6 Генподрядчик из сумм соответствующих платежей за выполненный этап работ удерживает в счет гарантийной суммы 5 % от суммы платежа (гарантийная сумма).

В соответствии с пунктом 4.4 Договора-7 Генподрядчик выплачивает субподрядчику все суммы, удержанные в счет гарантийной суммы, после истечения гарантийного срока в течение 30-ти дней с даты предоставления счета при условии отсутствия претензий и требований со стороны Генподрядчика.

Согласно пункту 8.2 Договора-7 гарантийный срок на результат выполненных работ начинается с даты подписания по последнему этапу работ Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и истекает по истечении 24 месяцев с даты ввода объекта в эксплуатацию, но не позднее 1 сентября 2014 года.

Согласно пункту 9.2 Договора-7 за просрочку оплаты выполненного этапа работ Генподрядчиком сроком более чем на 3 месяца Субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0.15 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Во  исполнение  обязанностей,  возложенных  Договором-7  на Субподрядчика, ООО«НПП «АИМ» выполнило предусмотренные Договором-7 Работы.

Актом о приемке выполненных работ б/н по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат б/н по форме КС-3за период с 1октября 2012 года по 31 октября 2012 года от 31 октября 2012 года, подписанными Ответчиком, подтверждается выполнение работ на сумму 889 668 (восемьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 76 копеек.

По факту истечения гарантийного срока 1 сентября 2014 года в соответствии с условиями Договора-7 наступил срок возврата гарантийной суммы в размере 44 483 (сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 43 копейки. Наличие задолженности подтверждается Актом сверки взаимных расчетов за период с января 2014 года по апрель 2017 года, согласно которому входящее сальдо по данным АО «ТЭК Мосэнерго» превышает сальдо по данным ООО «НПП «АИМ» на указанную сумму (150 378. 91 руб.- 105 895. 48 руб. = 44 483. 43 руб.).

Во исполнение условий Договора-7 и для получения оплаты гарантийной суммы 21 марта 2017 года Истец направил в адрес Ответчика пакет документов, предусмотренный пунктом 4.4 Договора-7, за исходящим номером 01/17-59, который был получен Ответчиком 22 марта 2017 года, что подтверждается сопроводительным письмом.

Таким образом, в течение 30-ти дней с даты получения Ответчиком указанного пакета документов в соответствии с условиями Договора-7 Ответчик был обязан оплатить гарантийную сумму в размере 44 483 (сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 43 копейки. До настоящего момента Ответчик указанную сумму не оплатил.

Таким образом, суммарная задолженность Ответчика перед Истцом по оплате выполненных работ и по оплате гарантийных сумм по Договору № 05/Н/15-57495 от 29 сентября 2015 года, Договору № 01/Т20/13-2367 от 20 февраля 2013 года, Договору № 01/Т12/14-56441 от 5 июня 2014 года, Договору № 09/Т12/14-56400 от 23 апреля 2014 года. Договору № 926 от 13 ноября 2012 года и Договору № 908/3 от 1 октября 2012 года составила 35 983 423 руб. 19 коп. 

В судебном заседании представитель ответчика заявил, что сумму основного долга ответчик не оспаривает.

25 мая 2017 года Истец направил в адрес Ответчика досудебную претензию №01/17-104 с требованием оплатить в течение 10 рабочих дней с момента получения Ответчиком претензии образовавшуюся задолженность. Согласно отметке на экземпляре Истца, досудебная претензия была получена Ответчиком 25 апреля 2017 года за входящим номером № ТЭК/5699. Однако вплоть до настоящего момента задолженность перед Истцом погашена Ответчиком не была.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства. 

В соответствии с п.1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ч. 1 ст. 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, указанные в договоре.

Так, согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Таким образом, исходя из положений статьи 720, пункта 4 статьи 753 ГК РФ надлежащим доказательством выполнения работ, их стоимости по договору подряда являются акты приемки выполненных работ.

В связи с чем, с момента сдачи результата работ подрядчиком заказчику у последнего возникает обязательство по оплате выполненных работ.

В соответствии со статьей 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 данного Кодекса.

Суммарная задолженность Ответчика перед Истцом по оплате выполненных работ и по оплате гарантийных сумм с учетом принятых к производству суда изменений заявленных требований  составляет 35 983 423, 19 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно пункту 13.7 Договора-1 в случае просрочки Генподрядчиком оплаты принятого результата работ сроком более чем на 3 месяца Субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0.2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Согласно пункту 10.4 Договора-2 в случае просрочки Генподрядчиком оплаты принятого результата работ сроком более чем на 3 месяца Субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Согласно пункту 14.9 Договора-3 в случае просрочки Генподрядчиком оплаты принятого результата работ сроком более чем на 3 месяца Субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Согласно пункту 13.9 Договора-4 в случае просрочки Генподрядчиком оплаты принятого результата работ сроком более чем на 3 месяца Субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0.2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Согласно пункту 11.6 Договора-5 в случае просрочки Генподрядчиком оплаты принятого результата работ сроком более чем на 3 месяца Субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Согласно пункту 9.2 Договора-6 за просрочку оплаты выполненного этапа работ Генподрядчиком сроком более чем на 3 месяца Субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,15 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Согласно пункту 9.2 Договора-7 за просрочку оплаты выполненного этапа работ Генподрядчиком сроком более чем на 3 месяца Субподрядчик вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,15 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Истцом в материалы дела представлен расчет неустойки, который проверен, принят судом и признан правильным, соответствующим обстоятельствам дела. В связи с чем, доводы ответчика, изложенные в отзыве, не принимаются судом.

На основании изложенного, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Суд, изучив довод ответчика о несоразмерности заявленной неустойки, находит его не подлежащим удовлетворению, ввиду следующего.

В силу пункта 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить.

В соответствии с разъяснениям, изложенным в п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 года № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.

Пунктом 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что основанием для применения статьи 333 ГК РФ может служить только явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательств. При оценке таких последствий судом могут приниматься во внимание, в том числе обстоятельства, не имеющие прямого отношения к последствиям нарушения обязательства. Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств, длительность неисполнения договорных обязательств и др. Вопрос о наличии или отсутствии оснований для применения указанной нормы закона арбитражный суд решает с учетом представленных доказательств и конкретных обстоятельств дела.

В соответствии со статьей 333 ГК РФ кредитор по требованию о взыскании неустойки не обязан доказывать причинение ему убытков, однако, не воспользовавшись таким правом, кредитор несет риск того, что суд в силу статьи 333 ГК РФ может уменьшить размер договорной ответственности приближенно к ставке рефинансирования, отражающей минимальный размер возможного ущерба, применительно к размеру процентов, установленных статьей 395 ГК РФ.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств направлена на установление баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения (определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2000 №263-0).

С учетом компенсационного характера гражданско-правовой ответственности под соразмерностью суммы неустойки последствиям нарушения обязательства Кодекс предполагает выплату кредитору такой компенсации его потерь, которая будет адекватна и соизмерима с нарушенным интересом.

Суд отмечает, что ответчиком не представлено доказательств явной несоразмерности начисленной неустойки (пункт 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Кроме того, в силу п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. № 81 снижение неустойки ниже двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения, не допускается.

Таким образом, требования истца о взыскании неустойки в размере 3 607 191, 97 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, суд считает требования подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 309-310, 781 ГК РФ, ст.ст. 110, 167-171, 172, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АО "Теплоэнергетическая компания Мосэнерго" (адрес: 101000, Москва, переулок Огородная Слобода, д.5А,  ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 30.11.2007) в пользу ООО "Научно-производственное предприятие "Архитектура, инжиниринг, Монтаж" (адрес: 115114, Москва, ул. Кожевническая, д.7, стр.2, ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, дата регистрации: 07.10.2003): 

• задолженность по оплате выполненных работ по Договор) № 05/Н/15-57495 от 29 сентября 2015 года в размере 30 754 139 (тридцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи сто тридцать девять) рублей 22 копейки;

• задолженность по оплате выполненных работ по Договору № 01/Т20/13-2367 от 20 февраля 2013 года в размере 2 734 248 (два миллиона семьсот тридцать четыре тысячи двести сорок восемь) рублей 61 копейка;

• задолженность по оплате выполненных работ по Договору № 01/Т12/14-56441 от 5 июня 2014 года в размере 2 437 879 (два миллиона четыреста тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят девять рублей) 55 копеек;

• задолженность по оплате выполненных работ по Договору № 09/Т12/14-56400 от 23 апреля 2014 года в размере 6 494 (шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 94 копейки;

• задолженность по оплате выполненных работ по Договору № 926 от 13 ноября 2012 года в размере 6 177 (шесть тысяч сто семьдесят семь) рублей 44 копейки;

• задолженность по оплате выполненных работ по Договору № 908/3 от 1 октября 2012 года в размере 44 483 (сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 43 копейки;

• неустойку Договору №05/Н/15-57495 от 29 сентября 2015 года за просрочку оплаты работ за период с 21 мая 2016 года по 24 октября 2017 года в размере 2 174 964 (два миллионов сто семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 35 копеек;

• неустойку по Договору № 05/Н/15-57495 от 29 сентября 2015 года за просрочку оплаты гарантийной суммы за период с 30 сентября 2016 года по 24 октября 2017 года в размере 900 449 (девятьсот тысяч четыреста сорок девять) рублей 57 копеек;

• неустойку по Договору № 01/Т16ГП/16-137 от 1 сентября 2016 года за просрочку оплаты работ за период с 26 апреля 2017 года по 30 июля 2017 года в размере 8 849 (восемь тысяч восемьсот сорок девять) рублей 65 копеек;

• неустойку по Договору № 01/Т20/13-2367 от 20 февраля 2013 года за период с 25 ноября 2016 года по 24 октября 2017 года в размере 273 424 (двести семьдесят три тысячи четыреста двадцать четыре) рубля 86 копеек;

• неустойку по Договору № 01/Т12/14-56441 от 5 июня 2014 года за период с 17 февраля 2017 юла по 24 октября 2017 года в размере 243 787 (двести сорок три тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 95 копеек;

• неустойку по Договору № 09/Т12/14-56400 от 23 апреля 2014 года за период с 5 мая 2017 года по 24 октября 2017 года в размере 649 (шестьсот сорок девять) рублей 40 копеек;

• неустойку по Договору № 926 от 13 ноября 2012 года за период с 5 мая 2017 года по 24 октября 2017 года в размере 617 (шестьсот семнадцать) рублей 74 копейки;

• неустойку по Договору № 908/3 от 1 октября 2012 года за период с 5 мая 2017 года по 24 октября 2017 года в размере 4 448 (четыре тысячи четыреста сорок восемь) рублей 34 копейки;

• расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 (двести тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

С.М. Кукина