Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-46810/2017

25 октября 2017 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена 17 октября 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен  25 октября 2017 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи  Лобовой Д.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» (адрес:  Россия 119071, 

<

...>, оф. А350, ОГРН:  

<

***>, ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой» (адрес:  Россия 199155, 

<

...>, лит Д, пом. 1-Н, 5-Н, ОГРН:  

<

***>, ИНН 

<

***>)

третье лицо: "Российские железные дороги" (адрес:  Россия 107174, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании задолженности по договору на выполнение комплекса строительно- монтажных работ на объекте «VI этап. Компенсационное строительство по ТУ ФГУП «Почта России» и ОАО «ФПК» от 13.12.2016 № ТБС/16-59 в размере 20 257 126 руб. 75 коп.

при участии

- от истца: представителя ФИО2 по доверенности от 02.08.2017

- от ответчика: представителя ФИО3 по доверенности от 16.06.2017

установил:

Истец - общество с ограниченной ответственностью «Трансмашэнерго» обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой» о взыскании задолженности по договору на выполнение комплекса строительно- монтажных работ на объекте «VI этап. Компенсационное строительство по ТУ ФГУП «Почта России» и ОАО «ФПК» от 13.12.2016 № ТБС/16-59 в размере 20 257 126 руб. 75 коп., возмещении расходов по оплате госпошлины в сумме 124 286 руб.

Определением суда от 29.08.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик требования истца не поддержал, возражал против удовлетворения исковых требований по мотивам, изложенным в отзыве.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, 13 декабря 2016г. между Обществом с ограниченной ответственностью ТрансМашЭнерго», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» и Обществом с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», заключен Договор № ТБС/16-59 (далее - Договор) по условиям которого Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя подряд на строительство (реконструкцию) в 2016 году объекта «VI этап. Компенсационное строительство по ТУ ФГУП «Почта России» и ОАО ФПК» (далее - Объект, Работы).

В соответствии с п. 2.1. Договора Общая стоимость Работ, подлежащих выполнению Субподрядчиком в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, оформлена в Ведомости договорной цены, являющейся неотъемлемой частью Договора и составляет - 39 510 702 (тридцать девять миллионов пятьсот десять тысяч семьсот два) руб. 28 коп. В том числе НДС (18%) - 6 027 056 (шесть миллионов двадцать семь тысяч пятьдесят шесть) руб. 28 коп.

Общий срок выполнения работ, подлежащих выполнению в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора, составляет один месяц. Начало работ: с момента подписания Договора; окончание работ: 31 декабря 2016г.

В соответствии с п. 3.2. Договора Оплата выполненных Субподрядчиком надлежащим образом и принятых Подрядчиком Работ по Договору производится после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), получения от Субподрядчика счета, надлежащим образом оформленного счета-фактуры, комплекта исполнительной  документации, соответствующей по составу и оформлению требованиям законодательства РФ, в течение 10 банковских дней с даты получения денежных средств от Генподрядчика (АО «РЖДстрой») по Договору № 03-16-01-6673 от 12 декабря 2016г. Оплата выполненных и принятых Работ производится до 95% от стоимости выполненных Работ.

Оплата оставшихся 5% от стоимости выполненных Работ производится Подрядчиком в соответствии с пунктом 3.3. настоящего Договора.

Согласно п. 3.3. Договора Окончательный расчет за выполненные и принятые Работы по настоящему Договору производится Подрядчиком после ввода Объекта в эксплуатацию; подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных Работ, включая устранение дефектов и замечаний, выявленных как в ходе производства Работ, так и при приёмке Объекта; возмещения нанесённого ущерба Заказчику (АО «РЖДстрой») и (или) третьим лицам, с зачётом ранее перечисленных средств в течение 10 банковских дней с даты получения денежных средств от Генподрядчика (АО «РЖДстрой») по Договору № 03-16-01-6673 от 12 декабря 2016г., при условии подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14) с приложением к нему Актов о приемке смонтированного оборудования формы №ФСУ-3, технической и исполнительной документации, иных предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации документов.

Согласно п. 3.4. Субподрядчик представляет счет-фактуру на выполненные Работы не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента Подписания Сторонами акта КС-2.

Сопроводительным письмом от 01 марта 2017г. № 17/28 в адрес Подрядчика направлены Акты № 1, № 2 о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справка № 1 о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за декабрь 2016г. с реестром, счет на оплату, счет-фактура.

По сумме актов выполненных работ форма (КС-2) № 1, № 2 и справки форма (КС-3) № 1 общая стоимость выполненных работ в текущих ценах на дату выполнения составила 16 904 245 (шестнадцать миллионов девятьсот четыре тысячи двести сорок пять) руб. 00 коп., кроме того НДС (18 %) - 3 042 764 (три миллиона сорок две тысячи семьсот шестьдесят четыре) руб. 10 коп., всего с НДС 18% - 19 947 009 (девятнадцать миллионов девятьсот сорок семь тысяч девять) руб. 10 коп.

Сопроводительным письмом от 02 марта 2017г. № 17/29 в адрес Подрядчика направлен Акт № 3 о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справка № 2 о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за март 2017г. с реестром, счет на оплату, счет-фактура.

Согласно акту выполненных работ форма (КС-2) № 3 и справки форма (КС-3) № 2 общая стоимость выполненных работ в текущих ценах на дату выполнения составила 11 001 583 (одиннадцать миллионов одна тысяча пятьсот восемьдесят три) руб. 00 коп., кроме того НДС 18 %) - 1 980 284 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч двести восемьдесят четыре) руб. 94 коп., всего с НДС 18% - 12 981 867 (двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят семь) руб. 10 коп.

Общая стоимость выполненных по Договору работ составляет 32 928 877 (тридцать два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) руб. 04 коп. в том числе НДС (18 %) - 5 023 049 (пять миллионов двадцать три тысячи сорок девять) руб. 04 коп., в том числе гарантийное удержание - 1 646 443 (один миллион шестьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок три) руб. 85 коп. Оплате за выполненные работы за вычетом гарантийного удержания подлежит сумма в размере 31 282 433 (тридцать один миллион двести восемьдесят две тысячи четыреста тридцать три) руб. 19 коп.

Окончательное завершение работ является невозможным в связи с отсутствием электрооборудования, поставку которого обязан осуществить Подрядчик, и отсутствием соглашения об установлении окончательного срока завершения работ. Уведомление об указанных обстоятельствах  было  направлено  в  адрес  Подрядчика 07  апреля 2017г. сопроводительным письмом №17/59 и оставлено без ответа.

В соответствии с разделом 10.1.   сдача   выполненных   Субподрядчиком   Работ осуществляется в следующем порядке. До 20-го числа отчетного месяца Субподрядчик предоставляет Подрядчику Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, Журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС6-а, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме №КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, расчеты и другие документы), оформленные в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р «Об утверждении альбома форм первичной документации». Акт о приемке выполненных работ составляется на основании Журнала учета выполненных работ (форма №КС-6а). Выполненные объемы Работ должны быть документально подтверждены Субподрядчиком и в соответствующем порядке согласованы с эксплуатирующим структурным подразделением ОАО «РЖД» (балансодержателем). На стоимость выполненного за месяц и принятого Подрядчиком объема Работ Субподрядчик предъявляет Подрядчику счет-фактуру.

Работы по монтажу оборудования и их стоимость включаются в акты о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 после оформления Акта о приемке смонтированного оборудования формы № ФСУ-3. Акт о приемке смонтированного оборудования формы № ФСУ-3 прикладывается к акту о приемке выполненных работ формы № КС-2, оформляется в целях промежуточных расчетов по настоящему Договору и не является основанием для перехода риска случайной гибели оборудования с Субподрядчика на Подрядчика, (п. 10.1.)

Подрядчик в течение 7 (семи) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы или направляет Субподрядчику обоснованный отказ от их подписания.

При оформлении и подписании Подрядчиком документов, подтверждающих приемку выполненных Субподрядчиком Работ (в том числе актов сдачи-приемки работ), Подрядчик сохраняет право ссылаться в последующем на любые недостатки в принятых в соответствии с данными документами результатах Работ, в том числе и на те, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки), и требовать от Подрядчика безвозмездного устранения данных недостатков, либо возврата денежных средств, уплаченных Подрядчиком за работы, содержащие указанные недостатки, а также возмещения иных убытков Подрядчика, связанных с устранением выявленных недостатков, (п. 10.2.)

Подрядчик оплатил Субподрядчику частично стоимость выполненных по Договору работ, перечислив платежным поручением № 560 от 16.03.2017г. сумму в размере 4 025 306 (четыре миллиона двадцать пять тысяч триста шесть) руб. 44 коп. В адрес Подрядчика 25.04.2017г. направлена претензия с требованием оплатить сумму основного долга за выполненные работы. Ответ на претензию от Подрядчика не поступил, но платежным поручением № 1208 от 20.06.2017г. Подрядчик дополнительно оплатил сумму в размере 7 000 000 (семь миллионов) руб. 00 коп. Общая сумма исполненных подрядчиком обязательств по оплате выполненных работ составила 11 025 306 (одиннадцать миллионов двадцать пять тысяч триста шесть) руб. 44 коп.

В то же время, в предусмотренные договором сроки и до настоящего времени представленные в его адрес первичные документы Подрядчик не подписал и Субподрядчику не направил, мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем подлежащих устранению замечаний и сроков их устранения не представил, оплату основного долга в полном объеме не произвел. Акты о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 ответчиком не подписаны.

Таким образом, задолженность ответчика перед истцом по Договору за выполненные работы с учетом произведенной оплаты и за вычетом гарантийного удержания составила 20 257 126 (двадцать миллионов двести пятьдесят семь тысяч сто двадцать шесть) руб. 75 коп.

В связи с тем, что направленная ответчику претензия оставлена без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Представленными в материалы дела документами подтверждается выполнение работ на сумму заявленных исковых требований.

Оценив доказательства в их совокупности и взаимосвязи, а также принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств оплаты выполненных работ в полном объеме, суд пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения требования истца о взыскании с ответчика суммы задолженности.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчиком не представлены доказательства оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные договором. Факт наличия задолженности в заявленном размере подтвержден представленными в материалы дела актами сдачи-приемки выполненных работ.

Ввиду изложенного, требования истца о взыскании задолженности по договору № ТБС/16-59  от 13.12.2016 подлежат удовлетворению в полном объеме на основании статей 309, 310, 330, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В связи с удовлетворением исковых требований, судебные расходы истца по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Арбитражный суд решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансбалтстрой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Трансмаршэнерго» задолженность по договору № ТБС/16-59 от 13.12.2016 в размере 20 257 126 руб. 75 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 124 286 руб. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

СудьяД.ФИО4