28/2019-21162(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-45624/2018

г. Новосибирск

05 февраля 2019 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой  

О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

Администрации Купинского района Новосибирской области (ОГРН  

<

***>), г. Купино Новосибирской области  

к обществу с ограниченной ответственностью "Sipдом-3" (ОГРН  

<

***>), г. Купино Новосибирской области 

об обязании устранить недостатки, при участии: от истца: не явился, извещен; от ответчика: не явился, извещен, 

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Администрации Купинского района Новосибирской  области удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Sipдом-3"  устранить недостатки объекта долевого строительства - 16 квартирного  жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...>, по муниципальному контракту № 14 от 11.11.2013 года, в  течении 3-х месяцев с момента вступления в законную силу решения суда, а  именно:  

1.1 Разрушенные бетонные покрытия отмостки, 85,5 кв. м., (вокруг  фундамента дома), разрушенные бетонные площадки и ступени перед  входными дверями в подъездах 1,14 куб. м (подъезд № 1- 0,51 куб. м, подъезд   № 2 - 0,63 куб. м.), трещины на стенах в подъездах 5,02 кв. м. (стены  

лестничной клетки подъезда № 1 - 2,8 кв. м., стены лестничной клетки  подъезда № 2 - 2,22 кв. м.).  

1.2 Трещины на плитках покрытия пола на лестничных площадках 105  штук (подъезд № 1-62 штуки, подъезд № 2- 43 штуки.)  

1.3 Следы промерзания перекрытия второго этажа (провисание и  следы намокания гипсокартонных листов на потолке), 330 кв. м. (по всей  площади перекрытия второго этажа жилого дома).  

1.4 Не работающую вентиляцию (квартира № 7,15). 

В случае неисполнения решения суда об устранении недостатков  выполненных работ по настоящему делу в установленный в решении срок,  взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Sipдом-3" (ОГРН  

<

***>) в пользу Администрации Купинского района Новосибирской  области (ОГРН 

<

***>) 678 582 рублей 60 копеек в качестве  компенсации за неисполнение судебного акта.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его  принятия.  

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в  Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух  месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или  суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья О.В. Суворова