АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. КазаньДело № А65-13328/2024 

Дата принятия решения –  19 августа 2024 года.

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Ивановой И.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению   Акционерного общества "Сетевая компания", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест" д.у. ЗПИФ недвижимости «АС – фонд строительный», г. Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №2014/КЭС/Т0208 от 29.04.2014, и взыскании 250 202 руб. 40 коп. убытков, 9 014 руб. 96 коп. неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Сетевая компания", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – истец) обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Капитал-Траст-Инвест" д.у. ЗПИФ недвижимости «АС – фонд строительный», г. Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – ответчик)  о   расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №2014/КЭС/Т0208 от 29.04.2014, взыскании 250 202 руб. 40 коп. убытков, 9 014 руб. 96 коп. неустойки.

Определением от 20.05.2024 исковое заявление было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Электронные копии материалов дела были размещены в режиме ограниченного доступа на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

О судебном процессе по настоящему делу стороны извещались по известным суду адресам их места нахождения. 

Факт извещения сторон подтверждается материалами дела. 

От ответчика 11.06.2024 поступил отзыв на иск.

От ответчика 04.07.2024 поступило ходатайство о приобщении к материалам дела акта технологического присоединения.

Судом представленные документы приобщены к материалам дела в порядке ст.159 АПК РФ.

От истца 24.06.2024 поступило уточнение наименования ответчика, просит считать ответчиком Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» Д.У.ЗПИФ комбинированный «АС-фонд строительный» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).

Судом уточнение принято в порядке ст.49 АПК РФ.

От истца 10.07.2024 поступило заявление о частичном отказе от иска, от требований в части расторжения договора об осуществлении технологического присоединения от 29.04.2014 №2014/КЭС/Т0208 и взыскании убытков по договору в размере 250 202 руб. 40 коп. заявил отказ.

Судом частичный отказ принят, производство в указанной части подлежит прекращению.

Судом, 17.07.2024 года с учетом внесенных в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации изменений, действующих с 01.06.2016 года, было вынесено решение путем подписания резолютивной части решения. 

Принятая по результатам рассмотрения дела резолютивная часть решения размещена на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 18.07.2024.

Сторонам было разъяснено право подачи заявления о составлении мотивированного решения в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Ответчиком заявлено о составлении мотивированного решения.

Как усматривается из материалов дела, на основании поданной заявки 29.04.2014 между истцом  (сетевая организация по договору) и ответчиком (заявитель по договору) заключен договор №2014/КЭС/Т0208 (далее - договор) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств ответчика.

По условиям заключенного договора истец принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающего устройства объекта ответчика с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств  ответчика  292.0кВт,   на  уровне напряжения  0.38кВ  по II категории надежности, а ответчик обязуется оплатить услугу в соответствии с условиями договора.

Согласно п.2 договора технологическое присоединение необходимо для энергоснабжения объекта ответчика: помещение №1100, назначение: нежилое, общая площадь 2218,6 кв.м, этаж 1, этаж №2, этаж №3, антресоль №1, подвал №1, номера на поэтажном плане 1-го этажа №1,2,2а,3-6,10,10а,10б,10в,11,11а,а-Лит.А, №17-41, в-Лит.А1,№42,43,б-Лит.А2, 2-го этажа №1.2,2а,3-21,21а,23-29,29а,29б,30-35-Лит А,№36-54-Лит.А1, №55,56,61,62-Лит.А2,3-го этажа №1-13,13а,14,14а,15-17,19-32-Лит.А,№33-48, 48а-Лит.А1, №50,51,51 а,52-54, Лит А2, антресоль на помещениями 3 этажа №1,2,7-13,1 За,14,14а,15-16,17,19-25,29-32,44-48,48а,№1,3-14,14а,14б,15-25-Лит.А-26-28-Лит А1, подвала "1,1а,2,3,За,Зб,4,а-Лит.А,5-Лит.А1, расположенного по адресу: 

<

...>.

В соответствии с п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с постановлением Государственного комитета РТ по тарифам и составляет 23 522 руб. 40 коп. 

Во исполнение условий договора Ответчиком внесена сумма в размере 23 522 руб. 40коп.

Согласно п.5 договора в редакции дополнительного соглашения от 02.03.2022 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен до 01.07.2022 г.

20.11.2023 между сторонами подписан акт о выполнении технических условий к договору. 

Истцом только  07.06.2024 получено уведомление о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемого объекта.

В связи с длительным неполучением разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемого объекта, акт технологического присоединения №2014/КЭС/Т0208 между сторонами подписан 02.07.2024.

В соответствии с условиями договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий  по технологическому  присоединению,   предусмотренный договором,  обязана уплатить другой стороне неустойку, равную произведению 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определённый в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Размер неустойки за нарушение срока исполнения мероприятий по договору за период с 02.07.2022 г. по 02.07.2023 г. за год просрочки составляет 9 014 руб. 96 коп. (23 522 руб. 40 коп. х 7,5% х 0.014 х 365 дней, где: 23 522 руб. 40 коп. - стоимость договора, 7,5% х 0.014 - коэффициент по условиям договора, 365 - количество дней просрочки).

Досудебный порядок урегулирования соблюден истцом; требования истца не исполнены ответчиком.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с иском.

Исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

Проанализировав условия договора №2018/КЭС/Т5 от 25.01.2018, суд приходит к выводу, что он является договором об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств, и регулируется нормами главы 39 ГК РФ, общими положениями об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ), а также специальными нормативными актами, закрепляющими правила подключения к системам энергоснабжения.

Такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее – Закон № 35-ФЗ) и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861).

В соответствии с абзацем 15 статьи 26 Закона № 35-ФЗ по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В силу пункта 2 статьи 23.2 Закона №35-ФЗ плата за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе посредством применения стандартизированных тарифных ставок. Размер платы за технологическое присоединение и (или) размер стандартизированных тарифных ставок определяются, исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства.

В пункте 7 Правил № 861 предусмотрено, что технологическое присоединение – это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта об осуществлении технологического присоединения.

Исходя из положений пункта 16 Правил № 861, технические условия представляют собой перечень мероприятий, которые стороны договора должны выполнить в целях создания фактической возможности для присоединения энергоустановок и подачи электроэнергии потребителю.

Согласно пункту 18 Правил № 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя в том числе:

б)разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в)разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

г)выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение  условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

Истец со своей стороны выполнил все мероприятия для создания условий по технологическому присоединению ответчика в предусмотренный договором срок (в соответствии с техническими условиями состав мероприятий со стороны истца - технологическое присоединение энергопринимающих устройств ответчика к существующим электрическим сетям истца (фактическое присоединение).

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В соответствии с условиями договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий  по технологическому  присоединению,   предусмотренный договором,  обязана уплатить другой стороне неустойку, равную произведению 0,014 ставки рефинансирования ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определённый в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Включение в договор условия о неустойке корреспондирует императивной норме подпункта "в" пункта 16 Правил № 861, согласно которой условие о неустойке в строго определенном размере является существенным условием договора.

Согласно расчету истца размер неустойки за нарушение срока исполнения мероприятий по договору за период с 02.07.2022 г. по 02.07.2023 г. за год просрочки составляет 9 014 руб. 96 коп. (23 522 руб. 40 коп. х 7,5% х 0.014 х 365 дней, где: 23 522 руб. 40 коп. - стоимость договора, 7,5% х 0.014 - коэффициент по условиям договора, 365 - количество дней просрочки).

Возражая относительно исковых требований, ответчик указывает, что в соответствии с пунктом 7 статьи 41 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего паевым инвестиционным фондом или активами акционерного инвестиционного фонда, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании. Имущество управляющей компании обособляется от имущества паевых инвестиционных фондов (п. 1 ст. 15 Закона об инвестиционных фондах). Таким образом, уплата неустойки в результате неисполнения обязательств по Договору не может осуществляться за счет имущества фонда. Возмещение убытков по общему правилу производится за счет имущества управляющей компании.

Между тем, суд отмечает, что доводы ответчика основаны на неверном толковании норм права; на основании п. 7 ст. 41 ФЗ "Об инвестиционных фондах" происходит лишь разграничение того, за счет каких средств управляющая компания должна осуществлять выплаты - за счет находящегося на ее балансе имущества паевого инвестиционного фонда, либо за счет собственных средств. Однако это не влияет на процессуальный статус Управляющей компании в качестве Ответчика по заявленным исковым требованиям, поскольку в силу ч. 3 ст. 11 ФЗ "Об инвестиционных фондах" управляющая компания выступает ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным фондом.

Иные доводы ответчика о несогласии с требованием о взыскании неустойки также подлежат отклонению судом, поскольку факт просрочки исполнения обязательств по договору технологического присоединения подтверждаются материалами дела; акт сторонами договора подписан лишь 02 июля 2024 года.

Расчет неустойки проверен судом, признан правильным. Контррасчет неустойки ответчиком не представлен, методика расчета не оспорена.

Доводы ответчика в отношении требований о расторжении договора и взыскании убытков не подлежат оценке судом, поскольку истцом заявлен отказ от иска в части расторжения договора и взыскании убытков.

Учитывая, что материалами дела подтверждается нарушение ответчиком сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, суд приходит к выводу о законности и обоснованности исковых требований в части взыскания неустойки за период с 02.07.2022 по 02.07.2023 в размере 9 014 руб. 96 коп.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь 49, 110, 167-170, 176, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,     

РЕШИЛ:

Уточнение наименование ответчика на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» Д.У.ЗПИФ комбинированный «АС-фонд строительный» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) принять.

Отказ истца от исковых требований в части расторжения договора об осуществлении технологического присоединения от 29.04.2014 №2014/КЭС/Т0208 и взыскании убытков по договору в размере 250 202 руб. 40 коп. принять. Производство по делу в указанной части прекратить согласно п.4 ч.1 ст. 150 АПК РФ. 

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» Д.У.ЗПИФ комбинированный «АС-фонд строительный» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества "Сетевая компания", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) пени за период с 02.07.2022 по 02.07.2023 в размере 9 014 руб. 96 коп., расходы по оплате  государственной пошлины в размере 2 000 руб.

Выдать истцу – Акционерному обществу "Сетевая компания", г.Казань (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), справку на возврат 12 185 руб. государственной пошлины из средств федерального бюджета.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.

Судья                                                                                                                  И.В. Иванова