АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-1884/2021

г. Уфа

07 июня 2021 года

Резолютивная часть решения объявлена 03.06.2021

Полный текст решения изготовлен 07.06.2021

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе

судьи Кузнецова Д.П., 

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Акционерного общества "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к Публичному акционерному обществу "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 5 285 975 руб. 57 коп.

с учетом принятых уточнений

При участии в судебном онлайн-заседании:

От истца подключился – ФИО2 по доверенности №67 от 12.05.2021, представлен диплом о высшем юридическом образовании Казанским государственным техническим университетом регистрационный номер 1024 от 28.02.2005, паспорт гражданина РФ;

От ответчика –  явки нет, извещены надлежащим образом;

В судебном заседании 31.05.2021 объявлен перерыв до 03.06.2021 до 10 час. 00 мин. После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при ведении протокола тем же лицом.

Акционерного общества "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Публичному акционерному обществу "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  о взыскании долга по договору субподряда № 478/01ВА-15 от 18.11.2015г. в размере 14 035 522 руб. 25 коп., расходов по оплате госпошлины в размере 93 178 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 04.02.2021 исковое заявление было принято к производству.

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, указав, что из текста искового заявления ответчик усматривает, что при вычислении суммы иска истец неверно рассчитывает сумму встречного неденежного представления подрядчика по договору, а также размер гарантийного удержания по п.4.8 договора. Истец в разрезе заявленных требований по 9 (девяти) требованиям учел не все произведенные корректировки долга на сумму встречного неденежного представления в порядке статьи 408 ГК РФ (сальдирование), что искажает окончательную сумму к оплате за работы. По заявленным требованиям производилось следующее сальдирование взаимных предоставлений сторон при исполнении договора, а именно: корректировки №9349 от 30.11.2019, 9350 от 31.12.2019, 9351 от 31.12.2019, 9352 от 30.11.2019, 9400 от 31.12.2019, 528 от 01.01.2020, 826 от 31.01.2020, 744 от 29.02.2020, 1846 от 29.02.2020, 1847 от 31.03.2020, 2548 от 30.04.2020, 2942 от 30.04.2020, 4212 от 31.05.2020,6456 от 01.07.2020, 6915 от 01.10.2020, 6916 от 01.10.2020, 8784 от 30.12.2020, 930 от 20.02.2021, а всего на сумму 20 788 605,52 рублей. Кроме того, истец неверно рассчитывает сумму гарантийного удержания вопреки условию договора по п. 4.8. (представил расчет). Считает, что размер исковых требовании является необоснованным, недоказанным, завышенным, в связи с чем, просит отказать в удовлетворении требований.

От истца через канцелярию суда посредством Сервиса подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru. поступило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит взыскать долг по договору субподряда № 478/01ВА-15 от 18.11.2015г. в размере 5 285 975 руб. 57 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 49 430 руб.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований судом приняты к производству. Дело рассматривается судом с учётом уточнений.

Представитель истца в судебном онлайн-заседании поддержал уточненные исковые требования, просил удовлетворить. 

Ответчик в судебное заседание после перерыва не явился, об уважительных причинах неявки не сообщил

Согласно ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд учитывает, что информация о времени и месте судебного разбирательства дополнительно размещена на интернет-сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан и является общедоступной.

Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 18.11.2015г. между ПАО «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж» (далее по тексту – Ответчик, подрядчик) и АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ» (далее по тексту – Истец, субподрядчик) был заключен Договор субподряда №478/01В А-15 (далее по тексту - Договор), по которому Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчика выполнить электромонтажные работы на Объекте, указанном в п.1.8 Договора, в соответствии с проектно­сметной документацией, а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить оговоренную Договором цену, согласно п.4.1 Договора.

Пунктом 2.3 Договора установлено, что конкретный перечень, объем и виды работ определяются в соответствии с выданными Подрядчиком Субподрядчику по акту приема-передачи Рабочей документацией и Проектно-сметной документацией и фиксируются путем подписания сторонами приложения №16 или дополнения к нему - Актом определения объемов работ, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Пунктом 1.8 Договора определен Объект - объект строительства этапа 1.4 комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске, а именно: тит. 008 Секция 4200 «Гидроочистка тяжелого газойля коксования».

Согласно п. 3.1 Договора срок начала работ — декабрь 2015 г., срок завершения работ - май 2016 г.

В дальнейшем дополнительными соглашениями к Договору перечень работ и сроки их выполнения уточнялись.

Стоимость работ, подлежащих выполнению по Договору, указана в п. 4.1 Договора и составляет 50 000 000 руб., в том числе НДС 18%. Окончательной ценой Договора является стоимость фактически выполненного Субподрядчиком объема работ. Стоимость работ определяется в соответствии с методикой определения стоимости строительно-монтажных работ (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора, а также в соответствии с действующим законодательством. Увеличение объема работ и/или цены Договора Стороны оформляют дополнительным соглашением.

В соответствии с п. 4.3 Договора Субподрядчик ежемесячно до 28 числа каждого месяца представляет Подрядчику акт формы №КС-2 за отчетный период и составленную на его базе справку по форме №КС-3 и счет-фактуру, в соответствии с порядком, изложенным в Приложении №3.

Подрядчик рассматривает и подписывает акт формы №КС-2 и справку формы №КС-3 в течение 10 рабочих дней со дня предоставления Субподрядчиком или в тот же срок передает Субподрядчику письменный мотивированный отказ в их подписании (4.4).

Оплата строительно-монтажных работ по принятым Подрядчиком справкам КС-3 осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчётный счет Субподрядчика согласно Приложению №3 (п. 4.6).

Согласно п. 4.8 Договора сумма оплаты выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ уменьшается на сумму 5% от стоимости выполненного месячного объема работ (без стоимости материалов и оборудования поставки заказчика/подрядчика, а так же без стоимости материалов и оборудования поставки субподрядчика, указанных в п.5, п.8, п.12 приложения №2 к настоящему Договору, приобретенных у Подрядчика). Сумма отложенного платежа является гарантией исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему договору. Гарантийная сумма может быть не удержана в случае предоставления Субподрядчиком безусловной и безотзывной банковской гарантии исполнения условий Договора по согласованной Сторонами форме на общую сумму 5% от стоимости выполненных работ (без стоимости материалов и оборудования поставки заказчика/подрядчика, а так же без стоимости материалов и оборудования поставки субподрядчика, указанных в п.5, п.8, п.12 приложения №2 к настоящему Договору, приобретенных у Подрядчика) банка-гаранта, предварительно согласованного с Подрядчиком. Срок действия банковской гарантии не должен превышать на 90 календарных дней срок завершения работ, указанный в п. 3.1 настоящего договора.

Пункт 4.9 Договора устанавливает, что окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся Подрядчиком в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней после завершения его строительства, включая устранение выявленных дефектов/недостатков, недоделок, на основании акта приемки законченного строительством объекта.

Пунктом 4.13 Договора учтено, что за оказываемые услуги Субподрядчик уплачивает Подрядчику 12% от суммы всех выставленных счетов по договору без учета стоимости материалов и прочих затрат. Подрядчик вправе уменьшить подлежащую выплате сумму за выполненные работы на стоимость данных услуг.

Пунктом 5.46 Договора предусмотрено, что на условиях главы 52 ГК РФ «Агентирование» Подрядчик выступает Агентом, Субподрядчик Принципалом при выставлении Подрядчиком Субподрядчику услуг: электроснабжения, водоснабжения, питания рабочих, организации питания, проезда рабочих, проживания рабочих, теплоэнергии, по хранению ТМЦ, связи, транспорта (авто, ж/д, водн. Транспорт), прочие.

Агент обязан: - исполнить принятое на себя обязательство на условиях, наиболее выгодных для Принципала, - уведомить Принципала о нарушении третьим лицом условий сделки, заключенной с ним Агентом в рамках настоящего договора и дополнительного соглашения к нему, - предоставить Принципалу отчеты об исполнении договора. К отчету Агента должны быть приложены необходимые документы и доказательства расходов, произведенных Агентом за счет Принципала, - уведомить Принципала об отказе от выполнения поручения.

Принципал обязан: - принять от Агента все исполненное в рамках выполнения поручения по настоящему Договору, - возмещать Агенту суммы, израсходованные им по исполнению поручения, Расчеты по настоящему договору производятся следующим образом: - Принципал перечисляет на расчетный счет Агента сумму, израсходованную Агентом при оказании услуг и агентское вознаграждение в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Агентом счета-фактуры, - в случае необходимости Агенту может быть выплачен аванс.

Принципал уплачивает Агенту вознаграждение в размере 0,2 % от суммы, израсходованной при оказании каждой услуги, но не менее 100 рублей без НДС. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по договору, она обязана возместить другой причиненные таким неисполнением убытки.

За весь период 2019 -2020 гг. в рамках Договора остались частично неоплаченными следующие работы, выполненные Истцом и принятые Ответчиком:

№ справки КС-3

Дата подписания

Сумма выполненных и принятых работ, руб.

45

30.11.2019

7 734 872,18

46

30.11.2019

15 011 524,80

47

29.02.2020

1 732 131,60

48

31.03.2020

2 246 030,40

49

30.04.2020

1 617 878,40

50

31.05.2020

1 234 574,40

51

30.06.2020

52 852,80

52

30.06.2020

255 870

53

30.09.2020

556 746

итого

30 442 480,58

Отложенный платеж в размере 5% от стоимости выполненных работ за весь период работ с 2016 г. по 2020 г. (п. 4.8 Договора) составил 10 803 180,78 руб.

С учетом всех поступивших оплат, зачетов стоимости оказания генуслуг, поставок и вознаграждений по агентским услугам с учетом входящего дебетового сальдо по ранее отработанным периодам за Ответчиком числится задолженность по Договору в размере 14 035 522,25 руб.

Пунктом 14.6 Договора установлено, что все споры или разногласия, возникшие между сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок разрешения споров. Ответ на претензию должен быть направлен заявителю не позднее 20 календарных дней от даты её получения. При неполучении ответа в указанный срок или неудовлетворения претензии, спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Поскольку спор в досудебном порядке урегулировать не удалось, претензия истца от 01.09.2020г. была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в суд.

От истца через канцелярию суда посредством Сервиса подачи документов в электронном виде http://my.arbitr.ru. поступило ходатайство об уточнении исковых требований, согласно которому просит взыскать долг по договору субподряда № 478/01ВА-15 от 18.11.2015г. в размере 5 285 975 руб. 57 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 49 430 руб.

В соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований судом приняты к производству. Дело рассматривается судом с учётом уточнений.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и выслушав доводы сторон в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает уточненные исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

В силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несёт риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Проанализировав условия представленного договора субподряда № 478/01ВА-15 от 18.11.2015г., суд приходит к выводу, что сторонами заключен договор подряда, следовательно, между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Договор субподряда № 478/01ВА-15 от 18.11.2015г. содержит все существенные условия договора подряда, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям закона о форме и содержании, подписан сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 746 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить подрядчику выполненные им работы после окончательной сдачи результатов работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работы.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из материалов дела следует, что пунктом 2.3 Договора установлено, что конкретный перечень, объем и виды работ определяются в соответствии с выданными Подрядчиком Субподрядчику по акту приема-передачи Рабочей документацией и Проектно-сметной документацией и фиксируются путем подписания сторонами приложения №16 или дополнения к нему - Актом определения объемов работ, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Пунктом 1.8 Договора определен Объект - объект строительства этапа 1.4 комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске, а именно: тит. 008 Секция 4200 «Гидроочистка тяжелого газойля коксования».

Стоимость работ, подлежащих выполнению по Договору, указана в п. 4.1 Договора и составляет 50 000 000 руб., в том числе НДС 18%. Окончательной ценой Договора является стоимость фактически выполненного Субподрядчиком объема работ. Стоимость работ определяется в соответствии с методикой определения стоимости строительно-монтажных работ (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора, а также в соответствии с действующим законодательством. Увеличение объема работ и/или цены Договора Стороны оформляют дополнительным соглашением.

В соответствии с п. 4.3 Договора Субподрядчик ежемесячно до 28 числа каждого месяца представляет Подрядчику акт формы №КС-2 за отчетный период и составленную на его базе справку по форме №КС-3 и счет-фактуру, в соответствии с порядком, изложенным в Приложении №3.

Подрядчик рассматривает и подписывает акт формы №КС-2 и справку формы №КС-3 в течение 10 рабочих дней со дня предоставления Субподрядчиком или в тот же срок передает Субподрядчику письменный мотивированный отказ в их подписании (4.4).

Оплата строительно-монтажных работ по принятым Подрядчиком справкам КС-3 осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчётный счет Субподрядчика согласно Приложению №3 (п. 4.6).

Согласно п. 4.8 Договора сумма оплаты выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ уменьшается на сумму 5% от стоимости выполненного месячного объема работ (без стоимости материалов и оборудования поставки заказчика/подрядчика, а так же без стоимости материалов и оборудования поставки субподрядчика, указанных в п.5, п.8, п.12 приложения №2 к настоящему Договору, приобретенных у Подрядчика). Сумма отложенного платежа является гарантией исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему договору. Гарантийная сумма может быть не удержана в случае предоставления Субподрядчиком безусловной и безотзывной банковской гарантии исполнения условий Договора по согласованной Сторонами форме на общую сумму 5% от стоимости выполненных работ (без стоимости материалов и оборудования поставки заказчика/подрядчика, а так же без стоимости материалов и оборудования поставки субподрядчика, указанных в п.5, п.8, п.12 приложения №2 к настоящему Договору, приобретенных у Подрядчика) банка-гаранта, предварительно согласованного с Подрядчиком. Срок действия банковской гарантии не должен превышать на 90 календарных дней срок завершения работ, указанный в п. 3.1 настоящего договора.

Пункт 4.9 Договора устанавливает, что окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся Подрядчиком в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней после завершения его строительства, включая устранение выявленных дефектов/недостатков, недоделок, на основании акта приемки законченного строительством объекта.

Пунктом 4.13 Договора учтено, что за оказываемые услуги Субподрядчик уплачивает Подрядчику 12% от суммы всех выставленных счетов по договору без учета стоимости материалов и прочих затрат. Подрядчик вправе уменьшить подлежащую выплате сумму за выполненные работы на стоимость данных услуг.

Пунктом 5.46 Договора предусмотрено, что на условиях главы 52 ГК РФ «Агентирование» Подрядчик выступает Агентом, Субподрядчик Принципалом при выставлении Подрядчиком Субподрядчику услуг: электроснабжения, водоснабжения, питания рабочих, организации питания, проезда рабочих, проживания рабочих, теплоэнергии, по хранению ТМЦ, связи, транспорта (авто, ж/д, водн. Транспорт), прочие.

Агент обязан: - исполнить принятое на себя обязательство на условиях, наиболее выгодных для Принципала, - уведомить Принципала о нарушении третьим лицом условий сделки, заключенной с ним Агентом в рамках настоящего договора и дополнительного соглашения к нему, - предоставить Принципалу отчеты об исполнении договора. К отчету Агента должны быть приложены необходимые документы и доказательства расходов, произведенных Агентом за счет Принципала, - уведомить Принципала об отказе от выполнения поручения.

Принципал обязан: - принять от Агента все исполненное в рамках выполнения поручения по настоящему Договору, - возмещать Агенту суммы, израсходованные им по исполнению поручения, Расчеты по настоящему договору производятся следующим образом: - Принципал перечисляет на расчетный счет Агента сумму, израсходованную Агентом при оказании услуг и агентское вознаграждение в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Агентом счета-фактуры, - в случае необходимости Агенту может быть выплачен аванс.

Принципал уплачивает Агенту вознаграждение в размере 0,2 % от суммы, израсходованной при оказании каждой услуги, но не менее 100 рублей без НДС. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по договору, она обязана возместить другой причиненные таким неисполнением убытки.

За весь период 2019 -2020 гг. в рамках Договора остались частично неоплаченными следующие работы, выполненные Истцом и принятые Ответчиком:

№ справки КС-3

Дата подписания

Сумма выполненных и принятых работ, руб.

45

30.11.2019

7 734 872,18

46

30.11.2019

15 011 524,80

47

29.02.2020

1 732 131,60

48

31.03.2020

2 246 030,40

49

30.04.2020

1 617 878,40

50

31.05.2020

1 234 574,40

51

30.06.2020

52 852,80

52

30.06.2020

255 870

53

30.09.2020

556 746

итого

30 442 480,58

Отложенный платеж в размере 5% от стоимости выполненных работ за весь период работ с 2016 г. по 2020 г. (п. 4.8 Договора) составил 10 803 180,78 руб.

Документы содержат подписи представителей сторон, а также информацию об объекте, наименовании и объемах работ, их стоимости.

Подписание данных документов представителями обеих сторон без замечаний и возражений по объемам и стоимости выполненных работ, их качеству, скрепление печатями истца и ответчика свидетельствуют о выполнении работ субподрядчиком (истцом), принятии их результата подрядчиком (ответчиком), а также о потребительской ценности результата работ для ответчика и желании последнего ими воспользоваться.

11.05.2018г. между сторонами был подписан акт сверки, долг Ответчика по состоянию на 1 квартал 2018 г. по всем договорам составил 5 673 100,76 руб.

Начальное сальдо долга по договору 478/01ВА-15 от 18.11.2015 по состоянию на 01 апреля 2018 г. составило 8 148 039,93 руб. в пользу Ответчика.

По состоянию на 12.04.2021г. долг Ответчика по указанному договору перед Истцом составляет 16 095 754,88 руб.

В указанном акте сверке учтены все взаимные обязательства по агентским услугам, взаимным поставкам, произведенные оплаты, генподрядные услуги.

Сумма гарантийного удержания с учетом всех подписанных актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 за период с марта 2016 по 12 апреля 2021 составила 10 809 779,31 руб.

Гарантийное удержание рассчитывалось как 5% от стоимости выполненных работ за минусом стоимости материалов Генподрядчика. Стоимость материалов Генподрядчика выделена в каждой справке КС-3 за соответствующий период. Подробный расчет со всеми справками КС-3 прилагается.

Таким образом, долг Ответчика перед Истцом по Договору по состоянию на 12 апреля 2021 составил

16 095 754,88 руб. - 10 809 779,31 руб. = 5 285 975,57 руб.

Однако, в нарушение срока, оплата не произведена, сумма долга по договору субподряда № 478/01ВА-15 от 18.11.2015г. составила 5 285 975 руб. 57 коп.

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Таким образом, доказательств оплаты задолженности в полном объеме ответчиком в материалы дела не представлено. Обстоятельства, на которые ссылается истец, ответчиком не опровергнуты.

Учитывая вышеизложенное, требование о взыскании суммы долга по договору субподряда № 478/01ВА-15 от 18.11.2015г. в размере 5 285 975 руб. 57 коп. подлежат удовлетворению.

Доводы ответчика, изложенные в письменном отзыве, судом исследованы, признаны несостоятельными, поскольку не основаны на представленных доказательствах.

При обращении в суд с требованием имущественного характера на сумму 14 035 522 руб. 25 коп. истцом уплачена государственная пошлина в размере  143 022 руб. по платежному поручению № 125 от 15.01.2021 г.

В последующем истец уточнил исковые требования, и уменьшил требование до 5 285 975 руб. 57 коп.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Сумма излишне оплаченной госпошлины подлежит возврату истцу.

Руководствуясь статьями  49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Иск Акционерного общества "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ"  удовлетворить.

Взыскать с Публичного акционерного общества "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Акционерного общества "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)   сумму долга по договору субподряда № 478/01ВА-15 от 18.11.2015г. в размере 5 285 975 руб. 57 коп, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере  49 430 рублей.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Возвратить Акционерному обществу "ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 93 592 рублей за подачу иска, уплаченную платежным поручением от 15.01.2021г. № 125.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.                                   

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Д.П. Кузнецов