АРБИТРАЖНЫЙ  СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-10424/2024

г. Нижний Новгород                                                                                       24 сентября 2024 года

резолютивная часть решения объявлена 4 сентября 2024 года

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Елисейкина Е.П. (шифр дела 27-137), при ведении протокола секретарем Бандиной А.М., рассмотрев в судебном заседании исковое заявлением общества с ограниченной ответственностью «Линкор» (ИНН 

<

***>) к ответчику: государственному казенному учреждению Нижегородской области «Нижегородсройзаказчик» (ИНН 

<

***>) о взыскании 3 506 061 руб. 04 коп. долга за выполненные работы,

при участии:

от ООО «Линкор»: ФИО1 (дов. от 01.09.2024), ФИО2 (дов. от 04.09.2023),

от ответчика: ФИО3 (дов. от 02.10.2023),

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Линкор» (далее – Истец, ООО «Линкор») обратилось с исковым заявлением к государственному казенному учреждению Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» (далее – Ответчик, Учреждение, ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик») о взыскании 3 625 644 руб. 37 коп.

Впоследствии, с учетом  возражений ответчика, ООО «Линкор» размер требований уменьшило в порядке статьи 49 АПК РФ до 3 506 061 руб. 04 коп.

Уточненные требования истец поддержал. Указывает, что Учреждение неправомерно уклоняется от оплаты выполненных работ.

Учреждение ссылается на завышение стоимости выполненных работ в связи с неприменением в направленных на подписание актах понижающего коэффициента.

Изучив материалы дела, суд пришел к следующему.

В соответствии пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять из результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором  строительного подряда; при отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ.

Между ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» (Государственный заказчик) и ООО «Линкор» (исполнитель) заключен государственный контракт № 1238 от 11.05.2022 на выполнение проектных, изыскательских работ и комплекс работ по строительству объекта «ОВОП в п. Бабушкино г.о.г Дзержинск (ГБУЗ НО «Городская больница № 2 г. Дзержинска.

В пункте 2.1 Контракта установлена цена в сумме 29 959 610 руб.

Работы, предусмотренные контрактом выполнены ООО «Линкор», что подтверждается актами выполненных работ от 09.08.2022 № 1 от 14.04.2023 № 2-1238 и от 31.10.2023 №№ 1-10. Работы выполнены на сумму 38 384 842 руб. 86 коп.

Подпунктом "а" пункта 1 части 62 статьи 112 Закона N 44-ФЗ установлено, что изменение условий контракта, при его исполнении допускается по соглашению сторон, если при исполнении контракта сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта. Предусмотренное настоящим пунктом изменение существенных условий осуществляется с учетом такой сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на тридцать процентов.

Стоимость работ определена на основании заключения ГАУ НО «Управление госэкспертизы» и не превышает 30% от цены контракта.

Более того, цена контракта в сумме 38 522 035 руб. 68 коп. также была установлена распоряжением Правительства Нижегородской области от 28.03.2023 № 322-р.

ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» уплатило в рамках Контракта 34 759 198 руб. 49 коп.

Согласно пункту 2.6 Контракта Государственный заказчик оплачивает не более 95% от этапа 5 «Комплекс работ по строительству объекта» до окончательной сдачи работ по акту приемки законченного объекта Государственному заказчику. Окончательный расчет за выполненные работы по этапу 5 производится Государственным заказчиком в течение 7 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком акта приёмки законченного строительством объекта на основании счет-фактуры, выставленного исполнителем.

Из материалов дела следует, что дата ввода объекта в эксплуатацию, являющегося предметом государственного контракта № 1238 от 11.05.2022 – 30.12.2022.

Таким образом, представленные в материалы доказательства подтверждают факт надлежащего исполнения государственного контракта ООО «Линкор» и возникновении обязанности по оплаты выполненных работ у ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик».

В рамках судебного разбирательства судом установлено, что ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» отозвало подписанные акты приема-передачи выполненных работ поскольку при определении цены, отращенной в актах, исполнитель не учел коэффициент заказчика, отраженный в графе 11 приложения № 3 к дополнительному соглашению № 5 от 30.03.2023. Представитель ответчика поясняла, что неприменение в актах этого коэффициента привело к тому, что даже не оспариваемая часть стоимости выполненных работ не была оплачена.

Согласно статье 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В силу п. 3 ст. 154 ГК РФ для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Действительно, 30.03.2023 между сторонами контракта заключено дополнительное соглашение № 5.

Однако дополнительное соглашение не содержит условий о применении понижающего коэффициента.

Расчет цены контракта к дополнительному соглашению хоть и содержит графу «Коэффициент заказчика» (0,9585548), однако при определении цены работ понижающий коэффициент в расчете не применен.

Таким образом, сторонами условие о понижающем коэффициенте не согласованы, в связи с чем он не может быть применен при расчете причитающегося исполнителю.

Учитывая изложенные обстоятельства, требования ООО «Линкор» о взыскании долга в сумме 3 506 061 руб. 04 коп. подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине в сумме 40 530 рублей относятся на ответчика и подлежат взысканию с него в пользу ООО «Линкор».

Излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 598 рублей подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

взыскать с государственного казенного учреждения Нижегородской области «Нижегородсройзаказчик» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Линкор» (ИНН 

<

***>) 3 506 061 руб. 04 коп. долга, 40 530 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя после вступления в решения в законную силу.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Линкор» (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета 598 рублей государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 04.04.2024 № 44871. Настоящий судебный акт является основанием для возврата государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца через Арбитражный суд Нижегородской области.

 

Судья                                                                                                                                Е.П. Елисейкин