Арбитражный суд Московской области

   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А41-8781/21

31 марта 2021 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 30 марта 2021 года 

Полный текст решения изготовлен 31 марта 2021 года.

Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующий судья Т.Ю. Гришина ,

при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело 

по иску ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к ООО "ГЛАВГРАДОСТРОЙ"(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о расторжении 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу от 30.03.2021

Лица, участвующие в деле, о времени  и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

Рассмотрев материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ:

ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к ООО "ГЛАВГРАДОСТРОЙ" (далее – ответчик) о расторжении договора № Ю8-15-302-4405(904109) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.08.2015г., заключенного между ПАО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» и ООО "ГЛАВГРАДОСТРОЙ".

Представитель истца в судебное заседание не явился, извещен. В материалы дела направил ходатайство о рассмотрении спора в отсутствии представителя истца.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился с учетом имеющихся в материалах дела доказательств извещения, применяя положения ст.ст. 121, 123 АПК РФ, извещен  надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства. 

Рассмотрев представленные в материалы дела документы, суд установил следующее.

Между ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» (далее -исполнитель) и ООО «ГлавГрадоСтрой» (далее - заказчик) 07.08.2015г. был заключен договор № Ю8-15-302-4405(904109) об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заказчика к электрическим сетям исполнителя.

24.07.2020 года МИ ФНС №46 по г. Москве зарегистрировано изменение наименования истца с публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (ПАО «МОЭСК») на публичное акционерное общество «Россети Московский регион» (ПАО «Россети Московский регион»).

В соответствии с п. 1 и 2 договора ПАО «Россети Московский регион» обязалось осуществить технологическое присоединение - 12-ти этажного жилого дома с подземной парковкой по адресу: 

<

...>, характеризующегося следующими признаками 404,7 кВт максимальной мощности по второй категории надежности, а заказчик обязался оплатить технологическое присоединение.

Пунктом 10 договора установлен размер платы за технологическое присоединение в размере 137 724,27 рублей с НДС.

В ходе исполнения договора ПАО «Россети Московский регион» подготовило и   выдало   заказчику   технические   условия   08.07.2015   №   Ю8-15-202-108/5 (904109/103). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек, и технические условия были продлены Дополнительным соглашением №1 от 30.08.2017 к договору ТП. Срок выполнения мероприятий, установленный доп. соглашением №1 истек 25.01.2018 года (п. 5 Договора в редакции доп. соглашения №1), новые ТУ № Ю8-17-202-16712 (911257/125) истекли 30.08.2019 года, Ответчик за продлением срока не обращался.

Истец своевременно приступил к исполнению своих обязательств по Договору ТП, подготовил и выдал обществу технические условия по договору, исполнив часть своих обязательств в рамках договора.

По мнению истца, ответчик не выполнил технические условия в части возложенных на него мероприятий в границах принадлежащего ему земельного участка в установленный п.5 Договора ТП срок - 25.01.2018 года, что является существенным нарушением условий договора ТП от 07.08.2015 г. № Ю8-15-302-4405(904109).

В связи с неисполнением ответчиком условий договора, истец лишен возможности надлежащим образом исполнить договор и получить в полном объеме плату за технологическое присоединение.

Для соблюдения досудебного порядка урегулирования спора в ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" было направлено соглашение о расторжении договора с сопроводительным письмом от 11.11.220 № ЮЭС/05/1184, которое было получено ответчиком в установленном порядке.

Ответ от ООО "ГЛАВГРАДОСТРОЙ" на данное письмо на сегодняшний день получен не был.

Данное обстоятельство послужило основанием для обращения с соответствующим иском в суд.

Рассмотрев представленные в материалы дела доказательства, заслушав представителя ответчика, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению в части в связи со следующим.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно пункту 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной; существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Согласно пункту 3 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

В соответствии с пунктом 4 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, не включены в раздел IV "Отдельные виды обязательств" Гражданского кодекса Российской Федерации, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения.

Применительно к энергоснабжению такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон об электроэнергетике) и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (далее - Правила N 861).

Согласно статье 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об оказании услуг по технологическому присоединению (пункт 6 Правил N 861 и статья 26 Закона об электроэнергетике).

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (п. 1 ст. 26 Закона N 35-ФЗ и п. п. 16, 17 Правил N 861).

Указанный договор является публичным.

В силу пункта 3 Правил технологического присоединения сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им названных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Следовательно, действующее законодательство не предоставляет сетевой организации права отказаться от заключения договора при наличии возможности осуществить технологическое присоединение.

Право на одностороннее расторжение договора технологического присоединения закреплено в подпункте "в" пункта 16 Правил технологического присоединения (в редакции, действовавшей на момент заключения договора).

Одностороннее расторжение возможно только в случае нарушения сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре. В остальных случаях подлежит применению норма статьи 310 Гражданского кодекса, согласно которой односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. При этом требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Из пункта 15 договора следует, что договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с п. 16 договора (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 30.08.2017) нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда. 

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований или возражений.

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Истец передал 11.11.2020 ответчику подписанное со стороны истца соглашение о расторжении договора. Документы, подтверждающие соблюдения п. п. 8, 9 и раздела III  договора, в материалах дела отсутствуют.

Ответчик не направил истцу ни подписанного соглашения о расторжении договора, ни мотивированного отказа от подписания соглашения в установленный  срок.

Принимая во внимание изложенное, оценив в совокупности все представленные доказательства, суд считает возможным удовлетворить требование истца о расторжении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.08.2015 № Ю8-15-302-4405 (904109).

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Принимая во внимание изложенное,  расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.  подлежат взысканию с ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.08.2015 № Ю8-15-302-4405 (904109), заключенный между ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" и ООО "ГЛАВГРАДОСТРОЙ".

Взыскать с ООО "ГЛАВГРАДОСТРОЙ" в пользу ПАО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области в течение месяца.

 

Судья                                                                                     Т.Ю. Гришина