﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА

ул. Якубовича, д.4, Санкт-Петербург, 190000

http://fasszo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2021 года

Дело №

А56-76820/2020

 

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Васильевой Е.С., судей Корабухиной Л.И., Родина Ю.А.,

при участии от акционерного общества «Оборонэнерго» Исаевой Е.И. (доверенность от 26.08.2020), от общества с ограниченной ответственностью «Строительная инжиниринговая компания «СИНКО»  Сорокина А.И.  (доверенность от  20.04.2021),

рассмотрев 18.10.2021 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Строительная инжиниринговая компания «СИНКО» на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.01.2021 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2021 по делу № А56-76820/2020,

у с т а н о в и л:

Акционерное общество «Оборонэнерго», адрес: 107140, Москва, Русаковская ул., д. 13, стр. 19-21-25, ОГРН 1097746264230, ИНН 7704726225 (далее – Общество), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная инжиниринговая компания «СИНКО», адрес: 196084, Санкт-Петербург, Заозёрная ул., д. 8, лит. А, ОГРН 1027804895216, ИНН 7810206161 (далее - Компания), о взыскании 3 186 876 руб. 15 коп. неустойки по договору от 15.11.2019 № 122-СЗФ-2019  и обязании исполнить обязательства по договору, а именно: разработать, согласовать и утвердить у заказчика программы и задания на выполнение инженерных изысканий, выполнить инженерные изыскания, согласовать с заказчиком технический отчет по инженерным изысканиям;  получить и согласовать всю исходно-разрешительную документацию; разработать, согласовать и утвердить у заказчика задание на проектирование, разработку проектной документации, согласовать проектную документацию со всеми заинтересованными организациями и ведомствами и с заказчиком; утвердить проектную документацию у заказчика; направить от имени заказчика проектную документацию на экспертную оценку проектной документации, в том числе в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства и сноса объектов капитального строительства  и получить положительное заключение уполномоченной организации, утвердить проектную документацию у заказчика;  разработать рабочую документацию, согласовать рабочую документацию с заказчиком, а также со всеми заинтересованными организациями и ведомствами, утвердить рабочую документацию у заказчика; осуществить мероприятия по получению и оформлению прав на земельные участки (при необходимости), а в случае объектов недвижимости - в обязательном порядке, получить и оформить от имени заказчика права на земельные участки, либо разрешения на использование земельных участков, необходимые для выполнения проектно-изыскательских работ и последующего строительства объекта и сноса объекта сноса, включая изготовление схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории со списком координат характерных точек границы каждого образуемого земельного участка в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, подготовить проект межевания территории и проект планировки территории, и/или подготовить градостроительный план земельного участка и согласовать их со всеми заинтересованными лицами, организациями и ведомствами, подготовить и согласовать акт выбора трассы кабельной (воздушной) линии, поставить земельные участки на кадастровый учет, установить сервитут, подготовить проект рекультивации земель, изменение разрешенного использования земельного участка, получить разрешение на вырубку зеленых и лесных насаждений, включая подготовку и согласование акта натурного технического обследования участка);  осуществить мероприятия по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства, включая, но не ограничиваясь: подготовить сведения о границах охранных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ охранных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН; подать заявление от имени заказчика об установлении охранной зоны с приложением документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в органы государственной власти или органы местного самоуправления, уполномоченные на принятие решений об установлении охранной зоны; получить выписки из ЕГРН с информацией о внесении сведений об охранной зоне в ЕГРН;  выполнить работы по сносу объекта сноса;  выполнить строительные и монтажные работы; выполнить пусконаладочные работы.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 26.01.2021, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2021, исковые требования  удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятыми решением и постановлением, Компания обратилась в суд округа с кассационной жалобой на указанные судебные акты, одновременно заявив ходатайство о назначении судебного заседания для рассмотрения вопроса о возможности утверждения мирового соглашения.

В суд кассационной инстанции 20.08.2021 поступило ходатайство Компании об утверждении заключенного между сторонами  мирового соглашения и о прекращении производства по делу, к которому приложен текст мирового соглашения, подписанного со стороны истца директором филиала «Северо-Западный» акционерного общества «Оборонэнерго» Диденко Игорем Павловичем, а со стороны ответчика – генеральным директором Компании Чубатюком Антоном Андреевичем.

В судебном заседании кассационной инстанции представители сторон поддержали заявленное ходатайство.

Вопрос об утверждении мирового соглашения рассмотрен судом округа в порядке статьи 141 АПК РФ.

В соответствии с частью 4 статьи 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15  АПК РФ. 

Согласно части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

В соответствии с частью 2 статьи 140 АПК РФ мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой. В мировом соглашении могут содержаться условия об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и иные условия, не противоречащие федеральному закону.

В соответствии с частью 6 статьи 141 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Исследовав материалы дела, изучив  условия мирового соглашения сторон, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что данное мировое соглашение подписано уполномоченными лицами, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

При таких обстоятельствах, представленное сторонами мировое соглашение подлежит утверждению судом кассационной инстанции.

Согласно части 2 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

В связи с утверждением мирового соглашения решение суда от 26.01.2021 и постановление апелляционного суда от 27.05.2021 подлежат отмене, а производство по делу - прекращению.

Руководствуясь статьями 139, 141, 150, 151, 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

п о с т а н о в и л:

утвердить мировое соглашение, заключенное акционерным обществом «Оборонэнерго» и  обществом с ограниченной ответственностью «Строительная инжиниринговая компания «СИНКО» по делу № А56-76820/2020, в следующей редакции:

«Акционерное общество «Оборонэнерго» в лице директора филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» Диденко Игоря Павловича, действующего на основании доверенности от 05.10.2021 № 211, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Строительная инжиниринговая компания «СИНКО» в лице Чубатюка Антона Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, в целях урегулирования спора по делу № А56-76820/2020, возникшего в связи с неисполнением обществом с ограниченной ответственностью «Строительная инжиниринговая компания «СИНКО» обязательства перед акционерным обществом «Оборонэнерго» по исполняемому сторонами договору от 15.11.2019 № 122-СЗФ-2019 на выполнение комплекса работ в целях осуществления мероприятий технологического присоединения объекта: здания капитального строительства «Казарма на 800 мест, столовая на 1200 мест» инв.№ 14/4 (Военно-космической академии им. Можайского), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 28, руководствуясь статьями 139-140 АПК РФ, в целях исполнения договора от 15.11.2019 № 122-СЗФ-2019 заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная инжиниринговая компания «СИНКО» обязуется в срок не позднее 30.11.2021 полностью завершить все работы по договору от 15.11.2019 №122-СЗФ-2019 и сдать результат всех работ акционерному обществу «Оборонэнерго», для чего приведенные ниже отдельные виды работ завершить в указанные ниже сроки:

- в срок до 01.09.2021 разработать, согласовать и утвердить у акционерного общества «Оборонэнерго» программы и задания на выполнение инженерных изысканий, выполнить инженерные изыскания, согласовать с заказчиком технический отчет по инженерным изысканиям;

- в срок до 01.09.2021 получить и согласовать с уполномоченными лицами всю исходно-разрешительную документацию;

- в срок до 01.09.2021 разработать и утвердить у акционерного общества «Оборонэнерго» задание на проектирование, разработать и согласовать со всеми заинтересованными организациями (ведомствами) и с акционерным обществом «Оборонэнерго» проектную документацию;

- в срок до 01.11.2021 направить от имени АО «Оборонэнерго» проектную документацию на экспертную оценку, в том числе в части оценки сметной стоимости строительства (сноса) объектов капитального строительства (далее – экспертная оценка проектной документации), получить положительное заключение экспертной организации, утвердить проектную документацию у заказчика;

 - в срок до 01.11.2021 разработать рабочую документацию, согласовать ее со всеми заинтересованными организациями (ведомствами, утвердить ее у акционерного общества «Оборонэнерго»);

- в срок до 01.11.2021 осуществить мероприятия по получению и оформлению прав на земельные участки (при необходимости, а в случае объектов недвижимости – в обязательном порядке, получить и оформить от имени акционерного общества «Оборонэнерго» права на земельные участки, либо разрешения на использование земельных участков, необходимые для выполнения проектно-изыскательских работ и последующего строительства (сноса) объектов капитального строительства, включая изготовление схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории со списком координат характерных точек границы каждого образуемого земельного участка в системе координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости, подготовить проект межевания территории и проект планировки территории, и/или подготовить градостроительный план земельного участка и согласовать их со всеми заинтересованными лицами, организациями и ведомствами, подготовить и согласовать акт выбора трассы кабельной (воздушной) линии, поставить земельные участки на кадастровый учет, установить сервитут, подготовить проект рекультивации земель, изменение разрешенного использования земельного участка, получить разрешение на вырубку зеленых и лесных насаждений, включая подготовку и согласование акта натурного технического обследования участка);

- в срок до 30.11.2021 выполнить комплекс необходимых строительно-монтажных работ, в том числе пуско-наладочные работы, работы по демонтажу объекта капитального строительства, подлежащего сносу;

- в срок до 01.11.2021 осуществить мероприятия по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства (далее – объекты ЭСХ), включая, но не ограничиваясь:

в срок до 01.11.2021 подготовить сведения о границах охранных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ охранных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН в срок до 01.11.2021;

в срок до 01.11.2021 подать заявление от имени АО «Оборонэнерго» об установлении охранной зоны с приложением документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в органы государственной власти или органы местного самоуправления, уполномоченные на принятие решений об установлении охранной зоны, с информацией о внесении сведений об охранной зоне в ЕГРН в срок до 01.11.2021;

2. Акционерное общество «Оборонэнерго» отказывается от взыскания с общества с ограниченной ответственностью «Строительная инжиниринговая компания «СИНКО» неустойки по договору от 15.11.2019 №122-СЗФ-2019 в размере 3 186 876 руб. 15 коп. за период просрочки с 01.01.2020 по 19.11.2020, а также за период с 20.11.2020 по 01.12.2021.

3. За неисполнение обязательств по завершению всех работ по договору от 15.11.2019 № 122-СЗФ-2019 и сдачи результата всех работ, предусмотренных пунктом 1 мирового соглашения, до 01.12.2021 общество с ограниченной ответственностью «Строительная инжиниринговая компания «СНИТКО» в бесспорном порядке выплачивает акционерному обществу «Оборонэнерго» штраф в размере 7 000 000 руб. в срок до 15.12.2021.

4. В случае надлежащего исполнения сторонами обязательств, принятых на себя мировым соглашением, стороны отказываются от взаимных претензий, в том числе финансовых, друг к другу.

5. Судебные расходы распределяются следующим образом: 

- общество с ограниченной ответственностью «Строительная инжиниринговая компания «СИНКО» обязуется в течении 10 дней после утверждения мирового соглашения уплатить акционерному обществу «Оборонэнерго» судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 39 426 руб., понесенные акционерным обществом «Оборонэнерго» при подаче искового заявления в суд по данному делу;

- расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной, кассационных жалоб, расходы по оплате услуг представителей, лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная инжиниринговая компания «СИНКО» подтверждает, что ему известно о том, что в силу статьи 142 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.

Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству истца или ответчика.

7. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

8. Мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

9. Мировое соглашение вступает в силу после его утверждение Арбитражным судом Северо-Западного округа и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств».

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.01.2021 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2021 по делу № А56-76820/2020 отменить. 

Производство по делу  № А56-76820/2020  прекратить.

 

Председательствующий

Е.С. Васильева

Судьи

Л.И. Корабухина

Ю.А. Родин