35/2023-116832(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А45-37152/2022

г. Новосибирск

26 апреля 2023 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Исаковой  С.А., при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Перлит-Строй» (ОГРН 

<

***>), г.   Новосибирск, к обществу с ограниченной ответственностью «СТС-ПЛЮС»  (ОГРН 

<

***>), г. Новосибирск, об исполнении гарантийных   обязательств,  

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «СТС-ПЛЮС»  

(ОГРН 

<

***>) в течение месяца со дня вступления решения в  

законную силу устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных  

работах по договору № 01/04-19 от 02.07.2019: 

1) на объекте «ул. Ключ-Камышенское плато»:  

- выбоины асфальтобетонного покрытия (напротив планетария, перед  

Ж/Д путепроводом) - 37 м2 , 

- выкрашивание асфальтобетонного покрытия проезжей части - 14 м2 ,  - образование колейности на асфальтобетонном покрытии проезжей  

части h=13/14-40/40 мм (на всем протяжении участка) - 1500 м2, 

2) на объекте «ул. Каменское шоссе»:  

- колейность по полосам наката 10-40 мм правая полоса на всем  

протяжении - 1400 м2 , - застой воды Флористический центр «Сказка» - 50 м2, 3) на объекте «ул. Ласточкина»: 

- выкрашивание асфальтобетонного покрытия (вблизи дома № 15) – 3  

м2, - колейность в асфальтобетонном покрытии h=28 мм - 600 м2; 4) на объекте «ул. Новоуральская»: 

- образование колейности на асфальтобетонном покрытии проезжей  

части h = 3,0 см (лево) от ул. Магистральная протяженностью 160 м - 480  

м2, 

- выкрашивание по полосам наката от дома № 4 до дома № 14 средней  

шириной 7 м протяженностью 380 м - 2660 м2, - просадка смотрового колодца напротив дома № 14 - 1 шт., 

- выкрашивание асфальтобетонного покрытия в местах отбора проб - 1  

шт., - раскрытие продольного шва от дома № 14а до дома № 14-30 п.м. 5) на объекте «ул. Чекалина»: 

 - выкрашивание асфальтобетонного покрытия: примыкание к ул.  

Новоуральская, перед домом № 23, между домом № 17 и № 15 – 6,4 м2 . 6) на объекте «ул. Троллейная»: 

- выкрашивание, колейность, выбоины на асфальтобетонном покрытии  

10 000 кв.м. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТС-ПЛЮС»  

(ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  

ответственностью «Перлит-Строй» (ОГРН 

<

***>) расходы по  

оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. 

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в Седьмой арбитражный апелляционный суд  (г. Томск) в течение месяца после принятия.  

Решение арбитражного суда, вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд  Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в течение двух месяцев с момента  вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный  суд Новосибирской области.  

Судья С.А. Исакова  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 28.03.2023 0:04:00

Кому выдана Исакова Светлана Анатольевна