АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-19750/2024

г. Ярославль

10 марта 2025 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Шмидько Е.Ю.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Тищенко А.В., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление государственного казенного учреждения Ярославской области «Единая служба заказчика» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Северный поток» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

об обязании выполнить гарантийные обязательства по контракту.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Северный поток» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в месячный срок с момента вступления решения суда в законную силу исполнить гарантийные обязательства по государственному контракту от 10.04.2018 г. № 665-есз путем выполнения следующих видов работ:  

- выполнить работы по заделке швов (рустов) в помещении методического кабинета с восстановлением штукатурного слоя и красочного покрытия;  

- восстановить штукатурный слой с покраской на потолке в группе «Сказка»; 

- устранить следы протечек в районе расположения ливневого стояка в кабинете логопеда с восстановлением штукатурного слоя и красочного покрытия;  

- восстановить штукатурный слой с покраской на стенах в кабинете психолога; 

- выполнить работы по заделке технологических отверстий в плитах перекрытия в помещении компьютерного класса с восстановлением штукатурного и покрасочного покрытия;  

- восстановить штукатурный слой с покраской на стенах в коридоре, напротив компьютерного класса;  

- устранить следы протечек в районе расположения ливневого стока в группе «Почемучки» с восстановлением штукатурного слоя и красочного покрытия;  

- устранить следы протечек в районе расположения вентиляционных решеток, восстановить штукатурный слой с покраской на стенах и в местах примыкания стен с потолком в Музыкальном зале;  

- восстановить штукатурный слой с покраской на стенах: за детскими шкафчиками, в районе вентиляционных решеток и потолка в группе «Капельки»;  

- восстановить штукатурный слой с покраской на стенах в спальной комнате группы «Светлячки»;  

- восстановить штукатурный слой с покраской на стенах в районе детских шкафчиков и провести замену противопожарных входных дверей в группе «Лучики»;  

- устранить сквозные трещины на стенах и в районе примыкания стен к потолку с восстановлением штукатурного слоя и красочного покрытия в пищеблоке: в мясорыбном цехе;  

- устранить трещины с восстановлением штукатурного слоя и красочного покрытия в тамбуре кабинета завхоза;  

- устранить трещины с восстановлением штукатурного слоя и красочного покрытия в местах примыкания стен к потолку в помещении постирочной;  

- устранить в помещениях детского сада выпадение заделок технологических отверстий в плитах перекрытий с восстановлением штукатурного слоя и красочного покрытия;  

- восстановить асфальтовое покрытие (устранить провалы) на территории детского сада;  

- восстановить (заменить) керамическую плитку входных групп главного и аварийного выходов;  

- провести восстановление (ремонт) или замену водосточной системы на главном входе детского сада;  

- восстановить гидроизоляцию в подвальном помещении; - восстановить кровлю (устранить протечки) в Блочно-модульной котельной. 

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Северный поток» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 50 000 руб. государственной пошлины. Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Е.Ю. Шмидько