АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

600005, 

<

...> тел. 

<

***>, факс 

<

***> е-mail: vladimir.info@arbitr.ru, Интернет-сайт: http://vladimir.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

_____________________________________________________________________________  

 РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А11-14277/2024

г. Владимир

10 сентября 2025 года

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи Смагиной Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лошкаревой Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А11-14277/2024 по исковому заявлению муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании устранить недостатки выполненных по контракту от 14.11.2023 № 0828600003223000098_196410 работ, о взыскании 17 000 руб. (с учетом уточнения).  

Руководствуясь статьями 17, 49, 65, 71, 101, 110, 112, 121, 123, 156, 167-170, 174, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в  

течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу устранить  

недостатки выполненных по контракту от 14.11.2023 № 0828600003223000098_196410  

работ, а именно: 1) устранение колейности и просадок: 

- исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала в количестве 0,225 (1000 м2);  

- щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М400, фракция 8-16 мм в количестве 2,5875м3.  

- щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М400, фракция 31,5-63 мм в количестве 12,375м3.  

2) устройство присыпной обочины и формирования примыкания кромки проезжей  

части к выравнивающему слою из песка: 

- исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала в  

количестве 0,45 (1000 м2); 

- щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М400, фракция  

8-16 мм в количестве 5,175м3; 

- щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М400, фракция  

31,5-63 мм в количестве 24,75м3. 

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка в  

количестве 0,525 (100м3); 

- песок природный для дорожного строительства I класс, мелкий, квадратные сита в  

количестве 63м3. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 в  

пользу муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»  

Камешковского района расходы по оплате услуг оценщика в размере 17 000 руб., а также  

расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 000 руб.  

Исполнительные листы выдать в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в срок, не превышающий месяца с момента его вынесения.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.В. Смагина