АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А76-33901/2022

30 марта 2023 года

г. Челябинск

 

Резолютивная часть решения объявлена 30 марта 2023 года  Решение изготовлено в полном объеме 30 марта 2023 года  

Судья Арбитражного суда Челябинской области О.Ю. Щербакова, при ведении  

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассматривает в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя  

ФИО2 (ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Электромонтажремонт» (ИНН 

<

***>) 

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  

требований относительно предмета спора, индивидуального предпринимателя ФИО4  

Татьяна Александровна (ИНН 

<

***>), о взыскании 2 030 695 руб., при участии в судебном заседании до перерыва: от истца: ФИО3 (доверенность от 25.10.2022 г., паспорт, диплом), от ответчика: не явился, извещен, от третьего лица: не явился, извещен 

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее –  предприниматель ФИО2, истец) обратился в Арбитражный суд Челябинской области  к обществу с ограниченной ответственностью «Электромонтажремонт» (далее – общество  «Электромонтажремонт», ответчик) с исковым заявлением о взыскании задолженности по  договору подряда от 13.10.2016 № 2 в размере 2 030 695 руб.  

Определением от 21.10.2022 заявление оставлено без движения в связи с  допущенными при его подаче нарушениями требований, установленных статьей 126  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Определением от 18.11.2022 судом назначено дело к рассмотрению в  предварительном судебном заседании на 18 января 2023 года 09 час. 50 мин.  

Определением от 18.01.2023 на основании норм статьи 51 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица,  не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена  ФИО4 (ИНН 

<

***>, далее – ФИО4, третье  лицо). Назначено дело к рассмотрению в судебном заседании на 01 марта 2023 года на 11  час. 10 мин.  

Определением от 01.03.2023 судебное заседание отложено на 23 марта 2023 года 10  час. 50 мин.  

Представитель истца в судебное заседание явился, настаивал на удовлетворении  исковых требований.  

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени  рассмотрения дела извещен надлежащим образом.  

Согласно сведениям, содержащимся в Выписке ЕГРЮЛ, имеющимся в материалах  дела, местом нахождения общества «Электромонтажремонт» является адрес: 649000,  

<

...>, оф. 2.  

Суд направлял ответчику копию определения о принятии искового заявления к  производству от 18.11.2022 по адресу: 649000, 

<

...>, оф. 2.  

С указанного адреса органом почтовой связи возращен почтовый конверт с отметкой  «истек срок хранения».  

Процедура доставки почтовых отправлений (включая заказные письма разряда  «Судебное») прописана в Правилах оказания услуг почтовой связи, утвержденных Приказом  Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234 (далее – Правила № 234), а также в Порядке  приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений (редакция № 2),  утвержденных Приказом ФГУП «Почта России» от 07.03.2019 № 98-п (далее – Порядок   № 98-п).  

Почтовые отправления разряда «Судебное» при невозможности их вручения  адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места  назначения в течение 7 дней (п. 11.1 № 98-п).  

При исчислении срока хранения почтовых отправлений разряда «судебное» день  поступления и возврата почтового отправления, а также нерабочие праздничные дни,  установленные трудовым законодательством Российской Федерации, не учитываются (п. 34  Правил № 234, абз. 5 п. 11.1 Порядка № 98-п).  

Помимо сведений о направлении ответчику извещений на почтовом конверте,  арбитражный суд принимает во внимание аналогичную информацию, размещенную на  официальном сайте ФГУП «Почта России» (https://www.pochta.ru/).  

В рассматриваемом случае порядок вручения почтового отправления был соблюден. 

Добросовестность организации почтовой связи по принятию всех неоднократных мер,  необходимых для вручения судебного акта, предполагается, пока заинтересованным  адресатом не доказано иное. Как следует из отчета об отслеживании отправлений в адрес  ответчика, копия определения о принятии искового заявления к производству от 18.11.2022  прибыло в место вручения 30.11.2022, отправителю выслано отправление 08.12.2022, то есть  с соблюдением сроков, указанных в Правилах  

Таким образом, если участник дела в течение срока хранения заказной  корреспонденции, не явился без уважительных причин за получением копии судебного акта  по приглашению органа почтовой связи, то арбитражный суд вправе признать такое лицо  извещенным надлежащим образом о месте и времени судебного заседания на основании  пункта 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Сведениями о нахождении (месте жительства) ответчика по иным адресам,  арбитражный суд не располагает.  

Кроме того, определение суда от 18.11.2022, размещено на официальном сайте  Арбитражного суда Челябинской области в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 19.11.2022, то есть за пятнадцать рабочих дней до момента проведения  судебного заседания, что соответствует абзацу второму части 1 статьи 121 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Ответчик несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений  (статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), доставленных по адресу,  указанному в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и адресной справке, а также риск отсутствия ответчика либо  его представителя по указанным адресам.  

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий  совершения или несовершения ими процессуальных действий.  

На основании изложенного, при рассмотрении вопроса о надлежащем извещении  ответчика, суд пришел к выводу о надлежащем извещении общества с ограниченной  

ответственностью «Электромонтажремонт» о судебном разбирательстве по настоящему  делу.  

Отзыв с указанием возражений по иску в нарушение части 1 статьи 131 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлен. В силу части 4  статьи 131 и части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле  доказательствам без каких-либо возражений ответчика. При этом в силу части 3.1 статьи 70  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые  ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются  признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими  обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные  возражения относительно существа заявленных требований.  

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, представил мнение по  делу, в котором поддерживает исковые требования в полном объеме.  

В судебном заседании 23.03.2023 в порядке норм статьи 163 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 30.03.2023 16 час. 10  мин. Информация о перерыве в судебном заседании размещена на официальном Интернет-сайте Арбитражного суда Челябинской области http://www.chelarbitr.ru.  

О перерыве в судебном заседании лица, участвующие в деле, извещены путем  размещения информации о перерыве в судебном заседании на официальном Интернет-сайте  Арбитражного суда Челябинской области http://www.chelarbitr.ru.  

Судебное заседание продолжено после перерыва 30.03.2023.  

После перерыва лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о  времени и месте рассмотрения спора, с соблюдением требований норм статей 121 - 123  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебное заседание  полномочных представителей не направили.  

Дело рассматривается по правилам норм статьи 156 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных  надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела.  

Исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела в  соответствии с нормами статей 71, 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, арбитражный суд установил следующее.  

Как следует из материалов дела, между обществом «Электромонтажремонт»  (заказчик) и индивидуальным предпринимателем ФИО4 (подрядчик,  первоначальный кредитор), был заключен договор подряда от 13.10.2016 № 2, в рамках  исполнения которого подрядчиком выполнены работы на сумму 4 055 895 руб.  

Вместе с тем, оплата заказчиком произведена частично на сумму 2 025 200 руб. 

Согласно п. 7.2 данного договора расчет производится заказчиком (ответчиком) не  позднее десяти дней после полного завершения этих работ, включая устранение выявленных  дефектов, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, оформленного в  установленном порядке. Таким образом, заказчику сданы работы:  

- акт от 31.10.2016 № 1 на сумму 370 987 руб.; - акт от 31.10.2016 № 2 на сумму 63 014 руб.; - акт от 30.11.2016 № 3 на сумму 106 678 руб.; - акт от 30.11.2016 № 4 на сумму 62 909 руб.; - акт от 30.11.2016 № 5 на сумму 319 178 руб.; - акт от 30.11.2016 № 6 на сумму 626 845 руб.; - акт от 30.12.2016 № 7 на сумму 912 084 руб. 

Для других видов работ стороны в спецификациях изменили порядок оплат и  установили его следующим образом: 100% в течение 90 дней с момента окончания работ:  

- акт от 10.11.2016 № 6 а на сумму 261 200 руб.; - акт от 30.11.2016 № 6 Б на сумму 259 000 руб.; - акт от 30.11.2016 № 6 В на сумму 300 000 руб.; 

- акт от 19.12.2016 № 8 на сумму 190 000 руб.; - акт от 26.12.2016 № 9 на сумму 188 000 руб.; - акт от 30.12.2016 № 10 на сумму 206 000 руб.; - акт от 30.12.2016 № 11 на сумму 190 000 руб. 

Работы приняты без замечаний, что подтверждается актами выполненных работ и  актом сверки взаимных расчетов, срок оплаты наступил.  

В дальнейшем, в соответствии с договором уступки прав (цессии) от 27.05.2020 № 1  первоначальный кредитор (ФИО4) уступила истцу (предпринимателю ФИО2) свое право требования 2 030 695 руб. с общества «Электромонтажремонт». О  состоявшейся уступке права требования ответчик извещен письмом 27.05.2020 (на письме  роспись в получении 29.05.2020) - Приложение № 39.  

В соответствии с п.10.3 договора подряда от 13.10.2016 № 2 стороны установили  обязательный претензионный порядок. Срок ответа на претензию 10 дней, в случае  неразрешения спора он подлежит разрешению в арбитражном суде Челябинской области.  13.07.2022 ответчику была направлена претензия - Приложение № 2 (45400471459742),  которая осталась без ответа и без оплаты, что послужило истцу основанием для обращения в  суд с настоящим иском за защитой нарушенных прав.  

Оценив представленные в материалы дела доказательства, заслушав пояснения истца,  арбитражный суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых  требований.  

Согласно положениям пунктов 1 и 2 статьи 382 Гражданского кодекса Российской  Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства,  может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к  другому лицу на основании закона, и для перехода к другому лицу прав кредитора не  требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.  

Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора  переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к  моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права,  обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права,  в том числе право на проценты (пункт 1 статьи 384 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

Право требования по денежному обязательству может перейти к другому лицу в части,  если иное не предусмотрено законом (пункт 2 статьи 384 Гражданского кодекса Российской  Федерации).  

Уведомление должника о переходе права имеет для него силу независимо от того,  первоначальным или новым кредитором оно направлено (пункт 1 статьи 385 Гражданского  кодекса Российской Федерации).  

Суды при рассмотрении требований сторон, вытекающих из договорных отношений, в  любом случае проверяют договор на предмет его заключенности и действительности  (постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009   № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с  неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств»).  

Проанализировав условия договора уступки прав требования от 27.05.2020 № 1,  заключенного между ФИО4 (цедент) и предпринимателем ФИО2  (цессионарий), согласно которому цедент уступила права требования в полном объеме по  договору подряда от 13.10.2016 № 2 на общую сумму 2 030 695 руб., суд приходит к выводу о  том, что оснований считать его недействительным не имеется.  

Оснований для критической оценки договора уступки права требования от 27.05.2020   № 1 не выявлено, лицами, участвующими в деле факт его заключения не оспаривается.  

В соответствии с частью 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации,  гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и  иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и  

не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

Проанализировав условия представленного договора, суд первой инстанции пришел к  выводу о том, что сторонами заключен договор подряда, следовательно, между сторонами  возникли отношения, регулируемые главой 37 Гражданского Кодекса Российской  Федерации.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой  стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик  обязуется принять результат работы и оплатить его.  

В соответствии с нормами статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации  заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием  подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении  отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе  немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при  ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе,  удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего  предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором  подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки  работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные  недостатки). Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора  подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе  приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты  подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.  

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик  обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов  работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом, если договором подряда не  предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов.  

Из положений норм статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской  Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства  по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение  работ и передача их результата заказчику.  

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных  договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ  (пункт 8 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от  24.01.2000 № 51).  

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача  результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным  обеими сторонами.  

Из материалов дела следует, что работы приняты без замечаний, что подтверждается  актами выполненных работ и актом сверки взаимных расчетов. Подписание данных  документов представителями обеих сторон без замечаний и возражений по объемам и  стоимости выполненных работ, их качеству, скрепление печатями истца и ответчика  свидетельствуют о выполнении работ подрядчиком (истцом), принятии их результата  подрядчиком (ответчиком), а также о потребительской ценности результата работ для  ответчика и желании последнего им воспользоваться.  

Как следует из пункта 7 Информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики  по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» (далее – Информационное  письмо № 165), суд должен оценивать обстоятельства дела в их взаимосвязи в пользу  сохранения, а не аннулирования обязательств, а также исходя из презумпции разумности и  добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10  Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Кроме того, в силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих  требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо  не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств,  обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных  требований.  

В соответствии частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или  не совершения ими процессуальных действий.  

Как следует из Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации от 15.10.2013 № 8127/13 суд не вправе отклонить представленные истцом  доказательства, если ответчик не участвовал в судебном заседании и не возражал по  существу предъявленного иска, поскольку в противном случае он фактически исполняет  обязанность ответчика по опровержению этих доказательств.  

Вместе с тем, в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам  Верховного Суда Российской Федерации от 06.08.2018 № 308-ЭС17-6757 разъяснено, что  исходя из принципа состязательности, подразумевающего, в числе прочего, обязанность  раскрывать доказательства, а также сообщать суду и другим сторонам информацию,  имеющую значение для разрешения спора, нежелание стороны опровергать позицию  процессуального оппонента должно быть истолковано против нее (статьи 9, часть 3 статьи  65, часть 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Ответчик доказательства, свидетельствующие о выполнении истцом работ в каком-либо ином объеме или стоимости, в материалы дела не представил (статьи 9, 65  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

В соответствии с нормами статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в  силу обязательств одно лицо (должник) обязано совершать в пользу другого лица  (кредитора) определенные действия, а кредитор имеет право требовать от должника  исполнения его обязанности. Обязательства должны исполняться надлежащим образом.  Только надлежащее исполнение прекращает обязательство (статья 408 Гражданского кодекса  Российской Федерации).  

В силу положений норм статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской  Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии  таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно  предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения  обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.  

Учитывая вышеизложенное, требование предпринимателя ФИО2 о  взыскании с общества «Электромонтажремонт» задолженности за выполненные работы в  рамках договора подряда от 13.10.2016 № 2 в сумме 2 030 695 руб. заявлены правомерно и  подлежат удовлетворению.  

В соответствии с нормами статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов, разрешаются  арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается  рассмотрение дела по существу.  

По смыслу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы по уплате государственной пошлины, понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным  судом со стороны.  

При цене иска 2 030 695 руб. уплате в федеральный бюджет подлежит  государственная пошлина в размере 33 153 руб.  

Судом при принятии искового заявления истцу была предоставлена отсрочка уплаты  госпошлины до рассмотрения спора по существу.  

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  

Федерации расходы по госпошлине подлежат отнесению на ответчика. 

Поскольку при принятии иска истцу была предоставлена отсрочка уплаты  

госпошлины, последняя взыскивается с ответчика в доход бюджета Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 101, 110, 112, 167-171, 176, 181 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Электромонтажремонт»  

(ИНН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>) задолженность в размере 2 030 695 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Электромонтажремонт»  (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере  

33 153 руб. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд  Челябинской области.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы  решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья О.Ю. Щербакова  

 Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru