АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, 

<

...>, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело № А07-28795/2016

г. Уфа

26 февраля 2026 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Савельевой Д.Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Конновой К.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску

акционерного общества "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная артель имени С.М. Ларионова" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неосновательного обогащения (стоимости невыполненных работ) по договору генерального подряда № 6310/11/=18 от 28.12.2011 в размере 18 694 120 руб., пеней за нарушение срока выполнения работ по договору генерального подряда № 6310/11/=18 от 28.12.2011 за период с 01.01.2015 по 29.08.2016 в размере 6 362 722 руб. (с учетом уточнения первоначального иска, т. 5 л.д. 90-91)

по встречному исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью "Строительная артель имени С.М. Ларионова" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к акционерному обществу "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании задолженности за выполненные подрядные работы в размере 17 941 467 руб. 63 коп. (с учетом уточнения встречного иска от 25.07.2025, т. 60 л.д.121-128).

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: 1) общество с ограниченной ответственностью «Башэнергострой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), 2) общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации оглашается 

резолютивная часть решения

.

Руководствуясь ст. ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования акционерного общества "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная артель имени С.М. Ларионова" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) стоимость невыполненных работ в сумме 6 567 890

руб. 57 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 38 865 руб. 00 коп., судебные расходы по оплате экспертизы в сумме 53 730 руб. 50 коп.

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Строительная артель имени С.М. Ларионова" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная артель имени С.М. Ларионова" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неосновательное обогащение в сумме 9 424 686 руб. 80 коп., судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 59 205 руб., судебные расходы по оплате экспертизы в сумме 236 385 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Произвести зачет удовлетворенных частей первоначального и встречного исков, в результате которого взыскать с акционерного общества "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная артель имени С.М. Ларионова" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неосновательное обогащение в сумме 3 059 790 руб. 73 коп.

Произвести процессуальное правопреемство, заменить общество с ограниченной ответственностью "Строительная артель имени С.М. Ларионова" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) на ФИО1 в части взыскания судебных расходов на оплату юридических услуг.

Взыскать с акционерного общества "Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу ФИО1 судебные расходы по оплате юридических услуг в сумме 442 120 руб. 00 коп.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Строительная артель имени С.М. Ларионова" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) с депозитного счета Арбитражного суда Республики Башкортостан денежные средства в сумме 115 000 руб., перечисленные по платежному поручению от 12.04.2024 № 2.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Д.Р. Савельева