Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-37572/2019

02 июля 2019 года

г. Санкт-Петербург

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Т.А. Косенко

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец:  общество с ограниченной ответственностью «ПЕРЕКРЕСТОК» (адрес: Россия 192289, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, д. 11, лит. Д, ОГРН: 

<

***>)

ответчик: закрытое акционерное общество «ЮВЕНАЛ» (адрес: Россия 194100, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 65, корп. 1, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 

при участии

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 22.11.2018

от ответчика: не явился, извещен

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРЕКРЕСТОК» (далее – ООО «ПЕРЕКРЕСТОК») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к закрытому акционерному обществу «ЮВЕНАЛ» (далее – ЗАО «ЮВЕНАЛ») о взыскании 1 704 461,42 руб. задолженности по договору субподряда от 07.09.2018 № 25/18.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в его отсутствие. 

Отзыв с возражениями по заявленным требованиям ответчик не представил.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, ООО «ПЕРЕКРЕСТОК» (Субподрядчик) и ЗАО «ЮВЕНАЛ» (Подрядчик) заключили договор субподряда от 07.09.2018 № 25/18, по условиям которого Субподрядчик по заданию Подрядчика обязуется на свой риск выполнить собственными и/или согласованными привлеченными силами и средствами, а также материалами, полный комплекс работ, включая, пусконаладочные работы и испытания, по установке дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесению дорожной разметки (далее по тексту «Работы») на объекте: «Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Елпзаветино - Скворицы, км 2+950 - км 7+200, км 7+800 - км 9+380 в Гатчинском районе Ленинградской области» (далее по тексту «Объект»), в соответствии с утвержденной документацией, Техническим заданием (Приложение №2), условиями договора и приложений к нему, а также нормами действующего законодательства, и передать результат выполненных работ Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их результат.

В соответствии с пунктом 2.1 договора началом выполнения работ является момент заключения договора, а окончанием - 30 сентября 2018, но не ранее 14 рабочих дней с момента передачи фронта работ, а в части работ по нанесению дорожной разметки - 14 рабочих дней при наличии благоприятных погодных условий, в случае наступления неблагоприятных погодных условий, срок отодвигается соразмерно их продолжительности, при условии предоставления Субподрядчиком справки из компетентного органа.

Пунктом 2.3 договора установлено, что началом выполнения работ по договору считается момент начала осуществления Подрядчиком любых действий, направленных на выполнение любой из своих обязанностей, предусмотренных договором.

Согласно пункту 3.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от 15.10.2018 № 1 к договору) стоимость работ по договору определяется в соответствии с расчетом договорной цены (приложение № 1 к договору) и составляет 1 704 461,42 руб.

Из пункта 3.4 договора усматривается, что оплата фактически выполненных Субподрядчиком работ производится Подрядчиком в течение 25 банковских дней с момента подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), представляемых Субподрядчиком Подрядчику, при условии получения Подрядчиком денежных средств от Подрядчика за работы, выполненные Субподрядчиком, а также предоставления счета, счета-фактуры, исполнительной и иной, указанной в пункте 4.1 договора, документации.

Как следует из пункта 4.2 договора, после выполнения работ Субподрядчик письменно уведомляет Подрядчика о готовности выполненных работ к сдаче в эксплуатацию и передает Подрядчику полный комплект исполнительной документации, согласованной в установленном порядке с инженером-резидентом службы технического надзора по объекту, оформляет акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. 

По пункту 4.6 договора работы считаются принятыми с момента подписания Подрядчиком акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ.

Субподрядчик выполнил работы по спорному договору согласно справке о стоимости выполненных работ и акту о приемке выполненных работ от 15.10.2018 № 1 на сумму 1 704 461,42 руб., подписанные и заверенные печатями сторонами без замечаний и возражений.

Субподрядчик направил подрядчику претензию от 31.01.2019 № 004 с требованием о взыскании задолженности по оплате выполненных работ. 

Отказ ЗАО «ЮВЕНАЛ» удовлетворить требования послужил основанием для обращения ООО «ПЕРЕКРЕСТОК» в арбитражный суд с настоящим иском.

Пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ).

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ представленные сторонами в материалы дела доказательства оцениваются арбитражным судом полно, всесторонне и объективно, в их совокупности и взаимной связи.

Выполнение Субподрядчиком работ по спорному договору подтверждается представленными в материалы дела актом формы КС-2 и справкой формы КС-3 от 15.10.2018 № 1, подписанными ЗАО «ЮВЕНАЛ» без возражений по объему и качеству.

Доказательств оплаты работ ответчик не представил, в связи с чем требование ООО «ПЕРЕКРЕСТОК» о взыскании 1 704 461,42 руб. задолженности подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с закрытого акционерного общества «ЮВЕНАЛ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПЕРЕКРЕСТОК» 1 704 461,42 руб. задолженности и 30 045 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Косенко Т.А.