АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-4589/2022

г. Уфа

02 августа 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 27.07.2022

Полный текст решения изготовлен 02.08.2022

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Шамсутдинова Э. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города Салават (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Альберт+" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

третье лицо: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

об обязании исполнить обязательства по договору (с учетом уточнения)

 

при участии в судебном заседании:

от истца в онлайн-режиме – ФИО2 по доверенности от 10.01.2022г. №15

от ответчика-Тттян А.Т. по доверенности от 27.05.2022г., директор ФИО3 решение №4 от 22.05.2017г.

от третьего лица – явки нет, уведомлены;

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города Салават обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Альберт+" об обязании исполнить обязательства по договору.

Истец уточнил требования по иску, конкретизировал их, просит согласно уточнению обязать ответчика исполнить обязательства по гражданско-правовому договору от 9 июля 2019 года №483 на сумму 2 075 196,7 руб., а именно:

1.1. Выполнить работы по облицовке стен в количестве 74,6 кв. метров.

1.2. Произвести сплошное выравнивание стен и потолков в количестве 2 514,5 кв. метров,

1.3. Покрасить потолок в количестве 80,5 кв. метров.

1.4. Произвести устройство стяжек в количестве 307,5 кв. метров.

1.5. Покрыть пол линолеумом в количестве 421,4 кв. метров.

1.6.Произвести устройство потолков типа Армстронг в количестве 198, 6 кв. метров.

1.7. Установить двери (в том числе противопожарные) в количестве 41 кв. метров.

1.8. Установить перегородки в количестве 10 кв. метров.

1.9. Покрасить перегородки в количестве 71,4 кв. метров.

1.10.    Покрасить потолки в количестве 8 кв. метров.

1.11.    Произвести монтаж алюминиевых потолков в количестве 9, 23 кв. метров.

1.12.    Установить решетки радиаторные в количестве 9 шт.,  моек- 64 шт., умывальников - 50 шт., смесителей - 40 ш.

Судом уточнение исковых требований принято в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дело рассмотрено с учётом уточнения.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, было привлечено Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.

Истец поддержал уточнённые требования.

Ответчик требования по иску отклонил по доводам отзыва.

Третье лицо явку в судебное заседание не обеспечило, о времени и месте его проведения уведомлено надлежащим образом, в том числе путем публичного размещения информации о движении дела на официальном сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан  в сети Интернет.

Третье лицо представило отзыв, оставляет решение по делу на усмотрение суда.

Дело рассмотрено в отсутствие третьего лица по правилам ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства, заслушав истца и ответчика, арбитражный суд 

 

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 09.07.2019 между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан городской больницы города Салават (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Альберт+» (подрядчик) заключен гражданско-правовой договор № 483 р/н 2026603402219000447, в соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «капитальный ремонт 3 и 4 этажей поликлиники ГБУЗ РБ ГБ г. Салават по адресу: РБ, 

<

...>» далее - Работы), в объеме и соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение №2 к Договору), с учетом положений, установленных в пунктах №1,2 Раздела №1 Технического задания документации электронного аукциона, по результатам которого заключен настоящий договор и передать выполненные работы заказчику, а заказчик обязуется принять работы и оплатить установленную настоящим договором цену.

Согласно п. 1.2 договора срок выполнения работ: с момента подписания договора в течение 90 дней.

Место выполнения работ: поликлиника по адресу: 

<

...> (далее - Объект) (п. 1.3 договора).

В соответствии с п. 4.1 договора цена контракта определяется локальным сметным расчетами и составляет 6 756 346 руб. 80 коп.

Истец указал, что по состоянию на 25.01.2022 подрядной организацией не выполнены объемы работ по договору: согласно актам о приемке выполненных работ формы КС-2 и справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 № 1 от 14.08.2019, № 2 от 30.09.2019, № 3 от 22.10.2019, № 4 от 20.11.2019, № 5 от 29.11.2019 излишне запроцентованы объёмы работ по облицовке стен в количестве 74,6 кв. метров, сплошному выравниванию стен и потолков в количестве 2 514,5 кв. метров, покраска потолка в количестве 80,5 кв. метров, устройству стяжек в количестве 307,5 кв. метров, устройству покрытий пола линолеумом в количестве 421,4 кв. метров, устройству потолков типа Армстронг в количестве 198, 6 кв. метров, установке двери (в том числе противопожарных) в количестве 41 кв. метров, устройству перегородок в количестве 10 кв. метров, покраске перегородки в количестве 71,4 кв. метров, покраске потолков в количестве 8 кв. метров, монтажу алюминиевых потолков в количестве 9, 23 кв. метров, установлению решеток радиаторных в количестве 9 шт., моек в количестве 64 шт., умывальников в количестве 50 шт., смесителей в количестве 40 шт.       

Указал, что указанные доводы подтверждаются актом проверки использования средств, выделенных на проведение капитального ремонта в ГБУЗ РБ Городская больница города Салават от 29.06.2021, выданным контрольно-ревизионным отделом Минздрава РБ после проведения проверки в период с 17.05.2021 по 04.06.2021.

Оплата по контракту осуществлена, что подтверждается платежными поручениями № 896605 от 02.09.2019, № 1049533 от 08.10.2019, № 1130595 от 28.10.2019, № 1253146 от 25.11.2019, № 1333600 от 10.12.2019.

Поскольку спор в досудебном порядке урегулировать не удалось, претензия истца от 16.11.2021г. была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в суд.

Ответчик требования не признал, в отзыве указал, что выполнил обязательства по договору в полном объёме, а истец в свою очередь принял объёмы выполненных работ подписанием соответствующих актов формы КС-2, КС-3. Акты подписаны главным врачом ФИО4, проверены техническим надзором ФИО5

Оценив все представленные доказательства в отдельности, относимость, допустимость и их достоверность, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает уточненные исковые требования не подлежащими удовлетворению на основании следующего.

При квалификации спорных отношений суд приходит к выводу,  что между сторонами возникли обязательственные отношения, которые подлежат регулированию положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации  о подряде.

В соответствии с пунктом 8 статьи 3 Закона N 44-ФЗ контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

В соответствии со ст. ст. 763, 764, 768 ГК РФ подрядные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному контракту государственными заказчиками могут выступать государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы управления государственными внебюджетными фондами, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. По муниципальному контракту муниципальными заказчиками могут выступать органы местного самоуправления, а также иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд.

Государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд (п. 8 ст. 3 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Проанализировав условия гражданско-правового договора № 483 р/н 2026603402219000447от 09.07.2019 года, суд оснований для признания его незаключенным не находит, все существенные условия контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд сторонами согласованы.

В силу условий п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (п. 2 ст. 740 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

В соответствии с п. 1 ст. 750 ГК РФ, если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежат возмещению другой стороной в случаях, когда это предусмотрено договором строительного подряда (п. 2 ст. 750 ГК РФ).

Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке (п. 1 ст. 753 ГК РФ).

Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика (п. 3 ст. 753 ГК РФ).

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной (п. 4 ст. 753 ГК РФ).

Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия (п. 1 ст. 754 ГК РФ).

Подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон (п. 1 ст. 755 ГК РФ).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами (п. 2 ст. 755 ГК РФ).

Статьей 756 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 724 настоящего Кодекса.

При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 настоящего Кодекса, составляет пять лет.

Согласно п. 1 ст. 757 Гражданского кодекса Российской Федерации, договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность подрядчика устранять по требованию заказчика и за его счет недостатки, за которые подрядчик не несет ответственности.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, в случаях, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом договора либо не может быть осуществлено подрядчиком по не зависящим от него причинам (п. 2 ст. 757 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В соответствии с пунктом 2 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

В силу условий пункта 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (п. 2 ст. 721 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, заказчик вправе потребовать от подрядчика, в частности, соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Имеющиеся в материалах дела акты выполненных работ по форме КС-2 подписаны сторонами без каких-либо замечаний к объему и качеству выполненных работ и скреплены печатями.

Пунктом 4 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 1 статьи 754 настоящего Кодекса, заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

Согласно пункту 4 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки результата работы обнаружены заказчиком по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком), подрядчик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

Иск подан истцом 18.02.2022 года в пределах гарантийного периода и истец должен доказать факт отступления подрядчика от условий договора.

Разделом 7 договора (Гарантии качества по сданным работам) предусмотрено:

7.1. Гарантии качества распространяются на все Работы и конструктивные элементы, составляющие результат Работ, выполненных Подрядчиком по Контракту. 

7.2. Подрядчик гарантирует, что качество и технические характеристики строительных материалов, применяемых им при выполнении работ, будут соответствовать условиям настоящего Контракта, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты (декларации) соответствия, удостоверяющие их качество. 

Качество работ и объём контроля качества работ должны соответствовать требованиям СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения». 

Выполняемые работы и результаты таких работ, а также качество, условия и требования к безопасности работ должны соответствовать всем требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

7.3. Подрядчик гарантирует соответствие технико-экономических показателей Объекта утвержденными Заказчиком локальным сметным расчетом и возможность эксплуатации Объекта в течение установленного Контрактом гарантийного срока и несет ответственность за отступление от локального сметного расчета. 

7.4. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и Работ составляет 60 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ. 

7.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок и ко времени, указанные в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. 

7.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами. 

7.7. При уклонении Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных недостатках Заказчик составляет указанный акт с участием представителя организации, осуществляющей технический надзор, в случае заключения контракта на ведение такого надзора.

Однако в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не представил достоверных доказательств, подтверждающих ненадлежащее исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Алберт+» обязательств по контракту.

Акт проверки использования средств, выделенных на проведение капитального ремонта в ГБУЗ РБ Городская больница города Салават от 29.06.2021, выданный контрольно-ревизионным отделом Минздрава РБ после проведения проверки в период с 17.05.2021 по 04.06.2021 таким доказательством не является.

Указанные истцом недостатки: излишне запроцентованы объёмы работ по облицовке стен в количестве 74,6 кв. метров, сплошному выравниванию стен и потолков в количестве 2 514,5 кв. метров, покраска потолка в количестве 80,5 кв. метров, устройству стяжек в количестве 307,5 кв. метров, устройству покрытий пола линолеумом в количестве 421,4 кв. метров, устройству потолков типа Армстронг в количестве 198, 6 кв. метров, установке двери (в том числе противопожарных) в количестве 41 кв. метров, устройству перегородок в количестве 10 кв. метров, покраске перегородки в количестве 71,4 кв. метров, покраске потолков в количестве 8 кв. метров, монтажу алюминиевых потолков в количестве 9, 23 кв. метров, установлению решеток радиаторных в количестве 9 шт., моек в количестве 64 шт., умывальников в количестве 50 шт., смесителей в количестве 40 шт. 

не могли носить скрытый характер и должны были быть обнаружены при приемке заказчиком посредством визуального осмотра. Таким образом, истец, принявший работы по актам о сдаче-приемке выполненных работ без замечаний к их объему и качеству, утратил право ссылаться на указанные недостатки выполненных работ в порядке пункта 3 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Составленный акт проверки использования средств, выделенных на проведение капитального ремонта в ГБУЗ РБ Городская больница города Салават от 29.06.2021, выданный контрольно-ревизионным отделом Минздрава РБ после проведения проверки в период с 17.05.2021 по 04.06.2021 (т. 2 л.д. 24-63) содержит только перечисление работ по актам выполненных работ с их стоимостью. Сведения о том, какие из перечисленных работ не выполнены полностью, а какие выполнены с недостатками, а также причины, по которым соответствующие недостатки не были обнаружены при приемке работ и подписании актов формы КС-2 отсутствуют.

Таким образом, в отсутствие доказательств, подтверждающих ненадлежащее исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Алберт+» обязательств по контракту, иск Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан городской больницы города Салават удовлетворению не подлежит.

Поскольку в удовлетворении исковых требований отказано, то государственная пошлина подлежит отнесению на истца по правилам части 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья                                                                        Э.Р. Шамсутдинов