Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 06АП-4598/2024

05 ноября 2024 года

г. Хабаровск

Резолютивная часть постановления объявлена 22 октября 2024 года.Полный текст постановления изготовлен 05 ноября 2024 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего           Воронцова А.И.

судей                                                 Жолондзь Ж.В., Иноземцева И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Михайленко Т.Н.

при участии в заседании:

от ООО «Скат»: ФИО1, представитель по доверенности от 25.11.2023,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу акционерного общества «Региоснаб»

на решение от 09.07.2024

по делу № А73-3426/2024

Арбитражного суда Хабаровского края

по иску общества с ограниченной ответственностью «Скат» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 682610, 

<

...>)

к акционерному обществу «Региоснаб» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680021, 

<

...>)

о взыскании 14 238 706 руб. 65 коп., 

 

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Скат» (далее – истец, ООО «Скат») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к акционерному обществу «Региоснаб» (далее – ответчик, АО «Региоснаб») о взыскании 12 016 085 руб. 97 коп. долга по договорам субподряда № 002/СП-21 от 29.03.2021, № 023/СП-22 от 16.11.2022, №  005/СП-23 от 22.03.2023, № 007/СП-23 от 27.04.2023, № 059/СП-23 от 18.09.2023, № 075/СП-23 от 29.12.2023, 480 672 руб. 71 коп. пеней, а также 939 025 руб. 50 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 09.07.2024 уточненные исковые требования удовлетворены в полном объеме, распределены судебные расходы.

Не согласившись с принятым судебным актом, АО «Региоснаб» обратилось в Шестой арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение суда в части взыскания неустойки изменить, снизив её размер до 100 000 руб.

В обоснование доводов жалобы заявитель указывает, что вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для снижения размера неустойки является необоснованным, принятым на основании субъективного мнения, без учета обстоятельств, имеющих значение при разрешении данного вопроса.

Обращает внимание на то, что АО «Региоснаб» является социально значимым предприятием Хабаровского края, 17.03.2022 общество включено в Перечень системообразующих предприятий Хабаровского края. Так, АО «Региоснаб»  в рамках заключенных договоров, выполняет работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения. При этом, выполнение работ производится обществом за счет собственных сил и средств исходя из условий контрактов путем последующей оплаты выполненных работ, в том числе, за приобретенные за счет собственных средств используемые материалы.

В настоящее время, в связи со стремительным ростом цен на используемые в деятельности общества материалы, нестабильной экономической обстановкой, ростом ставки ЦБ РФ, инфляцией, АО «Региоснаб» несет колоссальные издержки на обеспечение уставной деятельности общества.

В связи с этим, полагает, что суд первой инстанции безосновательно не снизил заявленную истцом неустойку в порядке статьи 333 ГК РФ.

Более подробно доводы заявителя изложены в апелляционной жалобе от 07.08.2024 № 698-08/24.

Определением Шестого арбитражного апелляционного суда от 05.09.2024 апелляционная жалоба принята к производству, рассмотрение жалобы назначено на 22.10.2024, информация об этом размещена публично на официальном сайте суда в сети интернет.

10.10.2024 в канцелярию апелляционного суда через систему «Мой арбитр» от ООО «Скат» поступил отзыв на апелляционную жалобу, в котором истец выразил несогласие с приведенными в апелляционной жалобе доводами, указав на их несостоятельность, просил оставить обжалуемое решение суда без изменения как законное и обоснованное.

В судебном заседании представитель ООО «Скат» возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, по основаниям, изложенным в письменном отзыве, просил решение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Определяя пределы рассмотрения настоящего спора, суд апелляционной инстанции руководствуется следующим.

Согласно части 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.

При непредставлении лицами, участвующими в деле, указанных возражений до начала судебного разбирательства суд апелляционной инстанции начинает проверку судебного акта в оспариваемой части и по собственной инициативе не вправе выходить за пределы апелляционной жалобы, за исключением проверки соблюдения судом норм процессуального права, приведенных в части 4 статьи 270 АПК РФ.

Принимая во внимание изложенное, следуя положениям части 5 статьи 268 АПК РФ, пункту 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», учитывая отсутствие возражений со стороны истца, законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверяется судом апелляционной инстанции только в обжалуемой заявителем апелляционной жалобы части (взысканной суммы неустойки).

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 29.03.2021 между АО «Региоснаб» (подрядчик) и ООО «Скат» (субподрядчик) заключен договор субподряда № 002/СП-21 в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Предметом договора является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межрегионального значения и искусственных сооружений на них, расположенных на территории Амурского муниципального района Хабаровского края протяженностью 85,604 км (пункт 1.1. договора).

В соответствии с пунктом 1.2. договора, объем выполняемых работ и материалов, применяемых при выполнении работ, определяется по фактической потребности подрядчика. Перечень видов работ, товаров (материалов), применяемых при выполнении работ, указан в Технической части.

В соответствии с пунктом 2.1. договора № 002/СП-21 от 29.03.2021 максимальная цена договора составляет 29 707 623 руб., с учетом НДС 20% (дополнительное соглашение от 09.12.2021 № 3).

Согласно пункту 3.1.договора оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, по цене единицы работы, единицы товара исходя из объема фактически выполненных работ, количества товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, на основании выставленного субподрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 45 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Как следует из пункта 4.2.5. договора, подрядчик обязан своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Срок выполнения (завершения) работ: с 26.02.2021 года по 31.12.2021 (пункт 6.1. договора).

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) (пункт 7.10. договора).

В соответствии с пунктом 9.1. договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 9.2.договора).

Согласно пункту 9.3.договора, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Договор от 29.03.2021 № 002/СП-21 вступает в действие с момента его подписания и действует до 28.02.2022 включительно (пункт 11.1. договора).

Истцом по договору № 002/СП-21 от 29.03.2021 представлены в материалы дела акты о приемке выполненных работ от 25.11.2021 № 09, от 25.12.2021 № 10, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 25.11.2021 № 9, от 25.12.2021 № 10, подписанные ответчиком без замечаний и заверенные оттиском его печати.

Истцом также представлены счета-фактуры от 25.11.2021 № 110, от 25.12.2021 №123.

Из расчета исковых требований, объяснений представителя в судебном заседании следует, что ответчиком оплачены все выполненные работы по данному договору в полном объеме.

16.11.2022 между АО «Региоснаб» (подрядчик) и ООО «Скат» (субподрядчик) заключен договор субподряда № 023/СП-22 в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Предметом договора является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межрегионального значения и искусственных сооружений на них, расположенных на территории Амурского муниципального района Хабаровского края протяженностью 85,791 км (пункт 1.1. договора).

В соответствии с пунктом 1.2. договора, объем выполняемых работ и материалов, применяемых при выполнении работ, определяется по фактической потребности подрядчика. Перечень видов работ, товаров (материалов), применяемых при выполнении работ, указан в Технической части.

В соответствии с пунктом 2.1 договора № 023/СП-22 от 16.11.2022 максимальная цена договора составляет 12 406 206 руб., в том числе НДС 20% (дополнительное соглашение от 14.03.2023 № 3).

Оплата за выполненные работы осуществляется по цене единицы работы, установленной пунктом 2.1. договора (пункт 3.1. договора).

Согласно пункту 3.2. договора оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, по цене единицы работы, единицы товара исходя из объема фактически выполненных работ, количества товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, на основании выставленного субподрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 45 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Как следует из пункта 4.2.5. договора, подрядчик обязан своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Срок выполнения (завершения) работ: с 01.01.2023 по 30.04.2023 (пункт 6.1. договора).

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) (пункт 7.10. договора).

В соответствии с пунктом 9.1. договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 9.2. договора).

Согласно пункту 9.3. договора, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Договор от 16.11.2023 № 023/СП-22 вступает в действие с момента его подписания и действует до 30.06.2023 включительно (пункт 11.1. договора).

Истцом по договору № 023/СП-22 от 16.11.2022 представлены в материалы дела акты о приемке выполненных работ от 07.03.2023 № 03, от 23.03.2023 № 04, от 17.04.2023 № 05, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 07.03.2023 № 3, от 23.03.2023 № 4, от 17.04.2023 № 5, подписанные ответчиком без замечаний и заверенные оттиском его печати.

Истцом также представлены счета-фактуры от 25.01.2023 №11, от 13.02.2023 №21, от 07.03.2023 № 27, от 23.03.2023 №34, от 17.04.2023 № 48.

29.05.2023 сторонами подписано соглашение о расторжении договора № 023/СП-22 от 16.11.2022.

19.04.2024 сторонами подписан акт взаимозачета от 31.03.2024 № 16 на сумму 566 007 руб. 19 коп.

Из расчета исковых требований следует, что основной долг по договору составил 6 404 068 руб. 81 коп.

22.03.2023 между АО «Региоснаб» (подрядчик) и ООО «Скат» (субподрядчик) заключен договор субподряда № 005/СП-23 в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Предметом договора является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межрегионального значения и искусственных сооружений на них, расположенных на территории Комсомольского муниципального района Хабаровского края протяженностью 26,841 км (пункт 1.1. договора).

В соответствии с пунктом 1.2. договора, объем выполняемых работ и материалов, применяемых при выполнении работ, определяется по фактической потребности подрядчика. Перечень видов работ, товаров (материалов), применяемых при выполнении работ, указан в Технической части.

В соответствии с пунктом 2.1. договора № 005/СП-23 от 22.03.2023 максимальная цена договора составляет 1 500 000 руб., в том числе НДС 20%.

Оплата за выполненные работы осуществляется по цене единицы работы, установленной пунктом 2.1. договора (пункт 3.1. договора).

Согласно пункту 3.2. договора оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, по цене единицы работы, единицы товара исходя из объема фактически выполненных работ, количества товара но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, на основании выставленного субподрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Как следует из пункта 4.2.5. договора, подрядчик обязан своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Срок выполнения (завершения) работ: с 18.03.2023 по 30.04.2023 (пункт 6.1. договора).

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) (пункт 7.10. договора).

В соответствии с пунктом 9.1 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 9.2. договора).

Согласно пункту 9.3. договора, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Договор от 22.03.2023 № 005/СП-23 вступает в действие с момента его подписания и действует до 30.06.2023 включительно (пункт 11.1. договора).

Истцом по договору № 005/СП-23 от 22.03.2023 представлены в материалы дела акт о приемке выполненных работ от 17.04.2023 № 01, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 17.04.2023 № 1, подписанные ответчиком без замечаний и заверенные оттиском его печати.

Истцом также представлена счет-фактура от 17.04.2023 № 49.

29.05.2023 сторонами подписано соглашение о расторжении договора № 005/СП-23 от 22.03.2023.

Из расчета исковых требований следует, что основной долг по договору составил 628 018 руб.

27.04.2023 между АО «Региоснаб» (подрядчик) и ООО «Скат» (субподрядчик) заключен договор субподряда № 007/СП-23, в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Предметом договора является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межрегионального значения и искусственных сооружений на них, расположенных на территории Амурского муниципального района Хабаровского края протяженностью 85,791 км (пункт 1.1. договора).

В соответствии с пунктом 1.2. договора, объем выполняемых работ и материалов, применяемых при выполнении работ, определяется по фактической потребности подрядчика. Перечень видов работ, товаров (материалов), применяемых при выполнении работ, указан в Технической части.

В соответствии с пунктом 2.1 договора № 007/СП-23 от 27.04.2023 максимальная цена договора составляет 11 117 650 руб. 50 коп., в том числе НДС 20% (дополнительное соглашение от 14.06.2023 № 1).

Оплата за выполненные работы осуществляется по цене единицы работы, установленной пунктом 2.1. договора (пункт 3.1. договора).

Согласно пункту 3.2. договора оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, по цене единицы работы, единицы товара исходя из объема фактически выполненных работ, количества товара но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, на основании выставленного субподрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Как следует из пункта 4.2.5. договора, подрядчик обязан своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Срок выполнения (завершения) работ: с 24.04.2023 по 30.06.2023 (пункт 6.1. договора).

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) (пункт 7.10. договора).

В соответствии с пунктом 9.1. договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 9.2. договора).

Согласно пункту 9.3. договора, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Договор от 27.04.2023 № 007/СП-23 вступает в действие с момента его подписания и действует до 11.07.2023 включительно (пункт 11.1. договора).

Истцом по договору № 007/СП-23 от 27.04.2023 представлены в материалы дела акт о приемке выполненных работ от 26.06.2023 № 2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 26.06.2023 № 2, подписанные ответчиком без замечаний и заверенные оттиском его печати.

Истцом также представлены счета-фактуры от 24.05.2023 № 75, от 26.06.2023 №89.

Из расчета исковых требований следует, что основной долг по договору составил 870 490 руб. 51 коп.

18.09.2023 между АО «Региоснаб» (подрядчик) и ООО «Скат» (субподрядчик) заключен договор субподряда №059/СП-23, в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Предметом договора является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межрегионального значения и искусственных сооружений на них, расположенных на территории Амурского и Комсомольского муниципальных районов Хабаровского края протяженностью 112,632 км (пункт 1.1. договора).

В соответствии с пунктом 1.2. договора, объем выполняемых работ и материалов, применяемых при выполнении работ, определяется по фактической потребности подрядчика. Перечень видов работ, товаров (материалов), применяемых при выполнении работ, указан в Технической части.

В соответствии с пунктом 2.1 договора № 059/СП-23 от 18.09.2023 максимальная цена договора составляет 17 053 554 руб. 81 коп., в том числе НДС 20% (дополнительное соглашение от 13.11.2023 № 1).

Оплата за выполненные работы осуществляется по цене единицы работы, установленной пунктом 2.1. договора (пункт 3.1. договора).

Согласно пункту 3.2. договора оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, по цене единицы работы, единицы товара исходя из объема фактически выполненных работ, количества товара но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, на основании выставленного субподрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Как следует из пункта 4.2.5. договора, подрядчик обязан своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Срок выполнения (завершения) работ: с 01.09.2023 по 31.12.2023 (пункт 6.1. договора).

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3) (пункт 7.10. договора).

В соответствии с пунктом 9.1. договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 9.2.договора).

Согласно пункту 9.3. договора, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Договор от 18.09.2023 № 059/СП-23 вступает в действие с момента его подписания и действует до 22.01.2024 включительно (пункт 11.1. договора).

Истцом по договору № 059/СП-23 от 18.09.2023 представлены в материалы дела акты о приемке выполненных работ от 07.12.2023 №5.1, № 5.2, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 07.12.2023 № 5, подписанные ответчиком без замечаний и заверенные оттиском его печати.

Истцом также представлена счет-фактура от 07.12.2023 № 166.

Из расчета исковых требований следует, что основной долг по договору составил 1 577 560 руб. 10 коп.

29.12.2023 между АО «Региоснаб» (подрядчик) и ООО «Скат» (субподрядчик) заключен договор субподряда № 075/СП-23, в соответствии с которым подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью договора, а подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

Предметом договора является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межрегионального значения и искусственных сооружений на них, расположенных на территории Комсомольского и Амурского муниципальных районов Хабаровского края протяженностью 247,985 км (пункт 1.1. договора).

В соответствии с пунктом 1.2. договора, объем выполняемых работ и материалов, применяемых при выполнении работ, определяется по фактической потребности подрядчика. Перечень видов работ, товаров (материалов), применяемых при выполнении работ, указан в Технической части.

В соответствии с пунктом 2.1 договора № 075/СП-23 от 29.12.2023 максимальная цена договора составляет 7 795 352 руб., в том числе НДС 20% (дополнительное соглашение от 24.01.2024 № 1).

Оплата за выполненные работы осуществляется по цене единицы работы, установленной пунктом 2.1. договора (пункт 3.1. договора).

Согласно пункту 3.2. договора оплата работ осуществляется по безналичному расчету путем перечисления подрядчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика, указанный в договоре, по цене единицы работы, единицы товара исходя из объема фактически выполненных работ, количества товара но в размере, не превышающем максимального значения цены договора, на основании выставленного субподрядчиком счета, счета-фактуры (при наличии) в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

Как следует из пункта 4.2.5. договора, подрядчик обязан своевременно принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

Срок выполнения (завершения) работ: с 18.12.2023 по 29.02.2024 (пункт 6.1. договора).

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) (пункт 7.10. договора).

В соответствии с пунктом 9.1. договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) (пункт 9.2. договора).

Согласно пункту 9.3. договора, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Договор от 29.12.2023 № 075/СП-23 вступает в действие с момента его подписания и действует до 15.03.2024 включительно (пункт 11.1. договора).

Истцом по договору № 075/СП-23 от 29.12.2023 представлены в материалы дела акты о приемке выполненных работ от 25.01.2024 № 2.1, № 2.2, № 2.3, от 09.02.2024 №3.1, № 3.2, от 19.02.2024 № 4.1, № 4.2, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 25.01.2024 № 2, от 09.02.2024 № 3, от 19.02.2024 № 4, подписанные ответчиком без замечаний и заверенные оттиском его печати.

29.02.2024 сторонами подписан акт взаимозачета № 2 на сумму 40 000 руб.

Из расчета исковых требований следует, что основной долг по договору составил 2 535 948 руб. 55 коп.

Истцом ответчику направлена претензия от 26.02.2024 № 458 с требованием об оплате задолженности и пени.

Из акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2024 по 19.04.2024, подписанного сторонами следует, что на 19.04.2024 задолженность в пользу ООО «Скат» составляет 12 016 085 руб. 97 коп.

Неисполнение в добровольном порядке ответчиком обязанности по оплате задолженности послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, оценив представленные в дело доказательства, пришел к выводу об удовлетворении заявленных уточненных исковых требований в полном объеме, с чем выразил несогласие ответчик.

Предметом апелляционного обжалования является размер взысканной судом неустойки.

Повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены судебного акта в обжалуемой части.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере 480 672 руб. 71 коп.

На основании статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с пунктом 9.2. договоров, в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В силу пункта 9.3. договоров, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

Факт просрочки исполнения ответчиком своих обязательств по оплате выполненных и принятых работ установлен судом, в связи с чем, требование о взыскании неустойки предъявлено истцом правомерно.

Расчет пени по договору № 002/СП-21 от 29.03.2021 произведен истцом, исходя из количества дней просрочки (периоды начисления 02.02.2022 по 31.03.2022, с 09.03.2022 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 22.11.2022) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, в сумме 167 751 руб. 24 коп.

Расчет пени по договору № 005/СП-23 от 22.03.2023 произведен истцом, исходя из количества дней просрочки (периоды начисления с 26.04.2023 по 29.05.2023) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие, в сумме 5 338 руб. 15 коп.

Расчет пени по договору № 023/СП-22 от 16.11.2022 произведен истцом, исходя из количества дней просрочки (периоды начисления с 31.03.2023 по 06.04.2023, с 19.04.2023 по 26.05.2023, с 17.05.2023 по 29.05.2023) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, в сумме 11 234 руб. 08 коп.

Расчет пени по договору № 007/СП-23 от 27.04.2023 произведен истцом, исходя из количества дней просрочки (периоды начисления с 02.06.2023 по 03.07.2023, с 05.07.2023 по 07.05.2024) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, в сумме 167 050 руб. 05 коп.

Расчет пени по договору № 059/СП-23 от 18.09.2023 произведен истцом, исходя из количества дней просрочки (периоды начисления с 19.12.2023 по 07.05.2024) в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, в сумме 129 299 руб. 19 коп.

Расчет пени, произведенный истцом, проверен судом апелляционной инстанции, признан арифметически и методологически верным.

Ответчиком контррасчет в материалы дела не представлен.

Обжалуя решение суда в части взыскания неустойки, ответчик ссылается на необоснованное неприменение судом первой инстанции положений статьи 333 ГК РФ.

Рассмотрев данные доводы ответчика, суд апелляционной инстанции находит их подлежащими отклонению на основании следующего.

По правилам пункта 1 статьи 333 ГК РФ подлежащая уплате неустойка может быть уменьшена судом, если она явно несоразмерна последствиями нарушения обязательства.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е. по существу, - на реализацию требования части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Особенности применения положений статьи 333 ГК РФ разъяснены в Постановлении № 7 (пункты  69 - 81).

Следуя правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении № 263-О от 21.12.2000, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения.

Критериями для установления несоразмерности подлежащей уплате неустойки последствиям нарушения обязательства в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и другие обстоятельства. При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела.

В пункте 71 Постановления № 7 разъяснено, что если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ).

В пункте 77 Постановления № 7 разъяснено, что снижение размера договорной неустойки, подлежащей уплате коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией, нарушившей обязательство при осуществлении ею приносящей доход деятельности, допускается в исключительных случаях, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства и может повлечь получение кредитором необоснованной выгоды (пункты 1 и 2 статьи 333 ГК РФ).

Суд первой инстанции в отсутствие доказательств несоразмерности посчитал, что исчисленный исходя из предусмотренной договором ставки размер пеней обеспечивает восстановление нарушенных прав истца и соответствует принципу соразмерности, в связи с чем отклонил ходатайство ответчика.

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ).

В рассматриваемом случае условие о договорной неустойке определено по свободному усмотрению сторон (статья 421 ГК РФ). При этом пени установлены в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы долга за каждый день просрочки, исходя из правоприменительной практики такой размер ответственности не является завышенным, а напротив максимально приближен к минимальному. Доказательств наличия предусмотренных законом оснований для снижения взысканной арбитражным судом неустойки, заявителем жалобы вопреки требованиям статьи 65 АПК РФ не представлено.

Исходя из изложенного, суд первой инстанции правомерно не установил оснований для снижения размера взыскиваемых пеней.

Суд апелляционной инстанции, с учетом разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в Постановлении № 7, соглашается с указанными выводами суда первой инстанции и не находит оснований для отмены принятого по делу судебного акта, полагая, что установленный судом первой инстанции размер ответственности обеспечивает восстановление нарушенных прав истца, в полной мере учитывает баланс прав лиц, участвующих в деле, и соответствует принципам добросовестности и разумности.

Сам по себе факт того, что ответчик является социально значимым предприятием, включен в Перечень системообразующих предприятий Хабаровского края, не может быть принят в качестве основания для снижения неустойки (пункт 73 Постановления № 7).

Таким образом, доводы ответчика относительно несогласия с применением положений статьи 333 ГК РФ отклоняются ввиду их несостоятельности.

С учетом изложенного, суд первой инстанции обоснованно взыскал с ответчика в пользу истца неустойку в заявленном размере.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не нашли своего подтверждения при рассмотрении апелляционной жалобы, не содержат фактов, которые имели бы юридическое значение, влияли на обоснованность и законность решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Принимая во внимание установленные обстоятельства, суд апелляционной инстанции находит решение суда законным и обоснованным, вынесенным с учетом обстоятельств дела и подлежащих применению норм права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее подателя по правилам статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Хабаровского края от 09.07.2024 в обжалуемой части оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня его принятия через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий

А.И. Воронцов

 

Судьи

Ж.В. Жолондзь

 

И.В. Иноземцев