34_1083108  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А42-7774/2016

город Мурманск

10 мая 2018 года

Руководствуясь статьями 110, 112, 167, 174 и 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области  

решил:

иск удовлетворить частично. 

Обязать ООО «РСК» в летне-осенний период 2018 года (июнь-октябрь) в течение трех  месяцев с момента вступления в законную силу решения суда безвозмездно исполнить  гарантийные обязательства по муниципальному контракту от 05.08.2014 № 129/48 и выполнить на  территории Аллеи Славы в городе Заполярном Мурманской области следующие работы:  

- выровнять и восстановить покрытия площадок и ступеней реконструируемой (90,17 м2) и новой  лестниц (211,12 м2);  

- выровнять кромки ступеней на новой лестнице – 48 м/п; 

- расшить и заполнить раствором с последующей окраской трещину на подпорной стенке  реконструируемой лестницы – 0,8 м/п;  

- выполнить 100 % очистку всей поверхности подпорных стенок на реконструируемой (48,9 м2) и  новой (73 м2) лестниц от штукатурки и выполнить отделку в соответствии с контрактом  (перетирка, огрунтовка жидким стеклом с удельным весом 1,1-1,15, с последующей окраской  силикатной краской серого цвета за 2 раза);  

- выполнить очистку, огрунтовку и окраску металлоконструкций ограждений новой (45,3 м2)  лестницы в соответствии с контрактом;  

- выполнить очистку, огрунтовку, шпатлевку и окраску памятника в соответствии с контрактом –  5,88 м2.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с ООО «РСК» в пользу ОМИ Администрации муниципального образования г.  

Заполярный судебные расходы в сумме 185 281 рубль 97 копеек. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок со дня  

принятия. 

Судья А.Е.Тарасов