АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

15 августа 2024 года

 

Дело № А33-9029/2024

Красноярск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 15.08.2024.

В полном объёме решение изготовлено 15.08.2024.

 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мальцевой А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Брайт Энерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки,

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "Брайт Энерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к публичному акционерному обществу "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании долга, неустойки,

в присутствии в судебном заседании:

от ответчика (до перерыва): ФИО1, представитель по доверенности №24/01 от 22.01.2024, представлен диплом о наличии высшего юридического образования, личность удостоверена паспортом;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гундериной А.О., 

 

установил:

публичное акционерное общество "Россети Сибирь" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Брайт Энерго" (далее – ответчик) о взыскании неустойки за нарушение сроков поставки товара по договору поставки от 02.08.2023 №02.5500.3504.23 в сумме 599 519.00 руб. Определением от 27.03.2024 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

15.04.2024 в материалы дела от ответчика поступило встречное исковое заявление, согласно которому истец по встречному иску просит суд взыскать 14 412 552,16 руб. долга по договору поставки от 02.08.2023 №02.5500.3504.23, 791 469,92 руб. неустойки за просрочку оплаты.

Определением от 02.05.2024 суд принял встречный иск, перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Истец по встречному иску уточнил требования до 13 608 600,50 руб. долга и 790 746,21 руб. неустойки.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

02.08.2023 публичным акционерным обществом «Россети Сибирь» (покупатель) и ООО «Брайт Энерго» (поставщик) заключен договор поставки № 02.5500.3504.23.

Согласно п. 2.1 договора поставщик обязан в обусловленный договором срок передать в собственность покупателя следующий товар - самонесущий изолированный провод (СИП) на напряжение до 35 кВ, не бывший в употреблении, указанный в Приложении №1 к Договору, а покупатель обязуется принять и оплатить товар. Предельная цена договора составляет 82 782 862,54 руб. (с НДС). Предельная цена не подлежит изменению в течение срока действия Договора.

Согласно п. 6.5, п. 6.10 договора поставка осуществляется поставщиком на основании заявок, поступающих от покупателя, в соответствии с условиями, адресом и сроками, указанными в заявках (приложение №4 к договору).        

Согласно п. 6.16 договора заявка на поставку товара, оформленная должным    образом со стороны покупателя  (отсканированная  копия) направляется в адрес поставщика по электронной почте для подписания, с последующим направлением оригинала Заявки в 2-х экземплярах в адрес поставщика: после получения заявки по электронной почте поставщик не более чем в течение 3 (трех) рабочих дней оформляет ее (подпись, печать, дата подписания) и направляет в адрес покупателя по электронной почте (отсканированная копия). После получения оригиналов заявки поставщик в течение 10 рабочих дней оформляет их в соответствии с заявкой, направленной ранее по электронной почте (отсканированная копия), и направляет один экземпляр заявки в адрес покупателя. Поставка товара осуществляется поставщиком в течение 30 календарных дней от даты направления заявки поставщиком покупателю в электронном виде (отсканированной копии), если иной срок (сроки) поставки не указан в самой заявке. Если поставщиком нарушены сроки подписания заявки, предусмотренные настоящим пунктом, срок поставки товара исчисляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления заявки поставщику в электронном виде (отсканированной копии), если иной срок не указан в самой заявке.

В соответствии с условиями договора покупателем в адрес поставщика направлены сопроводительными письмами по электронной почте следующие заявки (сканированные копии) на поставку товара:

1.         Сопроводительное письмо от 17.08.2023 исх. № 1.5/22/578 с Заявкой на поставку товара на сумму 9 340 912,13 руб., направлены 17.08.2023 на электронную почту и получены ответчиком в тот же день 17.08.2023, что подтверждается распечаткой с электронной почты представителя ПАО «Россети Сибирь» ФИО2 Подписанная поставщиком заявка возвращена по электронной почте в ПАО «Россети Сибирь» 01.11.2023., т.е. с нарушением 3-х дневного срока на оформления и возвращения в адрес покупателя, предусмотренного п. 6.16 договора, что подтверждается распечаткой с электронной почты представителя ПАО «россети Сибирь» ФИО2

2.         Сопроводительное письмо от 12.09.2023 исх. №1.5/22/634 с Заявкой на поставку товара на сумму 3 789 638,45 руб., направлены 12.09.2023 на электронную почту и получены ответчиком в тот же день 12.09.2023, что подтверждается распечаткой с электронной почты представителя ПАО «Россети Сибирь» ФИО2 Подписанная поставщиком заявка возвращена по электронной почте в ПАО «Россети Сибирь» 01.11.2023., т.е. с нарушением 3-х дневного срока на оформления и возвращения в адрес Покупателя, предусмотренного п. 6.16 Договора, что подтверждается распечаткой с электронной почты представителя ПАО «Россети Сибирь» ФИО2           

3.        Сопроводительное письмо от 03.11.2023 №1.5/22/746 с Заявкой на поставку товара на сумму 710 549,95 руб. направлены 07.11.2023 на электронную почту и получены ответчиком в тот же день 07.11.2023, что подтверждается распечаткой с электронной почты представителя ПАО

«Россети Сибирь» ФИО2 Подписанная поставщиком заявка возвращена по электронной почте в ЦАО «Россети Сибирь» 18.12.2023., т.е. с нарушением 3-х дневного срока на оформления и возвращения в адрес покупателя, предусмотренного п. 6.16 Договора, что подтверждается распечаткой с электронной почты представителя ПАО «Россети Сибирь» ФИО2

Так как поставщиком нарушены сроки оформления (подпись, печать, дата подписания) и возвращения по электронной почте в адрес покупателя вышеуказанных заявок, предусмотренных п. 6.1.16 договора, срок поставки товара по каждой заявке исчисляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления заявки покупателем поставщику в электронном виде (отсканированной копии). Однако поставка товара по всем 3-м вышеуказанным заявкам осуществлена поставщиком с нарушением сроков, указанных в заявках, что повлекло начисление неустойки; предусмотренной п. 13.1 Договора.

В соответствии с п. 13.1 договора при несвоевременном выполнении обязательств по поставке товара и/или при поставке некачественного товара (запасных частей к товару, указанных в Приложении №1 к договору) и/или недопоставки товара (запасных частей к Товару) - покупатель вправе г. потребовать от поставщика неустойку в размере 0,2% от стоимости не поставленного в срок / недопоставленного или некачественного товара (запасных частей к товару) за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательств до момента поставки товара (запасных частей к товару) либо до замены некачественного товара (запасных частей к товару).

ПАО «Россети Сибирь», руководствуясь п. 13.1 договора, начислило ответчику неустойку, исходя из следующего расчета.        

Поставка товара по 1-й Заявке, направленной сопроводительным письмом от 17.08.2023 исх. № 1.5/22/578 на сумму 9 340 912ДЗ руб., полученной ответчиком 17.08.2023 по электронной почте, должна быть осуществлена ответчиком до 18.09.2023 (30 календарных дней с даты получения заявки).

Однако поставка осуществлена с просрочкой, что подтверждается следующим:

7 357 689,60 руб. сумма несвоевременно поставленной продукции по УПД № 459 от 29.09.2023; Просрочка с 19.09.2023 по 02.10.2023.

Расчет 7357689,6 x 0,2% x     13 = 191 299,93 руб.

1507367,33 руб. сумма несвоевременно поставленной продукции по УПД № 460 от 29.09.2023; Просрочка с 19.09.2023 по 04.10.2023.

Расчет 1507367,33 x 0,2% x     15 = 45 221,01 руб.

475 855,20 руб. сумма несвоевременно поставленной продукции по УПД № 469 от 06.10.2023; Просрочка с 19.09.2023 по 09.10.2023.

Расчет 475 855,20  x 0,2% x     20 = 19 034,20 руб.

Итого сумма неустойки по 1-й Заявке составляет 255 555,14 руб. (191 299,93+45 221,01+19 034,20).

Поставка товара по 2-й Заявке, направленной сопроводительным письмом от 12.09.2023 исх. №1.5/22/634 на сумму 3  789 638,45 руб., полученной ответчиком по электронной почте 12.09.2023, должна быть осуществлена ответчиком до 12.10.2023 (30 календарных дней с даты получения заявки).

Однако поставка осуществлена с просрочкой, что подтверждается следующим.

2 229 684,48 руб. сумма несвоевременно поставленной продукции по УПД № 549 от 22.11.2023; Просрочка с 13.10.2023 по 28.11.2023.

Расчет 2 229 684,48 x 0,2% x     45 = 200 671,60 руб.

1233 090,24 руб. сумма несвоевременно поставленной продукции по УПД № 577 от 22.11.2023; Просрочка с 13.10.2023 по 04.12.2023.

Расчет 1233 090,24 x 0,2% x     51 = 125 775,20 руб.

Итого   сумма   неустойки   по   2-й   Заявке   составляет   326   446,80   руб. (200 671,60+125 775,20).

Поставка товара по 3-й заявке, направленной сопроводительным письмом от 03.11.2023 №1.5/22/746 на сумму 710 549,95 руб., полученной ответчиком 07.11.2023 по электронной почте, должна быть осуществлена ответчиком до 07.12.2023 (30 календарных дней сдаты получения заявки).

Однако поставка товара по данной заявке по состоянию на 25.12.2023 в адрес покупателя не осуществлена, что подтверждается следующим.

583 901,95 руб. сумма несвоевременно поставленной продукции по заявке; Просрочка с 08.12.2023 по 25.12.2023.

Расчет 583 901,95 x 0,2% x     15 = 17 517,06 руб.

Всего начислено 599 519 руб. неустойки.

В адрес ответчика была направлена претензия от 25.12.2023 1.5/22/909-йсх. об оплате неустойки претензия вручена ответчику 10.01.2024.  Претензия ответчиком не удовлетворена, что послужило основанием для обращения в суд.

Ответчик обратился в  суд с встречным иском:

Поставщик в рамках спорного оговора произвел поставку товара:

1)        Согласно заявке покупателя № 1.5/22/634 от 12.09.2023 на сумму 3 789 638,45 руб., что подтверждается подписанными со стороны покупателя УПД: № 458 от 29.09.2023 на сумму 326 863,73 руб., № 549 от 22.11.2023 на сумму 2 229 648,48 руб., № 577 от 28.11.2023 на сумму 1 233 090,24 руб.;

2)   Согласно заявке покупателя № 1.5/22/578 от 17.08.2023 на сумму 9 340 912,13 руб., что подтверждается подписанными со стороны покупателя УПД: № 459 от 29.09.2023 на сумму 7 357 689,60 руб., № 460 от 29.09.2023 на сумму 1 507 367,33 руб., № 469 от 06.10.2023 на сумму 475 855,20 руб.;

3)   Согласно заявке покупателя № 1.5/22/746 от 03.11.2023 на общую сумму 710 549,95 руб., что подтверждается подписанными со стороны покупателя УПД: № 537 от 13.11.2023 на сумму 126 648,00 руб., № 5 от 09.01.2024 на сумму 583 901,95 руб.;

4)   Согласно заявке покупателя № 1.5/22/763 от 14.11.2023 на общую сумму 241100,06 руб., что подтверждается подписанной со стороны покупателя УПД № 553 от 24.11.2023 на сумму 241 100,06 руб.;

5)   Согласно заявке покупателя № 1.5/22/783 от 20.11.2023 на общую сумму 110 817,00 руб., что подтверждается подписанной со стороны покупателя УПД № 597 от 01.12.2023    на сумму 110 817,00 руб.

6)       Согласно заявке покупателя № 1.5/22/856 от 12.11.2023 на общую сумму6 627 504,81 руб., что подтверждается подписанной со стороны покупателя УПД № 21 от 22.01.2024    на сумму 6 627 504,81 руб.;

Общая стоимость поставленного по указанным выше УПД Товара составляет 20 820 522,40 руб.

Покупатель, в свою очередь, частично оплатил 6 407 970,24 руб. стоимости товара, что подтверждается следующими платежными поручениями: № 38457 от 20.11.2023, № 43836 от 27.12.2023, № 2746 от 31.01.2024, № 38458 от 20.11.2023, № 10185 от 27.03.2024, № 38459 от 20.11.2023, № 2314 от 29.01.2024, № 8302 от 18.03.2024, № 8303 от 18.03.2024.

По состоянию на 04.04.2024, согласно прилагаемому к встречному иску расчету, задолженность покупателя по оплате принятого товара составляет 14 412 552,16 руб.

Пунктом 13.4 договора предусмотрена ответственность покупателя. В случае просрочки оплаты принятого товара поставщик вправе потребовать от покупателя уплаты неустойки в размере 1/360 ключевой ставки, установленной Банком России на день просрочки исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый лень просрочки до полной оплаты принятого товара.

Истец по встречному иску начислил 791 469,92 руб. неустойки на 04.04.2024.

Ответчик по встречному иску указал на частичную оплату долга в сумме 613 979,66 руб., долг составил 13 608 600,50 руб., также, представлен контррасчет неустойки на сумму 790 746,21 руб.

Истец по встречному иску уточнил требования, просит взыскать 13 608 600,50 руб. долга, 790 746,21 руб. неустойки.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Заключенный между сторонами договор поставки является договором поставки, правоотношения по которому регулируются главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ).

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

На основании статьи 458 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент: вручения товара покупателю или указанному им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара; предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте нахождения товара. Товар считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сроку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежащем месте и покупатель в соответствии с условиями договора осведомлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым к передаче, если он не идентифицирован для целей договора путем маркировки или иным образом. В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обязанность продавца по доставке товара или передаче товара в месте его нахождения покупателю, обязанность продавца передать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для доставки покупателю, если договором не предусмотрено иное.

В соответствии с пунктом 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

В силу статей 65 и 9 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требовании и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

ПАО «Россети Сибирь», руководствуясь п. 13.1 договора, начислило ответчику неустойку, исходя из следующего расчета.

Поставка товара по 1-й Заявке, направленной сопроводительным письмом от 17.08.2023 исх. № 1.5/22/578 на сумму 9 340 912ДЗ руб., полученной ответчиком 17.08.2023 по электронной почте, должна быть осуществлена ответчиком до 18.09.2023 (30 календарных дней с даты получения заявки).

Однако поставка осуществлена с просрочкой, что подтверждается следующим:

7 357 689,60 руб. сумма несвоевременно поставленной продукции по УПД № 459 от 29.09.2023; Просрочка с 19.09.2023 по 02.10.2023.

Расчет 7357689,6 x 0,2% x     13 = 191 299,93 руб.

1507367,33 руб. сумма несвоевременно поставленной продукции по УПД № 460 от 29.09.2023; Просрочка с 19.09.2023 по 04.10.2023.

Расчет 1507367,33 x 0,2% x     15 = 45 221,01 руб.

475 855,20 руб. сумма несвоевременно поставленной продукции по УПД № 469 от 06.10.2023; Просрочка с 19.09.2023 по 09.10.2023.

Расчет 475 855,20  x 0,2% x     20 = 19 034,20 руб.

Итого сумма неустойки по 1-й Заявке составляет 255 555,14 руб. (191 299,93+45 221,01+19 034,20).

Поставка товара по 2-й Заявке, направленной сопроводительным письмом от 12.09.2023 исх. №1.5/22/634 на сумму 3  789 638,45 руб., полученной ответчиком по электронной почте 12.09.2023, должна быть осуществлена ответчиком до 12.10.2023 (30 календарных дней с даты получения заявки).

Однако поставка осуществлена с просрочкой, что подтверждается следующим.

2 229 684,48 руб. сумма несвоевременно поставленной продукции по УПД № 549 от 22.11.2023; Просрочка с 13.10.2023 по 28.11.2023.

Расчет 2 229 684,48 x 0,2% x     45 = 200 671,60 руб.

1233 090,24 руб. сумма несвоевременно поставленной продукции по УПД № 577 от 22.11.2023; Просрочка с 13.10.2023 по 04.12.2023.

Расчет 1233 090,24 x 0,2% x     51 = 125 775,20 руб.

Итого   сумма   неустойки   по   2-й   Заявке   составляет   326   446,80   руб. (200 671,60+125 775,20).

Поставка товара по 3-й заявке, направленной сопроводительным письмом от 03.11.2023 №1.5/22/746 на сумму 710 549,95 руб., полученной ответчиком 07.11.2023 по электронной почте, должна быть осуществлена ответчиком до 07.12.2023 (30 календарных дней сдаты получения заявки).

Однако поставка товара по данной заявке по состоянию на 25.12.2023 в адрес покупателя не осуществлена, что подтверждается следующим.

583 901,95 руб. сумма несвоевременно поставленной продукции по заявке; Просрочка с 08.12.2023 по 25.12.2023.

Расчет 583 901,95 x 0,2% x     15 = 17 517,06 руб.

Всего начислено 599 519 руб. неустойки.

Проверив расчет, суд нарушений не установил.

Возражений не заявлено.

Относительно встречного иск суд установил следующее.

1)        Согласно заявке покупателя № 1.5/22/634 от 12.09.2023 на сумму 3 789 638,45 руб., что подтверждается подписанными со стороны покупателя УПД: № 458 от 29.09.2023 на сумму 326 863,73 руб., № 549 от 22.11.2023 на сумму 2 229 648,48 руб., № 577 от 28.11.2023 на сумму 1 233 090,24 руб.;

2)   Согласно заявке покупателя № 1.5/22/578 от 17.08.2023 на сумму 9 340 912,13 руб., что подтверждается подписанными со стороны покупателя УПД: № 459 от 29.09.2023 на сумму 7 357 689,60 руб., № 460 от 29.09.2023 на сумму 1 507 367,33 руб., № 469 от 06.10.2023 на сумму 475 855,20 руб.;

3)   Согласно заявке покупателя № 1.5/22/746 от 03.11.2023 на общую сумму 710 549,95 руб., что подтверждается подписанными со стороны покупателя УПД: № 537 от 13.11.2023 на сумму 126 648,00 руб., № 5 от 09.01.2024 на сумму 583 901,95 руб.;

4)   Согласно заявке покупателя № 1.5/22/763 от 14.11.2023 на общую сумму 241100,06 руб., что подтверждается подписанной со стороны покупателя УПД № 553 от 24.11.2023 на сумму 241 100,06 руб.;

5)   Согласно заявке покупателя № 1.5/22/783 от 20.11.2023 на общую сумму 110 817,00 руб., что подтверждается подписанной со стороны покупателя УПД № 597 от 01.12.2023    на сумму 110 817,00 руб.

6)       Согласно заявке покупателя № 1.5/22/856 от 12.11.2023 на общую сумму6 627 504,81 руб., что подтверждается подписанной со стороны покупателя УПД № 21 от 22.01.2024    на сумму 6 627 504,81 руб.;

Общая стоимость поставленного по указанным выше УПД Товара составляет 20 820 522,40 руб.

Покупатель, в свою очередь, частично оплатил 6 407 970,24 руб. стоимости товара, что подтверждается следующими платежными поручениями: № 38457 от 20.11.2023, № 43836 от 27.12.2023, № 2746 от 31.01.2024, № 38458 от 20.11.2023, № 10185 от 27.03.2024, № 38459 от 20.11.2023, № 2314 от 29.01.2024, № 8302 от 18.03.2024, № 8303 от 18.03.2024.

По состоянию на 04.04.2024, согласно прилагаемому к встречному иску расчету, задолженность покупателя по оплате принятого товара составляет 14 412 552,16 руб.

Пунктом 13.4 договора предусмотрена ответственность покупателя. В случае просрочки оплаты принятого товара поставщик вправе потребовать от покупателя уплаты неустойки в размере 1/360 ключевой ставки, установленной Банком России на день просрочки исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый лень просрочки до полной оплаты принятого товара.

Истец по встречному иску начислил 791 469,92 руб. неустойки на 04.04.2024.

Ответчик по встречному иску указал на частичную оплату долга в сумме 613 979,66 руб., долг составил 13 608 600,50 руб., также, представлен контррасчет неустойки на сумму 790 746,21 руб.

Истец по встречному иску уточнил требования, просит взыскать 13 608 600,50 руб. долга, 790 746,21 руб. неустойки.

Проверив расчеты по встречному иску, суд нарушений не установил.

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на проигравшую сторону по делу.

По результатам рассмотрения дела судом произведен зачет.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 

 

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Брайт Энерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 599 519 руб. неустойки, 14 990 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Брайт Энерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 13 608 600 руб. 50 коп. долга, 790 746 руб. 21 коп. неустойки, 94 997 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Брайт Энерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 10 759 руб. государственной пошлины уплаченной платёжным поручением № 1306 от 08.04.2024.

По результатам рассмотрения спора взыскать с публичного акционерного общества "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Брайт Энерго" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 13 879 834 руб. 71 коп.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

А.Н. Мальцева