4041/2020-278315(2) 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Резолютивная часть решения

 

10 сентября 2020 года. Дело № А56-47579/2020 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ПРОМИНЖИНИРИНГ»  произвести работы по устранению недостатков в выполненных работах по  муниципальному контракту от 06.06.2016 № 443195, выявленных в течение  гарантийного срока, а именно:  

- в течение 1-го месяца со дня вступления решения в законную силу устранить  выявленные контруклоны на трубопроводе хоз.-бытовой канализации, входящей в  систему водоотведения, от железобетонного колодца № 4 до железобетонного колодца   № 5 (1 см.), от железобетонного колодца № 8 до железобетонного колодца № 11 (15 см.),  выполнить демонтаж трубопровода (345 п.м.) и железобетонных колодцев (8 шт.).  Заново проложить трубопроводы (345 п.м.) и установить демонтированные  железобетонные колодцы с устройством нового песчаного основания. После  проведения вышеуказанных работ, необходимо промыть трубопровод (345 п.м.) и  провести испытания на пролив;  

- в течение 2-х месяцев со дня вступления решения в законную силу произвести  работы по устранению нарушенного благоустройства.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПРОМИНЖИНИРИНГ»  в пользу Муниципального казенного учреждения «Управление строительства  Гатчинского муниципального района» 6 000 руб. в качестве возмещения судебных  расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Стрельчук У.В.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 02.09.2020 8:02:58

 Кому выдана Стрельчук Ульви Валериевна