﻿АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                                                      Дело № А65-32101/2017 

 

Дата принятия решения –  15 ноября 2021 года.

Дата объявления резолютивной части –  09 ноября 2021 года.

 

 Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Коновалова Р.Р.,

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Нуруллиной Р.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 

заявление общества с ограниченной ответственностью "Максат", Тюлячинский район, п.Узяк к ответчику – сельскохозяйственному перерабатывающему и сбытовому потребительскому кооперативу "БЭРЭКЭТ", Тюлячинский район, п.Узяк об обязании принять дополнительный паевый взнос члена кооператива ООО «Максат» в виде выполненных строительных работ по устройству фундамента и стен цеха убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки по адресу Тюлячинский район, пос. Узяк, РТ, общей стоимостью 4443426.00 руб.,

при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора ООО "Фортэкс", ООО "Агролак", Ибрагимова Булата Тагировича, Саттарова Фарила Набиулловича, Диарова Адгама Рифгатовича, Мавлеева Рафиса Хакимзянова, Хабриева Ильяса Зиннуровича, Гараева Миннура Рафиковича, Мингалиева Талгата Мухаметгалиевича, Габдуллина Ильдара Нурмухаметовича, Хабибуллина Г.Г.; 

а также третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, Закирова Ф.Ф.,

 

с участием:

Закирова Ф.Ф. - представитель Сидоров А.В. по доверенности от 08.02.2021 г.,

СПСПК «БЭРЭКЭТ» - представитель Максутов Э.М. по доверенности от 21.09.2021 г.,

от иных лиц - не явились, извещены, 

 

у с т а н о в и л :

Истец – Общество с ограниченной ответственностью "Максат", Тюлячинский район, п.Узяк обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ответчику – Сельскохозяйственный перерабатывающий и сбытовой потребительский кооператив "БЭРЭКЭТ", Тюлячинский район, п.Узяк об обязании принять дополнительный паевый взнос члена кооператива ООО «Максат» в виде выполненных строительных работ по устройству фундамента и стен цеха убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки по адресу Тюлячинский район, пос. Узяк, РТ, общей стоимостью 4443426.00 руб. 

Постановлением Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от «02» августа» 2018 года определение Арбитражного суда Республики Татарстан от «26»марта 2018 года в части принятия отказа от иска и прекращения производства по делу отменено и в отмененной части дело направлено на новое рассмотрение.

Предварительное судебное заседание неоднократно откладывалось в связи с нахождением материалов дела в суде кассационной инстанции по рассмотрению жалобы на Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от «02» августа» 2018 года.

Представитель третьего лица заявила ходатайство о привлечении Закирова Ф.Ф. к участию в деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.

От ответчика поступил отзыв и ходатайство о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу решения суда по делу №А65-26532/2017.

Арбитражный суд РТ определением от 23.01.2019 г. привлек в порядке ст.50 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора Закирова Ф.Ф.

В судебном заседании представители третьего лица Закирова Ф.Ф. ходатайствовали о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу решения суда по делу №А65-26532/2017. Пояснили, что в рамках указанного дела проводится судебная экспертиза, в рамках которой устанавливается факт выполнения работ ООО «Максат» и их стоимость. Результаты экспертизы имеют непосредственное значение для рассмотрения настоящего дела, поскольку по ее итогам будет уточнена правовая позиция и стоимость выполненных работ, являющаяся предметом настоящего дела.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 25 февраля 2019 года производство по делу №А65-32101/2017 приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу №А65-26532/2017.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 апреля 2021 года по делу А65-26532/2017 иск удовлетворен частично. Решение общего собрания учредителей Сельскохозяйственного перерабатывающего и сбытового потребительского кооператива "БЭРЭКЭТ", оформленного протоколом №5 от 01.04.2016 г.  признано недействительным. Решение общего собрания учредителей Сельскохозяйственного перерабатывающего и сбытового потребительского кооператива "БЭРЭКЭТ", оформленного протоколом от 19.02.2018г., признано недействительным. В остальной части в иске отказано.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 августа 2021 года (резолютивная часть) решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 19 апреля 2021 года по делу № А65-26532/2017 в обжалуемой части оставлено без изменения, апелляционные жалобы Закирова Фидаиля Фаритовича и Сельскохозяйственного перерабатывающего и сбытового потребительского кооператива "БЭРЭКЭТ" – без удовлетворения.

Определением от 20.08.2021 г. производство по делу возобновлено, сторонам было предложено до даты заседания в письменном виде дополнительно основать позицию по делу с учетом результатов рассмотрения дела А65-26532/2017.

Информация о месте и времени судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Республики Татарстан в сети Интернет по адресу: www.tatarstan.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленном статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В силу части 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

От СПСПК «БЭРЭКЭТ» поступила правовая позиция по делу. В иске просит отказать.

Представитель Закирова Ф.Ф. заявил ходатайство об отложении судебного заседания до рассмотрения кассационной жалобы на решение по делу А65-26532/2017.

Стороны дали пояснения по существу спора.

Иные лица, в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. 

Суд в порядке ст. 156 АПК РФ рассмотрел дело в отсутствие представителей иных  лиц.  

Исследовав в  судебном заседании  материалы дела, заслушав доводы представителей сторон, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований по следующим основаниям. 

В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исковые требования направлены на обязание Сельскохозяйственного перерабатывающего и сбытового потребительского кооператива «БЭРЭКЭТ», принять дополнительный паевый взнос члена кооператива ООО «Максат» в виде выполненных строительных работ общей стоимостью 4 443 426.00 руб.  

Ответчик иск  не признает, указывает, что истец никаких работ не проводил, договорных отношений нет. Договорные отношения  у ответчика с ООО «Фортэкс».

В силу статье 34 Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (далее - Федеральный закон N 193-ФЗ, в редакции, действовавшей в период образования кооператива), источниками формирования имущества кооператива могут быть как собственные, так и заемные средства. Кооператив формирует собственные средства за счет паевых взносов членов кооператива, доходов от собственной деятельности, а также за счет доходов от размещения своих средств в банках, от ценных бумаг и других. При этом в силу прямого указания пункта 3 статьи 34 названного Закона Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве паевых взносов его членами.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона N 193-ФЗ членом Кооператива является физическое и (или) юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям настоящего Закона и устава Кооператива, внесшее паевой взнос в установленных уставом кооператива размере и порядке и принятое в кооператив с правом голоса.

Как следует из материалов регистрационного дела, Сельскохозяйственный  перерабатывающий и сбытовой потребительский кооператив "Бэрэкэт" зарегистрирован в качестве юридического лица 02.11.2015г. Учредителями кооператива выступили ООО «Агролак» и ООО «Максат».

Размер обязательного паевого взноса установлен в п. 5.1.4 Устава и составляет 10 000 руб. Член кооператива обязан внести обязательный паевой взнос в течение одного месяца с момента государственной регистрации кооператива.

После государственной регистрации кооператива и до 19.02.2018г. в состав кооператива были приняты еще 15 членов. 

В соответствии с п.6 Устава СПСПК «БЭРЭКЭТ», кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве паевых взносов, а также имущества, произведенного и приобретенного кооперативом в процессе его деятельности.

В соответствии с пп. Г п. 5-1-8 Устава СПСПК «БЭРЭКЭТ», часть имущества кооператива, формируемая за счет паевых взносов членов кооператива или за счет средств кооператива, не подлежащая в период существования кооператива разделу на паи членов кооператива и ассоциированных членов кооператива или выплате при прекращении ими членства в кооперативе, составляет неделимый фонд кооператива и используется на цели, установленные Уставом кооператива. К неделимому фонду относятся принадлежащие кооперативу фонды, помещения, компьютерное и иное оборудование, компьютерные программы, автотранспорт, офисная   мебель,   другие   основные   средства   и   фонды,   другое   имущество кооператива, относимое к неделимому фонду по решению Общего собрания членов кооператива. Неделимый фонд полностью или частично не подлежит выплате членам или ассоциированным членам кооператива при прекращении ими членства в кооперативе.

В соответствии с п.5-3-1 Устава СПСПК «БЭРЭКЭТ», кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам членов кооператива.

В соответствии с п.5.1 ст.34 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Уставом кооператива может быть определен перечень объектов имущества, относимого к неделимому фонду. В такой перечень с указанием балансовой стоимости могут включаться здания, строения, сооружения, техника, оборудование, сельскохозяйственные животные, семена, фураж и иное имущество кооператива, не подлежащее в период существования кооператива разделу на паи членов кооператива и ассоциированных членов кооператива или выдаче в натуральной форме при прекращении членства в кооперативе.

В соответствии с п.9.1 ст.35 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», в случае, если общее собрание членов кооператива примет решение об отнесении части средств паевого фонда кооператива к неделимому фонду, паи членов кооператива    и    паи    ассоциированных    членов    кооператива    уменьшаются пропорционально сумме указанной части средств.

В соответствии с положениями ст.37 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам членов кооператива, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" члены кооператива могут вносить дополнительные паевые взносы, размер и условия внесения которых предусматривается уставом кооператива.

Размер дополнительного паевого взноса не ограничивается (п. 5.1.5 Устава).

Согласно п. 5.1.6. Устава в случае внесения в счет паевого взноса лицом, вступившим в кооператив – имущества, денежная оценка их взносов производится председателем кооператива и утверждается Общим собранием членов кооператива.

В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец не представил доказательств соблюдения установленного порядка и утверждения Общим собранием членов кооператива (вопрос о выполнении ООО "Максат" работ на объекте не рассматривался и не одобрялся общим собранием членов СПСПК "БЭРЭКЭТ").

Напротив, ответчик категорически возражал против доводов истца о выполнении работ, указывает, что истец никаких работ не проводил, договорных отношений с ним нет. Договорные отношения  у ответчика с ООО «Фортэкс».

Ответчик в отзыве на исковое заявление и в письменных пояснениях от 14.02.2018г., пояснил, что СПСПК "БЭРЭКЭТ" заключило договор № 794-Ф от 09.04.2016г. на выполнение в полном объеме работ по строительству объекта "Цех убоя и переработки КРС в п.Узяк Тюлячинского района РТ" (далее - объект) с подрядной организацией ООО "Фортэкс". 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.04.2021г. по делу № А65-26532/2017 отказано в удовлетворении исковых требований о признании вышеуказанного договора недействительным и применении последствий недействительности сделки.

При этом, ответчик пояснил, что СПСПК "БЭРЭКЭТ" не давал ООО "Максат" ни в письменной, ни в устной форме задания на выполнение работ на объекте; вопрос о выполнении ООО "Максат" работ на объекте не рассматривался и не одобрялся общим собранием членов СПСПК "БЭРЭКЭТ", какие-либо договоры или соглашения с ООО "Максат" не заключались. Следовательно, у СПСПК "БЭРЭКЭТ" отсутствует обязанность по принятию выполненных ООО "Максат" работ. Более того, СПСПК "БЭРЭКЭТ" не располагает информацией о том, какие именно объемы работ на Объекте выполнялись силами и средствами истца.

В рамках исполнения договора № 794-Ф от 09.04.2016г. СПСПК "БЭРЭКЭТ" приняло у ООО "Фортэкс" все выполненные на объекте работы по актам КС-2, КС-3, включая и работы возможно выполненные ООО "Максат".

В свою очередь, ООО "Фортэкс" в письменных пояснениях от 14.12.2017г. подтверждает, что ООО "Максат" выполняло на объекте часть работ по поручению ООО "Фортэкс", а также оказывало для ООО "Фортэкс" услуги механизмов.

При этом, в рамках дела №А65-26532/2017 рассматривались требования  Общества с ограниченной ответственностью "Максат", Тюлячинский район, п.Узяк, (ОГРН 1141675000060; ИНН 1619006313) и Закирова Ф.Ф к Сельскохозяйственному перерабатывающему и сбытовому потребительскому кооперативу "БЭРЭКЭТ", Тюлячинский район, п.Узяк, (ОГРН 1151675001620; ИНН 1619006722) и Обществу с ограниченной ответственностью "Фортэкс", Тюлячинский район, с.Шадки (ОГРН 1047796144989; ИНН 7702517716)

- о признании сделки - договора подряда - недействительной, применении последствий недействительности сделки – возврате на расчетный счет СПиСПК «Бэрэкэт» перечисленных по договору денежных средств в полном объеме.

Судом в рамках дела А65-26532/2017 было установлено, что  06.04.2016г. между  СПСПК «Бэрэкэт» (заказчик по договору) и ООО «Фортэкс» (исполнитель по договору) был  заключен договор № 794-Ф, по условиям которого исполнитель обязуется в установленные договором сроки выполнить строительно-монтажные работы не включая работы по устройству инженерных сетей по объекту: Цех убоя и переработки КРС 15 голов в смену с колбасным цехом мощностью 1 т, РТ, Тюлячинский р-н, п.Узяк в соответствии с условиями настоящего договора и утвержденной  проектной документацией, а заказчик обязуется принять их результат и оплатить в установленном порядке.

В соответствии с п.2.1 договора ориентировочная стоимость работ по договору составляет 21 728 640руб., корректируется после утверждения проектно-сметной документации.

В соответствии с п.2.2. договора окончательная  стоимость настоящего договора определяется по фактически выполненным исполнителем  объему работ в соответствии с представленными исполнителем актами выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ по форме КС-2, КС-3, но не более стоимости, оговоренной в п.2.1 договора.

Срок завершения работ согласован сторонами в договоре – 31.10.2016г.

02.10.2017г. к договору  подписано дополнительное соглашение № 1 от 02.10.2017г. об увеличении стоимости работ до 13 000 000руб., срок завершения работ - 30.01.2018г.

30.11.2017г. к договору подписано соглашение № 2 которым стороны установили  стоимость работ по договору не более 73 794 380руб. определяется на основании локальных сметных расчетов, составленных в базисных ценах 2001г., объектных сметных расчетов, составленных в базисных ценах 2001г и пересчитанных в текущий уровень цен на 4 кв.2016г по индексам изменения стоимости строительно-монтажных работ и оборудования, сводного сметного расчета стоимости строительства. Срок завершения работ установлен 3009.2018г..

Согласно представленным в материалы дела платежным поручениям. Кооперативом произведена оплата по договору в размере 30 009 839руб.88коп.

Ответчик, ООО «Фортэкс»,  в отзыве на исковое заявление, указали на то, что истец  знал об оспариваемом договоре, поскольку  12 мая 2017г. между Министерством сельского хозяйства и продовольствия  РТ и  СПСПК «Бэрэкэт»  был заключен договор о предоставлении гранта на развитие  материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского  кооператива по вневедомственной целевой программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Республике Татарстан на 2015-2017 г.» и истец, совместно с кооперативом, собирал пакет документов  для участия  в программе. Истец не доказал причинение каких –либо убытков кооперативу  и истцу оспариваемым договором. Сделка была одобрена 01.04.2016г. членами кооператива, что подтверждается представленным протоколом от  01.04.2016г. № 5. В настоящий момент обязательства по договору исполнены, конечный результат в виде построенного здания достигнут.

Истец, Закиров Ф.Ф., возражая относительно доводов ответчика о том, что здание построено, заявил ходатайство о проведении по делу строительной экспертизы.

Определением от 15.06.2018 по делу назначена  судебная строительная  экспертиза, проведение которой поручено Обществу с ограниченной ответственностью «Международное агентство строительная экспертиза и оценка «Независимость» (ООО «Агентство «Независимость»), экспертам Кадырову Фархаду Абдурахмановичу, Иванову Алексею Владимировичу, Кузьмину Сергею Викторовичу, Мурзову Александру Дмитриевичу, с предупреждением  экспертов об ответственности за дачу заведомо ложного заключения в соответствии со ст. 307 Уголовного кодекса РФ. 

Перед экспертами поставлены  следующие вопросы: 

1. Определить объем и среднерыночную стоимость фактически выполненных ООО "Фортэкс" работ на объекте "Строительство цеха убоя и переработки КРС на 15 голов в смену в п. Узяк Тюлячииского района РТ" из общего объема работ, указанных в актах выполненных работ, подписанных между СПСПК "БЭРЭКЭТ" и ООО "Фортэкс"; 

2. Соответствуют ли выполненные ООО "Фортэкс" работы требованиям СНИП, ГОСТ, проектно-сметной документации;

 3. В случае наличия отступлений от указанных требований в выполненных работах, ухудшающих их качество, определить объем и стоимость устранения недостатков некачественно выполненных работ,

 4. Определить стоимость выполнения работ и стоимость использованных материалов на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95 »; 

5. Установить факт выполнения работ, указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ» на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95 »; 

6. Определить стоимость выполнения работ и стоимость использованных материалов , указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ» на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95»; 

7. Определить период выполнения работ, указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ» на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95»; 

8. Определить объём выполненных работ на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95 . 

9. Определить объём выполненных работ, указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ» на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95»; в общем объёме выполненных работ на объекте. 

Поскольку после представления в суд экспертного заключения, ответчик, ООО «Фортэкс», указал на то, что им устранены недостатки, выявленные  вышеуказанной экспертизой, а также ввиду несогласия с представленным экспертным заключением, было заявлено ходатайство о проведении дополнительной экспертизы. 

Определением суда от 04.12.2019 по делу с учетом заявленного ходатайства сторон назначена дополнительная судебная строительная экспертиза, производство судебной экспертизы поручено Автономной некоммерческой организации «Судебно-экспертный центр «Стройэкспертиза», экспертам Землянскому Петру Владимировичу, Галиеву Альмиру Фаридовичу.

Перед экспертами поставлены следующие вопросы:

1. Определить объем и среднерыночную стоимость фактически выполненных ООО "Фортэкс" работ на объекте "Строительство цеха убоя и переработки КРС на 15 голов в смену в п. Узяк Тюлячинского района РТ" из общего объема работ, указанных в актах выполненных работ, подписанных между СПСПК "БЭРЭКЭТ" и ООО "Фортэкс";

2. Соответствуют ли выполненные ООО "Фортэкс" работы требованиям СНИП, ГОСТ, проектно-сметной документации;

3. В случае наличия отступлений от указанных требований в выполненных работах, ухудшающих их качество, определить объем и стоимость устранения недостатков некачественно выполненных работ,

4. Определить стоимость выполнения работ и стоимость использованных материалов на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95 »;

5. Установить факт выполнения работ, указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ» на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95 »;

6. Определить стоимость выполнения работ и стоимость использованных материалов, указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ» на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95»;

7. Определить период выполнения работ, указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ» на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95»;

8. Определить объём выполненных работ на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95.

9. Определить объём выполненных работ, указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ» на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95»; в общем объёме выполненных работ на объекте.

10. Определить стоимость  и объем земляных работ, произведенных ООО «МАКСАТ» при устройстве фундамента с учетом строительных материалов, использованных при обратной засыпке и устройстве надземной части фундамента,  а также при устройстве наружных сетей водоснабжения на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95».

11. Чему равны стоимость выполнения работ и стоимость использованных материалов в составе суммы фактически выполненных работ ООО «Фортэкс».

12. Чему равны стоимость выполнения работ и стоимость использованных материалов в составе суммы фактически выполненных работ ООО «Фортэкс», не имеющих при этом отступлений от требований, ухудшающих их качество стоимость выполнения работ и стоимость использованных материалов.

Экспертное заключение № 49-20 представлено экспертами в материалы дела в трех томах.

1) отвечая на первый вопрос, эксперты указали, что при изучении предоставленной документации и материалов дела, относящихся к предмету экспертизы, выявлено, что на объекте фактически работы частично выполнялись как силами ООО «Фортэкс», так и силами ООО «Максат». При этом ООО «Фортэкс» позиционирует себя генподрядчиком и на основании этого составило полный комплект исполнительной документации на все спорные виды работ, а также оформило акты о приёмке всех фактически выполненных на объекте работ. ООО «Максат» придерживается позиции, что работало как самостоятельный хозяйствующий субъект и составило свой комплект исполнительной документации на спорные виды работ, а также оформило акт о приемке выполненных работ КС-2 №1 от 26.09.2016 г. на сумму 4 443 426 руб., с НДС. Однако составленная ООО «Максат» исполнительная документация подписана в одностороннем порядке и имеет ряд существенных противоречий.

Определить стоимость выполнения работ и стоимость использованных материалов, указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ» на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95, - не представляется возможным в связи с тем, что предъявленные работы в указанном акте являются скрытыми, а предоставленная документация ООО «Максат» имеет противоречивый характер.

Таким образом, разделить объемы работ, фактически выполненные на объекте экспертизы, между объемами выполненными ООО «Фортэкс» и объемами, выполненными ООО «Максат», - не представляется возможным.

Экспертом приведен расчет объемов и среднерыночной стоимости работ, фактически выполненных на объекте на дату осмотра.

Так, среднерыночная стоимость фактически выполненных на объекте работ, предъявляемых ООО «Фортэкс» в актах о приемке выполненных работ КС-2 по объекту: "Цех убоя и переработки КРС 15 голов в смену на территории поселка Узяк Тюлячинского района РТ", составляет 56 329 830,38 рублей (с НДС), в том числе, за 2016 год – 35 511 960,76 руб.; за 2017 год – 11 406 610,42 руб.; за 2019 год – 9 411 259,20 руб. (таблица, т.1 заключения, лист 88).

Эксперт отметил, что из указанной стоимости не может быть достоверно выделена стоимость работ, фактически выполненных ООО «Максат», так как составленная ООО «Максат» исполнительная документация подписана в одностороннем порядке и имеет ряд существенных противоречий.

2) отвечая на второй вопрос, эксперты указали, что выполненные ООО "Фортэкс" работы соответствуют требованиям СНИП, ГОСТ, проектно-сметной документации.

По результатам натурного осмотра и производства выборочных измерений определено, что конструкции фундаментов (размеры в плане, глубина заложения, прочность примененного бетона, обмазочная гидроизоляция и т.д.) соответствуют требованиям рабочей документации; все несущие и ограждающие конструкции (размеры в плане, размеры сечений, узлы крепления, виды отделки, виды применённых изделий и материалов и т.д.) всех построенных (на объекте экспертизы) объектов (цех убоя и переработки КРС, дезбарьер, весовая, рампа для погрузки животных, проход в загон) соответствуют требованиям рабочей документации; все смонтированные наружные сети и сети в цехе убоя (водоснабжение, канализация, вентиляция, теплоснабжение, электроснабжение, пожарная сигнализация, хладоснабжение) соответствуют требованиям рабочей документации (в колбасном цеху монтаж данных систем не окончен); всё смонтированное технологическое оборудование в цехе убоя соответствует требованиям рабочей документации (в колбасном цеху монтаж технологического оборудования не окончен).

Кроме того, факт соответствия всех построенных конструкций, требованиям СНИП, ГОСТ, проектно-сметной документации подтверждён полным комплектом исполнительной документации, подписанной в надлежащем порядке всеми участниками строительства, в том числе, и заказчиком строительства.

Все ранее имеющиеся дефекты (недостатки выполненных работ, указанные в материалах дела) устранены на дату натурного осмотра и, следовательно, производство работ по устранению недостатков не требуется.

Эксперт отметил, что все акты освидетельствования скрытых работ и акты освидетельствования ответственных конструкций подписаны представителем застройщика или заказчика: СПСПК «Бэрэкэт»; представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации ООО «СовПро»; представителем лица, осуществляющего строительство; лица осуществляющего строительный контроль; лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию ООО «Фортэкс»; представителем лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию ООО «ИК «ТехВент»; представителем лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию ООО «ИК «Интегра»; представителем лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию ООО «Виоленс». Все ранее имеющиеся дефекты устранены, произведена фотофиксация.

3) отвечая на третий вопрос, эксперты указали, что отступления от указанных требований в выполненных работах, ухудшающих их качество, на дату исследования отсутствуют.

4) в ответе на четвертый вопрос, эксперты указали, что расчет произведен с учетом применения различных методических подходов, ввиду чего имеется разница стоимости выполнения работ. 

Так, стоимость фактически выполненных работ на объекте исследования, предъявляемых ООО «Фортэкс» в актах о приемке выполненных работ КС-2, рассчитанная исходя из расценок, согласованных ООО «Фортэкс» и СПСПК «Бэрэкэт» в договоре (приложение №2, №3 к дополнительному соглашению № 2 от 30.11.2017г. к Договору № 794-Ф от 09.04.2016г.), составляет 52 245 046,74 рублей (с НДС), в том числе, материалов – 31 100 302,19 руб. (с НДС), оборудования – 10 950 864,63 руб. (с НДС). Эксперты указали, что такой расчет произведен по базисно-индексному методу расчета с применением Федеральных единичных расценок (ФЕР), поскольку такой расчет фактически согласован ООО «Фортэкс» и СПСПК «Бэрэкэт» в договоре и Приложении № 2, №3 к дополнительному соглашению № 2 от 30.11.2017г. к Договору № 794-Ф от 09.04.2016г. 

Среднерыночная стоимость фактически выполненных на объекте исследования работ, предъявляемые ООО «Фортэкс» в актах о приемке выполненных работ КС-2 составляет 56 329 830,38 рублей (с НДС), в том числе, материалов – 26 373 198,24 руб. (с НДС), оборудования – 10 661 884,10 руб. (с НДС). Эксперты указали, что определение среднерыночной стоимости основано на нормативных документах с результатами ежеквартального мониторинга текущих цен на ресурсы и материалы по Республике Татарстан, а также счетов-фактур и товарных накладных, имеющихся в материалах дела, с фактической ценой приобретения, что удовлетворяет требованиям определения рыночной стоимости согласно Федеральному закону от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки».

5) отвечая на пятый вопрос, эксперты указали, что установить факт выполнения работ, указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ» на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95», - не представляется возможным в связи с тем, что предъявленные работы в указанном акте являются скрытыми, а предоставленная документация ООО «Максат» имеет противоречивый характер.

Эксперт отметил, что указанное обстоятельство не исключает возможности выполнения работ, указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ», силами ООО «Максат».

По результатам исследования исполнительной документации ООО «Максат», определено следующее:

- во всех актах освидетельствования скрытых работ не указаны номера сертификатов и паспортов на применённые материалы;

- на объекте отсутствуют виды работ (изготовление металлических свай; грунтовка металлических свай составом «Гермокон-Гидро») (примечание эксперта: если предположить, что ООО «Максат» ошибся и вместо фразы «металлические конструкции каркаса» указал фразу: «металлические сваи», то возникает вопрос в достоверности сведений о грунтовке металлических конструкций составом «Гермокон-Гидро», так как на объекте экспертизы грунтовка данным составом не выявлена и не предусмотрена рабочей документацией; 

- фактически исполнительные схемы, составленные ООО «Максат», отсутствуют, однако, к актам освидетельствования скрытых работ ООО «Максат» приложены чертежи, на которых указана организация, разработавшая чертежи: ООО «Фортэкс»; сотрудники, разработавшие чертежи: ГАП - Гарифуллин; ГИП - Валеева; Гл. конструктор - Нестеров; Разработчик - Ибрагимова; Н.контр. - Мингазова (все данные исполнители являются сотрудниками проектной организации); указание о том, что эти чертежи можно считать исполнительными схемами, отсутствуют; на всех чертежах отсутствуют подписи представителей ООО «Максат».

В исполнительной документации, изготовленной ООО «Максат» имеются противоречия:

- в один и тот же период произведены работы либо только по изготовлению металлоконструкций стен, либо только по изготовлению металлических свай, однако все металлические конструкции каркаса здания изготовлены в заводских условиях силами ООО «ПФ «Стальные конструкции», что подтверждено соответствующими документами о качестве (описание документов приведено ниже), а металлические сваи на объекте отсутствуют (проектной документацией не предусмотрены);

- предъявляются к освидетельствованию либо только огрунтовка металлического каркаса, либо только огрунтовка металлических свай, однако, все металлические конструкции каркаса здания огрунтованы в заводских условиях силами ООО «ПФ «Стальные конструкции», что подтверждено соответствующими документами о качестве, а металлические сваи на объекте отсутствуют (проектной документацией не предусмотрены).

На основании анализа имеющихся материалов дела (первичной исполнительной документации составленной ООО «Максат»; протоколов лабораторных испытаний бетона фундаментов ООО «ИЛ «Качество в строительстве»; документов о качестве на конструкции металлического каркаса ООО «ПФ «Стальные конструкции») экспертами установлено, что определить точный (по числам и месяцам) период выполнения работ, указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ» на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее -Убойный цех) по адресу: РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95, выполненных ООО «Максат» не представляется возможным, однако все работы, на которые ООО «Максат» представило исполнительную документацию, в любом случае выполнены в 2016 году (либо ООО «Максат»; либо ООО «Фортэкс», либо совместно ООО «Максат» и ООО «Фортэкс») (данное обстоятельство подтверждено исполнительной документацией ООО «Фортэкс», протоколами испытательной лаборатории ООО «ИЛ «Качество в строительстве», документами о качестве на конструкции металлического каркаса ООО «ПФ «Стальные конструкции») по ниже перечисленным обстоятельствам:

- ООО «Максат» не могло выполнить работы по бетонированию фундаментов, в сроки указанные в исполнительной документации, так как в протоколах испытаний ООО «ИЛ «Качество в строительстве» указаны более поздние сроки заливки данных всех выполненных на объекте фундаментов;

- ООО «Максат» не могло выполнить работы по монтажу металлических конструкций, в сроки указанные в исполнительной документации, так как в документах о качестве на конструкции металлического каркаса ООО «ПФ «Стальные конструкции» указаны более поздние сроки изготовления всех смонтированных на объекте конструкций металлического каркаса здания (на указанный в исполнительной документации период производства работ, конструкции металлического каркаса здания ещё небыли изготовлены на заводе);

- в исполнительной документации ООО «Максат», имеются противоречия между Общим журналом работ, Актами освидетельствования скрытых работ, а указано, что в один и тот же период произведены работы либо только по изготовлению металлоконструкций стен, либо только по изготовлению металлических свай, однако все металлические конструкции каркаса здания изготовлены в заводских условиях силами ООО «ПФ «Стальные конструкции», что подтверждено соответствующими документами о качестве, а металлические сваи на объекте отсутствуют (проектной документацией не предусмотрены);

- в исполнительной документации ООО «Максат», имеются противоречия между Общим журналом работ, Актами освидетельствования скрытых работ, а указано, что предъявляются к освидетельствованию либо только огрунтовка металлического каркаса, либо только огрунтовка металлических свай, однако все металлические конструкции каркаса здания огрунтованы в заводских условиях силами ООО «ПФ «Стальные конструкции», что подтверждено соответствующими документами о качестве, а металлические сваи на объекте отсутствуют (проектной документацией не предусмотрены).

- на натурном осмотре истец (Закиров Ф.Ф.) пояснил, что ООО «Максат» выполнил работы по устройству всех фундаментов под несущий каркас здания, частично из своего бетона, частично из давальческого материала, данное утверждение противоречит данным указанным в Журнале бетонных работ составленном ООО «Максат», где указано, что ООО «Максат» выполнены бетонные работы в объёме 18м3, а в журнале бетонных работ составленном ООО «Фортэкс», указано, что ООО «Фортэкс» выполнены бетонные работы в объёме 179,5м3;

- на натурном осмотре и письменных пояснениях приобщенных к материалам дела и переданных судом в адрес экспертов представитель ООО «Фортэкс» и СПСПК «БЭРЭКЭТ» Максутов Э.М. подтверждает, что часть работ выполнены силами ООО «Максат», какую часть работ и в какие периоды временные периоды ООО «Максат» выполняло работы в пояснениях не указано.

6) отвечая на шестой вопрос, эксперты указали, что определить стоимость выполнения работ и стоимость использованных материалов, указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ» на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95, - не представляется возможным в связи с тем, что предъявленные работы в указанном акте являются скрытыми, а предоставленная документация ООО «Максат» имеет противоречивый характер.

Для ответа на вопросы суда экспертами произведен сравнительный анализ объемов работ, предъявленный ООО «МАКСАТ» в Акте выполненных работ КС-2 №1 от 26.09.2016 г. на сумму 4 443 426 руб. (с НДС 18%) на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95», с объемами работ, закрытыми в актах выполненных работ ООО «Фортэкс», объемами работ, предусмотренными проектно-сметной документацией, и объемами работ, фактически выявленными по результатам исследования (том 1 Заключения, лист 93-97).

Как указали эксперты, результаты сравнительного анализа наглядно свидетельствуют о частичном завышении ООО «Максат» объемов работ, включение видов работ, которые на объекте фактически отсутствуют, пересечении всех иных объемов работ с объемами работ ООО «Фортэкс».

7) отвечая на седьмой вопрос, эксперты указали, что определить период выполнения работ, указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ» на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95» не представляется возможным в связи с тем, что предъявленные работы в указанном акте являются скрытыми, а предоставленная документация ООО «Максат» имеет противоречивый характер.

На основании анализа имеющихся материалов дела (первичной исполнительной документации составленной ООО «Максат»; протоколов лабораторных испытаний бетона фундаментов ООО «ИЛ «Качество в строительстве»; документов о качестве на конструкции металлического каркаса ООО «ПФ «Стальные конструкции») установлено, что определить точный (по числам и месяцам) период выполнения работ, указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ» на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее -Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95, выполненных ООО «Максат» не представляется возможным, однако, все работы, на которые ООО «Максат» представило исполнительную документацию, в любом случае выполнены в 2016 году (либо ООО «Максат»; либо ООО «Фортэкс», либо совместно ООО «Максат» и ООО «Фортэкс») (данное обстоятельство подтверждено исполнительной документацией ООО «Фортэкс», протоколамииспытательной лаборатории ООО «ИЛ «Качество в строительстве», документами о качестве на конструкции металлического каркаса ООО «ПФ «Стальные конструкции») по ниже перечисленным обстоятельствам:

- ООО «Максат» не могло выполнить работы по бетонированию фундаментов, в сроки указанные в исполнительной документации, так как в протоколах испытаний ООО «ИЛ «Качество в строительстве» указаны более поздние сроки заливки данных всех выполненных на объекте фундаментов;

- ООО «Максат» не могло выполнить работы по монтажу металлических конструкций, в сроки указанные в исполнительной документации, так как в документах о качестве на конструкции металлического каркаса ООО «ПФ «Стальные конструкции» указаны более поздние сроки изготовления всех смонтированных на объекте конструкций металлического каркаса здания (на указанный в исполнительной документации период производства работ, конструкции металлического каркаса здания ещё небыли изготовлены на заводе);

- в исполнительной документации ООО «Максат», имеются противоречия между Общим журналом работ, Актами освидетельствования скрытых работ, а указано, что в один и тот же период произведены работы либо только по изготовлению металлоконструкций стен, либо только по изготовлению металлических свай, однако все металлические конструкции каркаса здания изготовлены в заводских условиях силами ООО «ПФ «Стальные конструкции», что подтверждено соответствующими документами о качестве, а металлические сваи на объекте отсутствуют (проектной документацией не предусмотрены);

- в исполнительной документации ООО «Максат», имеются противоречия между Общим журналом работ, Актами освидетельствования скрытых работ, а указано, что предъявляются к освидетельствованию либо только огрунтовка металлического каркаса, либо только огрунтовка металлических свай, однако все металлические конструкции каркаса здания огрунтованы в заводских условиях силами ООО «ПФ «Стальные конструкции», что подтверждено соответствующими документами о качестве, а металлические сваи на объекте отсутствуют (проектной документацией не предусмотрены).

- на натурном осмотре Истец (Закиров Ф.Ф.) пояснил, что ООО «Максат» выполнил работы по устройству всех фундаментов под несущий каркас здания, частично из своего бетона, частично из давальческого материала, данное утверждение противоречит данным указанным в Журнале бетонных работ составленном ООО «Максат», где указано, что ООО «Максат» выполнены бетонные работы в объёме 18м3, а в журнале бетонных работ составленном ООО «Фортэкс», указано, что ООО «Фортэкс» выполнены бетонные работы в объёме 179,5м3;

- на натурном осмотре и письменных пояснениях приобщенных к материалам дела и переданных судом в адрес экспертов представитель ООО «Фортэкс» и СПСПК «БЭРЭКЭТ» Максутов Э.М. подтверждает, что часть работ выполнены силами ООО «Максат», какую часть работ и в какие периоды временные периоды ООО «Максат» выполняло работы в пояснениях не указано.

8) в ответе на восьмой вопрос, эксперты указали, что объём выполненных работ на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95, указан на 422 листах в Томе №2 Заключения (Сравнительные ведомости объемов работ), приложенные к заключению.

9) отвечая на девятый вопрос, эксперты указали, что определить объём выполненных работ, указанных в Акте выполненных работ ООО «МАКСАТ» на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95»; в общем объёме выполненных работ на объекте, не представляется возможным в связи с тем, что предъявленные работы в указанном акте являются скрытыми, а предоставленная документация ООО «Максат» имеет противоречивый характер, что исключает возможность достоверного расчета объема выполненных работ ООО «Максат».

Общий объём выполненных работ на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее -Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95, указан на 422 листах в Томе №2 Заключения («Сравнительные ведомости объемов работ»), в том числе выделены объемы работ предъявляемые ООО «Максат».

Также эксперты отметили, что итоговые сравнительные объемы ООО «Максат» указаны в таблице при ответе на вопрос №6 суда (том 1 Заключения, лист 93-97).

1) отвечая на десятый вопрос, эксперты указали, что определить стоимость и объем земляных работ, произведенных ООО «МАКСАТ» при устройстве фундамента с учетом строительных материалов, использованных при обратной засыпке и устройстве надземной части фундамента, а также при устройстве наружных сетей водоснабжения на объекте «Цех убоя и переработки крупного рогатого скота на 15 голов в смену с колбасным цехом, мощностью 1 тонна в сутки (далее - Убойный цех) по адресу РТ, Тюлячинский район, пос. Узяк, улица Южная на земельном участке с кадастровым номером 16:40:110103:95», не представляется возможным в связи с тем, что предъявленные работы в указанном акте являются скрытыми, а предоставленная документация ООО «Максат» имеет противоречивый характер, что исключает возможность достоверного расчета объема произведенных работ ООО «Максат».

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 19.04.2021г. по делу № А65-26532/2017 отказано в удовлетворении исковых требований о признании вышеуказанного договора недействительным и применении последствий недействительности сделки.

На основании судебной экспертизы суд в решении от 19.04.2021г. по делу № А65-26532/2017 пришел к выводам о том, что :

Доводы истца, что между членами кооператива была договоренность о том, что строительство будет осуществляться силами членов кооператива, носят голословный характер, доказательств того, что члены кооператива имели возможность произвести работы самостоятельно не представлено (стр.29, абз.З решения);

             Для ответа на вопросы суда экспертами произведен сравнительный анализ объемов работ, предъявленных ООО "Максат" в Акте выполненных работ КС-2 № 1 от 26.09.2016г. на сумму 4 443 426 руб. (с НДС 18%) на объекте с объемами работ, закрытыми в актах выполненных работ ООО "Фортэкс", объемами работ, предусмотренными проектно-сметной документацией, и объемами работ, фактически выявленными по результатам исследования. Как указали эксперты, результаты сравнительного анализа наглядно свидетельствуют о частичном завышении ООО "Максат" объемов работ, включение видов работ, которые на объекте фактически отсутствуют, пересечении всех иных объемов работ с объемами работ ООО "Фортэкс" (стр.24, абз.6-7 решения);

            Эксперты указали, что установить факт выполнения работ, указанных в Акте выполненных работ ООО "Максат" на объекте не представляется возможным в связи с тем, что предъявленные работы в указанном акте являются скрытыми, а предоставленная документация ООО "Максат" имеет противоречивый характер (стр.22, абз.6);

           Эксперты указали, что определить стоимость выполнения работ и стоимость использованных материалов, указанных в Акте выполненных работ ООО "Максат" на объекте не представляется возможным в связи с тем, что пре предъявленные работы в указанном акте являются скрытыми, а предоставленная документация ООО "Максат" имеет противоречивый характер (стр.24, абз.5).

Таким образом, доводы истца не подтверждены относимыми и допустимыми доказательствами (статьи 67, 68 АПК РФ).

Согласно положениям статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

             С учетом всего вышеизложенного, исковые требования об обязании ответчика принять дополнительный паевой взнос истца в виде выполненных строительных работ являются необоснованны и подлежат отклонению.

Ходатайство об отложении судебного заседания до рассмотрения кассационной жалобы на решение по делу А65-26532/2017 отклоняется судом в силу отсутствия правовых оснований и принимая во внимание сроки рассмотрения настоящего дела.

В силу ст.110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины следует отнести на истца.

            Руководствуясь статьями 110, 112, 167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, 

 

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания отказать.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Максат", Тюлячинский район, п.Узяк (ОГРН: 1141675000060, ИНН: 1619006313), в доход федерального бюджета 6000 руб.  государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение  может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

 

          Судья                                                                                                        Р.Р. Коновалов