АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

10 ноября 2025 года Дело № А33-23104/2025 

Красноярск 

Резолютивная часть решения размещена в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21.10.2025. Мотивированное решение составлено 10.11.2025.  

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Винокуровой М.Ю.,  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску общества с ограниченной  

ответственностью "Стоворот" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск,  

к публичному акционерному обществу "Россети Сибирь" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>), г. Красноярск, об обязании осуществить действия, взыскании неустойки, без вызова лиц, участвующих в деле, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Стоворот" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к публичному акционерному обществу "Россети Сибирь" (далее – ответчик) с требованиями:  

1) обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» исполнить Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.12972.24 от «19» ноября 2024г., в течение одного месяца с момента вступления в силу решения по настоящему делу, в связи с чем выполнить, предусмотренные Пунктом 10.1. Технических условий № 8000641329 следующие организационные мероприятия:  

- обеспечение возможности действиями Заявителя осуществить фактическое присоединение объектов Заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами Заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке на Объекте: "Складское здание/помещение", расположен (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, городское поселение поселок Емельяново, 

<

...> земельный участок 177, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010106:297;  

- осуществить мероприятия выполнения требований по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" для электроснабжения Объекта Заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;  

Код доступа к материалам дела - 

- осуществить строительство ЛЭП-10(6) кВ от точки, указанной в пункте № 7 ТУ № 8000641329, до проектируемой ТП 10(6) кВ (п.10.2.3.), протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом;  

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 10(6) кВ Тип, и место установки разъединителя определить проектом;  

- осуществить строительство ТП 10(6) кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов определить проектом;  

- осуществить строительство ЛЭП 0,4 кВ от новой ТП до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами Заявителя, протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом;  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).  

2) взыскать с ПАО «Россети Сибирь» договорную неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по Договору в размере 15 769,18 руб.;  

3) взыскать с ПАО «Россети Сибирь» сумму договорной неустойки, предусмотренной п.17 Договора, начиная с 16.08.2025г. (следующий день после подписания настоящего иска), из расчета 0,25% платы 77872,49 руб., за каждый день просрочки, подлежащую начислению начиная с 16.08.2025г. по день фактического выполнения обязательств по Договору об осуществлении технологического присоединения объекта: "Складское здание/помещение", расположен (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, городское поселение поселок Емельяново, 

<

...> земельный участок 177, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010106:297;  

4) взыскать с ПАО «Россети Сибирь» судебную неустойку на случай неисполнения настоящего решения суда в размере 5 000 рублей за каждый календарный день неисполнения настоящего решения суда в части исполнения обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям, которая подлежит начислению, начиная с 31-го дня с момента вступления настоящего решения суда в законную силу по день фактического исполнения решения суда в названной части.  

Определением от 25.08.2025 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.  

20.10.2025 судом вынесена резолютивная часть решения по настоящему делу.  

В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.  

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.  

30.10.2025 в Арбитражный суд Красноярского края поступила от ответчика апелляционная жалоба.  

Резолютивная часть решения размещена в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 21.10.2025.  

При указанных обстоятельствах суд принимает решение по правилам главы 20 АПК РФ.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы истца, арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

Согласно статье 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.  

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.  

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

Из материалов дела следует, что основанием для обращения в суд послужило неисполнение ПАО «Россети Сибирь» обязательств по технологическому присоединению в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.12972.24 от «19» ноября 2024г., а именно: "Складское здание/помещение", расположенного (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, городское поселение поселок Емельяново, 

<

...> земельный участок 177, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010106:297.  

Следовательно, отношения сторон регулируются ГК РФ, Федеральным законом № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике», а также Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 861 от 27.12.2004 (далее – Правила № 861).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Согласно пункту 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.  

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил № 861, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном  

законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.  

В силу пункта 4 Правил № 861 любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с Правилами.  

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом (пункт 6 Правил № 861).  

Пунктом 7 Правил № 861 предусмотрена процедура технологического присоединения, включающая в себя подачу заявки юридическим или физическим лицом, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение; заключение договора; выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям; фактический прием (подача) напряжения и мощности; составление акта об осуществлении технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.  

В соответствии с подпунктом «б» пункта 16 Правил № 861 договор должен содержать следующие существенные условия:  

- срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт, в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.  

В пункте 14 Правил № 861 содержатся требования к оформлению заявки на технологическое присоединение, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.  

В соответствии с пунктом 15 Правил № 861 в адрес заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13, 14 Правил, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя  

(уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, а также уведомляет о возможности временного технологического присоединения, предусмотренного разделом VII настоящих Правил.  

Из материалов дела следует, что между ООО "СТОВОРОТ" (заявитель) и ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.12972.24 от «19» ноября 2024г., согласно пункту 1 которого по договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее - технологическое присоединение) "Складское здание/помещение", в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:  

 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт;  

 категория надежности третья; 

 класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ;  

 максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует.  

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор). Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора.  

Согласно пункту 2 договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения "Складское здание/помещение", расположенного (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, городское поселение поселок Емельяново, 

<

...> земельный участок 177, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010106:297.  

Согласно пункту 3 договора точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.  

Согласно пункту 4 договора технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.  

Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.  

Согласно пункту 6 сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.  

Согласно пункту 8 заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за  

исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.  

Согласно пункту 10 размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 07.12.2023 № 57-э с изменениями, внесенными Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 27.12.2023г № 115-э, от 23.01.2024г № 3-э, от 06.02.2024г № 4-э, от 20.02.2024г № 13-э, от 21.03.2024г № 16-э, от 26.04.2024г № 20-э, от 21.05.2024г № 27-э, от 26.09.2024г № 49-э и составляет 77872,49 руб. (Семьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят два рубля 49 копеек), в том числе НДС 20% в сумме 12978,75 руб. (Двенадцать тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 75 копеек).  

Согласно пункту 11 внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".  

Согласно пункту 12 датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.  

Согласно пункту 17 сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.  

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.  

Согласно пункту 18 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Согласно Техническим условиям № 8000641329, указано следующее: 

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки объекта «Складское здание/помещение».  

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: объект «Складское здание/помещение», расположенный по адресу: Российская  

Федерация, Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, городское поселение поселок Емельяново, 

<

...> земельный участок 177, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010106:297.  

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 150 кВт.  

3.а Ранее присоединенная мощность по объекту отсутствует. 4. Категория надежности: Третья.  

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.  

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2025г. 

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:  

I точка присоединения: максимальная мощность 150 кВт. Линия (0,4) Проектируемая ТП Проектируемая Линия (3/6/10) Проектируемая Линия (3/6/10) ВЛ 10 кВ ф.45-4_Емелья. Ячейка ПС яч. 5 Присоединение ЛЭП ф.45-4 ПС ПС 110 кВ Емельяново-110 № 45 8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Емельяново-110 № 45. 9. Резервный источник питания: отсутствует. 10. Сетевая организация осуществляет: 10.1. Организационные мероприятия: 10.1.1. Подготовка технических условий на технологическое присоединение. 

10.1.2. Обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.  

10.2. Требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "Россети Сибирь""Красноярскэнерго" для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.  

10.2.1. Строительство ЛЭП-10(6) кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до проектируемой ТП 10(6) кВ (п.10.2.3.) Протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом;  

10.2.2. Определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 10(6) кВ Тип и место установки разъединителя определить проектом;  

10.2.3. Строительство ТП 10(6) кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов определить проектом;  

10.2.4. Строительство ЛЭП 0,4 кВ от новой ТП до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом.  

10.2.5. Выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных  

рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).  

11. Заявитель осуществляет: 

11.а. Ввод от комплекса коммерческого учета электрической энергии до энергопринимающих устройств объекта выполнить кабелем или самонесущим изолированным проводом типа СИП;  

11.б. Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности);  

11.1. Требования по проектированию схемы электроснабжения от точки присоединения к сети ПАО "Россети Сибирь": разработать проектную документацию в границах земельного участка Заявителя в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;  

11.2. Требования по проектированию и установке устройств: 

11.2.1. Защитного заземления: заземление выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.  

11.2.2. Защиты и автоматики: не требуется. 

11.3. Мероприятия по обеспечению резервным источником питания энергопринимающих устройств, требующих повышенной надежности электроснабжения в соответствии с требованиями НТД: не требуется.  

11.4. Требования по согласованию проектной документации с ФИО1 организацией и федеральным органом исполнительной власти по технологическому надзору: при разработке проектной документации согласно п. 11.1 настоящих ТУ согласовать ее со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством.  

11.5. Требования по предоставлению заключений экспертных организаций по проектной документации, освидетельствования технического состояния энергоустановок: после выполнения технических условий энергопринимающее устройство предъявить представителю ФИО1 организации для составления акта о выполнении ТУ, акта об осуществлении технологического присоединения, акта допуска прибора учета к эксплуатации и согласования расчетной схемы учета электроэнергии.  

Дополнительные сведения: 

 Запрещается строительство и производство любых работ в охранных зонах электрических сетей, принадлежащих филиалу ПАО "Россети Сибирь""Красноярскэнерго" без предварительного согласования;  

 Запрещается самовольное изменение схемы электроснабжения и увеличение нагрузки сверх разрешенной.  

 Указанный в настоящих технических условиях номер опоры ПАО "Россети Сибирь" на момент заключения договора о технологическом присоединении является условной и окончательно фиксируется в документах о технологическом присоединении (акт о технологическом присоединении), что не требует внесения изменений в данные технические условия для последующего осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям.  

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.  

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.  

Согласно платежному поручению № 1393 от 26.11.2024 истец осуществил в пользу ответчика перевод денежных средств на сумму 77 872,49 руб. со следующим назначением  

платежа: «Оплата по счету № 1600011924 от 19.11.2024г. за технологическое присоединение по договору № 20.2400.12972.24. В том числе НДС 20%, 12978.75 руб.».  

Как указывает истец, на дату подачи настоящего искового заявления ответчиком не осуществлены мероприятия по осуществлению технологического присоединения, что явилось основанием для обращения истца в суд.  

Ответчиком в материалы дела отзыв на исковое заявление не представлен, какие-либо возражения не заявлены.  

Необходимость выполнения требуемых мероприятий, их сроки и стоимость должны учитываться ПАО «Россети Сибирь» при осуществлении своей деятельности как профессиональным участником рынка оказания услуг по осуществлению технологического присоединения.  

Срок выполнения мероприятий составляет 6 месяцев со дня заключения договора № 20.2400.12972.24 от «19» ноября 2024г. (пункт 5); данный срок соответствует закону, сторонами не продлевался. Каких-либо препятствий по выполнению технических условий и договора истцом не осуществлялось; доказательства обратного не представлены.  

Технические условия действовали с момента заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.12972.24 от «19» ноября 2024г., а также действуют в настоящее время, поэтому должны исполняться сторонами.  

При таких обстоятельствах обоснованным является требование истца об обязании ответчику в течение 1 (одного) месяца со дня вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.12972.24 от «19» ноября 2024г., выполнив предусмотренные пунктом 10.1. Технических условий № 8000641329 следующие организационные мероприятия:  

- обеспечение возможности действиями Заявителя осуществить фактическое присоединение объектов Заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами Заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке на Объекте: "Складское здание/помещение", расположен (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, городское поселение поселок Емельяново, 

<

...> земельный участок 177, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010106:297;  

- осуществить мероприятия выполнения требований по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" для электроснабжения объекта Заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;  

- осуществить строительство ЛЭП-10(6) кВ от точки, указанной в пункте № 7 ТУ № 8000641329, до проектируемой ТП 10(6) кВ (п.10.2.3.), протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом;  

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 10(6) кВ Тип и место установки разъединителя определить проектом;  

- осуществить строительство ТП 10(6) кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов определить проектом;  

- осуществить строительство ЛЭП 0,4 кВ от новой ТП до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной  

правоустанавливающими документами Заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом;  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).  

В данной части исковые требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.  

В соответствии со статьями 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться пеней, которой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

В силу статьи 331 ГК РФ соглашение о пени должно быть совершено в письменной форме.  

Согласно пункту 17 сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.  

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.  

Поскольку ответчик нарушил предусмотренный договором срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения обязательств по договору за период с 27.05.2025 по 15.08.2025 в размере 15 769,18 руб., а также неустойку за нарушение сроков выполнения обязательств по договору за период с 16.08.2025 по день фактического исполнения обязательств из расчета 0,25% общего размера платы за каждый день просрочки.  

Расчет является верным, поскольку произведен истцом, исходя из размера пени, предусмотренного пунктом 17 договора № 20.2400.12972.24 от «19» ноября 2024г.  

При этом, судом произведен расчет неустойки по дату вынесения резолютивной части решения по настоящему делу (20.10.2025), соответственно за период с 27.05.2025 по 20.10.2025 из расчета 77 872,49 руб. * 0,25 % * 147 дней размер неустойки составил 28 618,14 руб.  

Арифметическая правильность расчета истца не оспаривалась ответчиком при рассмотрении дела.  

Ответчиком контррасчет неустойки в материалы дела не представлен, как и доказательства частичной или полной оплаты заявленных ко взысканию пени, ходатайство об уменьшении размера пени по правилам статьи 333 ГК РФ не заявлено.  

Поскольку доказательства оплаты неустойки в сумме 28 618,14 руб. в материалы дела не представлены, требование истца о взыскании с ответчика неустойки в указанной сумме является обоснованным и подлежит удовлетворению в полном объеме. Также поскольку фактическое исполнение обязательств не исполнено ответчиком, также подлежит удовлетворению в полном объеме требование истца о взыскании с ответчика неустойки за  

нарушение сроков выполнения обязательств по договору за период с 21.10.2025 – неустойку по день фактического исполнения обязательств из расчета 0,25% общего размера платы (77 872,49 руб.) за каждый день просрочки.  

При присуждении ответчику пени по день фактического исполнения обязательств суд исходит из того, что положения статей 330, 395, 809 ГК РФ позволяют истцу требовать присуждения неустойки или иных процентов по день фактического исполнения обязательства.  

Аналогичная правовая позиция изложена в пункте 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 22 от 04.04.2014, который является действующим, несмотря на упразднение Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункт 13) пункта 2 указанного Постановления, что означает лишь отказ от «автоматизма» и безусловности начисления процентов, неустойки, поскольку прочие положения сохранены.  

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика судебной неустойки на случай неисполнения настоящего решения суда в размере 5 000 рублей за каждый календарный день неисполнения настоящего решения суда в части исполнения обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям, которая подлежит начислению, начиная с 31-го дня с момента вступления настоящего решения суда в законную силу по день фактического исполнения решения суда в названной части.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).  

При этом оплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (пункт 2 статьи 308.3 ГК РФ).  

Исходя из пункта 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).  

По смыслу статей 308.3, 330 ГК РФ, судебная неустойка направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления неблагоприятных материальных последствий. В данном случае следует учитывать обеспечительную функцию неустойки как инструмент правового воздействия на участников гражданского оборота.  

В пунктах 31, 32 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 24.03.2016 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.  

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ). Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.  

Размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение.  

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.  

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).  

Суд определяет момент, с которого соответствующие денежные средства подлежат начислению. Так, возможно начисление денежных средств с момента вступления решения в законную силу либо по истечении определенного судом срока, который необходим для добровольного исполнения судебного акта (часть 2 статьи 174 АПК РФ).  

Исходя из общих принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, необходимости соблюдения баланса интересов сторон, а также конкретных обстоятельств дела, суд считает обоснованным присуждение судебной неустойки в размере 2 500 руб. за каждый день неисполнения решения суда в части осуществления технологического присоединения к электрическим сетям по день фактического исполнения.  

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Истцом уплачено 60 000 руб. государственной пошлины, что подтверждается платежным поручением от 08.08.2025 № 2360.  

С учётом результатов рассмотрения спора, расходы по уплате госпошлины в сумме 60 000 руб. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение 1 (одного) месяца со дня вступления в законную силу решения суда исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.12972.24 от «19» ноября 2024г.,  

выполнив предусмотренные пунктом 10.1. Технических условий № 8000641329 следующие организационные мероприятия:  

- обеспечение возможности действиями Заявителя осуществить фактическое присоединение объектов Заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами Заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке на Объекте: "Складское здание/помещение", расположен (который будет располагаться) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, городское поселение поселок Емельяново, 

<

...> земельный участок 177, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010106:297;  

- осуществить мероприятия выполнения требований по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" для электроснабжения объекта Заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;  

- осуществить строительство ЛЭП-10(6) кВ от точки, указанной в пункте № 7 ТУ № 8000641329, до проектируемой ТП 10(6) кВ (п.10.2.3.), протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом;  

- определить проектом необходимость установки укоса и линейного разъединителя на отпаечной опоре ЛЭП 10(6) кВ Тип и место установки разъединителя определить проектом;  

- осуществить строительство ТП 10(6) кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов определить проектом;  

- осуществить строительство ЛЭП 0,4 кВ от новой ТП до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами Заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом;  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Стоворот" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск неустойку за неисполнение обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.12972.24 от «19» ноября 2024г. в сумме 28 618,14 руб. за период с 27.05.2025 по 20.10.2025 (77 872,49 руб. * 0,25 % * 147 дней)); с 21.10.2025 – неустойку по день фактического исполнения обязательств из расчета 0,25% общего размера платы (77 872,49 руб.) за каждый день просрочки, а также 60 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, несение которых подтверждается платежным поручением от 08.08.2025 № 2360.  

В случае неисполнения решения взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск, в пользу общества с ограниченной ответственностью "Стоворот" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), г. Красноярск 2 500 руб. судебной неустойки за каждый день просрочки исполнения решения суда по день его фактического исполнения.  

Во взыскании судебной неустойки в остальной сумме отказать.  

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.  

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.  

Судья М.Ю. Винокурова