ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-51712/23-141-402

г. Москва

19 мая 2023 года

Резолютивная часть решения изготовлена 05.05.2023г. 

Решение в полном объеме изготовлено 19.05.2023г.

Арбитражный суд в составе судьи Авагимяна А.Г.

рассмотрел дело по иску ООО «Тератек проект» (ИНН 

<

***>)

к ТСЖ «Фантазия» (ИНН 

<

***>)

о взыскании 676 756 руб. 00 коп.

УСТАНОВИЛ:

ООО «Тератек проект» обратилось с исковым заявлением к ТСЖ «Фантазия» о взыскании 676 756руб. 00коп. задолженности по договору №260320-001 от 08.07.2020г. Кроме того, истец просит взыскать 70 000руб. 00коп. расходов на оплату услуг представителя.

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом установлены основания, предусмотренные статьей 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 21.03.2023г. исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Копия определения Арбитражного суда г. Москвы направлена лицам, участвующим в деле, а также размещена на официальном сайте https://kad.arbitr.ru/.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

Истец ходатайствовал о рассмотрении дела по общим правилам искового производства.

В соответствии с ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд выносит определение о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам административного судопроизводства, если в ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства удовлетворено ходатайство третьего лица о вступлении в дело, принят встречный иск, который не может быть рассмотрен по правилам, установленным настоящей главой, либо если суд, в том числе по ходатайству одной из сторон, пришел к выводу о том, что:

1) порядок упрощенного производства может привести к разглашению государственной тайны; 

2) необходимо провести осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;

3) заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц; 

4) рассмотрение дела в порядке упрощенного производства не соответствует целям эффективного правосудия, в том числе в случае признания судом необходимым выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства.

Согласно п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 №10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, указанные в части четвертой статьи 232.2 ГПК РФ, части 5 статьи 227 АПК РФ (например, необходимость выяснения дополнительных обстоятельств или исследования дополнительных доказательств), могут быть выявлены как при принятии искового заявления (заявления) к производству, так и в ходе рассмотрения этого дела.

Указанное определение может быть вынесено в том числе по результатам рассмотрения судом ходатайства участвующего в деле лица, указавшего на наличие одного из обстоятельств, предусмотренных пунктами 1 и 2 части четвертой статьи 232.2 ГПК РФ, пунктами 1 - 3 части 5 статьи 227 АПК РФ. Данное ходатайство может быть подано до окончания рассмотрения дела по существу.

В определении о рассмотрении дела по общим правилам искового производства или по правилам производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, должно содержаться обоснование вывода суда о невозможности рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Суд, рассмотрев заявленное ходатайство, не установил наличия предусмотренных ч. 5 ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований для рассмотрения дела по общим правилам искового производства. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не предусматривает обязательности перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства в случае заявления об этом лица, участвующего в деле, считающего, что данное дело должно быть рассмотрено в этом порядке, а не в порядке упрощенного производства.

Истец ходатайствовал об истребовании у Главного Управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве, а также у Управления по Юго-Восточному Административному округу Главного Управления МЧС России по городу Москве и у ТСЖ «ФАНТАЗИЯ» следующих документов.

1. Решения Главного Управления Министерства РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по г. Москве, принятого по итогам проверки КНМ № 77220061000100864351 в отношении ТСЖ «ФАНТАЗИЯ» ИНН 

<

***> (109341, 

<

...>); 

2. техническая документация ТСЖ «ФАНТАЗИЯ» (109341, 

<

...>), связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты. Предоставленные ТСЖ «ФАНТАЗИЯ» в ходе проверки КНМ № 77220061000100864351 в отношении ТСЖ «ФАНТАЗИЯ» ИНН 

<

***>; 

3. техническая документация ТСЖ «ФАНТАЗИЯ» (109341, 

<

...>), наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности. Предоставленные ТСЖ «ФАНТАЗИЯ» в ходе проверки КНМ № 77220061000100864351 в отношении ТСЖ «ФАНТАЗИЯ» ИНН 

<

***>; 

4. лицензию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте (ТСЖ «ФАНТАЗИЯ» по адресу: 109341, 

<

...>) надзора работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности. Предоставленные ТСЖ «ФАНТАЗИЯ» в ходе проверки КНМ № 77220061000100864351 в отношении ТСЖ «ФАНТАЗИЯ» ИНН 

<

***>;

4. сертификаты соответствия (декларации соответствия) на противопожарные двери, люки, окна, ворота и др., а также на отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации на объекте (ТСЖ «ФАНТАЗИЯ» по адресу: 109341, 

<

...>). Предоставленные ТСЖ «ФАНТАЗИЯ» в ходе проверки КНМ № 77220061000100864351 в отношении ТСЖ «ФАНТАЗИЯ» ИНН 

<

***>.

Согласно абз. 2 ч. 4 ст. 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле, обращающееся в арбитражный суд с ходатайством об истребовании доказательства, должно обозначить доказательство, указать, какие обстоятельства могут быть установлены этим доказательством, назвать причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. Таким образом, статья 66 АПК РФ закрепляет процессуальный порядок, при котором возможно удовлетворение ходатайства об истребовании доказательств. Так, необходимым условием является то, что податель данного ходатайства должен обосновать, какие именно доказательства подлежат истребованию, какие обстоятельства могут быть установлены этими доказательствами; доказать, что у данного лица отсутствует возможность самостоятельно получить испрашиваемые доказательства. 

Проанализировав материалы дела, суд пришел к выводу о несоблюдении истцом  вышеперечисленных требований, в связи с чем основания для удовлетворения ходатайства об истребовании доказательств отсутствуют.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока.

Резолютивная часть судебного акта размещена на официальном сайте арбитражного суда города Москвы. 

В соответствии с ч. 2 ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

В связи с поступлением от сторон заявлений о составлении мотивированного решения, суд составляет мотивированное решение по делу.

Исследовав и оценив письменные доказательства, суд приходит к выводу, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 08.07.2020г. между истцом и ответчиком заключен договор №260320-001.

В соответствии с вышеуказанным договором истец обязался выполнять работы, а ответчик принимать и оплачивать их.

В порядке ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

Истец полагает, что он свои обязательства по договору выполнил надлежащим образом, о чем свидетельствуют акт о приемке выполненных работ №1, акт о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 24.10.2022г., универсальные передаточные документы №17 и №222.

В порядке ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Так, истец считает, что задолженность ответчика составила 676 756руб. 00коп. и до настоящего времени им не погашена. 

Вместе с тем требования истца не подлежат удовлетворению на основании следующего.

Согласно п. 2.1. договора истец выполняет работы согласно локальному сметному расчету (приложение №1). Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора, получения аванса, предусмотренного п. 3.3. договора, получения доступа к месту проведения работ и технической документации, передачи ответчиком оборудования, которое необходимо для проведения предусмотренных договором работ. Передача оборудования для выполнения работ оформляется актом о передаче оборудования, который подписывается уполномоченными представителями сторон.

Пунктом 2.2. договора предусмотрено, что срок выполнения работ – 45 календарных дней после начала работ при условии полной готовности строительной площадки для осуществления монтажа и пуско-наладки системы.

Ответчик перечислил истцу аванс платежными поручениями №2 от 18.08.2020г. и №3 от 31.08.2020г., приобщенных к материалам дела. 

Письмом от 29.09.2022г. (получено истцом 13.10.2022г.) ответчик уведомил истца о том, что работы не выполнены в срок, а также что работы производились с нарушением, в связи с чем уведомил истца о расторжении договора.

В силу п. 2 ст. 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Так, акт о приемке выполненных работ №1, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 датированы 24.10.2022г., направлены ответчику 28.10.2022г., то есть после одностороннего отказа ответчика от договора. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000г. №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Возникновение обязательственного правоотношения по оплате работ, закон связывает с фактами их выполнения, сдачи и принятия результата работ заказчиком (ответчиком).

В данном случае, доказательства надлежащей сдачи результата работ в период действия договора отсутствуют в материалах дела, в связи с чем суд приходит к выводу, что истец не выполнил работы в сроки, установленные договором. Доказательств наличия обстоятельств, препятствующих началу выполнения работ, истцом в материалы дела также не представлено. 

Поскольку акты по форме КС-2 направлены ответчику после принятия им решения об отказе от исполнения договора и истечения срока выполнения работ, а истцом заявлены исковые требования о взыскании задолженности по договору, то суд приходит к выводу, что представленные истцом доказательства не могут подтверждать факт выполнения обязательств по договору в период его действия.

Исходя из норм ст.ст. 8, 9 АПК РФ, стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих  требований и возражений.

В соответствии со ст. 71 АПК РФ  доказательство признается арбитражным  судом достоверным, если в результате его проверки и исследовании выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Арбитражным процессуальным законодательством установлены критерии оценки доказательств в качестве подтверждающих фактов наличия тех или иных обстоятельств. Доказательства, на основании которых лицо, участвующее в деле, обосновывает свои требования и возражения должны быть допустимыми, относимыми и достаточными.

Признак допустимости доказательств предусмотрен положениями ст. 68 АПК РФ. В связи с изложенным, суд считает утверждения истца о выполнении работ в соответствии с условиями договора, голословными и документально не доказанными. 

При вышеуказанных обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для удовлетворения требования о взыскании задолженности.

Учитывая, что в удовлетворении исковых требований истцу отказано полностью, то оснований для удовлетворения требования о взыскании расходов на оплату услуг представителя у суда не имеется.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца в порядке ст. 110 АПК РФ в связи с отказом в удовлетворении заявленных исковых требований.

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 702, 715, 720 ГК РФ, ст. ст. 65, 66, 106, 110, 167-170, 176, 229 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства ООО «Тератек проект» о рассмотрении дела по общим правилам искового производства, отказать. 

В удовлетворении исковых требований ООО «Тератек проект» (ИНН 

<

***>) о взыскании с ТСЖ «Фантазия» (ИНН 

<

***>) задолженности по договору №260320-001 от 08.07.2020г. в размере 676 756руб. 00коп. и расходов на оплату услуг представителя в размере 70 000руб. 00коп., отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

СУДЬЯ:                                                                                  А.Г. Авагимян