Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) 

улица Курашова, дом 28, бокс 8, г. Якутск, 677980, www.yakutsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А58-1422/2023

20 апреля 2023 года

город Якутск

 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Васильевой А.Б.  рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению  сельскохозяйственного потребительского (перерабатывающий) кооператива "Ханалас-Ас"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании  278 813,60 руб.,  

без вызова сторон. 

Суд, проверив расчет неустойки, признает его неверным в части периода  просрочки.  

Согласно пункту 7.3 договора за нарушение срока выполнения работ подрядчик  уплачивает заказчику пени из расчета 0,1 % от суммы договора за каждый день  просрочки.  

Истец произвел расчет неустойки по 22.02.2023. 

Между тем, договор расторгнут сторонами соглашением от 26.05.2022.  

Согласно пункту 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6  июня 2014 г. N 35 "О последствиях расторжения договора" разрешая споры, связанные с  расторжением договоров, суды должны иметь в виду, что по смыслу пункта 2 статьи 453  Гражданского кодекса Российской Федерации при расторжении договора прекращается  обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора  (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять работы по договору подряда,  выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому неустойка, установленная  на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, начисляется  до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора.  

 На основании изложенного, судом произведен следующий расчет до даты  расторжения договора.  

Расчёт процентов по задолженности, возникшей 01.04.2022 Период просрочки 

Задолженность Формула Неустойка  

с по дней 

209 950,00 01.04.2022 25.05.2022 55 209 950,00 × 55 × 0.1% 11 547,25 р.  

Итого: 11 547,25 руб. 

Сумма основного долга: 209 950,00 руб. Сумма процентов по всем задолженностям: 11 547,25 руб. 

При таких обстоятельствах, исковые требования подлежат частичному  удовлетворению в сумме 221 497 руб. 25 коп., в том числе основной долг в размере  209 950 руб., неустойка в размере 11 547 руб. 25 коп. за период с 01.04.2022 по 25.05.2022.  

Довод ответчика о том, что в период с 01.04.2022 по 01.10.2022 неустойка не  подлежит начислению в соответствии с Постановлением Правительства Российской  Федерации от 28.03.2022 № 497, суд отклоняет, поскольку действие указанного моратория  на рассматриваемый спор не распространяется.  

На срок действия моратория по обязательствам должников, на которых он  распространяется, не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции  за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных  платежей, за исключением текущих платежей (пп. 2 п. 3 ст. 9.1 Федерального закона от  26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 7 Постановления Пленума  Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений  статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности  (банкротстве)».  

Однако невыполнение работ по договору подряда в установленные сроки не  является денежным обязательством, а неустойка, начисляемая в качестве меры  ответственности за нарушение установленных сроков, не является финансовой санкцией  за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства.  

В данном случае неустойка взыскивается за нарушение обязательств неденежного  характера - нарушение сроков выполнения работ.  

Расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат распределению  пропорционально удовлетворенным требованиям согласно ст. 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  сельскохозяйственного потребительского (перерабатывающий) кооператива "Ханалас-Ас"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 221 497 руб. 25 коп. задолженности по договору  от 24.02.2022 № 26/01, в том числе основной долг в размере 209 950 руб., неустойка в  размере 11 547 руб. 25 коп. за период с 01.04.2022 по 25.05.2022; а также расходы по  уплате государственной пошлины 6813 руб.  

В остальной части иска отказать.  Решение подлежит немедленному исполнению. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвертый арбитражный  апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его принятия.  

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Саха  (Якутия).  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  суда в сети «Интернет».  

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе  могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

 Судья А.Б. Васильева 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России

Официальный сайт Арбитражного суда Республики Саха (Якутия): www.yakutsk.arbitr.ru 

Дата 21.03.2023 21:47:00(информаКцоимяу  воы ддваниаж Веансиилиь едвае лАан,н сап Броарвисоочвннаые материалы и др.).