126/2018-146104(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-14697/2018

г. Хабаровск

22 октября 2018 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Никитиной О.П.  при ведении протокола помощником судьи Бендик А.А,  

рассмотрел в судебном заседании дело по иску Муниципального  казенного учреждения «Управление капитального строительства города  Комсомольска-на-Амуре» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>, место  нахождения: 681000, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Импульс» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680007, 

<

...>)  

об обязании безвозмездно устранить недостатки работ по контракту № 1  от 25.01.2016г.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Импульс» в  течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу  безвозмездно устранить недостатки строительно-монтажных работ по  контракту № 1 от 25.01.2016г. на выполнение работ по строительству объекта  «Жилой дом № 54 по ул. Пионерской в микрорайоне № 16 в г. Комсомольске- 

на-Амуре с соблюдением требований проектной документации (шифр  06/10/14п), СП 78.13330.2012. СП 71.13330.2017, а именно:  

- заменить штукатурный слой в местах повреждения с последующей  окраской фасада здания в осях 1-9/ А-Г на всю высоту здания в соответствии  с проектом шифр 06/10/14 п-АР листы 7-8;  

- выполнить демонтаж покрытия проезжей части в местах провала  основания на пересечении ул. Пионерской (восстановление благоустройства  по трассе ХВС). Осуществить отсыпку подстилающего слоя песчаною  гравийной смесью до проектной отметки с уплотнением. Заменить дорожный  бортовой камень. Восстановить дорожное покрытие в соответствии с  проектом шифр 06/10/14 п-ГП лист 6;  

- в местах разрушение асфальтобетонного покрытия на въезде со  стороны ул. Красноармейской во двор жилого дома № 54 по ул. Пионерской  выполнить демонтаж асфальтобетонного покрытия с последующим  восстановлением в проектном варианте проект шифр 06/10/14 п-ГП лист 6  

- выполнить демонтаж асфальтобетонного покрытия в местах  прохождения теплотрассы от тепловой камеры до ввода в здание жилого  дома № 54 по ул. Пионерской г. Комсомольска-на-Амуре. Осуществить  отсыпку подстилающего слоя из ПГС до проектной отметки с уплотнением.  Восстановить дорожный бортовой камень. Восстановить дорожное покрытие  проезда и тротуара. Работы выполнить в соответствии с проектной  документацией проект шифр 06/10/14 п-ГП лист 6;  

- выполнить демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуара со  стороны проезда жилого дома № 54 ул. Пионерской г. Комсомольска-на- Амуре с последующим устройством асфальтобетонного покрытия в  соответствии с проектной документацией шифр проект 06/10/14 п-ГП лист 6.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Импульс»  доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

Судья Никитина О.П.