ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Батюшкова, д.12, г. Вологда, 160001

http://14aas.arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А52-1217/2016

г. Вологда

23 марта 2017 года

 

Резолютивная часть постановления объявлена 16 марта 2017 года.

В полном объеме постановление изготовлено 23 марта 2017 года.

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Зайцевой А.Я., судей Романовой А.В. и Шадриной А.Н. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Ленстрой-ОЛ» на решение Арбитражного суда Псковской области от 14 ноября 2016 года по делу                       № А52-1217/2016 (судья Семикин Д.С.),

установил:

муниципальное образование «город Псков» в лице Управления строительства и капитального ремонта администрации города Пскова (место нахождения: 180000, 

<

...>; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; далее – Управление) обратилось в Арбитражный суд Псковской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Ленстрой-ОЛ» (место нахождения: 191123, Санкт-Петербург, улица Чайковского, дом 36, офис 26; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>; далее – Общество) о взыскании 141 243 руб. 50 коп. штрафа и возложении обязанности в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу исполнить заключенный с Управлением муниципальный контракт от 27.05.2015 № 89 по капитальному ремонту жилого дома № 15 по улице Звездной в городе Пскове, путем выполнения следующих работ (с учетом уточнения, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)): в части капитального ремонта канализации: выполнить разборку трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм в количестве 21,2 м; выполнить ремонт отмостки, бетонной толщиной 8 см из бетона тяжелого крупностью заполнителя 20 мм, класс В7,5 (Ml00), в количестве 3,2 кв.м; выполнить разработку грунта в траншеях, группа грунтов 2, в количестве 34 м грунта; выполнить разработку грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, в количестве 5 м грунта; выполнить устройство основания под трубопроводы песчаного толщиной 15 см в количестве 2,3 куб.м; выполнить прокладку трубопроводов канализации из пластиковых труб канализационных для наружных работ, диаметром: 110 мм (выпуски) длиной 21,2 м (установить трубу из поливинилхлорида для наружных систем канализации 110 x 3,0 x 1000 мм в количестве 22 шт), установить угольник 90° полиэтиленовый диаметром ПО мм в количестве 8 шт, установить отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм в количестве 4 шт; выполнить засыпку траншей песком природным для строительных работ средним в количестве 2,3 куб.м грунта; выполнить засыпку траншей грунтом в количестве 34,8 куб.м грунта; выполнить врезку в действующие внутренние сети трубопроводов, канализации диаметром 100 мм в количестве 4 врезок; выполнить заделку отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м в количестве 4 куб.м; выполнить заделку сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм в количестве 4 сальника; выполнить разборку трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм в количестве 310 м трубопровода; выполнить разборку трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм в количестве 247 м трубопровода; выполнить прокладку трубопроводов канализации из труб канализационных ПВХ диаметром 110 мм, длиной 310 м; установить трубу из поливинилхлорида (ПВХ) для внутренних систем канализации 110 x 2,2 x 1000 мм в количестве 310 шт; установить соединительную арматуру трубопроводов: тройник диаметром ПО мм в количестве 30 шт, угольник 90°, диаметром: ПО мм в количестве 70 шт, установить ревизию полиэтиленовую размером 100 мм количестве 170 шт; выполнить прокладку трубопроводов канализации из труб канализационных ПВХ диаметром 110 мм длиной 247 м; установить трубу из поливинилхлорида для внутренних систем канализации 50 x 1,8 x 1000 мм в количестве 247 м; установить соединительную арматуру трубопроводов: тройник прямой диаметром 50 мм в количестве 170 шт, угольник прямой диаметром 50 мм в количестве 370 шт, установить переход 110 x 50 в количестве 30 шт; установить крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты в количестве 77,98 кг; установить крестовину канализационную полиэтиленовую двухплоскостную размером 110 x 110 x 50 мм в количестве 100 шт; выполнить демонтаж и монтаж унитазов (без стоимости унитазов) в количестве 170 шт, установить гофру для унитаза в количестве 170 шт; выполнить пробивку в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 кв.см в количестве 170 отверстий; выполнить заделку отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 кв.м в количестве 0,2 куб.м; выполнить погрузку и вывоз мусора строительного в количестве 5,9 тн;  в части капитального ремонта холодного водоснабжения: выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм в количестве 53,8 м; выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм в количестве 42,5 м; выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм в количестве 112,7 м; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб P№10/125 наружным диаметром 125 мм длиной 10,32 м; при выполнении прокладки использовать трубу из пропилена PN10/125 длиной 10,24 м; установить тройник полипропиленовый переходной 110 x 90 x 110мм в количестве 6 шт, установить тройник полипропиленовый переходной 125 x 25 x 125 мм в количестве 7 шт, установить тройник полипропиленовый соединительный диаметром 125 мм в количестве 1 шт, установить муфту полипропиленовую комбинированную, с наружной резьбой, под ключ диаметром 110 x 100 в количестве 1 шт, установить муфту полипропиленовую комбинированную, с наружной резьбой, разъемную диаметром 110 x 100 в количестве 1 шт; установить     угольник 90°, полипропиленовый диаметром 75 мм в количестве 2 шт, установить тройник полипропиленовый переходной диаметром 75 x 32 x 75 мм в количестве 2 шт, установить тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 x 25 x 75 мм в количеств 2 шт; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN10/50 наружным диаметром 50 мм длиной 1,99 м; при выполнении прокладки использовать трубу из пропилена PN10/50 длиной 1,88 м, установить угольник 90°, полипропиленовый 050 мм в количестве 1 шт, установить тройник полипропиленовый переходной диаметром 50 x 25 x 50 мм в количестве 5 шт; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN 10/40 наружным диаметром 40 мм длиной 0,5 м; при выполнении прокладки использовать трубу из пропилена PN10/40 длиной 0,47 м, установить тройник полипропиленовый переходной диаметром 40 x 25 x 40 мм в количестве 2 шт; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN10/32 наружным диаметром 32 мм длиной 20,6 м; при выполнении прокладки использовать трубу из пропилена PN10/32 длиной 19,32 м, установить тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм в количестве 16 шт, установить муфту полипропиленовую комбинированную, с наружной резьбой, под ключ диаметром 32 x 1 в количестве 13 шт, установить муфту полипропиленовую комбинированную, с наружной резьбой, разъемную диаметром 32 x 1 количестве 16 шт; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN10/25 наружным диаметром 25 мм длиной 67,9 м; при выполнении прокладки использовать трубу из пропилена PN10/25 длиной 63,08 м; установить тройник полипропиленовый переходной диаметром 25 x 20 x 25 мм в количестве 13 шт, установить угольник 90°, полипропиленовый диаметром 25 мм в количестве 32 шт, установить муфту полипропиленовую комбинированную, с наружной резьбой, под ключ диаметром 25 x 3/4 в количестве 32 шт, установить муфту полипропиленовую комбинированную, с наружной резьбой, разъемную диаметром 25 x 3/4 в количестве 17 шт, установить кран шаровый муфтовый для воды диаметром 20 мм, тип в/в в количестве 16 шт, установить кран шаровый муфтовый для воды диаметром  15 мм, тип в/в в количестве 29 шт, установить крепления для проложенных трубопроводов в количестве 13,64 кг; осуществить присоединение к действующим внутренним сетям трубопроводов водоснабжения диаметром 100 мм в количестве 1 врезки; осуществить присоединение к действующим внутренним сетям трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм в количестве 21 врезки; осуществить присоединение к действующим внутренним сетям трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм в количестве 17 врезок; выполнить изоляцию трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена тип 1 в количестве 217 м; при выполнении изоляции использовать трубки внутр. диаметр 125 мм, толщина 13 мм в количестве 45,54 м, трубки внутр. диаметр 76 мм, толщина 13 мм в количестве 13,64 м, трубки внутр. диаметр 54 мм, толщина 13 мм в количестве 46,75м, трубки внутр. диаметр 42 мм, толщина 13 мм в количестве 13,42 м, трубки внутр. диаметр 35 мм, толщина 13 мм в количестве 44,66 м, трубки внутр. диаметр 25 мм, толщина 13 мм в количестве 74,69 м; выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм в количестве 435,85 м; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN10/25 наружным диаметром 25 мм длиной                 274,74 м; при выполнении прокладки использовать трубу из пропилена PN10/25 длиной 255,2 м, установить тройник полипропиленовый переходной диаметром 25 x 20 x 25 мм в количестве 59 шт, установить угольник 90°, полипропиленовый диаметром 25 мм в количестве 13 шт, установить кран шаровый муфтовый диаметром 15 мм, тип в количестве 155 шт; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN10/32 наружным диаметром 32 мм длиной  161,11 м; при выполнении прокладки использовать трубу из пропилена PN10/32 длиной 151.1 м, установить тройник полипропиленовый переходной диаметром 32 x 20 x 32 мм в количестве 97 шт, установить угольник 90°, полипропиленовый диаметром 32 мм в количестве 21 шт, установить крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты в количестве 61,02 кг; выполнить изоляцию трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена тип 1 в количестве 476 м; при выполнении изоляции использовать: трубки внутр. диаметр 35 мм, толщина 13 мм в количестве                323,3 м, трубки внутр. диаметр 25 мм, толщина 13 мм в количестве 200,2 м; осуществить присоединение к действующим внутренним сетям трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм в количестве 105 врезок; осуществить присоединение к действующим внутренним сетям трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм в количестве 65 врезок; выполнить пробивку проемов в конструкциях из бетона в количестве 0,45 куб.м; выполнить заделку отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м в количестве 3,62 м заделки; выполнить погрузку и вывоз мусора строительного в количестве 2,22 тн; в части капитального ремонта горячего водоснабжения: выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм в количестве 90 м; выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм в количестве 90 м; выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм в количестве 645 м; выполнить смену полотенцесушителей в количестве 91 прибора;  при выполнении работ установить полотенцесушитель из нержавеющей стали внутренним диаметром 32 мм в количестве 91 шт, установить переходник диаметром 32 х 1 в количестве 182 шт, установить тройник размером 1 в количестве 182 шт; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из труб из полипропилена PN20/110 наружным диаметром ПО мм, длиной 23,74 м; при выполнении прокладки использовать трубу из пропилена PN 20/110 длиной 23,65 м; установить крепления для трубопроводов:   кронштейны, планки, хомуты в количестве 3,32 кг; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из труб из полипропилена PN20/63 наружным диаметром 63 мм длиной 29,46 м; при выполнении прокладки использовать трубу из пропилена PN20/63 длиной 27,87 м, установить крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты в количестве 4,12 кг, выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из труб из полипропилена PN 20/40 наружным диаметром 40 мм длиной 12,27 м; при выполнении прокладки использовать трубу из пропилена PN20/40 длиной                    11,5 м, установить крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты в количестве 1,72 кг; установить краны шаровые муфтовые (Valtec) для воды диаметром 32 мм в количестве 4 шт; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из труб из полипропилена PN20/32 наружным диаметром 32 мм длиной 164,92 м;  при выполнении прокладки использовать трубу из пропилена PN 20/32 длиной 154,7 м, установить крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты в количестве 23,09 кг; установить краны шаровые муфтовые (Valtec) для воды диаметром 25 мм в количестве 10 шт; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из труб из полипропилена PN20/25 наружным диаметром 25 мм длиной 246,95 м; при выполнении прокладки использовать трубу из пропилена PN20/25, длиной 229,4 м, установить крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты в количестве 34,57 кг; установить краны шаровые муфтовые (Valtec) для воды диаметром 20 мм. в количестве 10 шт; выполнить установку кранов воздушных в количестве 10 комплектов;  выполнить установку клапана балансировочного диаметром 15 мм (Danfoss MSV-M) в количестве 20 шт; выполнить установку воздухоотводчиков автоматических в количестве 20 шт; выполнить изоляцию трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена тип 2 в количестве 825 м; при выполнении изоляции использовать трубки внутр. диаметр 89 мм, толщина 32 мм в количестве 99 м, трубки внутр. диаметр 60 мм, толщина 32 мм в количестве 99 м, трубки внутр. диаметр 42 мм, толщина 19 мм в количестве 93,5 м, трубки внутр. диаметр 35 мм, толщина 19 мм в количестве 308 м, трубки внутр. диаметр 28 мм, толщина 19 мм в количестве 308 м; выполнить заделку отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 кв.м в количестве 0,6 куб.м; выполнить ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм в количестве 6 кв.м отремонтированной поверхности; выполнить окраску клеевыми составами улучшенную в количестве 6 кв.м поверхности; выполнить погрузку и вывоз мусора строительного в количестве 2,2 т; выполнить    прокладку    трубопроводов    водоснабжения    из    стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм в количестве 2,5 м; выполнить    прокладку    трубопроводов    водоснабжения    из    стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм в количестве 2 м; установить крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты в количестве 0,63 кг; провести гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм в количестве 2,5 м трубопровода; провести гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм количестве 2 м трубопровода; установить металлический дверной блок в готовый проем, величиной 1,6 кв.м; при производстве работ по установке металлического дверного блока использовать дверь размером 800x2000мм в количестве 1 шт;  установить решетку жалюзийную алюминиевую       вентиляционную размером 500 x 200 мм (АМН) в количестве 1 шт; выполнить прокладку трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм длиной 50 м, установить клапан канализационный HL 710,1 в количестве 1 шт; выполнить установку трапов диаметром 100 мм в количестве 1 комплекта: выполнить установку насосов канализационных с электродвигателем для отвода сточных вод с номинальной производительностью не менее  100 л/мин, мощностью 600 Вт        в количестве 1 шт, установить насос JEMIX STP- 100 в количестве 1 шт; выполнить монтаж клапана обратного приемного с сеткой фланцевого 16ч42р диаметром 100 мм в количестве 1 шт;  установить в щите с монтажной панелью: DIN-рейку металлическую оцинкованную длиной 300 мм в количестве 1 шт; шину алюминиевую 6x9мм в количестве 1 шт; клемные зажимы наборные в количестве 3 шт; выполнить монтаж выключателей автоматических «1ЕК» ВА47-29 IP 16А, характеристика С в количестве 1 шт; выполнить монтаж приборов, устанавливаемых в щитах и пультах, а именно тепловычислитель СПТ943,1 в количестве 1 шт; выполнить монтаж отдельно устанавливаемого блока питания в количестве 4 шт, а именно блок питания 220В/12В, 60 Вт в количестве 2 шт, блок питания 10 ВР220-24 Д, 220В/24В в количестве 2 шт; выполнить монтаж GSM модема в комплекте с блоком питания и антенной в количестве 1 шт; выполнить монтаж труб гибких гофрированных из самозатухающего  ПВХ-пластиката по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами в количестве 65 м, установить трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм в количестве 16,32 м, установить трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм в количестве 49,98 м, установить клипсы для крепежа гофротрубы диаметром 16 мм в количестве 28 шт, установить клипсы для крепежа гофротрубы диаметром 20 мм в количестве 8; выполнить затягивание провода в проложенные трубы длиной 65 м; при выполнении данной работы использовать провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 4 кв.мм длиной 24,48 м, использовать провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием, с числом жил - 3 и сечением 1,5 кв.мм длиной 41,82 м; выполнить затягивание провода в проложенные трубы длиной 105 м; при выполнении данной работы использовать провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием, с числом жил - 3 и сечением 1 кв.мм длиной 9,18 м; использовать кабель для систем охранно-пожарной сигнализации марки CQR САВ сигнальный, экранированный с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой сеч. 4 x 0,22 мм длиной 97,92 м; выполнить монтаж короба пластмассового шириной 25 x 30 мм количестве 10 м; выполнить монтаж провода силового для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 1 кв. мм в коробах в количестве 10 м.

Решением от 14.11.2016 суд удовлетворил исковые требования частично. Суд возложил на Общество обязанность в трехмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу исполнить заключенный с Управлением муниципальный контракт от 27.05.2015 № 89 по капитальному ремонту жилого дома № 15 по улице Звездной в городе Пскове, путем выполнения следующих работ: в части капитального ремонта канализации: выполнить разборку трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм в количестве 21,2 м; выполнить ремонт отмостки, бетонной толщиной 8 см из бетона тяжелого крупностью заполнителя 20 мм, класс В7,5 (M100), в количестве 3,2 кв.м; выполнить разработку грунта в траншеях, группа грунтов 2, в количестве 34 куб.м грунта;  выполнить разработку грунта в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1, в количестве 5 куб.м грунта; выполнить устройство основания под трубопроводы песчаного толщиной 15 см в количестве 2,3 куб.м; выполнить прокладку трубопроводов канализации из пластиковых труб канализационных для наружных работ, диаметром: 110 мм (выпуски) длиной 21,2 м (установить трубу из поливинилхлорида для наружных систем канализации 110 x 3,0 x 1000 мм в количестве 22 шт), установить угольник 90° полиэтиленовый диаметром 110 мм в количестве 8 шт, установить отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм в количестве 4 шт; выполнить засыпку траншей песком природным для строительных работ средним в количестве 2,3 куб.м грунта; выполнить засыпку траншей грунтом в количестве 34,8 куб.м грунта;  выполнить врезку в действующие внутренние сети трубопроводов, канализации диаметром 100 мм в количестве 4 врезок; выполнить заделку отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 кв.м в количестве 4 куб.м; выполнить заделку сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм в количестве 4 сальника; выполнить разборку трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм в количестве 310 м трубопровода; выполнить разборку трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм в количестве 247 м трубопровода;  выполнить   прокладку   трубопроводов   канализации   из   труб канализационных ПВХ диаметром 110 мм, длиной 310 м; установить трубу из поливинилхлорида (ПВХ) для внутренних систем канализации 110 x 2,2 x 1000 мм в количестве 310 шт; установить   соединительную   арматуру  трубопроводов:   тройник диаметром 110 мм в количестве 30 шт, угольник 90°, диаметром: 110 мм в количестве 70 шт, установить ревизию полиэтиленовую размером 100 мм количестве 170 шт; выполнить   прокладку   трубопроводов   канализации   из   труб канализационных ПВХ диаметром 110 мм длиной 247 м;  установить трубу из поливинилхлорида для внутренних систем канализации 50 x 1,8 x 1000 мм в количестве 247 м; установить соединительную арматуру трубопроводов: тройник прямой диаметром 50 мм в количестве 170 шт, угольник прямой диаметром 50 мм в количестве 370 шт, установить переход 110 x 50 в количестве 30 шт; установить крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты в количестве 77,98 кг, установить крестовину канализационную полиэтиленовую двухплоскостную размером 110 x 110 x 50 мм в количестве 100 шт; выполнить демонтаж и монтаж унитазов (без стоимости унитазов) в количестве 170 шт, установить гофру для унитаза в количестве 170 шт; выполнить пробивку в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 кв.см в количестве 170 отверстий; выполнить заделку отверстий, гнезд и  борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 кв.м в количестве 0,2 куб.м; выполнить погрузку и вывоз мусора строительного в количестве 5,9 тн; в части капитального ремонта холодного водоснабжения: выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм в количестве 53,8 м; выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм в количестве 42,5 м;  выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм в количестве 112,7 м;    выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN10/125 наружным диаметром 125 мм длиной 10,32 м; при выполнении прокладки использовать трубу из пропилена PN10/125 длиной 10,24 м; установить тройник полипропиленовый переходной 110 x 90 x 110 мм в количестве 6 шт, установить тройник полипропиленовый переходной 125 x 25 x 125 мм в количестве 7 шт,  установить тройник полипропиленовый соединительный диаметром 125 мм в количестве 1 шт, установить муфту полипропиленовую комбинированную, с наружной резьбой, под ключ диаметром 110 x 100 в количестве 1 шт,  установить муфту полипропиленовую комбинированную, с наружной резьбой, разъемную диаметром 110 x 100 в количестве 1 шт; установить угольник 90°, полипропиленовый диаметром 75 мм в количестве 2 шт, установить тройник полипропиленовый переходной диаметром 75  x 32 x 75 мм в количестве 2 шт, установить тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 x 25 x 75 мм в количеств 2 шт; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN10/50 наружным диаметром 50 мм длиной 1,99 м, установить угольник 90°, полипропиленовый Ø50 мм в количестве 1 шт, установить тройник полипропиленовый переходной диаметром 50 x 25 x 50 мм в количестве 5 шт; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN10/40 наружным диаметром 40 мм длиной 0,5 м, установить тройник   полипропиленовый переходной диаметром 40 x 25 x 40 мм в количестве 2 шт;  выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN10/32 наружным диаметром 32 мм длиной 20,6 м, установить тройник полипропиленовый переходной диаметром 32 х 20 х 32 мм в количестве 16 шт, установить муфту полипропиленовую комбинированную, с наружной резьбой, под ключ диаметром 32 x 1 в количестве 13 шт, установить муфту полипропиленовую комбинированную, с наружной резьбой, разъемную диаметром 32 количестве 16 шт; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб РN10/25 наружным диаметром 25 мм длиной 67,9 м, установить тройник полипропиленовый переходной диаметром 25 x 20 x 25 мм в количестве 13 шт, установить угольник 90°, полипропиленовый диаметром  25 мм в количестве 32 шт, установить муфту полипропиленовую комбинированную, с наружной резьбой, под ключ диаметром 25 x 3/4 в количестве 32 шт, установить муфту полипропиленовую комбинированную, с наружной резьбой, разъемную диаметром 25х3/4 в количестве 17 шт, установить кран шаровый муфтовый для воды диаметром 20 мм, тип в/в в количестве 16 шт, установить кран шаровый муфтовый для воды диаметром    15 мм, тип в/в в количестве 29 шт, установить крепления для проложенных трубопроводов в количестве 13,64 кг; осуществить присоединение к действующим внутренним сетям трубопроводов водоснабжения диаметром 100 мм в количестве 1 врезки; осуществить присоединение к действующим внутренним сетям трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм в количестве 21 врезки;  осуществить присоединение к действующим внутренним сетям трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм в количестве 17 врезок; выполнить изоляцию трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена тип 1 в количестве 217 м; при выполнении изоляции использовать трубки внутр. диаметр 125 мм, толщина 13 мм в количестве 45,54 м, трубки внутр. диаметр 76 мм, толщина 13 мм в количестве 13,64 м, трубки внутр. диаметр 54 мм, толщина 13 мм в количестве 46,75м, трубки внутр. диаметр 42 мм, толщина 13 мм в количестве 13,42 м, трубки внутр. диаметр 35 мм, толщина 13 мм в количестве 44,66 м, трубки внутр. диаметр 25 мм, толщина  13 мм в количестве 74,69 м; выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм в количестве 435,85 м; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб РN10/25 наружным диаметром 25 мм длиной                 274,74 м, установить тройник полипропиленовый переходной диаметром 25 x 20 x 25 мм в количестве 59 шт, установить угольник 90°, полипропиленовый диаметром 25 мм в количестве 13 шт, установить кран шаровый муфтовый диаметром 15 мм, тип в количестве 155 шт; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб PN10/32 наружным диаметром 32 мм длиной 161,11 м, установить тройник полипропиленовый переходной диаметром 32 x 20 x 32 мм в количестве 97 шт, установить угольник 90°, полипропиленовый диаметром 32 мм в количестве 21 шт, установить крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты в количестве 61,02 кг; выполнить изоляцию трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена тип 1 в количестве 476 м; при выполнении изоляции использовать: трубки внутр. диаметр 35 мм, толщина 13 мм в количестве             323,3 м, трубки внутр. диаметр 25 мм, толщина 13 мм в количестве 200,2 м; осуществить присоединение к действующим внутренним сетям трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм в количестве 105 врезок; осуществить присоединение к действующим внутренним сетям трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм в количестве 65 врезок; выполнить пробивку проемов в конструкциях из бетона в количестве 0,45 куб.м; выполнить заделку отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 кв.м в количестве 3,62 куб.м заделки; выполнить погрузку и вывоз мусора строительного в количестве 2,22 т; в части капитального ремонта горячего водоснабжения: выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм в количестве 90 м; выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм в количестве 90 м;  выполнить разборку трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм в количестве 645 м; выполнить смену полотенцесушителей в количестве 91 прибора. При выполнении работ установить полотенцесушитель из нержавеющей стали внутренним диаметром 32 мм в количестве 91 шт, 'установить переходник диаметром 32 х 1 в количестве 182 шт, установить тройник размером 1в количестве 182 шт;  выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из труб из полипропилена PN20/110 наружным диаметром 110 мм, длиной 23,74 м; установить  крепления  для  трубопроводов:   кронштейны,  планки, хомуты в количестве 3,32 кг; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из труб из полипропилена PN20/63 наружным диаметром 63 мм длиной 29,46 м, установить крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты в количестве 4,12 кг; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из труб из полипропилена PN20/40 наружным диаметром 40 мм длиной 12,27 м, установить крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты в количестве 1,72 кг; установить краны шаровые муфтовые (Valtec) для воды диаметром 32 мм в количестве 4 шт; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из труб из полипропилена PN20/32 наружным диаметром 32 мм длиной 164,92 м, установить крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты в количестве 23,09 кг; установить краны шаровые муфтовые (Valtec) для воды диаметром 25 мм в количестве 10 шт; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из труб из полипропилена PN20/25 наружным диаметром 25 мм длиной 246,95 м, установить крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты в количестве 34,57 кг; установить краны шаровые муфтовые (Valtec) для воды диаметром 20 мм. в количестве 10 шт;  выполнить установку кранов воздушных в количестве 10 комплектов;  выполнить установку клапана балансировочного диаметром 15 мм (Danfoss MSV-M) в количестве 20 шт; выполнить установку воздухоотводчиков автоматических в количестве 20 шт;  выполнить изоляцию трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена тип 2 в количестве 825 м; при выполнении изоляции использовать трубки внутр. диаметр 89 мм, толщина 32 мм в количестве 99 м, трубки внутр. диаметр 60 мм, толщина 32 мм в количестве 99 м, трубки внутр. диаметр 42 мм, толщина 19 мм в количестве 93,5 м, трубки внутр. диаметр 35 мм, толщина 19 мм в количестве 308 м, трубки внутр. диаметр 28 мм, толщина 19 мм в количестве 308 м; выполнить заделку отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 кв.м в количестве 0,6 куб.м;  выполнить ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м толщиной слоя до 20 мм в количестве 6 кв.м отремонтированной поверхности; выполнить окраску клеевыми составами улучшенную в количестве   6 кв.м поверхности; выполнить погрузку и вывоз мусора строительного в количестве 2,2 т; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм в количестве 2,5 м; выполнить прокладку трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм в количестве 2 м; установить крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты в количестве 0,63 кг; провести гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм в количестве  2,5 м трубопровода; провести гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм количестве 2 м трубопровода;  установить металлический дверной блок в готовый проем, величиной 1,6 м; установить решетку жалюзийную алюминиевую вентиляционную размером 500 x 200 мм (АМН) в количестве 1 шт; выполнить прокладку трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм длиной 50 м, установить клапан канализационный HL 710,1 в количестве 1 шт; выполнить установку трапов диаметром 100 мм в количестве 1 комплекта;  выполнить установку насосов канализационных с электродвигателем для отвода сточных вод с номинальной производительностью не менее 100 л/мин, мощностью 600 Вт в количестве 1 шт, установить насос JEMIX STP- 100 в количестве 1 шт; выполнить монтаж клапана обратного приемного с сеткой фланцевого диаметром 100 мм в количестве 1 шт; установить в щите с монтажной панелью: DIN-рейку металлическую оцинкованную длиной 300 мм в количестве 1 шт; шину алюминиевую 6x9мм в количестве 1 шт; клемные зажимы наборные в количестве 3 шт; выполнить монтаж выключателей автоматических «IЕК» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С в количестве 1 шт; выполнить монтаж приборов, устанавливаемых в щитах и пультах, а именно Тепловычислитель СПТ943,1 в количестве 1 шт; выполнить монтаж отдельно устанавливаемого блока питания в количестве 4 шт, а именно блок питания 220В/12В, 60 Вт в количестве 2 шт, блок питания 10 ВР220-24 Д, 220В/24В в количестве 2 шт;  выполнить монтаж GSM модема в комплекте с блоком питания и антенной в количестве 1 шт;  выполнить монтаж труб гибких гофрированных из самозатухающего ПВХ-пластиката по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами в количестве 65 м, установить трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого   типа диаметром 16 мм в количестве   16,32 м, установить трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм в количестве 49,98 м;  выполнить затягивание провода в проложенные трубы длиной 65 м. При  выполнении  данной  работы  использовать  провода  силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 4 кв.мм длиной 24,48 м, использовать провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием, с числом жил - 3 и сечением 1,5 кв.мм длиной 41,82 м; выполнить затягивание провода в проложенные трубы длиной 105 м; при  выполнении  данной  работы  использовать  провода  силовые  для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием, с числом жил - 3 и сечением 1 кв.мм длиной                 9,18 м; использовать кабель для систем охранно-пожарной сигнализации марки CQR CAB сигнальный, экранированный с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой сеч. 4 x 0,22 мм длиной 97,92 м; выполнить монтаж короба пластмассового шириной 25 x 30 мм количестве 10 м;  выполнить монтаж провода силового для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой, сечением 1 кв.мм в коробах в количестве 10 м. 

В удовлетворении остальной части иска суд отказал. Взыскал с Общества в пользу Управления 141 243 руб. 50 коп. штрафа, а также в доход федерального бюджета - 11237 руб. государственной пошлины.

Общество с решением суда не согласилось, в апелляционной жалобе просило его отменить, принять по делу новый судебный акт, отказав в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Доводы подателя жалобы сводятся к следующему. Получение в рамках исполнения государственных контрактов денежных средств с поставщиков (исполнителей, подрядчиков) за счет завышения санкций не отнесено к целям принятия Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ) и может воспрепятствовать этим целям, дискредитировав саму идею размещения государственных и муниципальных заказов на торгах, обеспечивающих прозрачность, конкуренцию, экономию бюджетных средств и направленных на достижение антикоррупционного эффекта. Управление не предоставило возможность для проведения работ, не согласовало с жилицами дома доступ работников подрядчика в квартиры, жилицам не разъяснило порядок выполнения и работ и не получено согласие на их выполнения. Вина Общества в невыполнении в установленные договором сроки работ по договору отсутствует. В соответствии со статьей 716 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) Общество незамедлительно предупредило заказчика о невозможности выполнения работ в срок и невозможности продолжения работ. В силу статьи 719 ГК РФ Общество по причине не исполнения заказчиком встречных обязательств приостановило выполнение договора по причине невозможности приступить к выполнению работ. Взыскание с Общества штрафа при отсутствии вины является незаконным. Уточняя свои исковые требования, истец в ходе судебного процесса изменил первоначальную смету по государственному контракту, включив в нее работы и материалы, ранее не оговоренные государственным контрактом, нарушив статью 767 ГК РФ, статью 95 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). Суд вышел за рамки своей компетенции при вынесении решения. Решением суда уменьшает правоспособность Общества, не исполнения Управлением условий контракта. Решение суда обязывает выполнить работ по ценам не оговоренные муниципальным контрактом, что проведет к предусмотренным контрактом затратам без и компенсации со стороны Управления.

Управление в отзыве на жалобу возразило против изложенных в ней доводов и требований, просило решение суда оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения жалобы, представителей в суд не направили, в связи с этим дело рассмотрено в их отсутствие в порядке, предусмотренном статьями 123, 156, 266 АПК РФ.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, приведенные в жалобе, отзыве на нее, апелляционная инстанция считает решение суда первой инстанции  в обжалуемой части в порядке части 5 статьи 268 АПК РФ законным и обоснованным, апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению.

Как следует из материалов дела, на основании результатов аукциона в электронной форме (протокол от 06.05.2015 № 0157300025215000129) Управление (заказчик) и Общество (подрядчик) заключили муниципальный контракт от 27.05.2015 № 89.

Согласно пункту 1.1 контракта заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и канализации жилого дома № 15 по улице Звездной в городе Пскове в соответствии с проектом и техническим заданием, а заказчик - принять и оплатить работы.

По условиям пунктов 2.1 - 2.2 контракта общая стоимость работ составляет 2 824 869 руб. 84 коп. и является строго фиксированной.

В пункте 4.1 контракта стороны определили срок выполнения работ: в течение 150 календарных дней от даты заключения контракта.

Пунктом 7.1.3 контракта предусмотрено, что штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом за исключением просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик уплачивает заказчику штраф в виде фиксированной суммы, определенной в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 в размере 5 % цены контракта. 

Фиксированная  сумма штрафа составляет 141 243 руб. 50 коп.

Срок окончания выполнения работ наступил 24.10.2015.

Управление 09.02.2016 направило письмо Обществу с требованием продолжить  и закончить работы, а также уплатить штраф за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в размере 141 243 руб. 50 коп. 

Ненадлежащее выполнение ответчиком договорных обязательств явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассматривая заявленные требования, суд первой инстанции признал их обоснованными в части взыскания 141 243 руб. 50 коп. штрафа и  частичного возложения на Общество обязанности в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу исполнить заключенный с Управлением муниципальный контракт от 27.05.2015 № 89 по капитальному ремонту жилого дома № 15 по улице Звездной в городе Пскове, путем выполнения конкретных работ.

С решением суда не согласился ответчик в части удовлетворения  иска.

Апелляционная инстанция не находит правовых оснований для отмены или изменения решения суда по доводам жалобы.

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с  обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется  принять результат работы и оплатить его.

Пунктом 1 статьи 716 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

В силу  пункта 2 статьи 763 ГК РФ по государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно статье 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7) разъяснено, что согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено ГК РФ, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. При этом следует учитывать, что в соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ должник не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства. При предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным. Разрешая вопрос о допустимости понуждения должника исполнить обязанность в натуре, суд учитывает не только положения ГК РФ, иного закона или договора, но и существо соответствующего обязательства.

Как указано в пункте 24 Постановления № 7, в случае, если исполнение обязательства в натуре возможно, кредитор по своему усмотрению вправе либо требовать по суду такого исполнения, либо отказаться от принятия исполнения (пункт 2 статьи 405 ГК РФ) и взамен исполнения обязательства в натуре обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных неисполнением обязательства (подпункты 1 и 3 статьи 396 ГК РФ). Предъявление требования об исполнении обязательства в натуре не лишает его права потребовать возмещения убытков, неустойки за просрочку исполнения обязательства.

Суд первой инстанции установил, что подрядчиком приостановлено выполнение работ по контракту в связи с тем, что жильцы дома отказываются предоставлять допуск в свои квартиры для производства работ. Стояки, являющиеся общедомовым оборудованием, закрыты различными конструкциями, которые собственники квартир отказываются демонтировать своими силами,  предлагают подрядчику произвести самостоятельно демонтаж данных конструкций, а впоследствии произвести их восстановление, что не предусмотрено контрактом.

Общество 18.09.2015 просило объяснить алгоритм действий подрядчика в случае отказа собственников от замены трубопроводов ХВС, ГВС и канализации.

Не получив ответа на свой запрос подрядчик 20.10.2015 уведомил заказчика о завершении работ по контракту и попросил направить специалиста для приемки выполненных работ.

Управление 23.10.2015 указало на невозможность назначить комиссию по приемке выполненных работ, поскольку ответчиком контракт в полном объеме не исполнен, а также не представлена им согласованная смета, просило Общество уточнить список квартир, с указанием их номеров, в которые не предоставлен доступ.

Управление 30.11.2015 просило Общество приостановить работы на объекте, при этом указало на то, что срок выполнения работ истек и подрядчику будут выставлены штрафные санкции за ненадлежащее выполнение обязательств. Заказчик оставил за собой право на расторжение контракта согласно пункту 10.2.

Общество 10.12.2015 пояснило, что направило Управлению сметы до начала работ в электронном виде, а 03.08.2015 на бумажном носителе, в сентябре 2015 года выполнило часть работ, при переходе к следующему этапу работ, подрядчик не смогло приступить к их выполнению из-за отсутствия доступа в квартиры.

Управление 17.12.2015 пояснило Обществу, что 20.11.2015 подрядчику выслан список квартир, составленные управляющей компанией, собственники которых согласны обеспечить доступ в помещения для проведения капитального ремонта.

Общество, извещенное о возможности продолжения работ, к дальнейшему исполнению контракта не приступило. 

Суд установил, что не отрицал представитель Общества, что ему обществу было известно о согласии собственников обеспечить доступ в квартиры.

Апелляционный суд полагает, что требования истца в части  возложения на ответчика обязанности  исполнить контракт обоснованно  признаны судом первой инстанции правомерными, поскольку  правовых оснований не выполнить в полном объеме работы по контракту у ответчика не имелось.

Ссылка на  возникновение трудностей в продолжении работ  не принимается во внимание, поскольку  объективных доказательств, свидетельствующих о том, что именно истец  препятствовал ответчику в своевременном выполнении работ по контракту, а также о непреодолимом  характере возникших сложностей, ответчик в порядке статьи 65 АПК РФ в суд не представил. Имеющиеся в деле документы такие сведения не содержат.

Доводы подателя жалобы  о заявлении истцом требований за пределами контракта, увеличении  объемов работ и их стоимости, что контрактом не предусмотрено,  не принимаются во внимание, поскольку материалами дела не подтверждаются.

Как следует из материалов дела, требования истца  сформулированы и основаны на локальных сметных расчетах по невыполненным работам. 

Суд первой инстанции  данные документы проверил и пришел к выводу о том, что  требование о возложении обязанности исполнить контракт подлежит удовлетворению частично, поскольку указанные истцом в исковых требованиях позиции (использование материалов), ни в аукционной документации истца, ни в локальной смете ответчика, ни в приложении к контракту не указаны.  В остальной части  перечисленные в иске работы  соответствуют  условиям контракта и приложениям к нему.

Из материалов дела видно, что ответчик ни в суд первой инстанции, ни в апелляционную инстанцию не представил ни одного документы, свидетельствующего о том, что  заявленные  истцом работы не относятся к контракту, а истцом заявлены требования не во исполнение контракта.

Кроме того, как следует из материалов дела, а также указано в тексте апелляционной жалобы, при производстве работ  ответчик установил, что  локальный сметный  расчет не учитывает все  необходимые  для работы  материалы и стоимость, предлагал заказчику  произвести дополнительный учет таких затрат. 

Вместе с тем, с учетом заключения сторонами контракта, в силу  норм Законов № 94-ФЗ и 44-ФЗ правовых оснований для  изменения стоимости работ и цены контракта  не имелось. Сведений о том, что  для выполнения контракта требовались дополнительные работы, в том числе те, без которых невозможно  выполнить контракт в полном объеме, в материалах дела не имеется, ответчиком в порядке статьи 65 АПК РФ в суд не представлено.  

Таким образом,  правовых оснований для отказа в иске в этой части у суда не имелось. Требования удовлетворены обоснованно.

Рассматривая требование истца в части взыскания  штрафа, суд пришел к выводу о том, что  данное требование  заявлены  в соответствии с пунктом 7.1.3 контракта, на основании статей 329, 330 ГК РФ 

Поскольку условия, при которых возможно начисление и предъявления данного штрафа,  возникли, ответчиком нарушены договорные обязательства,  истец  воспользовался правом и  предъявил  к взысканию в судебном порядке  соответствующий штраф.

При этом нарушений  или противоречий такого требования истца  нормам  Законов № 94-ФЗ и № 44-ФЗ не установлено. Условие контракта в этой части  сторонами согласовано.

Таким образом, оснований для отказа в удовлетворении иска в этой части у суда первой инстанции также не имелось. Иск  удовлетворен правомерно.

Оснований не согласиться с данными выводами суда первой инстанции у апелляционной инстанции не имеется.

Фактически все доводы подателя жалобы направлены на переоценку установленных по делу судом первой инстанции обстоятельств, доказательств и иные выводы, правовые основания для которых у апелляционной инстанции отсутствуют.

Поскольку судом первой инстанции полно исследованы обстоятельства дела, нарушений или неправильного применения норм материального и процессуального права не установлено, апелляционная инстанция не находит правовых оснований для отмены или изменения состоявшегося судебного акта.

Определением от  31.01.2017 апелляционный суд  запросил у подателя жалобы оригинал  платежного поручения от 05.12.2016 № 162 на уплату государственной пошлины  за рассмотрение жалобы, так как  данный документ с жалобой поступил в суд в виде копии.

В связи с отказом в удовлетворении жалобы и невыполнением требований апелляционного суда, с ответчика подлежит взысканию в  федеральный бюджет 3000 руб. государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Псковской области от 14 ноября                         2016 года по делу № А52-1217/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Ленстрой-ОЛ» - без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ленстрой-ОЛ» в доход федерального бюджета 3000 руб. государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд                Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

          А.Я. Зайцева

 

Судьи

          А.В. Романова

          А.Н. Шадрина