5094_340875 

Арбитражный суд Липецкой области 

пл. Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019 

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А36-8177/2018

г.Липецк

16 октября 2019 года

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Канаевой А.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Леликовой О.И.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

областного казенного учреждения «Управление капитального строительства  Липецкой области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Комплектснабэлектромонтаж»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 

<

...>)  

с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, - областного бюджетного учреждения  «Эксплуатация жилищного фонда» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  адрес: 

<

...>),  

об обязании устранить недостатки выполненных работ, 

при участии в судебном заседании:  

от истца – ФИО1, доверенность № 03 от 09.01.2019,  от ответчика – ФИО2, доверенность от 10.10.2018,  от третьего лица – представитель не явился,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью  «Комплектснабэлектромонтаж» (ОГРН 1024800823431, ИНН 4826035766, адрес:  г.Липецк, ул.Гастелло, д.5) в течение тридцати календарных дней с момента  вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить следующие  недостатки (дефекты) в выполненных работах по объекту – жилой дом,  расположенный по адресу: Липецкая область, Измалковский район, с.Измалково,  ул.Первомайская, д.34:  

1) восстановить целостность отмостки, устранив: - множественные поперечные трещиы; 

- отслоение отмостки от цоколя по периметру дома на 25 погонных метрах;  

- просадку и разрушение отмостки слева от входной группы квартиры № 1 на  площади 1,2 м2;  

2) восстановить целостность цоколя дома, устранив отслоение и разрушение  лицевого слоя кирпича цоколя по периметру дома на 19,4 погонных метрах;  

3) устранить очаги плесени в квартире № 2: 

- в жилой комнате на наружных стенах на площади 3,4 м2 в местах  сопряжения стен с потолком и на потолке на площади 3,4 м2 в месте его  сопряжения с наружными стенами;  

- в ванной комнате на всей поверхности потолка на площади 3,74 м2 и на  стенах (наружной и смежной с квартирой № 1) на площади 0,54 м2 в месте  сопряжения с потолком;  

- в коридоре на наружной стене в месте сопряжения с потолком на площади  0,48 м2 в месте сопряжения с наружной стеной;  

4) провести обработку против повторного появления плесени всей  поверхности стен и потолков, пораженных плесенью;  

5) восстановить отделку стен и потолков после удаления плесени и  обработки поверхностей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Комплектснабэлектромонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес:  

<

...>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 6 000 руб.  

 На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Липецкой области в месячный срок со дня принятия.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья А.В.Канаева