РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-239977/23-110-1927

г. Москва

21 мая 2024 г.

Резолютивная часть решения объявлена 03 мая 2024 года

Решение в полном объеме изготовлено 21 мая 2024 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью  "СТРОЙЖЕЛДОРПРОЕКТ" (127018, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРЬИНА РОЩА, 2-Я ЯМСКАЯ УЛ., Д. 4, ЭТАЖ 6, ПОМЕЩ. 22, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью    ИНСТИТУТ ИНЖПРОЕКТ (123022, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 11 874 230,11 руб., а также встречный иск ,

 

при участии:

от истца –ФИО1 по дов.  от  26.04.2024,

от ответчика- ФИО2 по дов.  от  09.01.2024, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной  ответственностью  "СТРОЙЖЕЛДОРПРОЕКТ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью    ИНСТИТУТ ИНЖПРОЕКТ (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 11 005 568,72 руб. задолженности по Договору №14.20/ИИП/ММС/ПД/РД/АН/СУБ4 от 08.04.2022, 446 659,29 руб. процентов по договору по разработке  проектной документации, 1 479 615,91 руб. по договору  по разработке рабочей документации, процентов на сумму 11 005 568,72 руб., исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды, с 04.05.2024 по дату фактического исполнения обязательства.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, предъявил встречный иск (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) о взыскании 1 186 684,99 руб. неустойки в соответствии с п.9.4. Договора №14.20/ИИП/ММС/ПД/РД/АН/СУБ4 от 08.04.2022, 360 000 руб. неустойки в соответствии с п.9.7. Договора №14.20/ИИП/ММС/ПД/РД/АН/СУБ4 от 08.04.2022.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между Обществом с ограниченной ответственностью Институт Инжпроект (Подрядчик), и ООО «СтройЖелДорПроект» (Субподрядчик) по результатам конкурсной процедуры в электронной форме (номер закупки в ЕИС № 32211191216) на торговой единой электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» (АО «ЕЭТП)». руководствуясь положениями Федерального закона от 18.07.11г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» был заключен Договор № 14.20/ИИП/ММС/ПД/РД/АН/СУБ 4 от 08.04.2022 г.

В соответствии с условиями Договора Субподрядчик принял на себя обязательства разработать проектную документацию стадия «Проектная документация» и стадия «Рабочая документация» и оказать услуги по осуществлению авторского надзора на период строительства Раздел: «Автоматика и телемеханика движения поездов» по объекту: «Южный участок ТПК ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского», включая реконструкцию участка ст. метро «Каширская» - ст. метро «Каховская». 4 этап: «Реконструкция участка - станция метро «Каширская» - станция метро «Каховская» Этап 4.1.4: «Обустройство новых веток в электродепо «Замоскворецкое». Этап 4.1.4.1: «Реконструкция Каховской линии на участке от ПКО148+00 до ПКО154+00». Этап 4.2.2: Реконструкция участка Каховской линии от ПК0135+00 до ПК 0116+32.14 по левому перегонному тоннелю и до ПК0121 + 12.00 по правому перегонному тоннелю, включая перегонные тоннели, станцию «Каширская», притоннельные и иные сооружения, в том числе Тяговая подстанция Т-1018 (площадка 1.3.2), площадка 20 (участок спрямления пути)» в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

ООО «СтройЖелДорПроект» выполнило своевременно и в полном объеме свои обязательства по разработке проектной и рабочей документации. Результаты работ были приняты Подрядчиком без замечаний. Условиями Договора установлен порядок расчетов за выполненные Субподрядчиком работы.

В соответствии с п. 3.5.2. Договора расчеты за работы по разработке Проектной документации по Договору до получения положительного заключения государственной экспертизы по Проектной документации осуществляются в следующем порядке: Подрядчик оплачивает Субподрядчику стоимость работ по разработке проектной документации поэтапно, в течение 30 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненного этапа работ, при условии предоставления Субподрядчиком оригиналов счета и счета-фактуры и поступления денежных средств от Заказчика.

В соответствии с п. 3.6.1. Договора Расчеты за работы по разработке Рабочей документации, по Договору осуществляются в следующем порядке в течение 15 рабочих дней с даты поступления соответствующей оплаты от Заказчика, а также подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, окончательный расчет за разработку Рабочей документации производится Подрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поступления денежных средств от Заказчика, а также подписания акта сдачи-приемки результата завершенных работ.

Сторонами 29 июля 2022 года были подписаны Акты сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектной и рабочей документации по этапам № 1. № 3 Календарного плана:

№ 1 на сумму 1 599 576.00 рублей.

№ 2 на сумму 426 120.00 рублей.

№ 3 на сумму 5 815 792.53 рублей.

№ 4 на сумму 1 255 600.19 рублей.

а также 16 декабря 2022 года сторонами были подписаны Акты сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектной и рабочей документации по этапам № 5 и № 3 Календарного плана

№ 5 на сумму 608 928.00 рублей.

№ 6 на сумму 1 299 552.00 рублей.

Таким образом, ООО «СтройЖелДорПроект» надлежащим образом осуществило выполнение работ в полном объеме, передав результат работ ООО «Институт Инжпроект» на общую сумму 11 005 568.72 рублей. Замечаний к работам Подрядчиком предъявлено не было. Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по Актам сдачи-приемки выполненных работ, соответствует Расчету стоимости проектных работ, являющемуся Приложением № 4 к Договору.

Однако оплата выполненных Субподрядчиком работ до настоящего времени не произведена и по состоянию на 15 сентября 2023 года за ООО «Институт Инжпроект» числится задолженность по оплате выполненных работ в размере 11 005 568,72 рублей.

Исходя из положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. В силу положений ст. 393 ГК РФ Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Положениями ст. 395 ГК РФ установлена ответственность за неисполнение денежного обязательства в размере процентов на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчик}', а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

В соответствии со ст. 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан уплатить подрядчик} установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

В соответствии со ст. 746 ГК РФ Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В ходе судебного разбирательства истцом заявлено ходатайство об изменении исковых требований в порядке ст.49 АПК РФ, в части взыскания неустойки.

С учетом изложенного, истец просит взыскать 11 005 568,72 руб. задолженности по Договору №14.20/ИИП/ММС/ПД/РД/АН/СУБ4 от 08.04.2022, 446 659,29 руб.     за период с 13.09.2022  по 03.05.2024 процентов за пользование чужими денежными средствами, процентов на сумму 11 005 568,72 руб., исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды, с 04.05.2024 по дату фактического исполнения обязательства.

При указанных обстоятельствах первоначальный иск подлежит удовлетворению.

При этом встречный иск подлежит частичному удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с условиями Договора Субподрядчик принял на себя обязательства разработать проектную документацию стадия «Проектная документация» и стадия «Рабочая документация» и оказать услуги по осуществлению авторского надзора на период строительства Раздел: «Автоматика и телемеханика движения поездов» по объекту: «Южный участок ТПК ст. «Каховская» - ст. «Проспект Вернадского», включая реконструкцию участка ст. метро «Каширская» - ст. метро «Каховская». 4 этап: «Реконструкция участка - станция метро «Каширская» - станция метро «Каховская» Этап 4.1.4: «Обустройство новых веток в электродепо «Замоскворецкое», Этап 4.1.4.1: «Реконструкция Каховской линии на участке от ПК0148+00 до ПК0154+00», Этап 4.2.2: Реконструкция участка Каховской линии от ПК0135+00 до ПК 0116+32,14 по левому перегонному тоннелю и до ПК0121+12,00 по правому перегонному тоннелю, включая перегонные тоннели, станцию «Каширская», притоннельные и иные сооружения, в том числе Тяговая подстанция Т-1018 (площадка 1.3.2), площадка 20 (участок спрямления пути)» в соответствии с заданием на проектирование (Приложение № 1 к Договору).

Сторонами 29 июля 2022 года были подписаны Акты сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектной и рабочей документации: № 1 на сумму 1 599 576,00 рублей, № 2 на сумму 426 120,00 рублей, № 3 на сумму 5 815 792,53 рублей, № 4 на сумму 1 255 600,19 рублей по этапам № 1, № 3 Календарного плана, а также 16 декабря 2022 года Акты сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектной и рабочей документации № 5 на сумму 608 928,00 рублей, № 6 на сумму 1 299 552,00 рублей по этапам № 5 и № 3 Календарного плана.

Пунктом 2.1. Договора установлено, что сроки начала и окончания, а также промежуточные сроки выполнения работ по разработке Проектной документации, установлены Календарным планом разработки Проектной документации (Приложение № 2 к Договору).

Пунктом 2.2. Договора установлено, что сроки начала и окончания работ по разработке Рабочей документации, в том числе этапов работ установлены в Календарном плане разработки Рабочей документации (Приложение № 3 к Договору).

Пунктом 7.1.3. Договора установлено, что в процессе выполнения работ по Договору Субподрядчик обязуется соблюдать сроки выполнения этапов работ, требования законодательства Российской Федерации к качеству выполняемых работ, нести ответственность, установленную Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Пунктом 9.4. Договора установлено, что за нарушение сроков выполнения работ по вине Субподрядчика, в том числе этапов выполнения работ, указанных в Календарном плане разработки Проектной документации (Приложение №2 к Договору) и Календарном плане разработки Рабочей документации (Приложение №3 к Договору), а также сроков устранения недостатков работ Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости работ, за каждый день просрочки.

Общая сумма неустойки в соответствии с пунктом 9.4. Договора составляет 1 186 684 (Один миллион сто восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 99 копеек.

Кроме того, пунктом 9.7. Договора установлено, что за непредставление или несвоевременное предоставление ежемесячных отчетов (п. 7.1.15 Договора) Субподрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый день просрочки по каждому факту не предоставления информации.

Ежемесячные отчеты в течение всего срока исполнения Договора Встречным ответчиком не предоставлялись.

Общая сумма неустойки в соответствии с пунктом 9.7 Договора составляет 360 000 рублей 00 копеек.

Вместе с тем, согласно Календарному плану разработки Проектной документации (приложение № 2 к Договору), установлен срок выполнения работ по 1 этапу плана (Этап 4.1.4. «Обустройство новых веток в электродепо «Замоскворецкое») — не более 15 календарных дней с даты заключения Договора (08.04.2022). Таким образом, срок окончания выполнения работ по этапу 1 Календарного плана 23.04.2022 года.

ООО «СтройЖелДорПроект» сопроводительным письмом № 01-1911/М от 25.04.2022 направило Заказчику результат работ – проектную документацию и накладную № 32 от 25.04.2022 года. Таким образом, просрочка выполнения работ составила всего 1 день, а не 29.07.2022 г., (98 дней) как указывает Заказчик во встречном иске, начисляя неустойку с 23.04.2022 года по дату подписания Акта № 1 от 29.07.2022 года.

Срок выполнения работ по 3 этапу плана (Этап 4.1.4.1. «Реконструкция Каховской линии на участке от ПК148+00 до ПК0154+00») — не более 15 календарных дней с даты заключения Договора (08.04.2022). Таким образом, срок окончания выполнения работ по этапу 3 Календарного плана 23.04.2022 года.

ООО «СтройЖелДорПроект» направило Заказчику результат работ – проектную документацию и накладную № 40 от 15.07.2022 года. Таким образом, просрочка выполнения работ составила 82 дня, а не 29.07.2022 (98 дней) как указывает Заказчик во встречном иске, начисляя неустойку с 23.04.2022 года по дату подписания Акта № 2 от 29.07.2022 года.

Таким образом, начисление неустойки по п. 9.4. Договора представляется следующим:

Период начисления неустойки с 24.07.2022 по 14.07.2022 (82 дня)

Ставка по договору: 0,1 % в день

Стоимость этапа работ 426 120,00 рублей

426 120,00 ? 82 ? 0,1% = 34 941,84 рублей.

Срок выполнения работ по 5 этапу плана (Этап 4.2.2. «Реконструкция участка Каховской линии от ПК0135+00 до ПК0116+32,14 по левому перегонному тоннелю и до ПК 0121+12,00 по правому перегонному тоннелю, включая перегонные тоннели, станцию «Каширскакя», притоннельные и иные сооружения, в том числе Тяговая подстанция Т-1018 (площадка 1.3.2), площадка 20 (участок спрямления пути)») — не более 15 календарных дней с даты заключения Договора (08.04.2022). Таким образом, срок окончания выполнения работ по этапу 3 Календарного плана 23.04.2022 года.

ООО «СтройЖелДорПроект» сопроводительным письмом № 01-1625/М от 08.04.2022 направило Заказчику результат работ – проектную документацию и накладную № 27 от 08.04.2022 года. Таким образом, просрочка выполнения работ ОТСУТСТВУЕТ, а не 16.12.2022 г., (238 дней) как указывает Заказчик во встречном иске, начисляя неустойку с 23.04.2022 года по дату подписания Акта № 5 от 16.12.2022 года.

Таким образом, размер неустойки за несоблюдение сроков передачи Подрядчику проектной документации, возможный к удовлетворению составляет 34 941,84 рублей.

Пунктом 5.2. Договора № 14.20/ИИП/ММС/ПД/РД/СУБ 4 от 08.04.2022 года установлено, что Подрядчик осуществляет приемку работ в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента получения от Субподрядчика, указанного в п. 5.1 акта при условии предоставления Субподрядчиком в полном объеме Проектной документации и других документов, указанных в п. 4.3 Договора.

В случае если Субподрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная Проектная документация, и/или качество предъявляемых к приемке работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, Подрядчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов).

В случае отсутствия замечаний и при условии согласования Сторонами предварительного расчета стоимости фактически выполненных работ (исполнительной сметы) Подрядчик в срок, указанный в настоящем пункте Договора, подписывает Субподрядчику акт сдачи-приемки выполненного этапа работ.

Подрядчик вправе продлить срок приемки результатов Работ (этапа Работ) на срок согласования с Заказчиком, но не более чем на 30 (Тридцать) календарных дней.

Замечаний к переданной документации Подрядчиком не заявлялись. Таким образом, налицо уклонение Подрядчика от подписания Актов выполненных работ, что является злоупотреблением правом по смыслу ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок выполнения работ по 1 этапу плана (Этап 4.1.4. «Обустройство новых веток в электродепо «Замоскворецкое») — не более 30 календарных дней с даты заключения Договора (08.04.2022). Таким образом, срок окончания выполнения работ по этапу 1 Календарного плана 08.05.2022 года.

ООО «СтройЖелДорПроект» сопроводительным письмом № 01-2523/М от 31.05.2022 направило Заказчику результат работ – рабочую документацию и накладную № 45 от 31.05.2022 года. Таким образом, просрочка выполнения работ составила 22 дня, а не 29.07.2022 г., (22 дня) как указывает Заказчик во встречном иске, начисляя неустойку с 12.05.2022 года по дату подписания Акта № 3 от 29.07.2022 года.

Таким образом, начисление неустойки по п. 9.4. Договора представляется следующим:

Период начисления неустойки с 09.05.2022 по 30.05.2022 (22 дня)

Ставка по договору: 0,1 % в день

Стоимость этапа работ 5 815 792,53 рублей

815 792,53 ? 22 ? 0.1% = 127 947,44 рублей.

Срок выполнения работ по 2 этапу плана (Этап 4.1.4.1. «Реконструкция Каховской линии на участке от ПК148+00 до ПК0154+00») — не более 30 календарных дней с даты заключения Договора (08.04.2022). Таким образом, срок окончания выполнения работ по этапу 1 Календарного плана 08.05.2022 года.

ООО «СтройЖелДорПроект» сопроводительным письмом № 01-2438/М от 26.05.2022 направило Заказчику результат работ – рабочую документацию и накладную № 43 от 26.05.2022 года. Таким образом, просрочка выполнения работ составила 17 дней, а не 29.07.2022 г., (79 дней) как указывает Заказчик во встречном иске, начисляя неустойку с 12.05.2022 года по дату подписания Акта № 4 от 29.07.2022 года.

Таким образом, начисление неустойки по п. 9.4. Договора представляется следующим:

Период начисления неустойки с 09.05.2022 по 25.05.2022 (17 дней)

Ставка по договору: 0,1 % в день

Стоимость этапа работ 1 255 600,19 рублей

255 600,19 ? 17 ? 0.1% = 21 345,20 рублей.

Срок выполнения работ по 3 этапу плана (Этап 4.2.2. «Реконструкция участка Каховской линии от ПК0135+00 до ПК0116+32,14 по левому перегонному тоннелю и до ПК 0121+12,00 по правому перегонному тоннелю, включая перегонные тоннели, станцию «Каширскакя», притоннельные и иные сооружения, в том числе Тяговая подстанция Т-1018 (площадка 1.3.2), площадка 20 (участок спрямления пути)») — не более 30 календарных дней с даты заключения Договора (08.04.2022). Таким образом, срок окончания выполнения работ по этапу 1 Календарного плана 08.05.2022 года.

ООО «СтройЖелДорПроект» сопроводительным письмом № 01-2523/М от 31.05.2022 направило Заказчику результат работ – рабочую документацию и накладную № 45 от 31.05.2022 года. Таким образом, просрочка выполнения работ составила 22 дня, а не 16.12.2022 г., (219 дней) как указывает Заказчик во встречном иске, начисляя неустойку с 12.05.2022 года по дату подписания Акта № 6 от 16.12.2022 года.

Таким образом, начисление неустойки по п. 9.4. Договора представляется следующим:

Период начисления неустойки с 09.05.2022 по 30.05.2022 (22 дня)

Ставка по договору: 0,1 % в день

Стоимость этапа работ 1 299 552,00 рублей

1 299 552,00 ? 22 ? 0.1% = 28 590,14 рублей.

Пунктом 5.5. Договора № 14.20/ИИП/ММС/ПД/РД/СУБ 4 от 08.04.2022 года установлено, что Подрядчик осуществляет приемку работ в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с момента получения от Субподрядчика Проектной документации и других документов, указанных в п. 5.4/ Договора. В случае если Субподрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная Проектная документация, и/или качество предъявляемых к приемке работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, Подрядчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков и/или дефектов), которые Субподрядчик обязан устранить за свой счет в срок, установленный Подрядчиком.

Замечаний к переданной документации Подрядчиком не заявлялись. Таким образом, налицо уклонение Подрядчика от подписания Актов выполненных работ, что является злоупотреблением правом по смыслу ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, размер неустойки за несоблюдение сроков передачи Подрядчику рабочей документации,   составляет 177 882,78 рублей.

Соответственно, общий размер неустойки, возможный к удовлетворению, составит 212 824,62 рублей.

Пунктом 7.1.15 установлено, что Субподрядчик обязан ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Подрядчику отчет о привлечении к исполнению Договора субподрядных организаций (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по форме Раздела № 9 Приложения № 4 к Договору.

Однако работы ООО «СтройЖелДорПроект» выполняло собственными силами, т.е. без привлечения субподрядных организаций.

Кроме того, пунктом 7.1.14 установлена обязанность Субподрядчика не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения договора с субподрядчиком уведомить Подрядчика о привлечении субподрядчика и представить по запросу Подрядчика документы, подтверждающие вышеуказанные требования. Такого уведомления в материалы дела Истцом по встречному иску в материалы дела не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ, 

 

РЕШИЛ:

Первоначальный иск  удовлетворить в полном объеме. Встречный иск удовлетворить частично- в размере 212 824,62 руб.. В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет взаимных требований.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью    ИНСТИТУТ ИНЖПРОЕКТ (ОГРН: 

<

***>)  в пользу общества с ограниченной  ответственностью  "СТРОЙЖЕЛДОРПРОЕКТ" ( ОГРН: 

<

***>) 11 005 568 руб. 72 коп. задолженности, 233 834 руб.  процентов,  проценты на сумму 11 005 568 руб. 72 коп.,  исходя из ключевой ставки ЦБ РФ,  в соответствующие периоды,  с 04.05.2024  по день фактической оплаты, 76 344 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Возвратить обществу с ограниченной  ответственностью  "СТРОЙЖЕЛДОРПРОЕКТ" ( ОГРН: 

<

***>)  из федерального бюджета госпошлину  в размере 2 110 руб. по п/ п №6618 от 18.10.2023

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко