Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-113442/2024

13 февраля 2025 года

г.Санкт-Петербург

 

Решение принято путем подписания резолютивной части 20 января 2025 года.

Мотивированное решение изготовлено 13 февраля 2025 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи Сергеевой О.Н.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» (адрес: 194044, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>), 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью «СМК» (адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, лн. 5-я В.О., д. 42, литера А, офис 212-2, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании, 

установил:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СМК» о взыскании 351 839 руб. 82 коп. неустойки по государственному контракту Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № ОСТ-90. 

Ответчик отзыв на иск не представил, требование истца по существу не оспорил. 

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании статей 226 - 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Суд установил, что между СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»                                    (далее – Дирекция, Заказчик) и  ООО «СМК» (Общество, Подрядчик), заключен государственный контракт Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № ОСТ-90, предметом которого является выполнение работ по объекту «Устройство остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта в Выборгском районе (Лот 4)» с разработкой рабочей документации для нужд Санкт-Петербурга (далее – Объект).

Согласно условиям заключенного Подрядчик обязуется собственными                    и (или) привлеченными силами и средствами выполнить работы по Объекту,                    в соответствии с передаваемой Заказчиком проектной документацией, графиком выполнения работ, и сдать Объект Заказчику.  

В соответствии с п. 3.9 Контракта, Заказчик по письменному запросу Подрядчика предоставляет Подрядчику аванс в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения дополнительного соглашения к Контракту на выдачу аванса.

 Порядок ежемесячного погашения аванса (график погашения аванса) и дата погашения аванса устанавливаются дополнительным соглашением к Контракту. 

Согласно п. 3.9.1. Контракта в случае непогашения Подрядчиком выданного аванса (части аванса) путем выполнения работ в срок, установленный для его погашения условиями Контракта (дополнительного соглашения), в течение 3 рабочих дней после истечения указанного срока, у Подрядчика возникает денежное обязательство по возврату аванса путем перечисления Заказчику денежных средств в сумме непогашенного аванса (части аванса).

В случае просрочки исполнения Подрядчиком денежного обязательства по возврату денежных средств в сумме непогашенного аванса Заказчик взыскивает неустойку в форме пеней в соответствии с пунктом 7.3.1. Контракта.

Согласно п. 7.3.1 Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная              со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (в том числе обязательств, предусмотренных пунктом 3.9.1 Контракта), и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени.

Между Заказчиком и Подрядчиком 18.03.2023 было заключено дополнительное соглашение № 4-ОСТ-58 к Контракту (далее – Соглашение), в соответствии с которым срок погашения аванса определен до 31.10.2023.

Заказчик начислил Подрядчику неустойку за просрочку исполнения обязательств, установленный календарным планом работ, рассчитанной в соответствии с п. 7.3.1. Контракта по состоянию на 22.07.2024 в размере 351 839,82 руб. Расчет неустойки приложен к исковому заявлению как приложение к претензии.

В соответствии с п. 7.3 Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Истцом 29.09.2024 в адрес ответчика направлена досудебная претензия                       № 09-7081/24-0-0 с требованием в добровольном порядке перечислить пени. Претензия была направлена в адрес Ответчика Почтой России и получена Ответчиком 11.10.2024 о чем свидетельствует отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80081402817522. Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском. 

Сложившиеся между сторонами правоотношения регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Закона о контрактной системе.

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

По смыслу закона неустойка является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, направленной на восстановление нарушенного права. Размер неустойки может быть установлен в твердой сумме (штраф) или в виде периодически начисляемого платежа (пени), о чем указано в абзаце первом пункта 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

В пункте 10 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 28.06.2017) разъясняется, что при несовершении заказчиком действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или существа обязательства, до совершения которых исполнитель государственного (муниципального) контракта не мог исполнить своего обязательства, исполнитель не считается просрочившим, а сроки исполнения обязательств по государственному (муниципальному) контракту продлеваются на соответствующий период просрочки заказчика.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств (в том числе просрочка исполнения обязательств), предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика (пункт 7.5 Контракта). Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства (статья 401 ГК РФ).

Ответчик утверждение истца о нарушении срока погашения аванса мотивированно не опроверг, не представил суду доказательств надлежащего исполнения обязательства либо доказательств невозможности исполнения по причинам, не связанным с Подрядчиком. При таких обстоятельствах истец правомерно претендует на взыскание с ответчика неустойки за просрочку. 

Проверив расчет, суд признал его обоснованным, выполненным в соответствии с условиями контракта и подлежащим применению. Ответчик расчет неустойки не оспорил; контррасчет не представил; ходатайство о применении статьи 333 ГК РФ не заявил. 

На основании изложенного, требование истца подлежит удовлетворению в полном объеме с отнесением на ответчика в порядке статьи 110 АПК РФ расходов по уплате государственной пошлины. Поскольку истец на основании статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СМК» в пользу Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция транспортного строительства» 351 839 руб. 82 коп. неустойки по государственному контракту Санкт-Петербурга от 15.12.2022 № ОСТ-90. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СМК» в доход федерального бюджета 22 592 руб. государственной пошлины. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия.

Судья                                                                            Сергеева О.Н.