АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

город Севастополь

«08» октября 2018 года

Дело №А84-2529/18

Полный текст судебного акта изготовлен 08.10.2018

Резолютивная часть судебного акта оглашена 03.10.2018

Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Архиповой С.Н.,

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Колотовой О.В.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй-Инвест» г. Севастополь

к государственному казенному учреждению города Севастополя «Городское хозяйство и строительство»

о взыскании задолженности,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, ФИО2,

от ответчика – ФИО3,

у с т а н о в и л :

26.07.2018 в Арбитражный суд города Севастополя (суд) обратилось ООО «Гарант-Строй-Инвест» (истец) с исковым заявлением о взыскании с государственного казенного учреждения города Севастополя «Городское хозяйство и строительство» (с 21.08.2018 в результате смены наименования ГКУ города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства) (ответчик) задолженности по государственному контракту №20ГЖФ-ЭА от 23.10.2017 на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Газификация жилищного фонда при капитальном ремонте жилых домов» в сумме 597 818,06 руб. долга.

Ответчик с иском не согласился, представил отзыв, в котором указал на то, что работы были выполнены при отсутствии уведомления о доведении лимитов, что исключает оплату таких работ, выполненных с нарушением условий государственного контракта.

Из материалов дела следует, что 23.10.2017 между истцом как Подрядчиком и ответчиком как Государственным заказчиком был заключен государственный контракт №20ГЖФ-ЭА от 23.10.2017 на выполнение строительно-монтажных работ объекта «Газификация жилищного фонда при капитальном ремонте жилых домов». По условиям данного контракта Подрядчик принял обязательство своевременно выполнить газификацию жилищного фонда при капитальном ремонте домов в городе Севастополе и сдать результат работ, а Государственный заказчик – принять и оплатить их.

Газификация домов должна быть осуществлены по адресам: ул. Толбухина, 4; ул. Толбухина, 5; ул. Толбухина, 10; ул. Толбухина, 12; ул. Раенко, 6; ул. Раенко, 8; ул. Раенко, 20; ул. Четвертакова, 4; ул. Четвертакова, 6/8; ул. Четвертакова, 17; ул. Буряка, 10. 

По условиям п.2.5.4 контракта расчет за выполненные работы осуществляется поэтапно, в соответствии с графиком оплаты выполненных работ, на основании подписанного сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. Выполненная работа оплачивается в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

По условиям п.2.6. контракта, начиная с 2018 года, Подрядчик исполняет свои обязательства, оплата которых будет производиться в 2018 году, только после получения от Заказчика уведомления о доведении (утверждении) Заказчику объема прав на принятие и (или) исполнение обязательств, позволяющего в соответствующем году оплатить контракт без изменения его условий.

В соответствии с п.4.1.5 контракта Подрядчик имеет право досрочно выполнить обязательства по контракту с согласия Заказчика. Срок выполнения работ установлен в п.9.4. контракта и определен до 01.08.2018.

06.12.2017 сторонами было подписано Дополнительное соглашение №1 к контракту, которым установлен график выполнения работ при условии получения от Заказчика с 1 по 10 января 2018 года уведомления о доведении Заказчику объема прав на принятие и исполнение обязательств, позволяющего в соответствующем году оплатить контракт без изменения его условий.

Иными словами, Государственный заказчик полагает, что Подрядчик имел право на проведение работ только в случае получения от него соответствующего уведомления с 1 по 10 января 2018 года.

Согласно утвержденному графику, работы по газификации жилого дома по адресу: ул. Толбухина, дом 4 должны быть произведена с 23.10.2017 по 10.01.2018; по адресу: ул. Толбухина, дом 5 – с 21.11.2017 по 15.01.2018; по адресу: ул. Толбухина дом 10 – с 11.12.2017 по 20.01.2018; по адресу: ул. Толбухина, дом 12 – с 21.01.2018 по 10.02.2018, по адресу: ул. Буряка дом 10 – с 11.07.2018 по 30.07.2018.

02.02.2018 Государственный заказчик уведомил Подрядчика о необходимости приостановления работ по ул. Толбухина, ул. Умрихина, ул. Раенко, ул. Четвертакова в г. Инкерман.

В подтверждение фактического выполнения работ истец представил справку о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 10.01.2018 по газификации дома по ул. Толбухина, д.4 на сумму 501 023,28 руб., акты о приемке выполненных работ №1 от 10.01.2018 на суммы 102 330,78 руб., 235 696,74 руб., 162 996,76 руб.. Работы приняты Государственным заказчиком. Также представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 15.01.2018 по газификации дома по ул. Толбухина, д.5 на сумму 455 495,34 руб., акты о приемке выполненных работ №1 от 15.01.2018 на суммы 107 657,30 руб., 202 512,78 руб., 145 325,26 руб.. Работы приняты Государственным Заказчиком. Представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 20.01.2018 по газификации дома по ул. Толбухина, д.10 на сумму 716 837,02 руб., акты о приемке выполненных работ №1 от 20.01.2018 на суммы 150 198,66 руб., 189 441,92 руб., 377 196,44 руб.. Работы приняты Государственным Заказчиком. В отношении выполнения работ по газификации дома по ул. Толбухина, 12 представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 10.02.2018 на сумму 498 692,14 руб., акты о приемке выполненных работ №1 от 10.02.2018 на суммы 109 252,66 руб., 178 248,44 руб., 211 191,04 руб.. Работы приняты Государственным Заказчиком.

Из указанных доказательств следует, что работы по газификации домов по ул. Толбухина были выполнены Подрядчиком до уведомления Государственным заказчиком о необходимости приостановления данных работ. Работы выполнены в установленный срок.

В отношении работ по газификации дома по ул. Буряка, 10 представлены справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 16.05.2018 на сумму 329 864,28 руб., акты о приемке выполненных работ № от 16.05.2018 на суммы 43 598,64 руб., 192 259,76 руб., 94 005,88 руб.. Работы также выполнены в срок и приняты Государственным заказчиком. Уведомления о необходимости приостановления работ по указанному адресу ответчиком не предъявлялось. 

Оценив представленные письменные доказательства, выслушав доводы сторон, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований на основании ст. ст. 309, 310, 702, 709, 711 ГК РФ.

То обстоятельство, что ответчик в период с 01 по 10.01.2018 не направлял истцу уведомление о доведении Заказчику объема прав на принятие и исполнение обязательств, позволяющего в соответствующе году оплатить контракт без изменения его условий, не освобождает его от обязанности оплатить принятые от Подрядчика работы. Также суд отмечает, что выполнение работ, поставленное под условие получения такого уведомления, нарушает права Подрядчика, на которого возложена обязанность выполнить работы в соответствии со сроком, утвержденном в графике. 

Кроме того, о начале работ по каждому объекту ответчик был уведомлен заблаговременно, о необходимости приостановления работ доведено до сведения Подрядчика уже после фактического выполнения работ. Поэтому представленные ответчиком возражения не признаются обоснованными и освобождающими его от обязанности оплатить фактически принятые работы.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя «Городское хозяйство и строительство» (299007, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 02.07.2014) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Строй-Инвест» (299029, 

<

...>), ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 22.10.2014) задолженность по государственному контракту №20ГЖФ-ЭА от 23.10.2017 в сумме 597 818,06 руб. долга, а также 14 956 руб. расходов по оплате госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд г. Севастополя в установленный законом срок.

Судья 

С.Н. Архипова