ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-243287/2022-52-1896

10 марта 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 08 февраля 2023 года.

Решение в полном объеме изготовлено 10 марта 2023 года.

 

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14» (117556, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.04.2003, ИНН: 

<

***>)

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «СОЮЗ-СК» (390000, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЯЗАНЬ ГОРОД, 196 КИЛОМЕТР (ОКРУЖНАЯ ДОРОГА) КИЛОМЕТР, ДОМ 12Б, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 11.01.2016, ИНН: 

<

***>)

о взыскании задолженности в размере 1 027 169,25 руб. по договору от 28.08.2019, неустойки в размере 61 149,06 руб. за период с 14.10.2019 по 24.12.2019, процентов в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 100 руб. с 25.12.2019 по дату фактической оплаты долга, за исключением периода действия моратория,

 

при участии:

от истца – ФИО2 (паспорт, диплом, дов. от 28.04.2022),

от ответчика – представитель не явился, извещен. 

 

УСТАНОВИЛ:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «СОЮЗ-СК» (далее – ответчик) о взыскании задолженности в размере 1 027 169,25 руб. по договору от 28.08.2019, неустойки в размере 61 149,06 руб. за период с 14.10.2019 по 24.12.2019, процентов в порядке ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 100 руб. с 25.12.2019 по дату фактической оплаты долга, за исключением периода действия моратория.

Истец заявленные требования поддержал.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в судебное заседание не явился.

ФГУП «ГВСУ № 14» (Генподрядчик) и ООО «Союз-СК» (Субподрядчик) заключили договор субподряда № 1819187379652554164000000/823.4 от 28.08.2019, согласно которому субподрядчик принял обязательство выполнить работы в соответствии с разделом 23 договора, расчетом цены в установленный договором срок.

Согласно п. 3.1 договора цена договора в соответствии с расчетом и обоснованием цены составляет 4 850 534 руб., в том числе НДС 20% - 808 422 руб. 33 коп.

Согласно п. 4.5 договора генподрядчик вправе произвести авансирование Субподрядчика при наличии у Субподрядчика, заключенного с Уполномоченным банком договора о банковском сопровождении и открытого в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в Уполномоченном банке отдельного счета.

ФГУП «ГВСУ № 14» перечислило ООО «Союз-СК» аванс в размере 3 880 427,20 руб., в том числе НДС 20% - 646 737,87 руб., что подтверждается платежным поручением № 41785 от 04.09.2019.

В связи с нарушением сроков выполнения работ по договору ФГУП «ГВСУ № 14» направило в адрес и ООО «Союз-СК» уведомление от 19.11.2019 № 21/04-28169 об отказе от исполнения договора и возврате задолженности в размере 3 880 427,20 руб.

Данное уведомление было получено ООО «Союз-СК» 24.12.2019.

ООО «Союз-СК» частично 18.02.2020 оплатило задолженность в размере 2 853 257,95 руб., что подтверждается платежным поручением № 115.

24.06.2022 Истец направил Ответчику претензию с требованием оплатить задолженность в размере 1 027 169,25 руб.

Ответ на претензию Истом получен не был, задолженность до настоящего времени не оплачена.

Согласно п.1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно п. 5.1 договора дата начала работ – с даты подписания договора.

Договор подписан 28.08.2019.

Согласно п. 5.2 дата окончания работ:

- выполнение строительно-монтажных работ – 45 календарных дней с даты подписания договора.

- подписание итогового акта приемки выполненных работ – 15 дней с момента завершения работ.

Согласно ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В соответствии с п. 19.1.1 Договора Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Субподрядчику с указанием даты предполагаемого отказа в случаях:

-нарушение конечного срока выполнения всех работ по Договору (подписания Итогового акта выполненных работ) более чем на 10 календарных дней.

Согласно п. 19.2 в случае отказа Генподрядчика от исполнения Договора Договор считается расторгнутым с момента получения Субподрядчиком уведомления Генподрядчика о таком отказе.

Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке на основании п. 19.2. Договора и ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации с 24.12.2019.

Согласно п. 6.1.4 Договора– Генподрядчик вправе требовать возврата аванса (неотработанной его части) в случае ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору.

Согласно п. 7.2.28 Договора – Субподрядчик обязан перечислить сумму неотработанного аванса в течении 5 дней с момента получения требования Генподрядчика о возврате аванса (неотработанной его части) согласно положениям Договора.

ФГУП «ГВСУ № 14» была направлена в адрес ООО «Союз-СК» претензия.

Согласно отчету почтовых отправлений, претензия была получена ООО «Союз-СК» 12.07.2022, однако аванс не был возвращен.

Согласно п. 17.3 Договора - в случае просрочки исполнения Субподрядчиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Генподрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки Субподрядчиком исполнения обязательства, начина со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по Договору. Стороны согласовали и не выражают, что размер такой неустойки (пени) определяется в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за каждый факт просрочки, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от Цены Договора.

Согласно п. 11 постановления Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Дата окончания работ: 13.10.2019.

Дата расторжения договора: 24.12.2019.

Истцом произведено начисление неустойки на сумму 61 149,06 руб. за период с 14.10.2019 по 24.12.2019.

Истцом также заявлены ко взысканию проценты в порядке ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 100 руб. с 25.12.2019 по дату фактической оплаты долга, за исключением периода действия моратория.

В соответствии с п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В соответствии с п. 3 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации - проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

24.12.2019 Договор субподряда расторгнут. Проценты за пользование чужими денежными средствами начисляются с 25.12.2019 по 17.02.2020.

18.02.2020 была частично произведена оплата долга, в размере 2 853 257,95 руб., что подтверждается платежным поручением № 115. Оставшаяся сумма задолженности составляет 1 027 169,25 руб. Проценты за пользование чужими денежными средствами (1 027 169,25 руб.) исчисляются с 18.02.2020 по день фактической уплаты задолженности, за исключением периода действия моратория, введенного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 №497.

Таким образом, с ООО «Союз-СК» подлежит взысканию в пользу ФГУП «ГВСУ № 14» задолженность в размере 1 027 169,25 рублей, неустойка в размере 61 149,06 рублей за период с 14.10.2019 по 24.12.2019, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 100 рублей, с 25.12.2019 по дату фактической оплаты задолженности, за исключением периода действия моратория, введенного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 №497, с учетом частичной оплаты задолженности 18.02.2020.

За период рассмотрения дела ответчиком в материалы дела письменный мотивированный отзыв на исковое заявление не представлен.

Согласно части 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие (ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, истец в соответствии с требованиями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предоставил все доказательства в подтверждение своего требования, которыми он располагал, тогда как ответчик, который должен добросовестно пользоваться своими процессуальными правами, своевременно не предоставил доказательств, опровергающих доводы истца, несмотря на то, что у него было достаточно времени и он обладал полной информацией об аргументах истца и представленных им доказательствах.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий несовершения им соответствующего процессуального действия.

В силу п. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

При таких обстоятельствах, суд считает требования истца правомерными и подлежащими  удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 65, 75, 110, 167, 170, 171, 180, 181, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗ-СК» (ИНН: 

<

***>) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №14» (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 1 027 169,25 руб., неустойку в размере 61 149,06 руб. за период с 14.10.2019 по 24.12.2019, проценты в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 100 руб. с 25.12.2019 по дату фактической оплаты долга, за исключением периода действия моратория.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗ-СК» (ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 23 884 руб.

 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья

Р.Е. Галиева