РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 

10.08.2018 года                                                           Дело № А40-95223/18-110-682

Резолютивная часть решения от 03.07.2018г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" (ОГРН 

<

***>, 129110, 

<

...>) к ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АРЕАЛ-98" (ОГРН 

<

***>, 115162, 

<

...>, ЭТАЖ 2)

о взыскании 94 604 руб. 02 коп. пени по договору №734-У095/16/250 от 23.11.2016г.

без проведения судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "РОСКОСМОС" обратилась с иском к ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АРЕАЛ-98" о взыскании 94 604 руб. 02 коп. пени по договору №734-У095/16/250 от 23.11.2016г.

Определением суда от 10.05.2018г. было назначено рассмотрение дела в порядке упрощенного производства по правилам гл. 29 АПК РФ. Суд располагает доказательствами надлежащего извещения сторон в соответствии со ст. 123 АПК РФ. 

Сторонам  было предложено  представить в арбитражный суд и направить друг другу доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений, в срок до 31.05.2018г.

Сторонам было предложено представить в арбитражный суд, рассматривающий дело, и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, в срок до 22.06.2018г. Такие документы не должны содержать ссылки на доказательства, которые не были раскрыты в установленный судом срок.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3 ст. 228 АПК РФ.

Ответчик иск не признал, представил отзыв на исковое заявление.

Как следует из материалов дела, в обоснование исковых требований, заявитель ссылается на следующие обстоятельства.

Между Госкорпорацией «Роскосмос» (далее - Истец, Заказчик) и закрытым акционерным обществом «АРЕАЛ-98» (ООО «АРЕАЛ-98» с 16.02.2017) (далее - Ответчик, Головной исполнитель) был заключен государственный контракт от 23.11.2016 № 734-У095/16/250 (шифр: НИР «Металл») (далее - государственный контракт), согласно которому Головной исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями государственного контракта научно-исследовательскую работу на тему «Разработка перечня составных частей и комплектующих комплексов боевой ракетной техники, находящихся на объектах Министерства обороны Российской Федерации и требующих утилизации, а также содержащихся в них чёрных, цветных и драгоценных металлов» (далее - НИР) и своевременно сдать Заказчику созданную научно-техническую продукцию в порядке и в сроки, предусмотренные государственным контрактом (пункт 1.1 государственного контракта).

Согласно пункту 3.5 государственного контракта оплата НИР (этапа НИР) производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта приемки НИР (акта приемки этапа НИР) путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Головного исполнителя с учетом ранее выплаченного аванса.

Истцом обязательства по оплате этапа № 1 государственного контракта выполнены своевременно и в полном объеме.

В соответствии с пунктом 2.1 государственного контракта СЧ ОКР выполняется Головным исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания на СЧ ОКР (приложение № 1 к государственному контракту.

В соответствии с пунктом 2.1 государственного контракта НИР выполняется Головным исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания и дополнения № 1 к техническому заданию на НИР (приложение № 1 к государственному контракту).

Согласно пункту 2.2 государственного контракта содержание этапов НИР и сроки выполнения установлены в календарном плане (приложение № 2 к государственному контракту).

В соответствии с календарным планом к государственному контракту срок выполнения работ по этапу № 1 - начало 23.11.2016 - окончание 25.05.2017, цена этапа№ 1 -4 209 300,00 рублей.

Согласно пункту 4.3 государственного контракта датой исполнения обязательств Головного исполнителя по этапам государственного контракта является дата утверждения Заказчиком акта приемки выполненного этапа НИР.

В установленный срок обязательство по государственному контракту Головным исполнителем не выполнено, акт приемки выполненного этапа НИР по этапу № 1 утвержден Заказчиком 23.06.2017.

Таким образом, срок просрочки исполнения обязательств по этапу № 1 составляет 29 дней (с 26.05.2017 по 23.06.2017).

В соответствии с пунктами 8.3.2 и 8.3.3 государственного контракта в случае просрочки исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Головным исполнителем обязательств, предусмотренных государственным контрактом, Заказчик направляет Головному исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Головным исполнителем обязательства, предусмотренного государственным контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены государственного контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных государственным контрактом и фактически исполненных Головным исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена государственного контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Головным исполнителем обязательства по государственному контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения государственного контракта; С - размер ставки).

Истец указал, что расчет пени по этапу №1: цена этапа № 1 – 4 209 300 рублей; срок просрочки - 29 дней (с 26.05.2017 по 23.06.2017); срок исполнения обязательства по этапу № 1 - 184 дня (с 23.11.2016 по 25.05.2017). К = (количество дней просрочки / срок исполнения обязательства по этапу) х 100 % = (29 / 184) х 100 % = 15,76 %. Согласно пункту 6 Правил при К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. С = (размер ставки рефинансирования на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К) х (количество дней просрочки) = (0,01 х 7,75 %) х 29 = 2,2475 %. П = цена этапа х размер ставки = 4 209 300 х 2,2475 % = 94 604,02 рублей.

Таким образом, как считает истец, сумма пени составляет 94 604,02 рублей.

Вместе с тем  соответствии с пунктом 1 статьи 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Согласно п.1.1 Контракта Головной исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями государственного контракта научно-исследовательскую работу и своевременно сдать Заказчику созданную научно-техническую продукцию в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

В соответствии с п.2.1. НИР выполняется Головным исполнителем в полном соответствии с требованиями технического задания и дополнения №1 к техническому заданию на НИР.

Согласно п.2.2. государственного контракта содержание этапов НИР и сроки выполнения установлены в календарном плане (приложение №2 к Контракту).

Согласно п.1.2. заказчик обязуется принять и оплатить НИР, в порядке и на условиях, предусмотренных государственным контрактом.

Помимо предусмотренных сроков сдачи, п.4.3. предусмотрена дата исполнения обязательств Головного исполнителя по этапам государственного контракта, которой является дата утверждения заказчиком акта приемки выполненного этапа НИР, а также согласно п.5.8. Контракта Заказчик в течении 35 дней с момента получения отчетных документов принимает выполненные работы или предъявляет Головному исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения НИР (этапа НИР), в случае обнаружения факта отступления Головным исполнителем от условий государственного контракта и Требований ТЗ.

В соответствии с календарным планом от 23.11.2016 №734-У095/16/250 определен следующий срок выполнения работ по этапу №1: начало 23.11.2016 – окончание 25.05.2017, цена этапа №1 -4 209 300 руб.

В соответствии с п.6 ТЗ по государственному контракту исполнитель обязан в соответствии с утвержденным Заказчиком Техническим заданием в предусмотренный контрактом срок выполнить работы по первому этапу НИР и передать Заказчику результаты.

Пунктом 5.4. государственного контракта предусмотрено, что Головной исполнитель не позднее срока окончания выполнения работ по этапу, а также не позднее срока окончания работ представило Заказчику в Департамент контрактно-договорной работы подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки 1 этапа работ по НИР и необходимые отчетные документы. 

В соответствии с п.п.5.8-5.11 госконтракта, Заказчик производил приемку выполненных работ в течении 29 дней, при этом фактов отступления от технического задания, замечаний, претензий и мотивированного отказа в течении установленного данными пунктами госконтракта сроком головному исполнителю со стороны Заказчика предъявлено не было.

В результате Акт сдачи-приемки работ был подписан Заказчиком 23.06.2017 и работа им была принята.

Таким образом, просрочки исполнения обязательств Головным исполнителем по этапу №1 отсутствует.

Судом было установлено, что работы фактически были выполнены с надлежащим качеством и предъявлены к приемке в установленные контрактом сроки, акт датирован в пределах сроков выполнения работ, его фактическое подписание истцом с проставлением в акте иной даты при условии отсутствия каких-либо претензий в отношении объемов и качества выполненных работ, не может быть признано судом в качестве надлежащего основания для наложения на ответчика обязанности по уплате штрафных неустоек за просрочку исполнения при фактическом установлении отсутствия такового.

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст.ст.  110, 156, 167-171, 229  АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска  отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению  и может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  пятнадцати  дней с даты его принятия,  а в случае составления мотивированного решения- со дня принятия решения в полном объеме.

Судья:               А.В.Мищенко