Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«24» января 2022 года

Дело №А12-32289/2021

Резолютивная часть оглашена 19 января 2022 года

Полный текст изготовлен 24 января 2022 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола  судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ОГРН 1033400473897, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о расторжении  муниципального контракта.

В судебном заседании  участвовал представитель истца – ФИО1 по доверенности.

Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (далее – истец)  обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» (далее – ответчик) о признании расторгнутым муниципальный контракт №2927 от 28.09.2016.

До принятия по делу судебного акта истец уточнил требования и просил  расторгнуть муниципальный контракт   № 2052 от 28.07.2016, заключенный между муниципальным  учреждением  коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания  и  обществом  с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис».

Заявление принято судом к рассмотрению.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд

установил:

28 июля 2016 года между МУ «Комдорстрой» (Муниципальный заказчик) иООО «Дорстройсервис» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 2052 (далее -Контракт) на предмет выполнения работ по ремонту проспекта им. В.И. Ленина вКраснооктябрьском районе Волгограда (выборочно).

Согласно   пункту  4.1.  Контракта   цена   Контракта  составляет  99 999 964  рубля. 

Цена Контракта включает в себя  стоимость материалов, НДС, налоги, сборы и другие обязательные платежи и затраты Подрядчика, прочие затраты, предусмотренные расчетом стоимости (Приложение № 2), а также иные расходы, которые Подрядчик может понести при исполнении Контракта.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

В соответствии с п.5.2 Контракта промежуточные платежи в рамках настоящего контракта осуществляется Муниципальным заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Муниципальным заказчиком объемов выполненных работ в течение 60 дней с момента подписания актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (КС-3).

В соответствии с пунктом 6.1. начало работ - с момента заключения Контракта, то есть с 28 июля 2016 года, окончание работ - до 01 декабря 2016 года (включительно).

Согласно п. 20.5 Контракта, муниципальный контракт вступает в силу с моментазаключения Контракта и действует до 31 декабря 2016 года (включительно), а в части исполнения финансовых обязательств до момента их полного исполнения.

  Согласно   пункту   10.1  Контракта,   приемка  законченных   работ   на   Объекте  

осуществляется  комиссией, состоящей  из представителей Муниципального заказчика, Подрядчика и представителя экспертной организации (в случае ее привлечения). Для промежуточной приемки предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц Муниципальный заказчик назначает своих специалистов (кураторов) на Объекте. Результат приемки осуществляется и оформляется с составлением соответствующихактов  формы КС-2, КС-3 и исполнительной производственно-технической документации.

Согласно п.9.1 Контракта Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить всеработы по ремонту Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом иприложениями к нему и сдать Объект Муниципальному заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложений к нему.

Между МУ «Комдорстрой» и ООО «Дорстройсервис» подписаны документы, подтверждающие факт частичного исполнения работ по муниципальному контракту № 2052 от 28 июля 2016 года.

В связи с тем, что Контракт  выполнен и оплачен на сумму 91 208 868 рублей 18 копеек и стороны утратили  необходимость в дальнейшем выполнении работ на сумму 8 791 095 рублей 82 копейки по указанному контракту,   МУ «Комдорстрой» в адрес Конкурсного управляющего ООО «Дорстройсервис» направило предложение о расторжении контракта путем заключения дополнительного соглашения №4 (исх. № 3052/03 от 18.10.2019, №1253/03 от 28 04 2021)

Письмом от 18.11.2019 года конкурсным управляющим ООО «Дорстройсервис» предложение о заключении дополнительного соглашения о расторжении муниципальногоконтракта  отклонено со ссылкой на нахождение в процедуре банкротства.

          Спорный муниципальный контракт  не содержит условия о том, что  окончание срока его действия влечет прекращение обязательства сторон по договору,  следовательно контракт признается действующим до момента окончания исполнения сторонами обязательства (п.3 ст. 425 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Пунктом 2 статьи 450 ГК РФ предусмотрено, что по требованию одной из  сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной либо в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В силу пункта 2 статьи 452 ГК РФ требование об изменении или о  расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

Учитывая, что  Контракт с 2016 года  до настоящего времени окончательно не исполнен, стороны утратили к нему интерес, требования истца признаны судом подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.110, 112, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

решил :

Расторгнуть  муниципальный контракт  № 2052 от 28.07.2016, заключенный между муниципальным  учреждением  коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания (ОГРН 1033400473897, ИНН 

<

***>) и  обществом  с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

Взыскать с общества  с ограниченной ответственностью «Дорстройсервис» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) государственную  пошлину в доход федерального бюджета в размере 6 000 руб. 

Полный текст решения  изготовлен в течение пяти рабочих дней с даты оглашения резолютивной части.

Решение может быть обжаловано в течение  одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Волгоградской области.

 

Судья                                                                                                                   Т.В.Попова