АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-25049/20

г. Уфа

24 декабря 2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 21.12.2020

Полный текст решения изготовлен 24.12.2020

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Хазиахметовой З. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Феоктистовой А.А., рассмотрев дело по иску индивидуального предпринимателя Козловой Миннемахиды Самниевны (ИНН: 027708331894, ОГРНИП 319028000188690) к обществу с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» (ИНН 0273082549, ОГРН 1110280011445) о взыскании задолженности по договорам субподряда  в размере 25 787 367,44 руб., расходов по оплате государственной пошлины  

при участии в судебном заседании:

от сторон – не явились, извещены надлежащим образом

Индивидуальной предприниматель ФИО2 обратилась в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» о взыскании задолженности по договорам субподряда  в размере 25 787 367,44 руб., расходов по оплате государственной пошлины.  

Определением суда от 23.10.2020 исковое заявление принято к производству суда, назначено предварительное судебное заседание.

Истцом заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя.

От ответчика в материалы дела поступил отзыв, поясняет, что оплата выполненных работ планировалась в указанный в договорах срок, однако в условиях создавшейся экономической ситуации и постоянном обороте денежных средств оплата должны была быть произведена после окончания и сдачи всех действующих контрактов и договоров подряда. 

В дополнении к отзыву ответчиком представлены платежные поручения о частичной оплате задолженности.

От истца в материалы дела поступило уточнение исковых требований, в связи с частичной оплатой задолженности, в результате просил взыскать задолженность по договорам субподряда в размере 23 655 920 руб.79 коп.

Уточнение судом принято в порядке ст. 49 АПК РФ.

Сторонами заявлены ходатайства о рассмотрении дела в отсутствии представителей.

Рассмотрев заявленные требования, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Между индивидуальным предпринимателем ФИО2  (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» (подрядчик) заключен договор субподряда № 219 от 09.12.2019 во исполнение договора подряда № 21 от 04.12.2019, по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить работы по текущему ремонту первой очереди помещений инкубации куриных эмбрионов ЦПГВ (№№ 112, 110, 109, 113) филиала АО «НПО Микроген» в г. Уфа «Иммунопрепарат» и сдать результат работ подрядчику, а подрядчик принять результат работ и оплатить его.

Согласно условиям договора цена работы составляет 3 363 000 руб. и включает в себя НДС 20% в сумме 560 500 руб.

Как указано в договоре генподрядчик обязуется единовременно оплатить выполненную работу в течении 5 дней с момента подписания акта приемки выполненной работы.

По условиям договора стороны установили следующий срок выполнения работ начальный срок – 09.12.2019, конечный срок – 21.12.2020.

В подтверждение факта выполнения работ по договору на сумму 3 363 000 руб. истцом в материалы дела представлены акт приемки выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 21.02.2020 № 1, а также акт сдачи-приемки результата выполненных работ от 21.02.2020, подписанные сторонами без возражений.

Между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» (подрядчик) заключен договор субподряда № 222 от 10.12.2019 и дополнительное соглашение от 10.02.2020 к договору субподряда № 222 от 10.12.2019 во исполнение договора подряда № 1985 от 13.11.2019, по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить работы по ремонту кабинетов и помещений корпуса № 76, 4 этаж, расположенного по адресу: 

<

...>, и сдать результат работ подрядчику, а подрядчик принять результат работ и оплатить его.

Согласно условиям договора цена работы составляет 2 430 000 руб., НДС не облагается в связи с применением субподрядчиком упрощенной системы налогообложения.

Как указано в договоре генподрядчик обязуется единовременно оплатить выполненную работу в течении 5 дней с момента подписания акта приемки выполненной работы.

По условиям договора стороны установили следующий срок выполнения работ начальный срок – 15.11.2019, конечный срок – 28.02.2020.

В подтверждение факта выполнения работ по договору на сумму 2 430 000 руб. истцом в материалы дела представлены акт приемки выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 10.02.2020 № 1, а также акт сдачи-приемки результата выполненных работ от 10.02.2020, подписанные сторонами без возражений.

Между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» (подрядчик) заключен договор субподряда № 227 от 12.12.2019 во исполнение договора подряда№ 2163 от 10.12.2019, по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить работы по ремонту санузла корпус № 19, 3 этаж, расположенного по адресу: 

<

...>, территория АО «УАПО», и сдать результат работ подрядчику, а подрядчик принять результат работ и оплатить его.

Согласно условиям договора цена работы составляет 332 500 руб. и включает в себя НДС 20% в сумме 55 416 руб.17 коп.

Как указано в договоре генподрядчик обязуется единовременно оплатить выполненную работу в течении 5 дней с момента подписания акта приемки выполненной работы.

По условиям договора стороны установили следующий срок выполнения работ начальный срок – 12.12.2019, конечный срок – 25 календарных дней с даты подписания договора обеими сторонами.

В подтверждение факта выполнения работ по договору на сумму 332 500 руб. истцом в материалы дела представлены акт приемки выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 23.12.2019, 24.12.2019 № 1, а также акт сдачи-приемки результата выполненных работ от 24.12.2019 № 1, подписанные сторонами без возражений.

Между индивидуальным предпринимателем ФИО2  (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» (подрядчик) заключен договор субподряда № 233 от 26.12.2019, дополнительное соглашение № 1 от 12.02.2020 к договору субподряда № 233 от 26.12.2019, во исполнение договора подряда № 2277 от 25.12.2019, по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить работы по ремонту помещений согласно инвестиционного проекта: «Реорганизация и техническое перевооружение участка вырубки и гибки АО «УАПО», корпус № 3-3а, расположенного по адресу: 

<

...>, и сдать результат работ подрядчику, а подрядчик принять результат работ и оплатить его.

Согласно условиям договора цена работы составляет 3 996 000 руб., НДС не облагается.

Как указано в договоре генподрядчик обязуется единовременно оплатить выполненную работу в течении 5 дней с момента подписания акта приемки выполненной работы.

По условиям договора (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 12.02.2020) стороны установили следующий срок выполнения работ начало – 20.04.2020, окончание 15.06.2020.

В подтверждение факта выполнения работ по договору на сумму 2 403744,72 руб. истцом в материалы дела представлены акт приемки выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 25.05.2020 №2, , подписанные сторонами без возражений.

Между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» (подрядчик) заключен договор субподряда № 246 от 17.02.2020 во исполнение договора подряда № 21 С/РБ-200150000011900173 от 03.02.2020, по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить комплекс работ по капитальному ремонту объектов, включая подготовительные работы, и сдачу объекта в эксплуатацию, а также иные неразрывно связанные с объектом работы, в том числе в течении гарантийного срока в соответствии с требованиями и условиями договора, Т3, ПСД, НПА и сдать результат работ подрядчику, а подрядчик принять результат работ и оплатить его.

Объекты расположены по адресам: 

<

...>, ремонт водоснабжения, водоотведения; 

<

...>, ремонт теплоснабжения.

Согласно условиям договора цена работы составляет 4 272 057 руб. 71 коп., НДС не облагается.

Как указано в договоре генподрядчик обязуется единовременно оплатить выполненную работу в течении 5 дней с момента подписания акта приемки выполненной работы.

По условиям договора стороны установили следующий срок выполнения работ начальный срок – 17.02.2020, конечный срок – 31.08.2020.

В подтверждение факта выполнения работ по договору истцом в материалы дела представлены акт приемки выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 20.08.2020 № 1, № 1 от 20.08.2020(на сумму 2 053 928,54 руб.), справка формы КС-3, КС-2 № 1 от 08.07.2020 (на сумму 1 583 068,50 руб.), акт сдачи – приемки выполненных работ от 02.10.2020 (на общую сумму 3 748 023,91 руб.)

Между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» (подрядчик) заключен договор субподряда № 265 от 25.03.2020 во исполнение договора подряда № 545 от 24.03.2020, по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить работы по ремонту раздевалок и комнат приема пищи в корпусе № 19 цеха №3, расположенного по адресу: 

<

...>, территория АО «УАПО», и сдать результат работ подрядчику, а подрядчик принять результат работ и оплатить его.

Согласно условиям договора цена работы составляет 821 750 руб. и включает в себя НДС 20% в сумме 136 985 руб.33 коп.

Как указано в договоре генподрядчик обязуется единовременно оплатить выполненную работу в течении 5 дней с момента подписания акта приемки выполненной работы.

По условиям договора стороны установили следующий срок выполнения работ начальный срок – 25.03.2020, окончание – 55 календарных дней с даты подписания договора обеими сторонами.

В подтверждение факта выполнения работ по договору на сумму 821 750 руб. истцом в материалы дела представлены акт приемки выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 18.05.2020 №1, а также акт сдачи-приемки результата выполненных работ от 18.05.2020,подписанные сторонами без возражений.

Между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» (подрядчик) заключен договор субподряда № 273 от 20.04.2020 во исполнение договора подряда № 670 от 14.04.2020, по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить работы по устройству вентилируемого фасада корпуса № 19, расположенного по адресу: 

<

...>, территория АО «УАПО», и сдать результат работ подрядчику, а подрядчик принять результат работ и оплатить его.

Согласно условиям договора цена работы составляет 6 792 500 руб. и включает в себя НДС 20% в сумме 1 132 083 руб.33 коп.

Как указано в договоре генподрядчик обязуется единовременно оплатить выполненную работу в течении 5 дней с момента подписания акта приемки выполненной работы.

По условиям договора стороны установили следующий срок выполнения работ начальный срок – 20.04.2020, конечный срок – 20.08.2020.

В подтверждение факта выполнения работ по договору на сумму 6 792 500 руб. истцом в материалы дела представлены акт приемки выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 20.08.2020 № 4, от 22.07.2020 № 3, от 23.06.2020 № 2, от 17.05.2020 №1, а также акт сдачи-приемки результата выполненных работ от 20.08.2020, подписанные сторонами без возражений.

Между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» (подрядчик) заключен договор субподряда № 288 от 03.06.2020, дополнительное соглашение № 1 от 13.08.2020, дополнительное соглашение от 25.11.2020 к договору субподряда № 288 от 01.06.2020 во исполнение договора подряда № 955 от 01.06.2020, по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить работы по ремонту кровли корпуса № 19, расположенного по адресу: 

<

...>, территория АО «УАПО», и сдать результат работ подрядчику, а подрядчик принять результат работ и оплатить его.

Согласно дополнительному соглашению № 1 от 13.08.2020 стороны договорились выполнить дополнительные работы согласно акта № 1 от 05.08.2020, на дополнительные работы по объекту: «Ремонту кровли корпуса № 19, расположенного по адресу: 

<

...>, территория АО «УАПО» на сумму 279 997 руб. 33 коп., в т.ч. НДС 20% 46 666 руб. 22 коп.

Согласно условиям договора (в редакции дополнительного соглашения от 25.11.2020) цена работы составляет 3 557 497 руб. 33 коп., НДС не облагается.

Как указано в договоре генподрядчик обязуется единовременно оплатить выполненную работу в течении 5 дней с момента подписания акта приемки выполненной работы.

По условиям договора стороны установили следующий срок выполнения работ начальный срок – 03.06.2020, конечный срок – 25.12.2020.

В подтверждение факта выполнения работ по договору на сумму 3 557 497  руб. 33 коп. и дополнительных работ на сумму 279 997 руб. 33 коп. истцом в материалы дела представлены акт приемки выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 22.07.2020 № 1, а также акт сдачи-приемки результата выполненных работ от 25.11.2020 № 1, от 25.11.2020 № 2-2, от 25.11.2020 № 2-1, от 25.11.2020 № 3, подписанные сторонами без возражений.

Между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» (подрядчик) заключен договор субподряда № 289 от 05.06.2020 и дополнительное соглашение от 13.07.2020 к договору субподряда № 289 от 05.06.2020 во исполнение договора подряда№ 21 С/РБ-200150000011900173 от 03.02.2020, по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить комплекс работ: «Капитальный ремонт по замене оконных блоков в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 47 имени А.П. Гайдара» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, и сдать результат работ подрядчику, а подрядчик принять результат работ и оплатить его».

Согласно условиям договора (в редакции дополнительного соглашения от 13.07.2020 к договору субподряда № 289 от 05.06.2020) цена работы составляет 3 075 652 руб. 55 коп., НДС не облагается в связи с применением субподрядчиком упрощенной системы налогооблажения.

Как указано в договоре генподрядчик обязуется единовременно оплатить выполненную работу в течении 5 дней с момента подписания акта приемки выполненной работы.

По условиям договора стороны установили следующий срок выполнения работ начальный срок – 05.06.2020, конечный срок – 24.08.2020.

В подтверждение факта выполнения работ по договору на сумму 3 075 652 руб. 55 коп. истцом в материалы дела представлены акт приемки выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 13.07.2020 №1, а также акт сдачи-приемки результата выполненных работ от 13.07.2020 подписанные сторонами без возражений.

Между индивидуальным предпринимателем ФИО2 (субподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» (подрядчик) заключен договор субподряда № 293 от 24.06.2020 во исполнение договора подряда№ 1131 от 22.06.2020 , по условиям которого субподрядчик обязуется по заданию подрядчика выполнить работы по перепланировке коридора корпусов № 21А-22, расположенных по адресу: 

<

...>, в соответствии с техническим заданием, и сдать результат работ подрядчику, а подрядчик принять результат работ и оплатить его.

Согласно условиям договора цена работы составляет 389 500 руб. и включает в себя НДС 20% в сумме 64 916 руб. 76 коп

Как указано в договоре генподрядчик обязуется единовременно оплатить выполненную работу в течении 5 дней с момента подписания акта приемки выполненной работы.

По условиям договора стороны установили следующий срок выполнения работ начальный срок – 24.06.2020, конечный срок – 13.07.2020.

В подтверждение факта выполнения работ по договору на сумму 389 500 руб. истцом в материалы дела представлены акт приемки выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 13.07.2020 №1 подписанные сторонами без возражений.

По сведениям истца, задолженность составляет  23 655 920 руб.79 коп. (с учетом уточнения исковых требований).

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение обществом с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» обязанности по оплате выполненных работ, индивидуальный предприниматель ФИО2 направила в его адрес претензию от 21.09.2020 с требованием уплаты задолженности, а впоследствии обратилось в суд с рассматриваемым иском.

Проанализировав условия договоров № 219 от 09.12.2019, № 222 от 10.12.2019, № 227 от 12.12.2019, № 246 от 17.02.2020, № 265 от 25.03.2020, № 273 от 20.04.2020, № 288 от 03.06.2020, № 289 от 05.06.2020, № 293 от 24.06.2020, суд пришел к выводу, что сторонами заключен договоры строительного подряда, отношения по которым регулируются положениями статей 740 – 757 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а также непротиворечащих им общих норм о подряде, содержащихся в главе 37 ГК РФ.

В силу статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В соответствии со статьей 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 названного Кодекса.

Основанием для возникновения обязательств заказчика по оплате выполненных работ является факт передачи результата работ подрядчиком заказчику (статьи 720, 753 ГК РФ).

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача и приемка выполненных работ оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно статьям 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, законами или иными правовыми актами.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, в том числе договоры № 219 от 09.12.2019, № 222 от 10.12.2019, № 227 от 12.12.2019, № 246 от 17.02.2020, № 265 от 25.03.2020, № 273 от 20.04.2020, № 288 от 03.06.2020, № 289 от 05.06.2020, № 293 от 24.60.2020, дополнительные соглашения к ним, акты приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, а также акты сдачи-приемки результата выполненных работ, суд установил факт заключения сторонами договоров подряда, факт выполнения истцом в рамках данных договоров работ, факт принятия указанных работ ответчиком, в связи с чем пришел к выводу о возникновении на стороне последнего обязанности по их оплате. 

Судом принято во внимание, что представленные в материалы дела акты КС-2, справки КС-3 и акты сдачи-приемки результата выполненных работ подписаны ответчиком без замечаний, доказательства наличия претензий к выполненным работам в материалах дела отсутствуют, факт выполнения работ ответчиком не оспорен, возражений относительно их количества, качества и стоимости не заявлено, при этом доказательств оплаты не представлено, наличие задолженности не опровергнуто.

В отзыве на иск ответчик поясняет, что оплата выполненных работ планировалась в указанный в договорах срок, однако в условиях создавшейся экономической ситуации и постоянном обороте денежных средств оплата должны была быть произведена после окончания и сдачи всех действующих контрактов и договоров подряда. Впоследствии представил платежные поручения о частичной оплате задолженности, в связи с чем истец уточнил исковые требования.

При таких обстоятельствах требования индивидуального предпринимателя ФИО2 о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» о взыскании задолженности в размере 23 655 920 руб. 79 коп. по оплате выполненных работ подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в полном объеме. В связи с предоставленной истцу отсрочкой, государственная пошлина взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Уточненные исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП 319028000188690)  удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН: 

<

***>, ОГРНИП 319028000188690) задолженность по договорам субподряда в размере 23 655 920 руб.79 коп.

Взыскать с с общества с ограниченной ответственностью «Универсалремстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 141 280 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья З.Р. Хазиахметова