Арбитражный суд Мурманской области ул. Академика Книповича, 20, г. Мурманск, 183038 http://murmansk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А42-4930/2023

город Мурманск

15 ноября 2023 года

Дело рассмотрено, резолютивная часть решения вынесена 09.11.2023  

Арбитражный суд Мурманской области в составе судьи Тарасова А.Е. при ведении  протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1, рассмотрев в открытом судебном  заседании дело по иску ММБУ «УДХ» к ООО «СеверСтрой» о понуждении исполнить  гарантийные обязательства,  

третье лицо: временный управляющий ООО «СеверСтрой» ФИО2, при участии в заседании представителей: 

от истца: ФИО3, доверенность от 17.07.2023,  от ответчика: ФИО4, доверенность от 09.01.2023,  

от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом 

установил:

ММБУ «УДХ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) (далее – истец) обратилось в  Арбитражный суд Мурманской области с иском к ООО «СеверСтрой» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) (далее – ответчик) о понуждении исполнить гарантийные обязательства по  гражданско-правовому договору от 25.11.2019 № 08/112019/1181, а именно: обязать ответчика в  течение одного месяца после вступления в силу решения суда устранить выявленные недостатки  по следующим участкам: переулок ФИО5, улица Чехова, улица Сафонова, улица Марата.  

Определением о принятии иска к производству к участию в деле в качестве третьего лица, не  заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен временный  управляющий ответчика Спасов Максим Васильевич.  

Ответчик представил отзыв на иск, в котором просил отказать в удовлетворении исковых  требований, указав, что истцом в ходе проверки контроля были нарушены требования ГОСТ  32825-2014, предъявляемые к инструментам измерения. Контроль состояния дороги осуществлялся  только металлической рулеткой, не прошедшей поверку в установленном порядке. Кроме того,  ответчиком в акт осмотра внесено особое мнение, в котором он указал, что на объекте проводились  земляные работы сторонними организациями, нарушалась целостность асфальтобетонного  покрытия, имеются следы механического разрушения асфальтобетонного покрытия на тротуаре и  проезжей части техникой, осуществляющей содержание, а также, что просадка (разрушение  основания проезжей части) асфальтобетонного покрытия не является гарантийным случаем,  поскольку техническим заданием к гражданско-правовому договору не были предусмотрены  работы по замене основания проезжей части.  

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте проведения судебного  разбирательства, в судебное заседание не явилось, отзыв на иск не представило, какие-либо  ходатайства не заявило.  

С учетом мнений представителей сторон, обстоятельств дела, руководствуясь статьей 156  Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ), суд определил рассмотреть спор в  отсутствие третьего лица.  

К судебному заседанию, истец в порядке статьи 49 АПК РФ представил заявление об  уточнении исковых требований, в котором просил обязать ответчика в течение одного месяца  после вступления в силу решения суда исполнить гарантийные обязательства по гражданско-правовому договору от 25.11.2019 № 08/112019/1181, а именно: произвести с соблюдением  нормативных требований и регламентов, применяемых при производстве данного типа работ,  гарантийный ремонт автомобильных дорог:  

1) выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия  автомобильной дороги и тротуаров на участке по улице Марата г. Мурманска устранить  следующие дефекты:  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в районе дома 3  по улице Марата г. Мурманска (1,2 м2),  

- поперечные трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе дома 4 по улице Марата г. Мурманска (0,09 м2),  

- поперечные трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе дома 10 по улице Марата г. Мурманска (0,04 м2),  

- поперечные трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе дома 14 по улице Марата г. Мурманска (0,21 м2),  

- поперечные трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе дома 14 по улице Марата г. Мурманска (0,57 м2),  

- разрушения асфальтобетонного покрытия примыкания проезжей части автомобильной  дороги по улице Марата в районе примыкания к улице Советской г. Мурманска (0,18 м2),  

- разрушения продольных швов проезжей части асфальтобетонного покрытия примыкания  проезжей части автомобильной дороги от улице Марата дом 17 А до пересечения с проспектом  Кирова г. Мурманска (12,96 м2),  

- разрушения асфальтобетонного покрытия примыкания проезжей части автомобильной  дороги в районе дома 21 по улице Марата г. Мурманска (12 м2),  

- разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в районе  пересечения улицы Марата с проспектом Кирова г. Мурманска (1,2 м2),  

- разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги примыкания  проезжей части к проспекту Кирова в районе дома № 26 по улице Марата г. Мурманска (0,33 м2),  

- разрушения продольных швов примыкания асфальтобетонного покрытия проезжей части  автомобильной дороги по улице Марата на участке от пересечения с проспектом Кирова до  пересечения с проспектом Ленина г. Мурманска (18,1 м2),  

- не заделаны места отбора проб на тротуаре около школы № 37 (дом 36/27 проспект Кирова г.  Мурманска),  

- продольные трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре в районе дома 30 по улице  Марата г. Мурманска (0,1 м2),  

- разрушения асфальтобетонного покрытия примыкания проезжей части автомобильной  дороги по улице Марата к проспекту Ленина г. Мурманска (0,63 м2),  

- не заделаны места отбора проб на тротуаре в районе дома 18 по улице Марата г. Мурманска, 

- разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома 30 по улице Марата г.  Мурманска (18 м2),  

- разрушения продольного шва примыкания проезжей части автомобильной дороги в районе дома  30 по улице Марата г. Мурманска (2,1 м2);  

2) выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия  автомобильной дороги и тротуаров на участке по переулку ФИО5 г. Мурманска устранить  следующие дефекты:  

- поперечная трещина асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе заезда на переулок ФИО5 с улицы Книповича г. Мурманска (0,36 м2),  

- не заделаны места отбора проб на тротуаре в районе дома 10 по переулку ФИО5 г. Мурманска,  - поперечная трещина асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе дома 10 по переулку. ФИО5 г. Мурманска (0,21 м2),  

- не заделаны места отбора проб на проезжей части автомобильной дороги в районе дома 15 по  переулку ФИО5 г. Мурманска,  

- просадка асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги на участке дом 10  и дом 15 по переулку ФИО5 г. Мурманска (17 м2);  

3) выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия  автомобильной дороги и тротуаров на участке по улице Чехова г. Мурманска устранить  следующие дефекты:  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги на примыкании  улицы Чехова к улице Радищева г. Мурманска (0,6 м2),  

- разрушение асфальтобетонного покрытия тротуара на участке от дома 7 по улице Чехова до  пересечения с улицей Радищева г. Мурманска,  

- продольные трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги по  улице Чехова от пересечения с улицы Павлова до пересечения с улицы Радищева г. Мурманска  (8,16 м2),  

- не качественно заделаны места отбора проб проезжей части автомобильной дороги в районе дома  11 по улице Чехова (5 шт.),  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги вокруг колодца  в районе дома 10 по улице Чехова г. Мурманска (0,25 м2);  

4) выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия  автомобильной дороги и тротуаров на участке по улице Сафонова г. Мурманска устранить  следующие дефекты:  

- разрушение продольных швов асфальтобетонного покрытия примыкания проезжей части  автомобильной дороги на участке от дома 32/19 по улице Сафонова до пересечения с улицей П.  Осипенко г. Мурманска (43,6 м2),  

- не заделаны места отбора проб на проезжей части автомобильной дороги в районе дома 43 по  улице Сафонова г. Мурманска,  

- продольные трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе дома 28 по улице Сафонова г. Мурманска (0,64 м2),  

- провал асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в районе дома 20/2  по улице Сафонова г. Мурманска (разрушение основания проезжей части),  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части улицы Сафонова дом 15  сторонними организациями (17,5 м2),  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в районе  пересечения улицы Сафонова с улицей Ушакова г. Мурманска (1,1 м2),  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в районе заезда  к дому № 12 по улице Сафонова г. Мурманска (0,24 м2),  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в районе заезда  к дому № 14 по улице П. Осипенко г. Мурманска (0,48 м2).  

Уточнение иска в порядке статей 49 и 159 АПК РФ судом принято. 

В судебном заседании представитель истца на удовлетворении уточненного иска настаивал  по изложенным в нем основаниям, представитель ответчика возражал против удовлетворения иска,  поддержал доводы отзыва.  

Из материалов дела следует, что по итогам аукциона в электронной форме между истцом  (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) 25.11.2019 заключен гражданско-правовой договор №  08/112019/1181 (далее – Договор), в соответствии с условиями которого ответчик принял на себя  обязательство выполнить на объекте, указанном в пункте 1.3. Договора, работы по капитальному  ремонту автомобильной дороги в сроки, предусмотренные Договором с учетом графика  выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Договору).  

Объектом строительства являются автомобильные дороги общего пользования местного  значения города Мурманска в соответствии с перечнем, указанным в пункте 2. «Технического  задания» (Приложение № 1 к Договору) (пункт 1.3. Договора).  

В пункте 1.4. Договора сторонами согласовано, что состав и объем работ, выполняемых  Подрядчиком по Договору, установлены «Техническим заданием» (Приложение № 1 к Договору) и  перечнем товаров, используемых при выполнении работ (Приложение № 2 к Договору).  

Результат работ принят Заказчиком, что подтверждается актом приемки результата  выполненных работ от 22.12.2020.  

В пункте 6.1. Договора указано, что гарантии качества результата работ распространяются на  все его составляющие, в том числе на все примененные строительные материалы, смонтированные  изделия, конструкции и работы, выполненные Подрядчиком.  

В пункте 6.4. Договора согласован гарантийный срок на работы. 

Гарантийные сроки на конструктивные элементы автомобильной дороги принимаются не  менее (лет): слои основания дорожной одежды – 6, верхний слой покрытия из асфальтобетона  дорожной одежды – 4, верхний слой покрытия из асфальтобетона тротуара – 4 (пункт 6.4.1.  Договора).  

Срок гарантии качества на результат работ, за исключением гарантийных сроков на  конструктивные элементы автомобильной дороги, указанные в подпункте 6.4.1. Договора,  составляет не менее 3 лет (пункт 6.4.2. Договора).  

Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в  процессе производства, приемки работ и во время эксплуатации объекта (пункт 6.6. Договора).  

26.04.2023 представители сторон провели обследование объекта производства работ и  обнаружили дефекты (недостатки) результата работ, возникшие в период гарантийного срока.  Результаты осмотра и выявленные дефекты (недостатки) работ отражены в акте обследования.  Ответчику поручено устранить выявленные замечания в срок до 20.06.2023 в рамках гарантийных  обязательств.  

Поручение истца оставлено ответчиком без удовлетворения, что послужило основанием для  обращения истца в суд с настоящим иском.  

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела и представленные  доказательства, суд находит иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим  основаниям.  

Факт выполнения ответчиком работ по Договору и факт принятия этих работ Заказчиком,  подтвержден материалами дела.  

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) по договору подряда  одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат  работы и оплатить его.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы  должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий  договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не  предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы  должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или  определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть  пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором  не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.  

Согласно пункту 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом,  договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы  гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать  условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 ГК РФ).  

Согласно пункту 3 статьи 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с  недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.  

В соответствии со статьей 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с  отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками,  которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при  отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования,  заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать  от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного  уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение  недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397 ГК  РФ).  

При обнаружении недостатков работ в течение гарантийного срока, бремя доказывания, что  недостатки произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его  эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим  заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта,  произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, лежит на подрядчике.  

Недостатки работ в настоящем случае были обнаружены в пределах гарантийного срока. 

В силу пункта 31 статьи 70 АПК РФ, обстоятельства, на которые ссылается сторона в  обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если  

они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных  доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных  требований.  

Доказательства того, что недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока,  произошли вследствие неправильной эксплуатации объекта, нормального износа объекта или его  частей, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными  им третьими лицами, ответчик не представил (пункт 2 статьи 755 ГК РФ).  

Выполнение работ с недостатками подтверждается представленными доказательствами. Доказательств устранения выявленных недостатков работ также не представлено. 

Доводы ответчика, изложенные в особом мнении в акте осмотра, а также возражения  ответчика, изложенные в отзыве на иск, являются оценочным мнением, поэтому подлежат  отклонению судом.  

Результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям  договора о качестве. Презумпция вины подрядчика за недостатки работ, обнаруженные в течение  гарантийного срока, провозглашена в главе 37 ГК РФ.  

В нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ ответчиком не представлено относимых и  допустимых доказательств (статьи 67, 68 АПК РФ) подтверждающих, что недостатки (дефекты)  работ, обнаруженные в течение гарантийного срока, возникли не по вине подрядчика, а вследствие  воздействия на результат работ иных лиц, либо по иным причинам. Кроме того, суду не  представлено доказательств того, что выявленные дефекты не относятся к гарантийным  обязательствам.  

Ходатайство о проведении экспертизы для определения факта наличия недостатков, а также  причин их образования ответчиком не заявлено.  

Вместе с тем, требование истца устранить разрушение асфальтобетонного покрытия  проезжей части по улице Сафонова дом 15 сторонними организациями (17,5 м2) удовлетворению  не подлежит, поскольку истцом не доказаны обстоятельства, подтверждающие факт  возникновения указанных недостатков вследствие выполненных подрядчиком работ (указанные  повреждения образовались не в результате проведения некачественного ремонта, а от действий  третьих лиц). Таким образом, основания для возложения на ответчика обязанности по устранению  указанных недостатков в рамках гарантийных обязательств, возникновение которых не входит в  зону ответственности подрядчика, отсутствуют.  

С учетом изложенного, требование истца документально подтверждено, соответствует  статьям 309, 310, 722, 723 и 724 ГК РФ, а иск обоснован и подлежит удовлетворению на основании  совокупности перечисленных обстоятельств дела и норм права, за исключением требования  

устранить разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части по улице Сафонова дом 15  причиненного сторонними организациями (17,5 м2).  

С учетом характера, объема подлежащей выполнению работы, суд находит, что для  устранения недостатков работ месячный срок является разумным и достаточным для их  устранения.  

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы истца по оплате государственной  пошлины в сумме 6 000 ₽ (п/п от 06.07.2023 № 204716) подлежат отнесению на ответчика.  

Судебный акт выполнен в форме электронного документа, в связи с чем в соответствии с  частью 1 статьи 177 АПК РФ он направляется лицам, участвующим в деле, и другим  заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в  сети интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его  принятия.  

Руководствуясь статьями 110, 112, 167, 174 и 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области  

решил:

иск удовлетворить частично. 

Обязать ООО «СеверСтрой» в течение одного месяца со дня вступления настоящего  решения суда в законную силу безвозмездно исполнить гарантийные обязательства по  гражданско-правовому договору от 25.11.2019 № 08/112019/1181 и выполнить с соблюдением  нормативных требований и регламентов, применяемых при производстве данного типа работ,  гарантийный ремонт автомобильных дорог, а именно:  

1) Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной  дороги и тротуаров на участке по улице Марата в городе Мурманске – устранить следующие  дефекты:  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в районе  дома 3 по улице Марата (1,2 м2);  

- поперечные трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги  в районе дома 4 по улице Марата (0,09 м2);  

- поперечные трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги  в районе дома 10 по улице Марата (0,04 м2);  

- поперечные трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги  в районе дома 14 по улице Марата (0,21 м2);  

- поперечные трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги  в районе дома 14 по улице Марата (0,57 м2);  

- разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги по улице  Марата в районе примыкания к улице Советской (0,18 м2);  

- разрушения продольных швов проезжей части асфальтобетонного покрытия примыкания  проезжей части автомобильной дороги от улицы Марата дом 17а до пересечения с проспектом  Кирова (12,96 м2);  

- разрушения асфальтобетонного покрытия примыкания проезжей части автомобильной  дороги в районе дома 21 по улице Марата (12 м2);  

- разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в районе  пересечения улицы Марата с проспектом Кирова (1,2 м2);  

- разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги  примыкания проезжей части к проспекту Кирова в районе дома № 26 по улице Марата (0,33 м2);  

- разрушения продольных швов примыкания асфальтобетонного покрытия проезжей части  автомобильной дороги по улице Марата на участке от пересечения с проспектом Кирова до  пересечения с проспектом Ленина (18,1 м2);  

- не заделаны места отбора проб на тротуаре около школы № 37 (дом 36/27 по проспекту  Кирова);  

- продольные трещины асфальтобетонного покрытия на тротуаре в районе дома 30 по улице  Марата (0,1 м2);  

- разрушения асфальтобетонного покрытия примыкания проезжей части автомобильной  дороги по улице Марата к проспекту Ленина (0,63 м2);  

- не заделаны места отбора проб на тротуаре в районе дома 18 по улице Марата; 

- разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части в районе дома 30 по улице  Марата (18 м2);  

- разрушения продольного шва примыкания проезжей части автомобильной дороги в районе  дома 30 по улице Марата (2,1 м2).  

2) Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной  дороги и тротуаров на участке по переулку ФИО5 в городе Мурманске – устранить следующие  дефекты:  

- поперечная трещина асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе заезда на переулок ФИО5 с улицы Книповича (0,36 м2);  

- не заделаны места отбора проб на тротуаре в районе дома 10 по переулку ФИО5; 

- поперечная трещина асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в  районе дома 10 по переулку ФИО5 (0,21 м2);  

- не заделаны места отбора проб на проезжей части автомобильной дороги в районе дома 15  по переулку Русанова;  

- просадка асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги на участке  дома 10 и дома 15 по переулку ФИО5 (17 м2).  

3) Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной  дороги и тротуаров на участке по улице Чехова в городе Мурманске – устранить следующие  дефекты:  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги на  примыкании улицы Чехова к улице Радищева (0,6 м2);  

- разрушение асфальтобетонного покрытия тротуара на участке от дома 7 по улице Чехова  до пересечения с улицей Радищева;  

- продольные трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги  по улице Чехова от пересечения с улицей Павлова до пересечения с улицей Радищева (8,16 м2);  

- не качественно заделаны места отбора проб проезжей части автомобильной дороги в районе  дома 11 по улице Чехова (5 штук);  

- разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги вокруг  колодца в районе дома 10 по улице Чехова (0,25 м2).  

4) Выполнить работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия автомобильной  дороги и тротуаров на участке по улице Сафонова в городе Мурманске – устранить следующие  дефекты:  

- разрушение продольных швов асфальтобетонного покрытия примыкания проезжей части  автомобильной дороги на участке от дома 32/19 по улице Сафонова до пересечения с улицей П.  Осипенко (43,6 м2);  

- не заделаны места отбора проб на проезжей части автомобильной дороги в районе дома 43  по улице Сафонова;  

- продольные трещины асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги  в районе дома 28 по улице Сафонова (0,64 м2);  

- провал асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в районе дома  20/2 по улице Сафонова (разрушение основания проезжей части);  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в районе  пересечения улицы Сафонова с улицей Ушакова (1,1 м2);  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в районе  заезда к дому № 12 по улице Сафонова (0,24 м2);  

- разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильной дороги в районе  заезда к дому № 14 по улице П. Осипенко (0,48 м2).  

В удовлетворении остальной части иска отказать.  

Взыскать с ООО «СеверСтрой» в пользу ММБУ «УДХ» судебные расходы по оплате  

государственной пошлины в сумме 6 000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок со дня  

принятия. 

Судья А.Е.Тарасов